정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	자연친화적인 남산공원 조성
② 추진배경	쾌적한 삶․깨끗한 도시 이미지가 또 하나의 상징이 되도록 하고, 자연친화적 공간 활용으로 푸른 여수를 조성하고자 함
③ 사업개요	○ 사업목적 : 자연친화적 랜드마크 도시공원 조성 ○ 위 치 : 여수시 남산동 274번지 일원(남산공원) ○ 사 업 비 : 29,000백만 원 ○ 사업내용 : 근린공원 조성, A=168,510㎡ - 1단계(‘12~‘17년) : 8,400백만 원(진입도로 L=427m, 주차장 A=3,388㎡) - 2단계(‘18년 이후) : 20,600백만 원(광장, 전망데크, 조각공원, 산책로 등)
④ 사업부서	여수시 공원과		⑤ 담당자		시설6급 김 혁 행정5급 조계윤
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘12. 1. ~‘20. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 근린공원 결정고시 (건교부 고시 제137호)		‘76. 3.27.		-
○ 추진방침 ※ 공원과-1249호		‘15. 1.29.		주철현 시 장 이승옥 부시장 민화기 국장 문휘식 과장 유홍은 팀장 최우진 주무관
○ 계약의뢰 ※ 공원과-1252호		‘15. 1.29.		문휘식 과장 유홍은 팀장 최우진 주무관
○ 남산공원(1단계) 조성공사 계약 체결 및 감독공무원 지정 통보 ※ 회계과-8918호 ○ 남산공원(1단계) 조성공사 착공		‘15. 3. 5. ‘15. 3.11.		김용우 과장 정종곤 팀장 최우진 주무관

○ 남산공원 진입로 개설공사 (2단계) 시행 ※ 공원과-4298호	‘15. 5.26.	김세곤 단장 김용우 과장 정채윤 회계과장 김지주 계약2팀장 김재호 팀장 정종곤 팀장 최우진 주무관
○ 남산공원(2단계) 조성계획(변경) 및 실시설계용역 준공 ※ 공원과-9605호	‘16. 8.13.	장두한 과장 최석원 팀장 임기형 주무관
○ 남산공원(1단계) 조성사업 준공 ※ 준공계	‘17.11.24.	김학섭 과장 최석원 팀장 임기형 주무관
○ 남산공원 2단계 조성사업 관련 시민여론조사 실시 검토 ※ 공원과-8071호	‘18. 8. 7.	권오봉 시장 고재영 부시장 성동범 단장 김학섭 과장 신영자 기획팀장 조희순 정책팀장 최석원 팀장 박진석 주무관
○ 남산공원 2단계 조성사업 관련 시민 여론조사 추진계획 ※ 공원과-11322호	‘18.10.30.	성동범 단장 장인호 기획예산과장 남성채 과장 신영자 기획팀장 조희순 정책팀장 최석원 팀장 김 혁 주무관
○ 여수시 남산공원 2단계 조성사업을 위한 시민 여론조사 용역 시행 ※ 공원과-11675호	‘18.11. 7.	남성채 과장 박은규 회계과장 홍주성 계약2팀장 최석원 팀장 김 혁 주무관
○ 남산공원 2단계 조성방안 설정 공청회 개최 계획 ※ 공원과-12396호	‘18.11.26.	권오봉 시장 고재영 부시장 성동범 단장 이범송(대결) 시민소통담담관 김용필 총무과장 김재일 정보통신과장 남성채 과장 백동선 녹지행정팀장 최석원 팀장 김 혁 주무관

○ 남산공원 2단계 조성사업 관련 시민 공청회 개최	‘18.12. 5.	200여명(시민, 시장, 의장, 시의원, 공무원 및 각계전문가)
○ 남산공원 2단계 조성사업 관련 시민 공청회 개최 결과보고 ※ 공원과-12998호	‘18.12.10.	권오봉 시장 고재영 부시장 성동범 단장 남성채 과장 최석원 팀장 김 혁 주무관
○ 남산공원내 사유토지 보상비 집행 계획 ※ 공원과-2692호	‘19. 3.13.	권오봉 시장 고재영 부시장 문태선 단장 박은규 회계과장 오병구 계약2팀장 남성채 과장 백동선 팀장 송인찬 차장
○ 남산공원 2단계 조성사업 현황보고 관련 여수시의회 전체의원 간담회 개최결과 ※ 공원과-4083호	‘19. 4. 9.	고재영 부시장 문태선 단장 남성채 과장 최석원 팀장 김 혁 주무관
○ 남산공원 2단계 조성사업 추진계획 보고 ※ 공원과-9484호	‘19. 7.26.	권오봉 시장 고재영 부시장 문태선 단장 박은규 회계과장 오병구 계약2팀장 조계윤 과장 최석원 팀장 김 혁 차장
○ 남산공원 공원조성계획 변경 및 진입도로 실시설계용역 계약체결 및 감독공무원 지정 통보 ※ 회계과-47789호 ○ 실시설계용역 착공	‘19. 9.23. ‘19. 9.20.	조계윤 과장 최석원 팀장 김 혁 차장