정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	연등천 차집관로 시설(정비)공사 (완료)
② 추진배경	기존 하수 차집관로의 노후화 및 불량으로 공공하수처리시설에 다량의 불명수 유입으로 운영비기 증가되고 있어 근본적인 문제해결 위해 사업추진
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 남산동 연등중계펌프장 ~ 오림동 버스터미널 앞 (연등천) ○ 사 업 비 : 9,800백만 원 ○ 사업내용 : 차집관로 L=3.13㎞
④ 사업부서	여수시 하수도과		⑤ 담당자	시설7급 강성욱 시설5급 최홍식
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간	‘14.10. ~‘20. 4.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계용역 시행 ※ 하수도과-16500호		‘14.10. 8.	이승옥 부시장 강승원 국장 오영록 과장 김태용 팀장 강성욱 주무관
○ 시행계획 ※ 하수도과-22343호		‘16.11.22.	주철현 시장 최종선 부시장 송병구 국장 송성현 과장 주영근 팀장 한상근 주무관
○ 공사 총괄분 및 1차분 계약 체결 ※ 하수도과-25090호		‘16.12.27.	송병구 국장 송성현 과장 주영근 팀장 한상근 주무관
○ 공사 2차분 시행 ※ 하수도과-4903호		‘18. 3.16.	주철현 시장 최종선 부시장 정종태 국장 박성재 과장 윤대근 팀장 박상진 주무관

○ 공사(총괄, 1차분, 2차분) 변경계약 ※ 하수도과-7371호	‘18. 4.19.	정종태 국장 박성재 과장 박태열 팀장 우희원 팀장
○ 공사(총괄, 1차분, 2차분) 일시정지 ※ 하수도과-14136호	‘18. 7.30.	박성재 과장 윤대근 팀장 박상진 주무관
○ 공사(총괄, 1차분, 2차분) 일시정지 해제 ※ 하수도과-18887호	‘18.10.19.	심근하 과장 윤대근 팀장 박상진 주무관
○ 실정보고(TPS추진구간 폐기물처리검토) ※ 하수도과-18887호	‘18.12.19.	정종태 단장 심근하 과장 윤대근 팀장 박상진 주무관
○ 실정보고(공사용 진출입로) ※ 하수도과-1050호	‘19. 1.18.	고재영 부시장 정종태 단장 심근하 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 1차분 5회 기성 ※ 하수도과-1611호	‘19. 1.28.	심근하 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 실정보고(물가변동, 토질변화) ※ 하수도과-4802호	‘19. 3.19.	고재영 부시장 김정남 단장 심근하 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 1차분 준공	‘19.6.30.	심근하 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 공사일시정지 ※ 하수도과-13338호	‘19.7.12.	김정남 단장 심근하 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 공사일시정지 해제 ※ 하수도과-19272호	‘19.10. 7.	김정남 단장 최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관

○ 관급자재 등 납품기한 변경 요청 ※ 하수도과-19667호	‘19.10.11.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 폐기물처리용역 및 CCTV조사 용역 기간 변경 요청 ※ 하수도과-20865호	‘19.10.25.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 현장실정(암절취 방법 변경)에 대한 요약 보고 ※ 하수도과-23925호	‘19.12.03.	고재영 부시장 김정남 단장 최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 실정보고(암절취 방법 변경) 승인사항 알림 ※ 하수도과-23987호	‘19.12.04.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 2차분 3회 기성대가 확정 ※ 하수도과-25068호	‘19.12.17.	김정남 단장 최홍식 과장 김용만 팀장 조윤희 주무관
○ 관급자재(레미콘, 철근) 추가 구매 요청 ※ 하수도과-25543호	‘19.12.23.	최홍식 과장 김용만 팀장(협조) 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 공사기간 변경 요약보고 ※ 하수도과-25909호	‘19.12.27.	김정남 단장 최홍식 과장 김용만 팀장(협조) 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 공사 및 용역기간 변경 요청 ※ 하수도과-25931호	‘19.12.27.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 폐기물처리 용역 외 1건 변경계약 ※ 하수도과-52호	‘20.1.2.	최홍식 과장 김용만 팀장 조윤희 주무관
○ 공사 총괄 및 2차분 변경계약 ※ 하수도과-332호	‘20.1.7.	최홍식 과장 김용만 팀장 조윤희 주무관

○ 건설사업관리기술자 법정 의무교육에 따른 현장이탈 승인 ※ 하수도과-809호	‘20. 1.14.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 연등천 차집관로 정비공사 현장실정(종점부 연결)에 대한 요약보고 ※ 하수도과-3144호	‘20. 2.19.	서은수 부시장 정윤수 단장 최홍식 과장 김동석 과장 정일석 팀장 김희경 팀장 강성욱 주무관
○ 연등천 차집관로 정비공사 현장실정(종점부 연결방안 등)승인사항 알림 ※ 하수도과-3145호	‘20. 2.19.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 설계변경 계약심사 요청 ※ 하수도과-5020호	‘20. 3.13.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 연등천 차집관로 정비공사(총괄 및 2차분) 4회 변경계약 의뢰 ※ 하수도과-6210호	‘20. 3.30.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 연등천 차집관로 정비공사 현장실정(사토장 변경 등)에 대한 요약보고 ※ 하수도과-7785호	‘20. 4.21.	정윤수 단장 최홍식 과장 김동석 과장 정일석 팀장 김희경 팀장 강성욱 주무관
○ 연등천 차집관로 정비공사 공사․용역기간 변경 요청 ※ 하수도과-7791호	‘20. 4.21.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 연등천 차집관로 정비공사(총괄 및 2차분) 5회 변경계약 의뢰 ※ 하수도과-7979호	‘20. 4.23.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 연등천 차집관로 정비공사 현장대리인 및 품질관리자 변경 알림 ※ 하수도과-8387호	‘20. 4.29.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 연등천 차집관로 정비공사 관련 용역기간 변경 요청 ※ 하수도과-12329호	‘20. 6.25.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 연등천 차집관로 정비공사 준공검사 결과 보고 ※ 하수도과-17188호	‘20. 8.28.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관