정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서(완료)

① 정책사업명	여자만 갯노을길 조성사업(완료)
② 추진배경	순천만 정원, 벌교 고막, 고흥 팔영산으로 이어지고 여자만을 일주할 수 있는 관광루트 개발
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 율촌면 상봉리 ~ 화양면 장수리 일원 ○ 사 업 량 : 갯노을길 조성 38.9km ○ 사 업 비 : 11,200백만 원(국비5,600 시비5,600) ○ 공사기간 : 2015. ~ 2021.
④ 사업부서	여수시 관광과		⑤ 담당자		행정5급 박형열 시설6급 윤대근 시설7급 박성원
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘14. 9. ~‘21.12.
<그간 주요 추진내용>
○ 여자만 생태관광자원 개발계획 수립		‘13. 6.		김충석 시장 이호경 부시장 이노철 국장 강승원 과장 송신현 팀장 김동언 주무관
○ 여자만 갯노을 관광개발 기본계획 수립 ※ 관광과-11537호		‘14. 7.25.		주철현 시장 이호경 부시장 이노철 국장 강성원 과장 김상태 팀장 한상범 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업 시행(총괄및1차분) ※ 관광과-12529호		‘16. 6. 6.		주철현 시장 이승옥 부시장 김광중 국장 김재일 과장 양기원 회계과장 박홍상 계약2팀장 오정환 팀장 김대성 주무관

○ 여자만 갯노을길 조성사업 시행(2차분) ※ 관광과-4400호	‘17. 3. 6.	주철현 시장 최종선 부시장 김광중 국장 김재일 과장 김용우 회계과장 장지문 계약2팀장 김재진 계약심사팀장 박성식 팀장 김대성 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업 시행(3차분) ※ 관광과-27613호	‘17.12.16.	주철현 시장 최종선 부시장 김광중 국장 박명윤 과장 김용우 회계과장 장지문 계약2팀장 김재진 계약심사팀장 박성식 팀장 김대성 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업 계약 의뢰(3차분) ※ 관광과-542호	‘18. 1.10.	박명윤 과장 박성식 팀장 김대성 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업 변경계약 의뢰(총괄 및 3차분) ※ 관광과-10916호	‘18. 6.11.	박명윤 과장 박성식 팀장 김대성 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업 사업계획 변경 요청 ※ 관광과-20004호	‘18.10.30.	박명윤 과장 오병구 팀장 임인수 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업 (3차분) 준공 ※ 관광과-22836호	‘18.12.20.	박명윤 과장 최종춘 팀장 임인수 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업 (4차분) 착공 ※ 관광과-3570호	‘19. 3. 7.	김학섭 과장 최종춘 팀장 임인수 차장
○ 여자만 갯노을길 조성사업 일시정지 검토 보고 ※ 관광과-23054호	‘19.12. 6.	김학섭 과장 박은규 회계과장 오병구 계약2팀장 최종춘 팀장 임인수 차장
○ 여자만 갯노을길 조성사업 노선변경 및 설계변경 검토 보고 ※ 관광과-23816호	‘19.12.18.	김학섭 과장 최종춘 팀장 임인수 차장

○ 여자만 갯노을길 조성사업 시행(총괄 및 4차분) 일시정지 요청 ※ 관광과-23140호	‘20.12.10.	김학섭 과장 최종춘 팀장 임인수 차장
○ 여자만 갯노을길 조성사업 시행(총괄 및 4차분) 일시정지 통보 ※ 회계과-63749호	‘20.12.10.	박은규 회계과장 오병구 계약2팀장 김영란 차장
○ 공유수면 점용‧사용 승인 (여자만 갯노을길 조성사업 4차분) ※ 해양항만레저과-1764호	‘20. 2.25.	오영록 해양항만레저과장 곽춘호 연안관리팀장 정숙이 차장
○ 여자만 갯노을길 조성사업 시행(총괄 및 4차분) 일시정지 해지 및 설계변경 검토 보고 ※ 관광과-4793호	‘20. 3.13.	김용필 국장 정재호 과장 박은규 회계과장 오병구 계약2팀장 최종춘 팀장 한상근 차장
○ 여자만 갯노을길 조성사업 시행(총괄 및 4차분) 일시정지 해지 및 설계변경 계약 의뢰 ※ 관광과-5096호	‘20. 3.18.	정재호 과장 최종춘 팀장 한상근 차장
○ 여자만 갯노을길 조성사업 시행(총괄 및 4차분) 일시정지 해지 및 설계변경 계약 사항 통보 ※ 회계과-5096호	‘20. 3.23.	양기원 행정지원국장 박은규 회계과장 오병구 계약2팀장 이미경 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업 시행(4차분) 관급자재 열연강판 구입 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 회계과-32792호	‘20. 6. 4.	양기원 행정지원국장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 이태경 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업(4차분) 일반해역이용협의(변경협의) 용역 계약 의뢰 ※ 관광과-14847호	‘20. 8.25.	정재호 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업(4차분) 일반해역이용협의(변경협의) 용역 계약 체결 ※ 회계과-49979호	‘20. 9. 3.	조계윤 과장 손하진 팀장 최수지 주무관

○ 여자만 갯노을길 조성사업 물가변동에 따른 계약금액 조정 검토보고 ※ 관광과-16005호	‘20. 9.10.	권오봉 시장 서은수 부시장 김학섭 국장 정재호 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업(4차분) 관급자재(목재데크) 시험의뢰(1차) ※ 관광과-16042호	‘20. 9.14.	정재호 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업 물가변동에 따른 계약금액 조정 검토결과 회신 ※ 관광과-16049호	‘20. 9.14.	정재호 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업(4차분) 관급자재(목재데크) 시험의뢰(2차) ※ 관광과-16952호	‘20. 9.29.	정재호 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업(4차분) 관급자재(목재데크) 시험결과(1차) ※ 관광과-17118호	‘20.10. 6.	한국임업진흥원
○ 여자만 갯노을길 조성사업(4차분) 관급자재(목재데크) 시험결과(2차) ※ 관광과-17843호	‘20.10.19.	한국임업진흥원
○ 여자만 갯노을길 조성사업(4차분) 기성검사공무원 지정 통보 ※ 회계과-66278호	‘20.12. 7.	조계윤 과장 오병구 팀장 김창희 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업(4차분) 일반해역이용협의 일시정지 요청 ※ 관광과-59호	‘21. 1. 4.	정재호 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업(4차분) 일반해역이용협의 일시정지 통보 ※ 회계과-734호	‘21. 1. 6.	조계윤 과장 오병구 팀장 최수지 주무관

○ 여자만 갯노을길 조성사업 설계변경 계약심사 의뢰 ※ 관광과-2698호	‘21. 2.19.	정재호 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업 설계변경 계약심사 결과 알림 ※ 전라남도 회계과-7593호	‘21. 2.22.	김성훈 과장 문인기 팀장 이광열 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업[총괄(5회) 및 4차(2회)] 설계변경 계약 의뢰 ※ 관광과-3187호	‘21. 3. 2.	정재호 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업[총괄(5회) 및 4차(2회)] 설계변경 계약 통보 ※ 회계과-9606호	‘21. 3. 3.	김용필 국장 조계윤 과장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업 경관조명 실시설계용역 계약 의뢰 ※ 관광과-3709호	‘21. 3.10.	정재호 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업 경관조명 실시설계용역 계약 체결 ※ 회계과-12816호	‘21. 3.10.	조계윤 과장 김진욱 팀장 최수지 주무관
○ 해양환경영향조사 용역 시행 ※ 관광과-5254호	‘21. 4. 5.	김학섭 국장 정재호 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○ 해양환경영향조사 계약 체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 회계과-21562호	‘21. 4.27.	조계윤 과장 김진욱 팀장 김창희 주무관

○ 여자만 갯노을길 조성사업(4차분) 기성검사공무원 지정 통보 ※ 회계과-24850호	‘21. 5.13.	조계윤 과장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업(전기) 시행 ※ 관광과-9981호	‘21. 6.21.	권오봉 시장 서은수 부시장 김학섭 국장 정재호 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○ 일반해역 변경 협의 용역 준공검사 공무원 지정 알림 ※ 회계과-33169호	‘21. 6.23.	조계윤 과장 김진욱 팀장 최수지 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업(총괄, 4차분) 일시정지해지 및 기간연장 계약 사항 통보 ※ 회계과-34991호	‘21. 7. 1.	김용필 국장 조계윤 과장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업(전기) 계약 의뢰 ※ 관광과-12382호	‘21. 8. 4.	박형열 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업(전기) 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 회계과-43389호	‘21. 8.23.	조계윤 과장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업(전기) 설계변경 계약 사항 통보 ※ 회계과-52007호	‘21.10.20.	조계윤 과장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○ 여자만 갯노을길 CCTV 물품 구입 검사(검수) 공무원 지정 알림 ※ 회계과-57847호	‘21.11.23.	조계윤 과장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업(전기) 검사(검수) 공무원 지정 알림 ※ 회계과-57723호	‘21.11.23.	조계윤 과장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○ 여자만 갯노을길 조성사업 경관조명 시설물 인계․인수 요청 ※ 관광과-19937호	‘21.12. 2.	박형열 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○ 관광자원개발사업(여자만 갯노을길 조성) 실적보고 제출 ※ 관광과-21723호	‘21.12.27.	박형열 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관