정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	둔덕정수장 고도정수처리시설사업
② 추진배경	○ 첨단 막여과 고도정수처리시설 도입으로 시민들에게 깨끗한 수돗물 공급 ○ 노후된 기존 정수처리시설 현대화로 미래 안정적인 수도 기반시설 확충
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 둔덕정수장일원 ○ 사 업 량 : 막여과시설 92,000㎥/일 ○ 사 업 비 : 42,302백만 원 ○ 사업기간 : 2012. ~ 2024.
④ 사업부서	여수시 상수도과		⑤ 담당자		시설6급 문효순 시설5급 이광재
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 사업		⑦ 사업기간		‘12. 1. ~‘24. 10.
<그간 주요 추진내용>
○ 추진계획 검토 ※ 상수도과-28140		‘17.12.26.		주철현 시장 최종선 부시장 김동균 단장 하헌옥 과장 명주완 팀장 이재태 주무관
○ 계약심의 요청 ※ 상수도과-28403		‘17.12.27.		하헌옥 과장 명주완 팀장 이재태 주무관
○ 막여과 구입 의뢰 ※ 상수도과-2825		‘18. 2. 7.		주철현 시장 최종선 부시장 정종태 단장 하헌옥 과장 명주완 팀장
○ 사업추진 재검토 결과보고 ※ 상수도과-16599		‘18. 9.13.		권오봉 시장 고재영 부시장 하헌옥 과장 김승주 팀장 이재태 팀장
○ 막여과 기자재 구매 계약체결 ※ 수도행정과-8026		‘18.10.26.		하헌옥 과장 김승주 팀장 이재태 팀장
○ 계약심위원회 심의 요청 ※ 수도행정과-8026		‘18.12.18.		하헌옥 과장 김승주 팀장 이재태 팀장

○ 고도정수처리시설 설치사업 시행 계획 보고 ※ 상수도과-342	‘19. 1.10.	권오봉 시장 고재영 부시장 정종태 단장 하헌옥 과장 김승주 팀장 이재태 차장
○ 통합건설사업관리용역 일상 감사 요청 ※ 상수도과-541	‘19. 1.10.	강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장
○ 토목․건축․기계 공사(총괄 및 1차분) 계약 의뢰 ※ 상수도과-641	‘19. 1.14.	강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장
○ 통합건설사업관리용역 계약 심사 의뢰 ※ 상수도과-751	‘19. 1.14.	강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장
○ 정수장(둔덕․학용) 통합건설 사업 관리용역 집행계획 ※ 상수도과-3015	‘19. 2.17.	권오봉 시장 고재영 부시장 김정남 단장 강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장
○ 정수장(둔덕․학용) 통합건설 사업 관리용역 PQ 평가 결과 ※ 상수도과-6693	‘19. 4. 9.	김정남 단장 강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장
○ 정수장(둔덕․학용) 통합건설 사업 관리용역 SOQ 평가 결과 ※ 상수도과-8249	‘19. 5. 2.	김정남 단장 강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장
○ 정수장(둔덕․학용) 통합건설 사업 관리용역 계약체결 의뢰 ※ 상수도과-8249	‘19. 5. 7.	강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장
○ 정수장(둔덕․학용) 통합건설 사업 관리용역 계약체결 ※ 수도행정과-4411	‘19. 6. 4.	강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장
○ 시설공사 계약체결 ※ 광주지방조달청 경영관리과-4294	‘19. 6.11.	강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장

○ 시설공사 착공 ※ 상수도과-11374	‘19. 6.21.	강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장
○ 안전관리계획서 검토 ※ 상수도과-16499	‘19. 9. 4.	강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 폐기물처리용역 계약 체결 의뢰 ※ 상수도과-17916	‘19. 9. 27.	강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 둔덕, 학용정수장 고도정수처리 시설 설치사업 (2차분) 집행계획 ※ 상수도과-23484	‘19.12.16	권오봉 시장 고재영 부시장 김정남 단장 강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업(2차분)계약 체결 의뢰 ※ 상수도과-23533	‘19.12. 17.	강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업(2차분)공사 착공 ※ 상수도과-10377	‘19.12. 24.	강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 기술지원건설사업기술인 현장점검 결과보고 ※ 상수도과-4238	‘20. 3. 2.	강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○ 기술지원건설사업기술인 현장점검 결과보고 ※ 상수도과-8562	‘20. 5. 1.	강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○ 기술지원건설사업기술인 현장점검 결과보고 ※ 상수도과-10751	‘20. 6. 4.	강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○ 공사 변경 계약의뢰(총괄및1,2차분) ※ 상수도과-13750	‘20. 7. 16.	오정환 과장 명호남 팀장 정상기 주무관
○ 공사 준공(1차분)	‘20. 8. 31.	오정환 과장 명호남 팀장 정상기 주무관
○ 녹색건축 예비인증 신청 ※ 상수도과-16899	‘20. 8. 31.	오정환 과장 명호남 팀장 정상기 주무관

○ 녹색건축 예비인증 신청자료 제출 ※ 상수도과-20478	‘20. 10. 22.	오정환 과장 명호남 팀장 정상기 주무관
○ 소방 및 정보통신공사 시행 ※ 상수도과-20532	‘20. 10. 23.	권오봉 시장 서은수 부시장 정윤수 단장 오정환 과장 명호남 팀장 정상기 주무관
○ 소방 및 정보통신공사 계약의뢰 ※ 상수도과-21348	‘20. 11. 4.	오정환 과장 명호남 팀장 이강선 주무관 정상기 주무관
○ 소방 및 정보통신공사 감리용역 시행 ※ 상수도과-23117	‘20. 12. 1.	오정환 과장 김동석 과장 김희경 팀장 명호남 팀장 이강선 주무관 정상기 주무관
○ 소방 및 정보통신공사 감리용역 계약의뢰 ※ 상수도과-23188	‘20. 12. 1.	오정환 과장 명호남 팀장 정상기 주무관
○ 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 총괄(3회) 및 2차분(3회) 변경계약 의뢰 ※ 상수도과-24205	‘20. 12. 14.	오정환 과장 명호남 팀장 정상기 주무관
○ 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업(2차분) 준공	‘20. 12. 17.	오정환 과장 명호남 팀장 정상기 주무관
○ 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업(3차분) 계약 체결 의뢰 ※ 상수도과-242	‘21. 1. 5.	오정환 과장 명호남 팀장 정상기 주무관

○ 「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치공사(3차분)」선금 지급 결정 통보 ※ 상수도과-20478	‘21. 1. 25.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ - 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 - 막여과동 배관지지대 변경 실정보고내용 검토보고 ※ 상수도과-1885	‘21. 1. 25.	서은수 부시장 김지선 단장 오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 관급자재(공기공급설비 1식) 제작·구매 의뢰 ※ 상수도과-5284	‘21. 3. 15.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ 관급자재(둔덕정수장 고도정수처리시설-강이형관 등) 구매 의뢰 ※ 상수도과-13117	‘21. 6. 28.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ ‘둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업’ 막여과동 단열재(바닥)공사 변경 실정보고내용 검토 보고 ※ 상수도과-13482	‘21. 7. 13.	박현식 부시장 김지선 단장 이돈주 수도행정과장 송향자 수도경리팀장 오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치공사 관급자재(강이형밸브접합관 등) 구매 요청 ※ 상수도과-13994	‘21. 7. 20.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ `21년 자율균특 사업비 조정(둔덕정수장 고도정수) 요청 자료 제출 ※ 상수도과-16001	‘21. 8. 17.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ - 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 -막여과동 스틸그레이팅 구조보강 실정보고내용 검토 보고 ※ 상수도과-16867	‘21. 8. 30.	권오봉 시장 박현식 부시장 김지선 단장 이돈주 수도행정과장 송향자 수도경리팀장 오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관

○ 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치공사 관급자재(강이형관, 1수편락관 등) 구매 요청 ※ 상수도과-18702	‘21. 9. 24.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ '둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업(전기) 관급자재(유량계) 제작·설치 사업' 시행 ※ 상수도과-19070	‘21. 9. 30.	박현식 부시장 김지선 단장 이돈주 수도행정과장 송향자 수도경리팀장 오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ 정수장(둔덕·학용) 고도정수처리시설 설치사업 통합건설사업관리용역(4차분) 집행계획 ※ 상수도과-22825	‘21. 11. 23.	권오봉 시장 박현식 부시장 김지선 단장 이돈주 수도행정과장 송향자 수도경리팀장 오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 총괄(4회) 및 3차분(1회) 변경계약 의뢰 ※ 상수도과-24078	‘21. 12. 8.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업(3차분) 준공	‘21. 12. 16.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ 둔덕·학용 고도정수처리시설 설치사업(4차분) 집행계획 ※ 상수도과-691	‘22. 1. 10.	권오봉 시장 박현식 부시장 김지선 단장 이돈주 수도행정과장 송향자 수도경리팀장 오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업(4차분) 착공	‘22. 1. 19.	김 혁 차장

○ 둔덕·학용 고도정수처리시설 설치사업 막여과동 배관연결부 시공 실정보고 건 승인 통보 ※ 상수도과-5275	‘22. 3. 7.	주영근 과장 정일석 팀장 김 혁 차장
○ 둔덕·학용 고도정수처리시설 설치사업 막여과동 배관연결부 시공 실정보고 건 승인 통보 ※ 상수도과-9215	‘22. 4. 25.
○ 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 관급자재(자동스트레이너) 재구매 요청	‘22. 5. 4.	주영근 과장 정일석 팀장 김 혁 차장
○ 조달청 총액계약 재구매 의뢰 결과 통보(둔덕정수장-자동스트레이너) ※ 상수도과-10266	‘22. 5. 17.
○ 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 관급자재-배출수여과기 선금지급 결정 통보	‘22. 5. 17.
○ 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 설계변경[총괄5회,4차1회]검토보고	‘22. 6. 7.	김지선 단장 이돈주 수도행정과장 송향자 수도경리팀장 주영근 과장 정일석 팀장 김 혁 차장
○ 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 설계변경[총괄5회,4차1회]계약의뢰	‘22. 6. 9.	주영근 과장 정일석 팀장 김 혁 차장
○ 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 품질, 안전, 환경관리계획서 변경 검토보고	‘22. 6. 30.	주영근 과장 정일석 팀장 김 혁 차장
○ 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 품질, 안전, 환경관리계획서 변경 승인 통보	‘22. 6. 30.	주영근 과장 정일석 팀장 김 혁 차장
○ 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 현장대리인 변경 승인 통보	‘22. 8. 24.	주영근 과장 서범규 팀장 강호권 주무관

○「둔덕·학용정수장 고도정수처리시설 설치사업 통합건설사업관리용역」기술인(전기) 변경 승인 통보	‘22. 8. 25.	주영근 과장 서범규 팀장 강호권 주무관
○「둔덕·학용정수장 고도정수처리시설 설치사업 통합건설사업관리용역」기술인 투입계획 변경 승인 통보(책임 및 분야)	‘22. 9. 26	주영근 과장 서범규 팀장 강호권 주무관
○ 둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 막모듈 변경관련 실정보고 승인 통보	‘22. 10 .13.	주영근 과장 서범규 팀장 강호권 주무관
○ 「둔덕·학용정수장 고도정수처리시설 설치사업」 물가변동에 따른 계약금액 조정(3회)검토보고 및 승인	‘22. 11 .3.	정기면 시장 박현식 부시장 한광민 단장 조계윤 수도행정과장 장내근 수도경리팀장 주영근 과장 서범규 팀장 강호권 주무관
○ 「둔덕·학용정수장 고도정수처리 시설 설치사업」옹벽설치 및 우수관로 계획변경 실정보고에 따른 검토 보고 및 승인	‘22. 11. 30.	주영근 과장 조계윤 수도행정과장 장내근 수도경리팀장 서범규 팀장 강호권 주무관
「둔덕·학용정수장 고도정수처리 설치사업」품질관리인 변경 및 적정성 검토 보고 및 승인	‘22. 12. 9.	주영근 과장 서범규 팀장 강호권 주무관
「둔덕·학용정수장 고도정수처리 설치사업」총괄분 6회 및 4차분 2회 설계변경 등	‘23. 1. 2.	주영근 과장 조계윤 수도행정과장 장내근 수도경리팀장 서범규 팀장 강호권 주무관
「둔덕·학용정수장 고도정수처리 설치사업」고도정수처리시설 시운전 용역 일상감사 의뢰	‘23. 1. 4.	주영근 과장 서범규 팀장 강호권 주무관

○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 5차분 계약의뢰」	‘23. 1. 12	김정남 과장 서범규 팀장 강호권 주무관
○「둔덕정수장고도정수처리시설 설치사업 종합시운전용역」시행	‘23. 1. 17.	김종기 부시장 김태횡 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리팀장 서범규 팀장 강호권 주무관
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 등 2건 계약심사 요청」	‘23. 1. 17	김정남 과장 서범규 팀장 강호권 주무관
○ 「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업(전기) 2차분 집행계획」	‘23. 1. .20.	정기명 시장 김종기 부시장 김태횡 단장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리팀장 김정남 과장 서일원 팀장 박정호, 강호권 주무관
○ 「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 종합시운전 용역」계약 의뢰	‘23. 1. 25.	김정남 과장 서범규 팀장 강호권 주무관
「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업」막여과 설비 일부배관 간섭부 변경 검토보고 및 승인 통보	‘23. 2. 13.	김종기 부시장 김태횡 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리팀장 서범규 팀장 박순용 차장 강호권 주무관
「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업」사토장 및 배출수 회수관 검토보고 및 승인 통보	‘23. 3. 2.	김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리팀장 김 혁 팀장 강호권 주무관
「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업」통합운영실 및 홍보실 배치계획 변경 검토보고 및 승인 통보	‘23. 3. 29.	김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리팀장 이광재 팀장 강호권 주무관

○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 품질관리자 변경」승인	‘23. 4. 12	김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리팀장 이광재 팀장 강호권, 한기원 주무관
○「둔덕정수장고도정수처리시설 설치사업 프로세스 제어 탁도기 등」검토보고	‘23. 4. 26.	김종기 부시장 김태횡 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리팀장 서일원 팀장 박정호 주무관
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 품질관리자 변경」승인	‘23. 5. 9.	김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리팀장 이광재 팀장 강호권, 한기원 주무관
○ 「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업」구내 배관(추가)변경 실정보고 승인	‘23. 5. .17.	김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리팀장 김정남 과장 이광재 팀장 강호권 주무관
「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업(전기)」관급자재 유량계 실정보고 승인	‘23. 5. 22.	김종기 부시장 김태횡 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리팀장 이광재 팀장 박순용 차장 강호권 주무관
○「둔덕정수장고도정수처리시설 설치사업」 건축설비공사 실정보고 승인	‘23. 5. 23.	정기명 시장 김종기 부시장 김태횡 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리팀장 이광재 팀장 박순용 차장 강호권, 김건문, 박정호 주무관

○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업 현장대리인 변경」승인	‘23. 5. 30.	김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리팀장 이광재 팀장 강호권, 한기원 주무관
○「둔덕정수장고도정수처리시설 설치사업(관급)」프로세스 제어 실정보고 승인	‘23. 6. 13.	김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리팀장 서일원 팀장 박정호 주무관
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업(전기)」실정보고 승인	‘23. 5. 9.	김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리팀장 서일원 팀장 박정호 주무관
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업」막여과시설 배관세정 더미모둘 설치·해체 실정보고 승인	‘23. 7. 4.	김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리팀장 김정남 과장 이광재 팀장 강호권 주무관
「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업」구내배관 변경(부단수천공 시공) 실정보고 승인	‘23. 10. 5.	김종기 부시장 오정환 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리팀장 서범규 팀장 박순용 차장 강호권 주무관
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업」 종합시운전 용역 일시정지해지 및 과업 추진	‘23. 10. 17.	오정환 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리팀장 이광재 팀장 강호권주무관

○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업(통신)」실정보고 검토보고	‘23. 11. 16.	오정환 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리팀장 서일원 팀장 박정호 주무관
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업」구내배관 변경 실정보고 검토보고	‘23. 11. 28.	김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리팀장 이광재 팀장 강호권 주무관
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업(전기)」실정보고 검토보고	‘23. 11. 30.	김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리팀장 이광재 팀장 박정호 주무관
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업(통신)」물가변경 계약금액 조정 검토 보고	‘23. 12. 7.	오정환 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리팀장 서일원 팀장 박정호 주무관
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업(통신)」공사기간 연장 검토 보고	‘23. 12. 27.	오정환 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리팀장 이광재 팀장 강호권 주무관
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업(전기)」실정보고 검토보고	‘24. 1. 4.	김종기 부시장 오정환 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리팀장 서일원 팀장 박정호 주무관
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업」실정보고 검토보고[석면해체]	‘24. 2. 14.	장현철 과장 최재영 수도행정과장 이미영 수도경리팀장 이광재 팀장 문효순 차장
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업(통신,소방)」사업기간 연장 검토 보고	‘24. 2. 16.	오정환 단장 장현철 과장 최재영 수도행정과장 이미영 수도경리팀장 위진복 팀장 박정호 차장

○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업」통합건설사업관리용역 변경 시행 및 예산 조정(감리비) 검토보고	‘24. 3. 15.	김종기 부시장 오정환 단장 장현철 과장 최재영 수도행정과장 이미영 수도경리팀장 이광재 팀장 문효순 차장
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업」설계변경 검토보고(총괄7회, 5차분 1회)	‘24. 4. 15.	김종기 부시장 오정환 단장 장현철 과장 최재영 수도행정과장 이미영 수도경리팀장 이광재 팀장 문효순 차장
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업(전기)」설계변경 검토보고	‘24. 4. 22.	김종기 부시장 오정환 단장 이광재 수도시설팀장 최재영 수도행정과장 이미영 수도경리팀장 위진복 팀장 박정호 주무관
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업」폐기물처리용역 설계변경 검토보고	‘24. 4. 25.	오정환 단장 이광재 수도시설팀장 최재영 수도행정과장 이미영 수도경리팀장 문효순 차장
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업」실정보고 검토보고[지장수목 제거]	‘24. 4. 24.	김종기 부시장 오정환 단장 최재영 수도행정과장 이미영 수도경리팀장 이광재 팀장 문효순 차장
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치공사(통신)」물가변동 계약금액 조정 설계변경	‘24. 5. 1.	오정환 단장 장현철 과장 최재영 수도행정과장 이미영 수도경리팀장 이광재 팀장 위진복 팀장 박정호 차장
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업」실정보고 검토보고[사토장 운영]	‘24. 6. 12.	김종기 부시장 오정환 단장 장현철 과장 최재영 수도행정과장 이미영 수도경리팀장 이광재 팀장 문효순 차장

○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치공사(소방)」실정보고 설계변경 검토보고	‘24. 6. 18.	오정환 단장 장현철 과장 최재영 수도행정과장 이미영 수도경리팀장 이광재 팀장 위진복 팀장 박정호 차장
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업」현장 실정 검토보고[1계통 정수지 기존 유입관 폐쇄]	‘24. 6. 26.	최재영 수도행정과장 장현철 과장 이미영 수도경리팀장 이광재 팀장 문효순 차장
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업」실정보고 검토보고[구내배관(역세척 배출수관) 추가 시공]	‘24. 6. 28.	김종기 부시장 최재영 수도행정과장 장현철 과장 이미영 수도경리팀장 이광재 팀장 문효순 차장
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업(전기)」물가변동으로 인한 계약금액조정 검토보고	‘24. 7. 2.	장현철 과장 위진복 팀장 이광재 수도시설팀장 박정호 주무관
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업」관급자재(배출수여과기 섬유여과포) 추가 구매 검토보고	‘24. 7. 5.	최재영 수도행정과장 장현철 과장 이미영 수도경리팀장 이광재 팀장 문효순 차장
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업(소방)」물가변동으로 인한 계약금액 조정 설계변경 검토 보고	‘24. 8. 6.	김문환 단장 이광재 과장 박영춘 수도행정과장 정은성 수도경리팀장 최우진 팀장 강동영 차장
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업」계약심사(설계변경) 요청	‘24. 9. 9.	최우진 팀장 문효순 차장
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업」공사기간 연장 검토보고	‘24. 9. 10.	김문환 단장 박영춘 수도행정과장 정은성 수도경리팀장 위진복 팀장 최우진 팀장 박순용 차장 강동영 차장 문효순 차장

○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업(전기)」실정보고에 따른 검토보고	‘24. 9. 30.	최정기 부시장 김문환 단장 박영춘 수도행정과장 정은성 수도경리팀장 최우진 팀장 강동영 차장
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업(관급)」프로세스 제어 실정보고에 따른 검토보고	‘24. 9. 30.	최정기 부시장 김문환 단장 박영춘 수도행정과장 정은성 수도경리팀장 최우진 팀장 강동영 차장
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업」실정보고에 따른 설계변경 검토보고(총괄 8회, 5차분 2회)	‘24. 10. 14.	최정기 부시장 김문환 단장 박영춘 수도행정과장 정은성 수도경리팀장 이광재 과장 최우진 팀장 문효순 차장
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치공사」관급구매설치(프로세스제어) 설계변경 검토 보고(2회)	‘24. 10. 15.	이광재 과장 박영춘 수도행정과장 정은성 수도경리팀장 최우진 팀장 강동영 차장
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업(전기)」변경계약 시행계획 (전체 3회, 1,2차분 3회)	‘24. 10. 17.	정기명 시장 최정기 부시장 김문환 단장 박영춘 수도행정과장 정은성 수도경리팀장 이광재 과장 최우진 팀장 강동영 차장
○「둔덕정수장 고도정수처리시설 설치공사(소방)」통합건설사업관리용역 변경 시행 및 예산 조정(감리비) 검토보고	‘24. 10. 25.	최정기 부시장 김문환 단장 박영춘 수도행정과장 박영심 수도행정팀장 이광재 과장 최우진 팀장 문효순 차장