정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-28	담당부서 작성자	건설교통국/도로과 마동현/659-4072
정 책 명	무선～여천초교 도로개설
사업개요	○ 추진배경 - 도시기반시설 확충으로 무선 및 석창방면 차량분산 교통 체증해소 ○ 추진기간 : 2015. 5.∼ 2017. 6. ○ 총사업비 : 106.5억원(공사비 72.5, 보상비 등 34) ○ 주요내용 - 도로개설 L=1,060m, B=25m(4차로)
추진경과 및 사업 관련자	□ 주요 추진경과 및 사업관련자 현황 ○ 중기지방재정계획 및 투ㆍ융자심사 : 2012. 7.30. ○ 실시설계용역 완료 : 2012. 12.28. ○ 착공(총괄 및 1차분) : 2015. 5.19. ○ 1.2차분 준공 : 2016. 5.30. ○ 3차분 준공 : 2016. 12.31. ○ 총괄 및 4차분 준공 : 2017. 7. 4. - 관련자 : 도로과 주무관 서주용, 팀장 유경상, 과장 문태선, 국장 조일수, 부시장 최종선, 시장 주철현