정책실명제 사업관리 이력서

정책실명제

등록번호

2014-46

담당부서

작성자

(건설교통국 / 건설방재과)

(조정선/4037/jsjo65@korea.kr)

정 책 명

연등천 하천환경 조성사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 연등천(지방하천) 호안시설이 노후되어 석축기초가 세굴로 인해 붕괴될 우려가 있고 집중호우 시 제방이 낮아 범람이 예상되므로 시가지 침수피해에 대비 하천환경 개선 필요

○ 추진기간 : 2012. 2. ~ 2014. 12.

○ 총사업비 : 2,723백만원(국비 1,634, 시비 1,089)

- 기 집행액 : 500백만원(국비 300, 시비 200)

․기본 및 실시설계, 하천준설비 집행

○ 주요내용

- 파라펫설치 1㎞, 석축보강 2.2㎞, 하상준설 0.36㎞ 등

○ 추진경과

- 2012.  2. 23. : 기본 및 실시설계 용역 착수

- 2012.  4. 06. : 연등천 하천환경조성사업(준설) 착공

- 2012.  5. 22. : 연등천 하천환경조성사업(준설) 준공

- 2012.  6. 08. : 기본 및 실시설계 용역 일시정지

- 2013.  1. 18. : 연등천 하천기본계획 수립 고시(전라남도)

- 2013.  4.  1. : 연등천 하천환경 조성사업 협의 승인 요청

- 2014.   1.  17. : 익산국토관리청 사업승인

- 2014.   2.  12. : 연등천 하천환경 조성사업 계약심사 결과 통보(전라남도)

- 2014.   2.  18. : 일상감사 및 관련 용역부분 계약심사 통보(여수시)

- 2014.   3.  12. : 하천공사 시행계획 고시

- 2014.   3.  14. : 사업발주 및 계약의뢰

- 2014.   4.  현재 : 낙찰자결정 및 계약체결 추진 중

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 시설7급 (직급) 김용채(성명)

- 최종 결재자 : 여수시장 (직급) 김충석(성명)

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
시장	김충석	1급	‘10. 7. 11	입안결정
시장
․ ․
부시장	정병재	3급	‘11. 1. 1	입안검토
부시장	이호경	3급	‘13. 1. 1	“
․ ․
국장	고성석	4급	‘11. 1. 17	총괄검토
국장	조태용	3급	‘13. 7. 1	“
국장
․ ․
과장	김세곤	5급	‘11. 7. 1	총괄추진
과장	김정석	5급	‘13. 2. 1	“
과장
․ ․
팀장	문태선	6급	‘11. 1. 31	준공검사 및 사업추진
팀장	유경상	6급	‘13. 7. 1	“
․ ․
담당자	김용채	7급	‘11.1.31～13.1.31	공사감독 및 사업추진
담당자	조정선	7급	‘13.2.1～현재	“
담당자
․ ․

다른기관 또는

민간인 관련자

설계자 : (주)백산기술단

추진실적

※ 추진실적은 추진경과의 모든 목록의 내용을 날짜순서대로 PDF파일 또는 한글파일로 첨부하여 공개