[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2014-60	담당부서 작성자	도로관리사업소/구조물관리 (박상진/659-5118)
정 책 명	삼호교 보수·보강공사
사업개요	□ 추진배경 ○ 교량의 구조적, 기능적 결함을 보수·보강하여 안전성과 호용성을 증진하고 재난·재해를 사전에 예방하여 차량의 안전운행 확보 □ 사업개요 ○ 위 치 : 여수시 삼산면 거문리 ○ 사 업 량 : 교량 보수ㆍ보강 1식 ○ 사 업 비 : 1,522백만원(전액시비) ○ 사업기간 : 2013. 11. 05 ~ 2015. 01. 19.
추진경과 및 사업 관련자	□ 추진상황 ○ '13. 01. 10. : 정밀안전진단 용역 완료 ○ '13. 02. 22. ~ '13. 08. 27. : 실시설계 용역 시행 ○ '13. 06. 11. : 여수시 설계자문위원회 자문 ○ '13. 11. 05. ~ '14. 05. 04. : 보수ㆍ보강 공사 시행(1차분) ○ '14. 01. 27. ~ '14. 05. 06. : 보수ㆍ보강 공사 시행(2차분) ○ '14. 09. 01. ~ '15. 01. 17. : 보수ㆍ보강 공사 시행(3차분) ○ '15. 01. 19 : 공사 완료 □ 사업관련자 ○ 최초 입안자 : 시설7급 황규석 ○ 최종 결정자 : 여수시장 김충석 ○ 시 공 사 : 거송건설(주) 외 1

※ 추진실적은 필요한 경우 별첨으로 등록 가능