(서식1)

정책실명제 사업관리 이력서

정책실명제

등록번호

2014-79

담당부서

작성자

(상하수도사업단장/하수도과)

(차재원/659~4991/hl4cls@korea.kr)

정 책 명

도원지구 우수저류시설 설치사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

-여수시 도원지구는 집중호우시 상습적인 침수피해를 입고 있어 근본적인 침수방지 예방을 위하여 본 사업지구내 우수저류 시설을 설치하여 침수피해 예방과 주민인명 피해 최소화 하고자 함

○ 추진기간 : 2012.06.22 ~ 2014. 06.18

○ 총사업비 :15,367백만원

○ 주요내용 : 11,400㎥(L=220 , B=7.2m H=7.2m )

, 유입관로 L=65m

○ 추진경과

- 2011. 10 : 도원지구 우수저류시설 사업확정(소방방재청)

- 2012. 05 : 실시설계 사전검토 회의(2회) 및 심의(소방방재청)

- 2012. 06 : 총괄 및 1차분 공사 착공

- 2012. 06. 19 : 도원지구 우수저류시설 설치공사 계약 체결

- 2012. 08. 14 : 우수저류시설 통합 전면 책임감리용역 착수

- 2013. 02. 26 : 2차분 착공

- 2013. 10. 08 : 설계변경 계약심사(전라남도)

- 2013. 11.   6 : 1차분 공사 준공

- 2014. 3.  3. ~ 6. 18. : 유입관로 구간 압입추진중 시행(L=65m)

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 입안자 : 주무관 서주용

○ 검토자 : 하수정비팀장 정원완, 하수도과장 강동연

상하수도사업단장 김태옥, 부시장 정병재

○ 최종결재자 : 여수시장 김충석

- 최초 입안자 : 시설7급(직급)  서주용(성명)

- 최종 결재자 : 여수시장       김충석(성명)

○ 사업 관련자

구 분	성 명	직 급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
시 장	김충석	시 장	‘12.6.5~’14.6.
․ ․
부시장	정병재	부시장	‘12.6.5~’12.12.31
부시장	이호경	부시장	‘13.1.1~’14.6
국 장	김태옥	시설4급	‘12.6.5~’12.12.31
국 장	박개환	행정4급	‘13.1.1~’13.6.30
국 장	김재곤	시설4급	‘13.7.1~’14.6.
과 장	김동연	행정5급	‘12.6.05~’12.7.19
과 장	김종석	시설5급	‘12.7.20~’13.12.31
과 장	김영곤	시설5급	‘14.1.1~’14.6.
팀 장	정원완	시설6급	‘12.6.5~’13.1.30
팀 장	주영근	시설6급	‘13.2.1~’14.6.
담당자	서주용	시설7급	‘12.6.5~’13.1.6
담당자	김승주	시설7급	‘13.1.7～’1312.31.
담당자	박동훈	시설8급	‘14.1.1～’14.1.23
담당자	차재원	시설7급	‘14.1.24~’14.6.18

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설 계 자 : 한국기술개발(주) 임형택

○ 도 급 자 : 삼일건설(주)  최갑열

○ 감리회사 : (주)삼안 임종명, 산하종합기술(주) 최인준

추진실적

※ 추진실적은 추진경과의 모든 목록의 내용을 날짜순서대로 PDF파일 또는 한글파일로 첨부하여 공개