[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2014-29	담당부서 작성자	(경제해양수산국 / 해양항만제러과) (김현식 / 3977)
정 책 명	돌산해양낚시공원 조성사업
사업개요	○ 필 요 성 : 관광휴양자원과 수산업의 연계로 지역의 성장 촉진에 기여 바다낚시 관련사업 활성화 및 고용창출로 지역경제 활성화 ○ 위 치 : 여수시 돌산읍 우두리 강남금 일원 ○ 사 업 량 : 낚시쉼터 6동, 가두리낚시터 1식, 인공어초 1식 ○ 사 업 비 : 3,000백만원(광특 1,500, 시비 1,500) ※ 광특사업 - ‘11년 400, ‘12년 540, ’13년 860, ‘14년 688, ‘15년 512 ○ 기 간 : 2010. ～ 2015.
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ’10. 5. 24 : 기본 및 실시설계용역 계약체결 - 담당자 홍종옥 연안관리담당 김기채 연안관리과장 하헌옥 관광문화수산국장 송인종 ○ ‘10. 12. 29 : 낚시공원 선정위원회 개최(돌산 강남금 확정) - 담당자 홍종옥 연안관리담당 김기채 연안관리과장 김정석 관광문화수산국장 박기성 ○ ’11. 11. 16 : 전라남도 공공디자인위원회 심의 - 담당자 홍종옥 해양레포츠팀장 장 천 해양항만과장 유영만 ○ ’12. 10. 18 : 공유수면 점사용허가 완료 - 담당자 박혜지 연안과리팀장 유경상 해양항만레저과장 강성원 ○ ’12. 12. 29 : 토목공사 총괄 계약 및 1차분 공사 착공 - 담당자 : 홍종옥 해양레저팀장 정용길 해양항만레저과장 강성원 ○ ’13. 10. 30 : 토목 공사 1, 2차 공사 준공 - 담당자 : 홍종옥 해양레저팀장 정용길 해양항만레저과장 강성원 ○ ’14. 3. 10 : 토목공사 3차분 착공(인공어초 투하, 수도공사) - 담당자 : 정종기 해양레저팀장 정용길 해양항만레저과장 최문홍 ○ ’15. 2. 23 : 관급자재(낚시쉼터 부잔교) 2차분 계약 및 착수 - 담당자 : 정종기 해양레저시설팀장 장광일 해양항만레저과장 장종순 ○ ’15. 8. 12 : 관급자재(낚시부잔교 쉼터) 총괄 준공(해상계류 완료) - 담당자 : 정종기 해양레저시설팀 장광일 해양항만레저과장 노정열 ○ ’15. 10. 16 : 토목공사 총괄 및 3차분 준공 - 담당자 : 김현식 해양산단조성T/F팀장 박진웅 해양항만레저과장 노정열