특수공시 사업 목록

(2018. 12. 31. 기준 / 단위 : 억원)

사 업 명		총사업비	부 서 명	비 고
1.	청소년 해양교육원 건립	180	투자박람회과
2.	진남상가 주차장 신축	70.2	지역경제과
3.	조·명 연합수군 테마 관광단지 조성	83.65	관광과
4.	이순신 도서관 건립	198.9	시립도서관
5.	어르신문화체육센터 신축	97.2	노인장애인과
6.	육아종합지원센터 건립	40.3	여성가족과
7.	웅천 ~ 소호 도로개설	678.73	도로과
8.	관문지구 행복주택 건설	215	허가민원과
9.	치매 안심센터 신축	34.5	보건사업과
10.	자산교 재가설	33	도로시설관리과
11.	여수 상징문 설치 및 쉼터 조성사업	29	도로시설관리과

1		여수 청소년해양교육원 건립

투자박람회과 박규연(659-3469)

실태		□ 청소년 해양재난 대처능력 배양을 위한 전문 안전체험 및 교육기관 필요
추진방향		□ 해양 분야 체험‧교육시설 건립
기대효과		□ 안전한 체험학습 공간 조성 및 박람회장 사후활용 활성화

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 수정동 776번지

◦ 사업기간 : 2017. ~ 2020.

◦ 사업규모 : 대지면적 4,710.90㎡, 건축연면적 6,238㎡, 지하1층~지상4층/1동

◦ 사 업 비 : 180억(국비 98억, 도비 21억, 시비 61억)

<연도별 사업비 투자현황>

(단위: 억원)

구 분	총사업비	2018년까지	2019년 이후	비 고
계	180	73	107
국 비	98	51	47
도 비	21	11	10
시 비	61	11	50

사업진행 현황

◦ 타당성조사, 재정투자심사, 공유재산관리계획 의결	: 2016. 3. ~ 12.

◦ 설계용역 착수(설계공모)	: 2017. 6. 14.

◦ 설계용역 완료	: 2018. 9. 27.

◦ 여수박람회법 개정*	: 2018.12. 11.

* 국가 또는 지방자치단체는 특구 내 박람회 시설 이외의 시설 조성 가능

◦ 공사착공	: 2019. 3.

◦ 공사준공	: 2020.10.

위 치 도

청소년해양교육원

전경사진 (조감도)

2		진남상가 주차장 신축

지역경제과 최두용(659-4536)

실태		□ 진남상가의 주차 공간 부족에 따른 상가 주변 불법 주차 해소로 상가 이용 활성화 및 정주여건 개선
추진방향		□ 주차전용건축물 신축
기대효과		□ 상가 밀집지역의 주차난 해소와 불법 주정차 예방

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 교동 221번지 외 1필지(216번지)

◦ 사업기간 : 2016. 3. ∼ 2019. 6.

◦ 사업규모 : 주차전용건축물 신축(연면적 3,332.37㎡, 지상4층, 주차99면)

◦ 사 업 비 : 70.2억원(국비 41.52, 시비 28.16, 자부담 0.52)

◦ 공 정 률 : 10%(기존건물 철거, 골재포설)

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2018년까지	2019년 이후	비 고
계	70.2	41.8	28.4
국 비	41.52	24.12	17.4
도 비
시 비	28.16	17.16	11
기 타	0.52	0.52

사업진행 현황

◦ 전통시장 주차환경개선사업 공모 선정	: 2016.  3.  7.

◦ 공유재산관리계획 변경 의결	: 2017. 10. 25.

◦ 실시설계용역 완료	: 2018.  5.  2.

◦ 전라남도 경관·공공디자인 공동위원회 심의	: 2018.  6. 27.

◦ 전라남도 계약심사 완료	: 2018.  6. 28.

◦ 건축허가(협의) 완료	: 2018.  7. 19.

◦ 공사 착공	: 2018.  8. 20.     ◦ 공사 준공	: 2019.  6. 20.

위 치 도                       당초 부지 :      추가 부지 :

전경사진 (조감도)

3		조․명 연합수군 테마 관광단지 조성

관광과 임인수(659-3881)

실태		□ 급증하는 관광수요와 다양하게 변화되는 관광산업의 추세에 효율적으로 대처하고 풍부한 생태자원을 활용한 관광인프라 필요
추진방향		□ 명나라 수군 도독 진린장군, 등자룡 장군과 조명 연합수군의 항일 전쟁 스토리 등을 활용 역사공원 조성
기대효과		□ 조명연합수군의 항일전쟁 스토리 등 관광상품 개발을 통한 중국 및 국내 관광객 유치 증대와 새로운 관광인프라 구축으로 지역경제 활성화 기여

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 묘도7길 110(이순신대교 홍보관 일원)

◦ 사업기간 : 2018. 2. ~ 2022. 12.(5년)

◦ 사업규모 : 테마공원 조성(29,661㎡)

◦ 사 업 비 : 83.65억원(국비 30, 시비 53.65)

◦ 공 정 률 : 10%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2018년까지	2019년 이후	비 고
계	83.65	27.35	56.3
국 비	30	2	28
도 비
시 비	53.65	25.35	28.30
기 타

사업진행 현황

◦ 기본계획 수립용역 준공	: 2016. 10. 20.

◦ 실시설계 용역 착수	: 2018.  5.  3.

◦ 토지보상 협의 요청	: 2018.  6. ~

◦ 용역 중간보고	: 2018. 12.  7.

위 치 도

전경사진 (조감도)

4		여수 이순신도서관 건립

시립도서관 위준용(659-4780)

실태		□ 문화, 교육, 정보 등 복합기능을 갖추고 다양한 세대가 문화적 융합을 이룰 수 있는 인문환경 조성을 위한 도서관 건립 필요
추진방향		□ 다양한 교육․문화공간 확보 및 학술문화정책의 중추적 역할을 수행하는 자생력을 갖춘 도서관 건립으로 평생교육 기반 구축
기대효과		□ 지역 독서 및 평생학습의 통로로서 여수시 대표 도서관 건립

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 웅천동 1820-2번지

◦ 사업기간 : 2016. 9. ∼ 2019. 8.

◦ 사업규모 : 지상4층/지하1층, 부지 7,120㎡, 연면적 5,621.79㎡

◦ 사 업 비 : 198.9억원 (국비 53.5, 시비 145.4)

◦ 공 정 률 : 52%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2018년까지	2019년 이후	비 고
계	198.9	174.73	24.17
국 비	53.5	44.5	9
도 비
시 비	145.4	130.23	15.17
기 타

사업진행 현황

◦ 도서관건립 계획수립 및 사전행정절차 이행	: 2016.까지

◦ 기본 및 실시설계 착수(설계공모)	: 2017.  2. 13.

◦ 기본 및 실시설계 완료	: 2017. 11. 16.

◦ 공사 착수(건축, 전기, 소방, 통신)	: 2018.  1.  3.

◦ 공사 준공 예정	: 2019.  8.

◦ 도서관 개관 예정	: 2019. 11.

위 치 도

위치

전경사진

5		어르신문화체육센터 신축

노인장애인과 신미연(659-3716)

실태		□ 고령사회 대비 다양한 노인복지 욕구에 맞는 건강하고 활기찬 여가문화 생활을 즐길 수 있는 노인 전용 체육시설 구축 필요
추진방향		□ 보편적 다수 노인들을 위한 교육･문화･체육･오락이 함께 어우러진 복합 문화공간으로 체육시설 건립
기대효과		□ 100세 시대에 발맞춘 맞춤형 서비스 제공으로 시민 삶의 질 및 복지 체감도 향상

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 웅천동 1820-2번지(☎684-6007)

◦ 사업기간 : 2016. 4. ~ 2019. 3. 29.

◦ 사업규모 : 4,500㎡(연면적 2,727.20㎡/지상 3층)

◦ 사 업 비 : 97.2억원(국비 20, 시비 77.2)

◦ 공 정 률 : 90％

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2018년까지	2019년 이후	비 고
계	97.2	72.2	25
국 비	20	18	2
도 비
시 비	77.2	54.2	23	특별교부세 8억 포함
기 타

사업진행 현황

◦ 어르신 다목적체육센터 건립 계획        : 2016.  4. 14.

◦ 기본 및 실시설계 용역                  : 2017.  5. ∼ 11.

◦ 용역 준공                              : 2017. 11. 17.

◦ 조달청 계약의뢰                        : 2017. 11. 22.

◦ 공사계약                               : 2017. 12. 15.

◦ 착공                                   : 2017. 12. 21.

◦ 준공                                   : 2019  3. 29.

◦ 개관식 및 운영                         : 2019  7. 12.

위 치 도

전경사진 (조감도)

6		육아종합지원센터 건립

여성가족과 이선옥(659-3761)

실태		□ 지역 보육의 거점기관 건립으로, □아이 양육하기 좋은 환경을 조성□을 조성하여 우리 시 보육서비스의 질을 제고
추진방향		□ 어린이집과 가정양육을 지원하고, 지역의 특화된 서비스를 제공할 수 있는 육아종합지원센터 건립
기대효과		□ 종합적인 보육서비스 제공으로 시민의 보육 및 삶의 질 향상

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 웅천동 1820-1번지(노유자 부지)

◦ 사업기간 : 2014. 10. ∼ 2019. 4.

◦ 사업규모 : 지상3층, 부지 1,546.1㎡, 연면적 1,354.56㎡

◦ 사 업 비 : 40.3억원 (국비 10, 도비 4, 시비 26.30)

◦ 공 정 률 : 85%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2018년까지	2019년 이후	비 고
계	40.3	25.3	15
국 비	10	10
도 비	4	4
시 비	26.3	11.3	15
기 타

사업진행 현황

◦ 육아종합지원센터 건립 계획 수립	: 2014. 10. 14.

◦ 기본 및 실시설계 착수	: 2017.  8. 11.

◦ 기본 및 실시설계 완료	: 2017. 12. 22.

◦ 공사 착수(건축, 전기, 소방, 통신)	: 2018.  5. 15.∼ 6. 1.

◦ 공사 준공 예정	: 2019.  4.

위 치 도

전경사진 (조감도)

7		웅천 ~ 소호 도로개설

도로과 마동현(659-4071)

실태		□ 웅천택지개발사업 준공으로 시가지 도로의 교통 정체가 극심함에 따라 웅천에서 소호구간을 해상교량으로 연결하여 교톨량을 분산사켜 교통소통 원활을 기하고자 함
추진방향		□ 도로개설 L=1,154m, B=22.5~26m(4차로)
기대효과		□ 웅천택지 준공에 따른 시가지 교통체증 해소 및 차량분산으로 인한 시가지 교통소통원활

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 웅천동~소호동

◦ 사업기간 : 2018. 7.30. ~ 2022. 7.28.

◦ 사업규모 : L=1,154m, B=22.5~26.0m(4차로)

교량 L=550m(사장교 220, PSC거더교 330)

◦ 사 업 비 : 678.73억원

◦ 공 정 률 : 28%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2018년까지	2019년 이후	비 고
계	678.73	155.07	523.66
국 비
도 비
시 비	678.73	155.07	523.66
기 타

사업진행 현황

◦ 노선결정(해상교량 형식)	: 2015. 11. 24.

◦ 기본계획 및 측량용역 완료	: 2016. 12. 16.

◦ 일괄입찰 공고(조달청)	: 2017.  4. 20.

◦ 실시설계 적격자 선정(조달청)	: 2017. 10. 13.

◦ 실시설계 완료	: 2018.  3. 11.

◦ 도시관리계획(도로) 결정 변경 및 지형도면 고시	: 2018.  7.  5.

◦ 시설공사 착공	: 2018.  7. 30.

◦ 시설공사 준공	: 2022.  7. 28.

위 치 도(계획평면도)

전경사진

8		관문지구 행복주택 건설

허가민원과 안준성(659-4029)

실태		□ 서민의 주거안정 및 주거수준 향상을 도모하여 쾌적한 주거생활 도모
추진방향		□ 200세대(아파트 1개동, 지상 15층) 건설
기대효과		□ 주거안정 및 구도심 지역에 인구유입을 통한 지역경제 활성화 유도

사 업 개 요

◦ 위    치 : 관문동 251-2번지 일원(구 동시장)

◦ 사업기간 : 2016. 10. ~ 2020. 7.

◦ 사업규모 : 200세대(아파트 1개동, 지상 15층)

◦ 사 업 비 : 215억원(시비 17, LH 191)

◦ 공 정 률 : 5%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2018년까지	2019년 이후	비 고
계	215	115	100
국 비
도 비
시 비	17	17
기 타	198	98	100

사업진행 현황

◦ 행복주택 후보지 선정(국토교통부)	: 2012.  8. 27.

◦ 토지보상 완료(4필지, 1,358㎡)	: 2016.  8. 22.

◦ 주택건설사업계획 승인(국토교통부)	: 2016. 12. 16.

◦ 동시장 및 지장물 철거	: 2017.  9. 29.

◦ 착공	: 2018.  1. 25.

위 치 도

전경사진 (조감도)

9		치매안심센터 신축

보건사업과 김용현(659-4396)

실태		□ 치매안심센터 확충으로 치매관리 인프라 보강 및 환자와 그 가족을 체계 적으로 통합 지원
추진방향		□ 치매국가책임제에 대한 치매안심센터 설치 운영
기대효과		□ 치매환자의 의료․돌봄 서비스 이용 증가에 따른 사회적․경제적 부담가중 으로 치매에 대한 공공의료서비스의 적극적인 대처

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 봉강동 323-10, 323-11

◦ 사업기간 : 2017년~2019년(공사기간 2018. 12. 20. ~ 2019. 6. 12.)

◦ 사업규모 : 지상3층/1동, 연면적 876.70㎡

◦ 사 업 비 : 34.5억원(국비 9.6, 도비 1.2, 시비 23.7)

- 토지매입비 : 16.5억원

- 공  사  비 : 18억원

◦ 공 정 률 : 10%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2018년까지	2019년 이후	비 고
계	34.5	16.5	18
국 비	9.6		9.6
도 비	1.2		1.2
시 비	23.7	16.5	7.2
기 타

사업진행 현황

◦ 공유재산관리계획(신축) 심의 의결	: 2018.  3. 29.

◦ 치매안심센터 신축 기본 계획 수립	: 2018.  4.  9.

◦ 치매안심센터 신축 부지 매입	: 2018.  5.  3.

◦ 치매안심센터 기본 및 실시설계 용역 준공	: 2018. 11.  5.

◦ 치매안심센터 신축공사 도 계약심사 완료	: 2018. 11. 20.

◦ 치매안심센터 신축공사 착공	: 2018. 12. 20.

◦ 치매안심센터 신축공사 준공	: 2019.  6.

위 치 도

전경사진 (조감도)

10		자산교 재가설공사

도로시설관리과 안병현(659-5118)

실태		□ 노후된 기반시설을 정비하여 자산교를 이용하는 차량 및 보행자의 안전 확보
추진방향		□ 자산교 재가설(L=30m, B=10.9m)
기대효과		□ 도로 시설물 정비를 통한 안전사고 예방

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 종화동 885-1번지 일원(자산교)

◦ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2019. 12.

◦ 사업규모 : 자산교 재가설 L= 30m, B=10.9m

◦ 사 업 비 : 33억원(시비 33)

◦ 공 정 률 : 50%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2018년까지	2019년 이후	비 고
계	33	11	22
국 비
도 비
시 비	33	11	22	특별교부세 10억 포함
기 타

사업진행 현황

◦ 실시설계용역 완료	: 2017. 10. 20.

◦ 재난안전특별교부세 교부	: 2018. 12. 28.

◦ 공사 착공(총괄 및 1차)	: 2018.  1. 19.

◦ 2차분 착공	: 2018. 12. 28.

◦ 1차분 준공	: 2018. 12. 30.

위 치 도

여수여고

자산공원

공 사 위 치

전경사진 (조감도)

11		여수 상징문 및 쉼터 조성공사

도로시설관리과 안병현(659-5118)

실태		□ 임란 당시 삼도수군통제영이었던 우리 시의 역사적 사실 홍보 □ 쉼터 조성을 통한 국도 17호선 이용객의 피로해소에 따른 사고 예방
추진방향		□ 상징문 및 쉼터 조성
기대효과		□ 우리 시의 지역특성을 나타낼 수 있는 매력적이고 관광명소 개발 및 도로 안전기능 강화

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 소라면 대포리 산 121-9(국도 17호선)

◦ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2019. 6.

◦ 사업규모 : 상징문 1식, 쉼터조성 1,200㎡

◦ 사 업 비 : 29억원(시비 29)

◦ 공 정 률 : 60%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2018년까지	2019년 이후	비 고
계	29	16	13
국 비
도 비
시 비	29	16	13
기 타

사업진행 현황

◦ 도로점용(연결)허가(순천국토관리사무소)	: 2017.  6. 14.

◦ 공사착공	: 2017. 10. 20.

◦ 공사준공	: 2019.  6.  7.

◦ 도로점용공사 준공 승인	: 2019.  6. 25.

위 치 도

공사현장

해산교차로

덕양교차로

대포터널

대포쉼터

공사현장

대 포 교

여수국가산단

전경사진 (조감도)