109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 여수시에서 ‘17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
여수 이순신 도서관 건립	19,890	44	4,899	14,947	2,019	2016	40
여수 충무지역 새뜰마을사업	4,693	729	440	3,524	2019	2016	30
가고 싶은 섬 낭도 가꾸기	4,400	2,000	800	1,600	2,019	2016	70
여수 청소년해양 교욱원 건립	17,100	-	2,800	14,300	2020	2016	10
수산물처리저장 시설 건립	7,900	-	5,530	2,370	2018	2016	60
어르신 다목적 체육센터 건립	9,720	-	2,800	6,920	2019	2016	30
여문공원 공영주차장 신축	5,500	-	145	8,355	2018	2016	30
둔덕동 주민자치 센터 신축	3,600	700	2,900	-	2018	2016	70
궁항~달천 도로개설	2,700	50	2,450	200	2018	2016	80
관문지구 행복주택 건설	21,743	1,677	220	19,846	2020	2017	9
여수상징문 설치 및 쉼터 조성사업	2,910	110	2,500	300	2018	2017	21
남산동 43-17 일원 급경사지 정비사업	2,500	-	1,000	1,500	2018	2017	20

개별 투자심사 사업 추진현황 1

사업명

여수 이순신도서관 건립

담당자

시립도서관 위준용(☎659-4780)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화, 교육, 정보 등 복합 기능을 갖춘 여수시 대표 공공도서관을 건립

○ 다양한 세대가 문화적 융합을 이룰 수 교육문화 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 9. ~ 2019. 5.

○ 위 치 : 여수시 웅천동 1820-2번지 일원(에듀파크 부지)

○ 규 모 : 지상4층, 지하1층 / 연면적 5,621.79㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,890백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	19,890	44	4,899	1,2531	2,416
국 비	5,350		225	4,225	900
시 도 비
시군구비	14,540	44	4,674	8,306	1,516
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사진행중 40%)

○ 2015. 10.  5. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

○ 2016.  6.  9. : 2016년 제2차 지방재정 중앙투자심사 완료

○ 2016.  9. 30. : 건축설계공모 공고

○ 2017.  2. 13. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2017. 11. 16. : 기본 및 실시설계용역 준공

□ 향후계획

○ 2018.  1.  3. : 공사 착공

○ 2018.  2.  1. : 기공식

○ 2019.  5. 27. : 여수 이순신도서관 준공

○ 2019.  7. 31. : 여수 이순신도서관 개관

□ 사업변경 내역

○ 실시설계 구체와 및 설계기간 지연으로 사업규모, 사업기간 변경

(당초) 부지면적 8,856㎡, 연면적 5,600㎡, 사업기간 ‘14. 9. 2. ~ ’18. 5.31.

(변경) 부지면적 7,120㎡, 연면적 5,622㎡, 사업기간 ‘14. 9. 2. ~ ’19. 5.27.

개별 투자심사 사업 추진현황 2

사업명

여수 충무지역 새뜰마을사업

담당자

도시재생과 황용순(☎659-4560)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시 달동네 판자촌, 노후주택 등 열악한 주거환경 개선

○ 쾌적한 주거환경 정비로 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016~2019

○ 위 치 : 여수시 충무동 일원

○ 규 모 : 마을 소통길 조성, 마을기업육성, 상⋅하수도 정비, 소공원조성,

집수리, 소공원조성, 재래식화장실 정비, 주민역량강화

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,693백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,693	729	440	1,143	2,381
국 비	3,201	510	300	800	1,591
시 도 비	422	66	42	103	237
시군구비	1,070	153	98	240	553
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2016년 새뜰마을사업 공모 선정                      : ‘16. 2. 3.

○ 마스터플랜 수립 승인(국토부)                       : ‘17. 8. 6.

□ 향후계획

○ 거점형 공간 조성(다목적커뮤니센터 등)              : ‘18. 8. ~ ’19. 12.

○ 휴먼케어 및 주민역량강화 교육                      : ‘18. 9. ~’19. 12.

○ 기반시설 확충(우⋅오수시설 정비 등)                : ‘18. 9. ~’19. 12.

□ 사업변경 내역

○ 마스터플랜 계획 수립 후 사업비 변경

- (당초) 6,800백만원⇒ (변경) 4,693백만원 변경

개별 투자심사 사업 추진현황 3

사업명

가고 싶은 섬 낭도 가꾸기

담당자

섬자원개발과 정을룡(☎659-3987)

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬 고유 생태자원의 보존과 회복 및 매력적인 섬 문화 관광자원화를 통한 섬 부가가치 창출

◦ 주민과 지자체가 함께하는 섬 가꾸기를 추진하여 주민 자발적인 참여 유도 및 마을소득 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 여수시 화정면 낭도 일원

○ 내 용 : 탐방로 조성 L=3.2㎞, 마을회관 리모델링 1식, 중학교 리모델링 1식,

규포 어가민박, 갯가길 및 경관조성, 야영장 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,400	2,000	800	800	800
국 비
시 도 비	2,000	800	400	400	400
시군구비	2,000	800	400	400	400
지 방 채
민간자본	400	400
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ ‘15.  8.     : 기본계획 수립

○ ‘16.  9. 25. : 복지회관 및 간이매표소 리모델링 완료

○ ‘17.  7. 13. : 마을환경정비 완료

○ ‘17. 11. 27. : 탐방로 조성 완료

○ ‘17. 12. 29. : 돌담길, 갯가길 조성 완료

□ 향후계획

○ ‘18. 12. : 낭도중학교 관사동 리모델링 완료

○ ‘19.  3. : 야영장 조성 완료

○ ‘19. 12. : 총사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황 4

사업명

여수 청소년해양교육원 건립

담당자

투자유치박람회과 배영노 (☎659-3291)

□ 사업목적 및 필요성

○청소년 해양재난 대처능력 배양을 위한 전문 안전체험 및 교육기관 설립

○자유학기제 전면 시행에 따른 안전하고 신뢰성 있는 체험학습 공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2020.

○ 위 치 : 여수시 수정동 776번지(2012여수세계박람회장 내)

○ 규 모 : 대지면적 4,710㎡, 연면적 6,100㎡, 지하1층,지상4층/1동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	17,100		2,800	4,550	9,750
국 비	9,800	-	1,960	3,185	4,655
시 도 비	2,100	-	420	683	997
시군구비	5,200	-	420	682	4,098
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘17.  6. 14. : 기본 및 실시설계용역 착수(설계공모)

○ ‘17.  9. 19. : 설계 경제성검토용역, 실시계획승인용역 착수

○ ‘17. 12. 31. : 기본 및 실시설계용역 진행 중

□ 향후계획

○ ‘18. 10. : 착공

○ ‘20.  6. : 준공 및 개원

개별 투자심사 사업 추진현황 5

사업명

수산물처리저장시설건립

담당자

수산경영과 박상영(☎659-3911)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대형어선의 위판 유도 및 저렴한 수산물 공급을 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 6. 20. ~ 2018. 6. 11.

○ 위 치 : 여수시 봉산동 100-7번지 외4필지

○ 규 모 : 연면적 4,588.81㎡/지상5층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,900		5,530	2,370	0
국 비	2,280		1,596	684	0
시 도 비
시군구비	2,280		1,596	684	0
지 방 채
민간자본	3,340		2,338	1,002	0
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ ‘16.11.21. : ’17~‘21년 중기지방재정계획 반영

○ ‘17. 5.24. : 실시설계 및 건축인허가 완료

○ ‘17. 6. 7. : 보조금 교부결정

○ ‘17. 6.20. : 사업 착공

□ 향후계획

○ ‘18. 6.11. : 사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 층고변경 및 기상악화에 따른 사업규모, 사업기간 변경

(당초) 연면적 4,562.27㎡, 사업기간 2017.6.20.~2018.2.28.

(변경) 연면적 4,588.81㎡, 사업기간 2017.6.20.~2018.6.11.

개별 투자심사 사업 추진현황 6

사업명

어르신 다목적체육센터 건립

담당자

노인장애인과 노상철(☎659-3733)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고령사회를 맞아 어르신들이 건강하고 활기찬 노후를 누릴 수 있도록 다목적체육센터 건립(우리 시 65세이상 인구 48천명-전체인구 17%)

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016 ~ 2018

○ 위    치 : 여수시 웅천동 1820-2번지(에듀파크 부지)

○ 사 업 량 : 면적 4,500㎡, 연면적 2,727㎡(지상 3층)

○ 사업내용 : 다목적체육관, 상설스포츠실, 체력단련실, 게이트볼장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,720백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,720		2,800	6,920
국 비	2,800			2,800
시 도 비
시군구비	6,920		2,800	4,120
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 기본 및 실시설계 용역	: ‘17.  5. ~ 11.

○ 공사(도급) 계약체결	: ‘17. 12. 15.

□ 향후계획

○ 기공식	: ‘18.  2.

○ 준공 및 개관	: ‘19.  3.

□ 사업변경 내역

○ 실시설계 구체화에 따른 사업비 변경(당초 8,500백만원 ⇒ 변경9,720백만원)

개별 투자심사 사업 추진현황 7

사업명

여문공원 공영주차장 신축공사

담당자

교통과 김지아(☎659-4149)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여서․문수지구의 주차공간 협소로 주차시설 확보를 통한 주차난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2018. 9.

○ 위 치 : 여수시 문수동 169번지

○ 규 모 : 주차전용건축물 신축(철골조, 지상3층, 주차 253면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,500		145	5,355
국 비	1,750		72.5	1677.5
시 도 비
시군구비	3,750		72.5	3,677.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30%)

○ 사업계획(35억→55억) 변경	: ‘16.  3. 25.

○ 지방재정 전남도 투자심사 재심사(사업비 증액)	: ‘16. 10. 18.

○ 공유재산 관리계획 변경 의결	: ‘17.  4.  4.

○ 여문공원 지구단위계획 재정비 완료	: ‘17. 10. 12.

○ 계약 심사 및 설계용역 완료	: ‘17. 12. 11.

□ 향후계획

○ 공사 착공	: ‘18.  1.  5.

○ 공사 완료	: ‘18.  9.

□ 사업변경 내역

○ 부지 확장에 따른 사업비 변경(당초 3,500백만원 ⇒ 변경5,500백만원)

개별 투자심사 사업 추진현황 8

사업명

둔덕동 주민자치센터 건립

담당자

회계과 지상훈(☎659-3223)

□ 사업목적 및 필요성

○ 30년 이상 경과된 노후 건축물로 주민 자치공간 부족 등 주민센터 이용자의 불편 초래하고 있는 실정으로, 보다 편리한 행정서비스 제공과 복지․문화․여가공간 확보를 통한 삶의 질 향상 및 지역공동체 형성의 구심체 역할 담당할 수 있도록 주민자치센터 신축 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 2. ~ 2018. 5.

○ 위 치 : 여수시 좌수영로 509(둔덕동)

○ 규 모 : 지상3층/1동, 연면적 1,276.97㎡ 건물 신축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,600	700	2,900
국 비
시 도 비
시군구비	3,600	700	2,900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ ‘16. 10. : 전라남도 지방재정투자심사

○ ‘16. 12. : 공유재산관리계획 의결

○ ‘17.  7. : 실시설계용역 완료

○ ‘17.  8. : 공사계약 체결 및 착공

○ ‘17. 12. : 1층 레미콘 타설 완료

□ 향후계획

○ ‘18.  5. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 증가에 따른 사업비 변경(당초 3,300백만원 → 변경 3,600백만원)

개별 투자심사 사업 추진현황 9

사업명

궁항 ∼ 달천 도로 개설

담당자

도로과 황규석(☎659-4076)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민의 오랜 숙원사업 해결 및 사회간접자본 확충으로 지역균형 발전 도모

○ 자연풍광과 멋을 살리는 도로기반 시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 2 ~ 2018. 6.

○ 위 치 : 여수시 소라면 복산리 1916번지 일원

○ 규 모 : L= 1,080m, B= 8.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	2,700	50	2,450	200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 실시설계용역	: ‘14. 2. ~ ’14. 2.

○ 도로구역 결정 고시(실시계획인가 포함)	: ‘16. 12.

○ 보상 추진	: ‘17. 1. ~ ’17. 12.

○ 공사 시행	: ‘17. 4. 25.

□ 향후계획

○ 준공	: ’18.  6.

개별 투자심사 사업 추진현황 10

사업명

관문지구 행복주택 건설

담당자

허가민원과 김경열(☎659-4098)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사회초년생, 대학생, 신혼부부 등 젊은 층과 노인 및 취약계층의 주거안정을 위한 행복주택 건설(200호) 추진

○ 인구유입을 통한 원도심 지역경제 활성화 및 노후된 도시공간 정비

□ 사업개요

○ 위    치 : 여수시 관문동 251-2번지 일원

○ 부    지 : 3,097㎡(사유지 4필지, 시유지 1필지)

○ 규    모 : 200세대(16㎡형 36, 26㎡형 40, 36㎡형 124), 지상15층

○ 사업시행 : 여수시(부지제공), LH(건설, 운영)

○ 사 업 비 : 217억원 [용지비(시) 19, 시설비(LH) 198]

○ 입주대상 : 대학생, 신혼부부, 사회초년생, 노인 및 취약계층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,743백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	21,743	1,677	220	9,846	10,000
국 비
시 도 비	1,943	1,677	220	46	-
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타	19,800	-	-	9,800	10,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  9%)

○ 2016.  4. 22. : 행복주택 후보지 선정(국토교통부)

○ 2016.  8. 22. : 토지보상 완료(4필지, 1,358㎡)

○ 2016. 12. 16. : 주택건설사업계획 승인(국토교통부)

○ 2017.  9. 29. : 동시장 및 지장물 철거

□ 향후계획

○ 2018.  1. : 착공

○ 2019.  1. : 입주자모집공고

○ 2020.  1. : 준공 및 입주

개별 투자심사 사업 추진현황 11

사업명

여수 상징문 설치 및 쉼터 조성사업

담당자

도로관리사업소 박채원(☎659-5118)

□ 사업목적 및 필요성

○ 임란 당시 최초의 삼도수군 통제영이었던 우리시의 역사적 사실을 대내외에 알리고, 이를 기념할 수 있는 관문상징물을 설치하여 새로운 관광명소로 개발하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2018

○ 위 치 : 여수시 소라면 대포리 일원(여수~순천 자동차전용도로 내)

○ 규 모 : 상징문 1식, 쉼터조성 A=1,200㎡, 가감속차로 L=415m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,910백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,910	110	2,500	300
국 비
시 도 비
시군구비	2,910	110	2,500	300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 21%)

○ 기본계획 수립	: ‘15.  3. ~ 9.

○ 기념문 명칭 확정	: ‘15. 12. 23.

○ 실시설계용역	: ‘17.  1. ~ 11.

○ 도로점용(연결)허가	: ‘17.  6. 14.

○ 공사 착공	: ‘17. 10. 20.

□ 향후계획

○ 공사 준공	: ‘18.  8.

□ 사업변경 내역

○ 실시설계 후 총사업비 변경 (당초 4,100백만원 ⇒ 변경 2,910백만원)

개별 투자심사 사업 추진현황 12

사업명

남산동 43-17일원 급경사지 정비사업

담당자

도로관리사업소 김 혁(☎659-5111)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남산동(돌산대교) 일원 급경사지를 정비하여 재해를 사전에 예방하고 최근 늘어난 교통수요를 감안 돌산대교 주변 교통체계를 개선(회전교차로 설치)하여 쾌적한 도로환경을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2018

○ 위 치 : 여수시 남산동 43-17번지 일원(돌산대교 입구)

○ 규 모 : 급경사지 정비 및 교통개선(회전교차로 설치) L= 280m, A= 7,865㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,500		1,000	1,500
국 비
시 도 비
시군구비	1,500			1,500
지 방 채
민간자본
기 타	1,000		1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 실시설계용역 착수	: ‘17.  2. 14.

○ 일상감사 및 계약심사	: ‘17.  7. 21.

○ 공사 계약(총괄 및 1차분)	: ‘17.  9.  1.

○ 공사 착공	: ‘17.  9.  8.

□ 향후계획

○ 2차분 착공	: ‘18.  2.

○ 1차분 준공	: ‘18.  3.

○ 총괄 준공	: ‘18. 10.

□ 사업변경 내역

○ 실시설계 후 사업비 변경(당초 2,200백만원 ⇒ 변경 2,500백만원)

10-2. 지방채 발행사업

우리 여수시에서 ‘17년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
	해		당		없		음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2017년에 추진한 사업

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

☞ “해당없음”

10-3. 민간투자사업

우리 여수시에서 ‘17년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’16년까지 부담액	’17년 부담액	’18년 이후 부담 예정액
BTL	2005년도 하수관거정비	푸른여수지키미(주)	38,662	29,489	4,547	56,343	2010. 3. 31. ~ 2030. 3. 30.
	2008년도 하수관거정비	여수맑은물사랑(주)	55,475	15,382	5,773	94,893	2014. 2. 14. ~ 2034. 2. 13.
BTO	음식물자원화시설 설치사업	㈜여수엑스포환경	11,349	32,623	2,644	20,309	2010. 1. 15. ~ 2030. 1. 14.

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2017년까지는 집행액(결산기준), 2018년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

▢ 하수관거정비사업

⚪ 민간사업자가 관리운영권 행사의 방법으로 약정한 기간 동안 지자체 등에 시설을    임대하고, 약정된 임대료 수입을 통해 투자비 회수(국비 70%, 시비 30%)

⚪ 시설임대료는 현재가치로 평가하여 부채로 계상하고 있음

⚪	시설임대료 = 총민간투자비	×	수익률
			1-(1+수익률)-(임대기간)

▢ 음식물자원화시설 설치사업

⚪ BTO 사업의 재정부담액은 연간 음식물 처리량에 톤당 단가를 곱한 금액. 매년 일정 규모의 사용료가 지출 되므로 재정부담이 큼.

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황 1

사업명

2005년 하수관거 BTL 사업

담당자

하수도과 고영란(☎659-4998)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재원조달의 한계로 장기간이 소요되는 하수관거 정비사업을 민간자본을       활용하여 정비함으로써 하수처리장 운영효율 향상 및 하천수질개선 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2006. 7. 31. ~ 2010. 3. 30.

○ 위    치 : 6개처리 분구(학동, 화장, 신월, 여도, 둔덕, 세구지)

○ 민간사업자 : 푸른여수지키미㈜

○ 총사업비 : 38,662백만원

○ 사업규모 : L=47.7㎞, 배수설비 4,036개소

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : ‘10. 3. 31 ～’30. 3. 30.(20년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	90,379	29,489	4,547	4,547	51,796
국 비	57,229	18,819	2,906	2,906	32,598
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	33,150	10,670	1,641	1,641	19,198
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영 중(운영기간 : 2010. 3. 31. ~ 2030. 3. 30.)

□ 향후계획

○ 매분기 성과평가에 따라 임대료, 운영비 지급

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황 2

사업명

2008년 하수관거 BTL 사업

담당자

하수도과 고영란(☎659-4998)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재원조달의 한계로 장기간이 소요되는 하수관거 정비사업을 민간자본을       활용하여 정비함으로써 하수처리장 운영효율 향상 및 하천수질개선 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010. 12. 14. ~ 2014. 2. 13.

○ 위    치 : 6개처리 분구(연등, 여서, 웅천, 여천, 소호, 수정)

○ 민간사업자 : 여수맑은물사랑㈜

○ 총사업비 : 45,596백만원

○ 사업규모 : L=34.76㎞, 배수설비 4,403개소

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : ‘14. 2. 14 ～’34. 2. 13.(20년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	116,048	15,382	5,773	5,773	89,120
국 비	71,289	9,366	3,565	3,565	54,793
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	44,759	6,016	2,208	2,208	34,327
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영 중(운영기간 : 2014. 2. 14. ~ 2034. 2. 13.)

□ 향후계획

○ 매분기 성과평가에 따라 임대료, 운영비 지급

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황 3

사업명

음식물자원화시설 설치사업

담당자

도시미화과 김수정 (☎659-3848)

□ 사업목적 및 필요성

○ 음식물쓰레기의 원활한 처리를 통해 쾌적한 생활 환경 유지

○ 음식물류 폐기물의 호기성 퇴비화로 자원화

□ 사업개요

○ 기    간 : ‘10. 1. 15 ～’30. 1. 14(20년)

○ 위    치 : 여수시 진달래길 310-142(월내동)

○ 민간사업자 : (주)여수엑스포환경

○ 총사업비 : 11,349백만원

○ 사업규모 : 90톤/일(호기성 퇴비화)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : ‘10. 1. 15 ～’30. 1. 14(20년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	55,576	32,623	2,644	2,408	17,901
국 비
시 도 비
시군구비	55,576	32,623	2,644	2,408	17,901
기 타

□ 추진단계

○ 현재 운영 중

□ 향후계획

○ 사용료는 매년 물가상승분 반영(2017년 단가 : 87,180원/톤, 2018년 단가 : 89,086원/톤)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음