7		여문공원 공영주차장 신축

교통과 김지아(659-4149)

실태		□ 여서·문수지구의 주차 공간 부족에 따른 상가 주변 불법 주차 해소로 상가 이용 활성화 및 정주여건 개선
추진방향		□ 주차전용건축물 신축
기대효과		□ 상가, 주거 밀집지역의 주차난 해소와 불법 주정차 예방

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 문수동 169번지

◦ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2018. 9.

◦ 사업규모 : 주차전용건축물 신축(연면적 5,780㎡, 지상3층, 주차 253면)

◦ 사 업 비 : 55억원(국 17.5, 시 37.5)

◦ 공 정 률 : 50%(1층 기초공사 완료)

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2017년까지	2018년 이후	비 고
계	55	55
국 비	17.5	17.5
도 비
시 비	37.5	37.5
기 타

사업진행 현황

◦ 지방재정투자사업 심사(여수시)/35억원	:‘15.  8.  5.

◦ 사업계획 변경(35억 → 55억)	:‘16.  3. 25.

◦ 지방재정 투자사업(전라남도)/55억원	:‘16.  8. 12.

◦ 공유재산 관리계획 변경 의결	:‘17.  4.  4.

◦ 여문공원 지구단위계획 재정비 완료	:‘17. 10. 12.

◦ 실시설계용역 및 계약심사 완료	:‘17. 12. 11.

◦ 공사 착공	:‘18.  1.  5.

위 치 도

전경사진