9

주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

우리 여수시에서 ‘15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

사 업 명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
여수시 장애인 국민체육센터 건립	8,000		1,000	7,000	2017	2015	10
제10회 전국 해양스포츠제전	1,500		1,500		2015	2015	100
학용정수장 고도처리시설 설치	15,915	862		15,053	2013	2015	5
서도항(지방어항) 시설 확충	7,000		625	6,375	2018	2015	5
여수시육아종합 지원센터 건립	3,000			3,000	2017	2015	30
여자만 연안생태 휴양마을 조성	9,000		1,000	8,000	2018	2015	5
여수 광림지역 새뜰마을 조성	8,500		1,572	6,928	2018	2015	15
율촌 봉전지구 택지개발사업	90,100			90,100	2020	2015	5
오동도 입구 공영 주차장 조성사업	3,500			3,500	2016	2015	30
여문공원 공영 주차장 조성사업	3,500			3,500	2017	2015	0
2016한국마이스연례 총회 및 마켓플레이스	490			490	2016	2015	100
화양면 소장 ~ 굴구지 도로확장	2,600	40	200	2,360	2017	2015	10
전라좌수영 동헌일원 복원	2,1500		30	21,470	2022	2015	10
손죽도 도서식수원 개발사업	2,500			2,500	2017	2015	5
여수국가산업단지 혁신지원센터 구축	12,800		958	11,842	2018	2015	5
신덕지구 연안정비	6,500			6,500	2019	2015	10
2016년 한국농업 경영인 전국대회 개최	1,000			1,000	2016	2015	70
남면사무소 신축	3,170			3,170	2017	2015	0

(단위 : 백만원, %)

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

여수시 장애인 국민체육센터 건립

담당자

체육지원과 배영노(☎659-3268)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인 체육활동 여건을 조성하여 체육활동 욕구 충족 및 여가 선용 기회 제공

○ 장애인 복지향상 및 문화․소통 공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 9. ~ 2017. 12.

○ 위 치 : 여수시 오림동 102번지 일원

○ 규 모 : 연면적 4,200㎡, 지상3층 1동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	8,000		1,000	5,000	2,000
국 비	5,000		1,000	3,000	1,000
시 도 비
시군구비	3,000			2,000	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘15. 4. 29. : 국민체육진흥기금 지원사업 공모 선정(문화체육관광부)

○ ‘16. 1. 14. : 설계공모 당선작 선정

○ ‘16. 2.  4. : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ ‘16. 10. : 기본 및 실시설계용역 완료

○ ‘16. 12. : 공사 발주 및 착공

○ ‘17. 12. : 준공

□ 사업변경 내역

○ 해 당 없 음

사업명

제10회 전국해양스포츠제전

담당자

체육지원과 문재동(☎659-3254)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세계 각국 철인 3종 경기 동호인이 대거 참여하는 ‘15년 세계대회를  통해 국제해양관광 중심인 우리시에서 유치 및 개최

○ 국제 체육행사를 개최함으로써 도시기능의 활력 및 해외관광객을 유치하여 지역경제 활성화 기여

○ 행사 및 주 경기장소를 박람회장 일원으로 하여 박람회장 사후활용 등 여수 브랜드 가치 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 8.13 ~ 8. 16.

○ 위 치 : 여수시 박람회장 일원

○ 규 모 : 5,000명 참여(내국인 4,000명, 외국인 1,000명)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  1,410백만원(국비 610, 도240, 시560)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	1,216		1,216
국 비	598		598
시 도 비	240		240
시군구비	378		378
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ '15. 2. : 전국해양스포츠제전 T/F팀 구성 및 기본계획 수립

○ '15. 3. : 추진위원회(27명) 및 소위원회(7명) 구성

○ '15. 3. : 준비계획 수립(20개부 50팀 기관․단체 업무분장)

○ '15. 6. : 공식행사 운영 대행사 선정 (여수문화방송/주)

○ '15. 7. : 종합실행계획 수립(공식행사, 경기, 안전대책, 교통대책 등)

○ '15. 7. : 종합상황실 운영, 초청장 발송, 경기장 설치

○ '15. 8. 13. ~ 16 : 제전 추진

□ 향후계획

○ 해 당 없 음

사업명

학용 정수장 고도정수처리시설 설치

담당자

상수도과 이재태(☎659-4909)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고도정수처리시설로 내염소성병원성 미생물 등을 제거하여 안전한 수돗물 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 1. ~2023. 11.

○ 위 치 : 여수시 학용동 학용정수장

○ 규 모 : 고도정수처리시설(막여과) Q=42,000㎥/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,915백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	15,915	862		2,641	12,412
국 비	11,141	603		1,849	8,688
시 도 비
시군구비	4,774	259		792	3,724
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5 %)

○ 2015.  5. 27. : 전라남도 지방재정 투자사업 심사 완료

○ 2015. 11. 25. : 계약의뢰(여수시 → 조달청)

○ 2016.   3. 23. : 막여과 공법분 신기술사용협약서 변경 협의

□ 향후계획

○ 2016.  8.  : 신기술사용협약서 변경

○ 2016. 10.  : 공사착공

○ 2023. 11.  : 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 당초 사업비 18,400백만원/변경사업비 15,915백만원

사업명

서도항(지방어항)시설 확충

담당자

섬자원개발과 차재원(☎659-3991)

□ 사업목적 및 필요성

○ 매년 태풍 및 해일 내습 시 어항 피해발생 대비

○ 정온 수역 확보하여 어선의 대피장소 확보

□ 사업개요

○ 위    치 : 삼산면 서도리 827-9 서도항

○ 공사개요

- 위    치 : 삼산면 서도리 827-9 서도항

- 사 업 량 : 방파제 L=165m, 물양장L=200m

- 사업기간 : 2016. 01. ~ 2018. 12.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
계	7,000		625	1,250	5,125
국 비	5,600		500	1,000	4,100
시 도 비
시군구비	1,400		125	250	1,025
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ‘10. 6.    : 서도항 기본계획 재정비 시행 및 전남도 협의

○ ‘15. 8. 4  : 용역 계약심 결과 통보

○ ‘15. 9. 1~’15. 11. 28 : 수심 및 현황 측량용역

○ ‘15. 9. 17 : 실시설계용역 계약

○ ‘15. 9. 23 : 실시설계용역 착공

○ ‘15. 9. 30~ 12. 28 : 토질조사용역

○ ‘16. 3. 24 : 사전재해영향성검토서 협의

○ ‘16. 4. 22 : 2016년 제3회 여수시 설계자문 위원회개최

○ ‘16. 6. 15 : 계약심사결과 통보 (전라남도→여수시)

○ ‘16. 6. 23 : 총사업비 변경승인

○ ‘16. 7. 11 :  계약심의결과 통보

□ 향후계획

○ ‘16.  8.  : 공사 착공

○ ‘18. 12.  : 공사 준공

사업명

여수시 육아종합지원센터 건립

담당자

여성가족과 선인숙(☎659-3763)

□ 사업목적 및 필요성

○ 저출산 문제의 극복을 위하여 가족공동체의 육아기능 보완과 창의적인 놀이체험

공간을 활용한 지역사회 중심의 육아지원

○ 일시보육 서비스 및 다양한 양육지원 프로그램 제공으로 이용자들의 편의 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. ～ 2017.

○ 위 치 : 여수시 웅천택지 제2단계 개발지구내(노유자 부지2)

○ 규 모 : 육아종합지원센터 신축 1식 (연면적 1,400㎡, 지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,000			135	2,865
국 비	1,000				1,000
시 도 비	300				300
시군구비	1,700			135	1,565
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ ‘14. 10. 14. : 육아종합지원센터 건립사업 계획 수립

○ ‘15.  6. 12. : 자체 투자사업 심의

○ ‘15. 11. 19. : 중기재정계획 반영

○ ‘15. 12.  3. : ’16년 국비 예산(10억) 확보

○ ‘16.  4.  1. : 도비지원 예산 건의

○ ‘16.  5. 26. : 도비 3억원 확보(2016년 제2회 추경)

○ ‘16.  5. 31. : 부지매입(특별회계→일반회계)

□ 향후계획

○ ‘16.  7.～ 12. : 기본 및 실시설계

○ ‘17.  2.～ 10. : 착공 및 준공

○ ‘17. 12.      : 개원(예정)

사업명

여자만 연안생태 휴양마을 조성사업

담당자

관광과 정준호(☎659-3882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 갯벌, 섬, 낙조 등 관광자원을 연계한 연안생태 휴양 마을을 조성

○ 여자만과 여자도를 연계하는 휴양과 힐링 관광지로 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2018

○ 위 치 : 여수시 소라면 복산리 일원

○ 규 모 : 수변공원조성, 정소공원, 생태마을 정비, 복합관광센터 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	9,000		1,000	2,000	6,000
국 비	4,250		500	1,000	2,750
시 도 비
시군구비	4,250		500	1,000	2,750
지 방 채
민간자본	500				500
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ‘13.  9.    : 남해안관광클러스터조성사업 반영(문체부 사업)

○ ’15.  6. 19. : 기본계획수립 용역 준공

○ ’15.  7. 28. : 지방재정 투융자 심사 완료(전남도)

○ ’16.  1. 11. : 실시설계 착수

□ 향후계획

○ ’16.  8. : 실시설계 준공

○ ‘16. 11. : 공사 착공

사업명

여수 광림지역 새뜰마을사업 조성

담당자

도시재생과 윤대근(☎659-4559)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시 달동네 판자촌, 노후주택 등 열약한 주거환경 개선

○ 쾌적한 주거환경 정비로 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. ~ 2019.

○ 위 치 : 광무동 611-2번지 외 383 (38,511㎡, 499명 거주)

○ 규 모 :  4개분야 13개사업(안전 확보 3, 생활·위생 4, 주택정비 3, 주민역량강화 3)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	8,500		1,572	1,474	5,454
국 비	4,900		1,100	990	2,810
시 도 비	600		141	127	332
시군구비	3,000		331	357	2,312
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 공모사업 선정	: ’15.  3. 24.

○ 중앙부처 전문가 현장 지도	: ’15.  5.  6.

○ 총괄코디네이터 선정	: ’15.  7.  3.

○ 마스터플랜 수립 용역 착수	: ’15. 11. 24

□ 향후계획

○ 국토부 사전검토	: ’16.  7.

○ 마스터플랜용역 완료	: ’16.  9.

○ 소방도로 공사시행	: ’16. 11.

□ 사업변경 내역

○ 당초 사업비 9,300백만원/변경사업비 8,500백만원

사업명

율촌 봉전지구 택지개발사업

담당자

공영개발과 전명수(☎659-4581)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여수시의 지속적인 인구감소에 체계적으로 대응하면서 인근 도시권으로의 인구 유출방지 및 율촌 2, 3산업단지 근로자와 도시은퇴자 등에 맞춤형 주택 공급을 위한 경제적이고 자연친화적인 택지 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. ～ 2020.

○ 위 치 : 여수시 율촌면 봉전리 일원

○ 규 모 : 596천㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 90,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	90,100			2,500	87,600
국 비
시 도 비
시군구비	90,100			2,500	87,600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5 %)

○ '13. 9. 12. : 택지개발 타당성조사 및 기본계획 용역 착수

○ '14.  1. ～ '14. 11. : 용역 중간보고(3회)

○ '15. 7. 21. : 타당성조사 및 기본계획 용역 준공

○ '15. 8.  5. : 자체 지방재정 투자심사 완료

○ '15. 10. 1. : 토지거래 허가구역 지정 고시

○ '16. 3.  4. : 개발행위허가 제한 지역 지정

○ '16. 4. 20. : 개발계획 및 실시설계용역 계약체결

○ ‘16. 6. 20. : 실시설계용역 착수 보고회

□ 향후계획

○ ‘16. 7. ～ ’17.  4. : 개발계획 및 실시설계용역 추진

○ ‘17. 1. ～ ’20. 12. : 보상 및 택지개발 부지 조성

사업명

오동도입구 공영주차장 조성사업

담당자

교통과 강한빛(☎659-4149)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오동도주변 관광지와 주변상가의 주차문제 해결로 지역경제 활성화 및   주민삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2016. 12.

○ 위 치 : 여수시 수정동 280번지

○ 규 모 : 일반철골조 3층/1동, 연면적 3,180㎡/ 주차 117면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,500			3,500
국 비	1,750			1,750
시 도 비
시군구비	1,750			1,750
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2015. 8.  5. : 지방재정투자심사

○ 2016. 5. 13. : 실시설계 완료

○ 2016. 6. 23. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2016. 12.    : 공사완료

□ 사업변경 내역

구분	부지면적	연면적	주차면수	비고
변경전	1,570㎡	3,500㎡	125면
변경후	1,722㎡	3,180㎡	117면

사업명

여문공원 공영주차장 조성사업

담당자

교통과 강한빛(☎659-4149)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여서․문수지역의 심각한 주차난 해소로 위축된 지역상권 활성화 및 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.

○ 위 치 : 여수시 문수동 196번지

○ 규 모 : 일반철골조, 3층/1동, 4,200㎡, 주차 160면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,500				3,500
국 비	1,750				1,750
시 도 비
시군구비	1,750				1,750
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2015. 8.  5. : 지방재정투융자심사

○ 2016. 2.  4. : 2017년 국비신청

○ 2016. 2. 26. : 공유재산 관리계획 의결

□ 향후계획

○ 2016.  5.   : 실시설계

○ 2016.  6.   : 공사착공

○ 2016. 12.   : 공사완료

사업명

2016한국마이스연례 총회 및 마켓플레이스

담당자

박람회활용과 김상규(☎659-3462)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여수세계박람회 개최를 계기로 확충된 MICE 인프라를 적극 활용하여 남해안권        MICE 중심도시 도약 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 2. 25.(목) ~ 2. 27.(토)

○ 위 치 : 여수세계박람회장 일원

○ 규 모 : MICE 관계자 1,500여명(내국인 1,300, 외국인 200)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 490백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	30			30
국 비
시 도 비	30			30
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타	460			460

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ ’15 연례총회(경주) 시 ’16 연례총회 개최지(여수) 홍보 : ’15. 3. 5 ~ 7.

○ ’16 연례총회 준비 워크숍 : ’15. 4. 23. ~ 4. 24.

○ 행사지원 기본계획 수립 : ’15. 9. 4.

○ 행사관계자 면담 등 업무협의 : ’15. 11. 19.

○ 행사지원 세부추진계획 수립 : ’16. 2. 23

○ 2016 마이스연례총회 및 마켓플레이스 개최 : ‘16. 2. 25. ~ 2. 27.

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 당초 : 시비 50백만원 / 변경 도비 : 30백만원

사업명

화양면 소장~굴구지 도로확장

담당자

도로과 전세용(☎659-4076)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민 숙원사업 해결 및 마을진입도로 확장으로 정주의식 고취

○ 농촌지역 도로망 확충으로 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 여수시 화양면 나진리 소장~굴구지마을

○ 공사개요 : 도로개설 L=1.31km, B=7.5m

○ 사업기간 : 2013. 1. ~ 2017. 12.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,600	40	200	2,360
국 비
시 도 비
시군구비	2,600	40	200	2,360
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 26%)

○ 2013.  4. 17. : 설계용역 착수

○ 2013. 10. 13. : 설계용역 완료

○ 2015. 10. 27. : 도시관리계획 및 실시계획인가 협의

○ 2015. 11. 12. : 도로노선지정공고 및 세목고시

○ 2016.  4. 21. : 착공

□ 향후계획

○ 2017. 12. : 공사완료

사업명

전라좌수영 동헌일원 복원

담당자

문화예술과 김경열(☎659-4757)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전라좌수영 수군의 본영이었던 동헌에 대한 복원사업으로 자랑스러운

국난극복의 역사를 회복하고 지역민의 자긍심을 고취하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 5. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 여수시 군자동 일원(국보 제304호 진남관 주변)

○ 규 모

- 토지매입 : 80필지(동산동, 군자동 일부 11,257㎡)

- 건물철거 및 발굴조사

- 건축물 복원 : 동헌 내 8동(운주헌, 결승당, 백화당, 공사문, 정변문, 내아, 무권재, 완경루)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	21,500		30	1,920	19,550
국 비
시 도 비
시군구비	21,500		30	1,920	19,550
지 방 채
민간자본
기 타

※ 문화재 지정 후 국도비 지원 추진

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2015. 5.18. ~    8. 17. : 동헌복원 기본계획 수립용역 추진

○ 2016. 2.24.             : 도시계획시설결정 용역 착수

○ 2016. 5.30.             : 실시설계 용역 착수

○ 2016. 6. 1.             : 주민설명회 개최(중앙동 주민센터)

○ 2016. 6.13. ~     6.15.  : 1, 2단계 편입토지 중 7필지 실태조사 실시

○ 2016. 6.16. ~ 2017. 7. 1. : 보상계획 열람공고 실시(7필지)

○ 2016. 7.12.             : 1, 2단계 구역 토지(7필지) 감정평가 완료

□ 향후계획

○ 2016. 8.             : 1, 2단계 구역 잔여 토지(7필지) 매입 및 도시계획시설

결정 및 실시계획 인가 용역 완료

○ 2016. 9. ~ 12.       : 건축물 철거 및 발굴조사 실시

○ 2017. 3.             :  문화재 지정 신청

○ 2018. ~ 2022.        : 동헌 복원

사업명

손죽도 도서식수원 개발사업

담당자

상수도과 이재태(☎659-4909)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도서지역 열악한 급수시설을 확충하여 생활불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~2017. 11.

○ 위 치 : 여수시 삼산면 손죽리 일원

○ 규 모 : 관정개발 1개소, 관로(D32~50mm) L=5.0km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,500			715	1,785
국 비	1,750			500	1,250
시 도 비	75			42	33
시군구비	675			193	482
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5 %)

○ 2015.  10. 15. : 지방재정(자체)투자 심사 완료

○ 2016.  3. 14.  : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2016.  9.  : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2016. 11.  : 공사착공

○ 2017. 11.  : 공사준공

사업명

여수국가산업단지 혁신지원센터 구축

담당자

산단지원과 김경석(☎659-3636)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 내 분산된 산단관련기관 집적화를 통한 협업체계 구축 및 기업지원

종합 플랫폼 구축으로 기업하기 좋은 환경을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015.9 ~ 2018.8(3년)

○ 위 치 : 여수시 주삼동 426번지(삼동지구)

○ 규 모 : 부지 3,300㎡(998평)/ 건축물 5,700㎡(1,724평)

- 지상 6층,  주차공간(지하 1층, 지상 1,500㎡)/ 공원․녹지공간 1,072㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,800백만원(국비8,000, 시비2,000, 산단공2,800)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	12,800	-	958	2,200	9,642
국 비	8,000	-	958	1,500	5,542
시 도 비	2,000	-	-	500	1,500
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타	2,800	-		200	2,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 혁신지원센터 구축사업 신청(전남도․여수시→산업부)    : ‘15. 7. 29.

○ 혁신지원센터 구축사업 대상단지 최종 선정            : ‘15. 9. 15.

○ 혁신지원센터 구축사업 관계기관 협약 체결            : ‘15. 12. 28.

□ 향후계획

○ 연구․교육기관 센터 내 유치를 위한 기관방문          : ‘16. 7. ~ 12.

○ 삼동지구 실시계획 인가(익산청)                       : ‘16. 8.

○ 혁신지원센터 구축사업 실시설계 용역                 : ‘16. 8.

○ 혁신지원센터 구축사업 시행 및 관련기관 입주         : ‘17. 2.~‘18. 8.

사업명

신덕지구 연안정비사업

담당자

해양항만레저과 정동섭(☎3972)

□ 사업목적 및 필요성

○ 태풍, 해일 등 자연재해로부터 연안해역 보호

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 2. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 여수시 신덕해수욕장 및 모사금 해수욕장 일원

○ 규 모 : 해안정비 L=450m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,500			635	5,865
국 비	4,550			445	4,105
시 도 비
시군구비	1,950			190	1,760
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘14. 10. 2. : 제2차 연안정비 기본계획(변경) 반영

○ '15. 11. 9. : 연안정비사업 국고보조금 가내시

○ ‘16. 2. 16. : 실시설계용역 착수

○ ‘16. 4. 21. : 지역주민 사업설명회(모사금)

○ ‘16. 4. 22. : 실시설계용역 일시정지(행정절차 이행 및 관련부처 실시계획협의)

○ ‘16. 6. 14. : 지역주민 사업설명회(신덕)

○ ‘16. 6. 23. : 해양수산부 협의

□ 향후계획

○ ‘16. 12. : 실시계획협의 및 행정절차 이행.

○ ‘17.  1. : 공사 착공

사업명

제15회 한국농업경영인 전국대회 개최

담당자

농업정책과 문채환(☎659-4404)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국제해양관광의 중심도시 여수에서 전국 농업인들의 한마당 잔치를 통해 농업경영인들의       사기진작 도모하고 다양한 정보․정책 등 지식공유와 학술행사를 통해 미래농업       비전과 발전방향을 모색하기 위함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016. 8. 9 ~ 8. 11(2박3일)

○ 위    치 : 여수세계박람회장 일원

○ 참여인원 : 30,000여명

○ 주최/주관 : (사)한국농업경영인중앙연합회/전남도․여수시연합회

○ 주요행사 : 환영리셉션, 개막행사, 학술행사, 운동경기 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	1,000			1,000
국 비
시 도 비	300			300
시군구비	500			500
지 방 채
민간자본
기 타	200			200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2016년  한농연 전국대회 여수 유치 확정	: ‘15. 7. 1

○ 전국대회 전 개최지 벤치마킹(여주, 제주)	: ‘15. 12. 4 ～ 12. 11

○ 한농연(중앙․도․시연합회)임원진 워크숍	: ‘16. 1. 19

○ T/F팀 구성 및 운영                               : ‘16. 4.

○ 추진위원회 구성 및 위촉장 수여, 위원회 개최	: ‘16. 6. 2

□ 향후계획

○ 기반 정비 및 편의시설 설치 등 사전 준비           : ‘16. 7. 20한

○ 하반기 현장 간부회의 개최                         : 16. 8. 2.

○ 행사 사전 리허설 및 문제점 보완                   : ‘16. 8. 6.

○ 제15회 한농연 전국대회 개최                       : ‘16. 8. 9 ~ 8. 11

사업명

남면사무소 신축 공사

담당자

회계과 정은주(☎659-5252)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1985년 건립된 건물로 노후 및 균열․누수 등으로 유지관리비 증가

○ 주민에게 쾌적한 주민복지 공간 제공 등 행정서비스 질적 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2016. 12.

○ 위 치 : 전라남도 여수시 남면 내외진길 10

○ 규 모

- 대지면적 : 2,135㎡(부지매입 700㎡ 포함)

- 연 면 적 : 1,290㎡(지상3층/1동)

- 구    조 : 철근콘크리트조

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,170백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,170			550	2,620
국 비
시 도 비
시군구비	3,170			550	2,620
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ ‘15. 10. 28. : 전라남도 지방재정 투자사업 심사 완료

○ ‘15. 12. 22. : 2016년도 공유재산관리계획 의결

○ ‘15. 12. 22. : 신축예산 반영(시설비 550백만원)

※ 신축위치 관련 주민 갈등 발생으로 현재 사업추진 지연

□ 향후계획

○ 신축위치 관련 주민 합의의견 제출 시 사업추진

9-2. 지방채 발행사업

우리 여수시에서 ‘15년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
웅천택지개발사업	616,100	12,500	0	0	603,600	0	12,500	94
여수국가산단주변 마을주민이주사업	543,984	114,800	273,121	24,700	131,363	0	114,800	95

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2015년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

9-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

웅천택지개발사업

담당자

공영개발과  홍종옥(☎659-4578)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인간과 자연이 공존하는 친환경적 신개념 도시 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2004. 4 ~ 2016. 12

○ 위 치 : 여수시 웅천동 일원

○ 규 모 : 2,800천㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 616,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	616,100	592,502	23,598	0	0
지 방 채	12,500	12,500	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	603,600	580,002	23,598	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 택지개발사업 실시설계 승인 고시    :  ‘04. 04. 27.

○ 총괄 및 1단계 사업 착공            :  ‘04. 4. 27.

○ 3단계 사업 착공                    :  ‘08. 12. 26.

○ 1단계 사업 준공 인가               :  ‘10. 11. 25.

□ 향후계획

○ 1단계 및 3단계 사업 준공 인가      :  ‘16. 12. 31.

사업명

여수국가산단주변마을주민이주사업

담당자

공영개발과  전명수(☎ 659-4581)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여수국가산단 주변마을 거주 주민들을 공해와 산업재해로부터 보호하고자

인근 택지개발지구로 이주시키고

○ 이전적지에 입주기업을 유치, 지역경제 활성화와 인구증가 시책에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘04. 7. 27. ～ ’16. 12. 31.

○ 위 치 : 여수시 월하․평여, 두암․적량, 중흥 일원

○ 규 모 : 5개동 6개마을 1,791세대 5,956명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 543,984백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	543,984	543,449	194	341
지 방 채	114,800	114,800
국 비	273,121	273,121
시 도 비	24,700	24,700
시군구비	131,363	130,828	194	341
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 연관단지 개발계획 승인                      :  ‘01. 12. 28.

○ 월하․평여지구 연관단지 조성공사 준공        :  ‘04. 7. ～ ’07. 5.

○ 두암지구 연관단지 조성공사 준공             :  ‘05. 7. ～ ’08. 9.

○ 중흥지구 연관단지 조성공사 준공             :  ‘14. 6.

□ 향후계획

○ 국가산단 주변마을 주민이주사업 준공         :  ‘16. 12.

9-3. 민간투자사업

우리 여수시에서 ‘15년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사 업 명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’14년까지 부담액	’15년 부담액	’16년 이후 부담 예정액
BTL	`05년도 하수 관거정비	푸른여수 지키미(주)	38,662	21,536	4,065	64,780	`10.3.31. ~ `30.3.30
	`08년도 하수 관거정비	여수맑은물 사랑(주)	55,475	5,062	5,800	105,986	`14.2.24. ~ `34.2.23
BTO	음식물자원화시설설치사업	㈜여수 엑스포환경	8,349	8,886	2,129	25,585	`10.1.15 ~ `25.1.14

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2015년까지는 집행액(결산기준), 2016년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

☞ 하수관거정비사업

⚪ 민간사업자가 관리운영권 행사의 방법으로 약정한 기간 동안 지자체 등에 시설을    임대하고, 약정된 임대료 수입을 통해 투자비 회수(국비 70%, 시비 30%)

⚪ 시설임대료는 현재가치로 평가하여 부채로 계상하고 있음

⚪	시설임대료 = 총민간투자비	×	수익률
			1-(1+수익률)-(임대기간)

☞ 음식물자원화시설설치사업

⚪ BTO 사업의 재정부담액은 연간 음식물 처리량에 톤당 단가를 곱한 금액 임. 매년 일정 규모의 사용료가 지출 되므로 재정 부담이 큼.

※ 2016년 이후 연간 처리량은 2015년 처리량을 대입했으며, 톤당 단가는 소비자물가지수 평균 변동률(2.3%)을 적용함.

9-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명

‘05년 하수관거 BTL 사업

담당자

하수도과 한상근(☎659-4986)

□ 사업개요

○ 기간 : 2006.07.31~ 2010.03.30

○ 위치 : 6개처리 분구(학동, 화장, 신월, 여도, 둔덕, 세구지)

○ 민간사업자 : 푸른여수지키미(주)

○ 총사업비 : 38,662백만원

○ 사업규모 : L=47.7㎞, 배수설비 4,036개소

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익 보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자액	2015년	2016년	2017년 이후
계	90,381	21,536	4,065	3,908	60,872
국 비	61,720	13,814	2,560	2,736	42,610
시 도 비
시군구비	28,661	7,722	1,505	1,172	18,262
기 타

□ 추진단계

○ 운영기간 : 2010. 03. ~ 2030. 03.(20년)

□ 향후계획

○ 매분기 성과평가에 따라 임대료, 운영비 지급

□ 사업변경 내역

○ 해 당 없 음

사업명

‘08년 하수관거 BTL 사업

담당자

하수도과 한상근(☎659-4986)

□ 사업개요

○ 기  간 : 2010.12.14.~ 2014.2.13

○ 위  치 : 6개처리분구(연등, 여서, 웅천, 여천, 소호, 수정)

○ 민간사업자 : 여수맑은물사랑(주)

○ 총사업비 : 45,596백만원

○ 사업규모 : L=34.76㎞, 배수설비 4,403개소

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자액	2015연도	2016연도	2017년 이후
계	116,848	5,062	5,800	5,820	100,166
국 비	80,883	3,129	3,564	4,074	70,116
시 도 비
시군구비	35,965	1,933	2,236	1,746	30,050
기 타

□ 추진단계

○ 운영기간 : 2014. 03. ~ 2034. 03.(20년)

□ 향후계획

○ 매분기 성과평가에 따라 임대료, 운영비 지급

□ 사업변경 내역

○ 해 당 없 음

사업명

여수시 음식물자원화시설 설치 사업

담당자

도시미화과 서희성(☎659-3848)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관내에서 발생하는 음식물류 폐기물의 안정적 처리

○ 음식물류 폐기물의 자원재활용(퇴비 생산)으로 환경오염 방지

□ 사업개요

○ 기    간 : 2008. 8. ~ 2010. 1(신설)/ 2012. 2. ~ 2012. 4.(증설)

○ 위    치 : 여수시 진달래길 310-157(월내동)

○ 민간사업자 : (주)엑스포환경

○ 총사업비 : 8,349(백만원)

○ 사업규모 : 75톤(‘12년 15톤 증설 포함)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 세후 실시 수익률 5.41%/ 2010. 1. 15. ~ 2025. 1. 14.(운영기간 15년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2015연도	2016연도	2017연도 이후
계	36,600	8,886	2,129	2,755	22,830
국 비
시 도 비
시 비	36,600	8,886	2,129	2,755	22,830
기 타

□ 추진단계

○ 시설 운영 중

□ 향후계획

○ ‘15. 11. ~ ’16. 4.까지 2차 증설공사 실시 예정(75 → 90톤/일)

- 사업비 30억(전액 민자 부담)/ 사용기간 연장(5년 연장)

○ 사용료는 매년 물가상승분 반영(‘15년 사용료 : 79,728원/톤)

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 변경 : 당초 60톤 → 75톤(‘12년 4월 준공)/ 사업비 18억(전액 민자 부담)