특수공시 사업 목록

(2013. 12. 31.기준 / 단위 : 억 원)

분야별	사 업 명	총사업비	공정율
일반공공행정	◦ 남산초교 앞 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	147	22%
	◦ 도원지구 우수저류시설 설치사업	153.6	87%
문화및관광	◦ 여수시 문예회관 건립사업	49	67%
	◦ 묘도 봉화산 전망공원 조성사업	25	80%
환경보호	◦ 농어촌지역 제2단계 상수도확충사업	73.5	17%
	◦ 백야도 도서식수원 개발 사업	54	75%
	◦ 연도 도서식수원 개발 사업	100	50%
사회복지	◦ 봉안당 신축공사	48	25%
	◦ 시청직장어린이집 신축공사	43	47%
농림해양수산	◦ 산림문화 휴양관 신축공사	20	75%
	◦ 승월지구 대구획 경지정리사업	38	49%
수송및 도로교통	◦ 미평~만흥 도로 확장공사	230	30%
	◦ 무선~여천초등학교 도로개설공사	116	15%
국토 및 지역개발	◦ 거문교(동도~서도간 연도교)가설공사	456	51%
	◦ 돌산읍 소재지 종합정비사업	100	45%
	◦ 돌산읍갓권역 농촌마을 종합개발	70	42%

1		남산초교 앞 급경사지 붕괴위험지역 정비사업

도로관리사업소 김동언(659-5111)

실태		□남산초교 앞 비탈면은 급경사지 붕괴위험지역으로 우기시 재해발생 위험성 상존
추진방향		□급경사지 사면을 완화하여 재해발생 위험요인 해소
기대효과		□재해위험지역 정비로 안전사고 예방 및 주민불편 해소

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 남산동 4번지일원

◦ 사업기간 : 2013. 1. ~ 2016. 12.

◦ 사업규모 : 사면정비 A=69,473㎡(L=340m, H=60m)

◦ 사 업 비 : 147억원(국비 52.5억, 시비 94.5억)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2012년까지	2013년	2014년	2015년이후
계	147	15	6	23	103
국 비	52.5		3	5	44.5
도 비
시 비	94.5	15	3	18	58.5
기 타

사업진행 현황

◦ 2012. 4. 10. : 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 계획서 제출

◦ 2012. 6. 11. : 급경사지 붕괴위험지역 지정고시

◦ 2012. 9. 27 ~ 2013. 6. 10. : 실시설계용역 시행

◦ 2014. 4. 30. : 붕괴위험지역 정비사업 실시계획 고시

◦ 2014. 6. 30. : 편입용지 105필지 중 43필지 보상 완료

위 치 도

전경사진

2		도원지구 우수저류시설 설치사업

하수도과 차재원(659-4991)

실태		□ 도원지구는 집중호우시 상습적인 침수피해를 입고 있어, 거주 주민들의 재산과 통행차량의 침수 등 재산상의 피해 발생
추진방향		□ 집중호우시에 유입되는 우수를 저류하여 침수 해소
기대효과		□ 주택 및 상가 등 시가지 침수피해지역 주민의 숙원사업을 시행함으로써 지역 주민의 생명과 재산 보호

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 안산동 도원사거리 일원

◦ 사업기간 : 2012. 6. ~ 2014. 6.

◦ 사업규모 : 우수저류시설 11,400㎥, 유입관로 L=65m 등

◦ 사 업 비 : 153.6억원(국비 90.2,  시비 63.4)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2012년까지	2013년	2014년	2015년 이후
계	153.6	49.0	104.6
국 비	90.2	27.4	62.8
도 비	-	-	-
시 비	63.4	21.6	41.8
기 타

사업진행 현황

◦ 2012.  6. : 총괄공사 발주 및 1차분 공사 착공

◦ 2013.  2. : 2차분 공사 착공

◦ 2013. 11. : 1차분 공사 준공

◦ 2014. 6. 23. : 전체 사업 준공

위 치 도

3		여수문예회관 건립사업

문화예술과 김대희(659-4753)

실태		□ 여수문예회관은 1992년 공사 착공 지하 골조공사 후 1998년 중단됨.(종합공정 42%) □ 지하주차장 방수 등 보수 후 지하 1,2층 및 지상층 노출부분 일부를 민원인 주차장으로 활용 중(320대)
추진방향		□ 기존 문예회관 사업계획을 변경하여 참신성 있는 문예회관 건립 □ 현상설계 공모를 통하여 주변시설 및 환경과 조화되는 문예회관 건립
기대효과		□ 15년 이상 장기간 흉물로 방치되었던 문예회관 공사를 재개하여 공연장(455석), 회의실 등 다목적 문화예술 공간 확충으로 시민문화예술 창달에 기여

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 시청로 1(학동 168)

◦ 사업기간 : 2013. 11. 14 ~ 2014. 5. 21.

◦ 사업규모 : 지하2층/지상2층, 2,427.01㎡(금회신축), 455석

◦ 사 업 비 : 49억원(국비 20, 시비 29)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2012년 까지	2013년	2014년	2015년이후
계	49	18	31	-	-
국 비	20	9	11	-	-
도 비	-	-	-	-	-
시 비	29	9	20	-	-
기 타	-	-		-	-

사업진행 현황

◦ ‘88.  8. 10 : 종합문예회관 건립계획 수립

◦ ‘92. 11. 14 : 공사 착공<(남양건설(주)>

◦ ‘98.  2. 16 : 공사중단(종합공정 42.1%, 기투자액 : 124억)

◦ ‘11.  8. 10 : 지방재정 투융자 심사 완료

◦ ‘12. 12. 27 : 시의회 공유재산관리계획 및 예산 편성 승인

◦ ‘13.  2.  5 : 『여수시 문예회관 건립』설계공모 공고

◦ ‘13.  5. 11 : 지하시설물 정밀안전진단 완료<한국구조안전연구원>

◦ ‘13.  6. ~ 9 : 기본 및 실시설계<도무수유 건축사사무소>

◦ ‘13. 11. 14 : 공사착수<제일건설(주)>

※ ‘14. 05.    : 준공예정

위 치 도

사업부지

전경사진

4		묘도 봉화산 전망공원 조성사업

관광과 임인수(659-4986)

실태		□ 국가 산단(야경), 율촌 산단, 이순신대교, 광양제철, 광양컨테이너 부두 등 광양만 항을 한눈에 조망할 수 있는 전망공원 조성으로 관광명소 구축
추진방향		□ 문화관광 성향의 변화에 따라 목적형 관광형태의 수용
기대효과		□ 새로운 관광수요를 창출하여 관광객 유치증대 도모

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 묘도동 산160번지 일원

◦ 사업기간 : 2011. 10. ～ 2014. 09. 30.

◦ 사업규모 : 공원조성 1,360㎡, 산책로 1,375m, 봉수대복원 1식 등

◦ 사 업 비 :  25억원(광특 8, 시비 17)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2012년 까지	2013년	2014년	2015년이후
계	25	21	4
국 비	8.2	8.2
도 비
시 비	16.8	12.2	4
기 타

사업진행 현황

◦ ´11. 06. 17. : 지방재정 투융자 심사

◦ ´11. 12. 14. : 매장문화재 조사 완료

◦ ‘12. 11. 21. : 여수 도시관리계획(도로, 공원)결정 및 지형도면 고시

◦ ‘13. 03. 20. : 실시계획인가 고시

◦ ‘14. 03. 18. : 보상협의 요청

◦ ‘14. 05. 16. : 재결 수용 열람공고

◦ ‘14. 09. 30. : 사업 완료 예정

위 치 도

조감도

5		농어촌 2단계지방상수도 확충사업

상수도과 황경성(659-4908)

실태		□농어촌 미급수지역의 수원고갈 및 식수난으로 인한 수돗물 공급 시급
추진방향		□조기에 수돗물이 공급될 수 있도록 예산 확보하여 사업 추진
기대효과		□양질의 수돗물 공급으로 식수난 해소 및 보건위생환경 개선

사 업 개 요

◦ 위    치 : 돌산읍, 소라면, 율촌면, 화양면 일원

◦ 사업기간 : 2013. 6 ~ 2015. 6

◦ 사업규모 : 관로 79km

◦ 사 업 비 : 73.5억원(국비 51.4, 지방비 22.1)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2012년 까지	2013년	2014년	2015년이후
계	73.5	15.6	14.7	21.6	21.6
국 비	51.4	10.9	10.3	15.1	15.1
도 비	3.4	0.2	1.3	1.9	-
시 비	18.7	4.5	3.1	4.6	6.5
기 타

사업진행 현황

◦ 2013. 3. 28 : 실시설계 용역 완료

◦ 2013. 6. 14 : 총괄 및 1차분 계약

◦ 2013. 6. 18 : 1차분(L=16.8km) 착공

◦ 2014. 3. 20 : 2차분(L=18.5km) 착공

전경위성사진(위치포함)

6		백야도 도서식수원 개발 사업

상수도과 황경성(659-4908)

실태		□농어촌 미급수지역의 염분유입 및 식수난으로 인한 수돗물 공급 시급
추진방향		□조기에 수돗물이 공급될 수 있도록 예산 확보하여 사업 추진
기대효과		□양질의 수돗물 공급으로 식수난 해소 및 보건위생환경 개선

사 업 개 요

◦ 위    치 : 화정면 백야리, 안포리 일원

◦ 사업기간 : 2011. 6 ~ 2014. 12

◦ 사업규모 : 관로 19.4km

◦ 사 업 비 : 54억원(국비 51.4, 지방비 22.1)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2012년 까지	2013년	2014년	2015년이후
계	54	42.3	5.9	5.8
국 비	38	29.6	4.1	4.1	-
도 비	1.6	1.3	0.2	0.1	-
시 비	14.4	11.4	1.6	1.6	-
기 타

사업진행 현황

◦ 2011. 6. 27 : 계약체결 및 1차분 착공

◦ 2013. 1. 22 : 2차분(L=8.44km) 준공

◦ 2013. 3. 26 : 3차분(L=2.6km) 착공

◦ 2013. 4. 10 : 1차분(L=4.56km) 준공

◦ 2014. 1. 16 : 3차분(L=2.6km) 준공

◦ 2014. 3.  6 : 4차분(L=2.1km) 착공

위 치 도(전경위성사진)

7		연도 도서식수원 개발 사업

상수도과 황경성(659-4908)

실태		□도서지역의 염분유입 및 식수난으로 인한 수돗물 공급 시급
추진방향		□조기에 수돗물이 공급될 수 있도록 예산 확보하여 사업 추진
기대효과		□양질의 수돗물 공급으로 식수난 해소 및 보건위생환경 개선

사 업 개 요

◦ 위    치 : 남면 연도리 일원

◦ 사업기간 : 2012. 6 ~ 2015. 6

◦ 사업규모 : 암반관정 1식, 정수장 200㎥/일, 관로 7.5km

◦ 사 업 비 : 100억원(국비 70, 지방비 30)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2012년 까지	2013년	2014년	2015년이후
계	100	39.3	37	23.7
국 비	70	27.5	25.9	16.6	-
도 비	3	1.2	1.1	0.7	-
시 비	27	10.6	10	6.4	-
기 타

사업진행 현황

◦ 2012.  6. 29 : 암반관정개발사업 계약체결 및 1차분 착공

◦ 2013.  6. 21 : 연도(정수장) 도서식수원 개발사업 총괄 및 1차분 착공

◦ 2013. 12.  8 : 암반관정개발사업 1차분 준공(27공)

◦ 2014.  3. 24 : 암반관정개발사업 2차 및 총괄준공(40공)

◦ 2014.  3. 26 : 2차분 착공

전경위성사진(위치포함)

8		봉안당 신축공사

노인장애인과 박송인(659-1795)

실태		□화장 및 봉안시설 이용증가로 2014년 하반기 봉안당 안치단 만장 예상에 따른 봉안시설 확충
추진방향		□봉안시설 확충
기대효과		□선진 장묘문화 정착 및 기능강화로 이용자 편익도모

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 소라면 봉두리 산190외 34필지

◦ 사업기간 : ´13.12.27. ~ ´14.9.24.

◦ 사업규모 : 지하1층, 지상4층 / 연면적 3,200㎡

◦ 사 업 비 : 48억원(국비33.6/ 도비7.2/ 시비7.2)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2012년 까지	2013년	2014년	2015년이후
계	48		48
국 비	33.6		33.6
도 비	7.2		7.2
시 비	7.2		7.2
기 타

사업진행 현황

◦´13. 3.25. : 2013년 장사시설 설치사업 국고보조금 확정

◦´13. 4.18. : 설계용역 착수

◦´13. 9.30. : 설계용역 납품

◦´13.12.27. : 신축공사 착공

◦´14. 9.    : 준공예정

위 치 도

전경사진

9		여수시청 직장 어린이집 신축공사

안전행정과 최철웅(659-3203)

실태		□ 여수시는 상시근로자 500명 이상을 고용하는 사업장으로 영유아보육법에 의해 직장어린이집을 의무적으로 설치하여야 하는 사업장임. □ ‘05년부터 공노조 여수시지부에서 단체협약안으로 직장어린이집 설치를 매년 꾸준히 요구됨.
추진방향		○ 설계 단계부터 보육 전문가 참여 어린이집 이용자 모두를 고려한 효율적인 공간 배치 ○ 보육 영유아의 안전과 보육의 전문성을 운영의 최우선 과제로 선정 - 보육에 관한 전문적인 지식과 경험을 가진 위탁업체 선정
기대효과		□ 여수시청 소속 영유아를 보육하는 공무원의 사회적․경제적 활동지원 및 보육 영유아의 건전한 성장 도모

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 시청동 1길 30(학동)

◦ 사업기간 : 2013. 10. 10 ～ 2014. 03. 08

◦ 사업규모

- 부지면적 : 4,396㎡, 연면적 : 2,278.26㎡ / 지하1층, 지상3층

- 주요시설 : 보육실(12), 특별활동실(2), 다목적 강당, 식당, 희망 장난감 도서관 등

◦ 사 업 비 : 43억원(설계용역비 등 포함)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2012년 까지	2013년	2014년	2015년이후
계	43	-	10	33
국 비
도 비
시 비	43	-	10	33
기 타

사업진행 현황

◦ 계약체결 : 2013. 10. 07

◦ 공사착공 : 2013. 10. 10

◦ 기 공 식 : 2013. 11. 19

◦ 위․수탁 계약체결 : 2014. 02. 26

◦ 공사준공 : 2014. 03. 08

◦ 개    원 : 2014. 03. 20

조감도

전경사진

10		산림문화 휴양관 신축공사

산림과 김종명(659-4613)

실태		□ 봉황산 자연휴양림 구역으로 시유지이며 구역내에 임도가 있어 휴양관 진입로 및 산책로 등 활용이 가능
추진방향		□ 산림휴양시설 확충
기대효과		□ 남해안의 풍부한 관광자원과 연계한 산림휴양시설 확충으로 시민 및 관광객 편의 제공

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 돌산읍 대복길 160

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2014년

◦ 사업규모 : 1동/지상2층 콘크리트 구조, 연면적 752.85㎡

세미나실 1실, 객실 10실

◦ 사 업 비 : 20억원

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2012년 까지	2013년	2014년	2015년이후
계	20	-	20	-	-
국 비	10	-	10	-	-
도 비	3	-	3	-	-
시 비	7	-	7	-	-
기 타	-	-	-	-	-

사업진행 현황

◦ 2013. 5. : 산림문화 휴양관 실시설계용역 완료

◦ 2013. 6. : 산림문화 휴양관 신축사업 착공

◦ 2014. 5. : 산림문화 휴양관 신축사업 준공

◦ 2014. 6. 1. : 산림문화 휴양관 개관

조 감 도

전경사진

11		승월지구 대구획경지정리사업

건설방재과 안병현(659-4052)

실태		□ 농경지의 규모와 형상이 불규칙하고, 농가별 소유 형태가 분산되어 있어서 합리적인 농업경영 어려운 실정
추진방향		□ 농업의 기계화 촉진으로 영농작업의 편리도모 및 농촌환경 개선
기대효과		□ 규모화, 대형기계화 영농기반 조성으로 토지 및 노동의 생산성 증대 □ 농지 및 수자원의 효율적인 이용, 보전, 관리기반 조성

사 업 개 요

◦ 위    치 : 돌산읍 죽포․서덕․둔전(봉수)리 일원

◦ 사업기간 : 2013. 11. ~ 2014. 6.

◦ 사업규모 : 58.7ha(수혜면적 50.2ha)

-  승월 : 45ha(수혜면적 38.9ha), 봉수 : 13.7ha(수혜면적 11.3ha)

◦ 사 업 비 : 38억원(국비 15.  도비 0.38,  시비 22.2)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2012년 까지	2013년	2014년	2015년이후
계	37.77		35.53	2.24
국 비	15.15		15.15	0
도 비	0.38		0.38	0
시 비	22.24		20	2.24
기 타

사업진행 현황

◦ 2012.  3. : 기본계획수립 대상지 선정(농림축산식품부)

◦ 2013.  2. : 기본계획 승인(전라남도)

◦ 2013. 11. : 시행계획 승인(전라남도)

◦ 2013. 11. : 공사 착수

◦ 2014.  6. : 공사 준공

위 치 도

12		미평~만흥 도로 확장공사

도 로 과  황용순(659-4071)

실태		□ 해양경찰교육원, 만성리 해수욕장 등 진입로 협소로 교통체증 발생
실태		□ 간선도로망 확충으로 관내 주요시설 및 관광지 교통체증 해소
추진방향		□ 주요 관광지 진입로 확장으로 해양관광 도시 발전에 기여

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 미평동~만흥동

◦ 사업기간 : 2006~2015

◦ 사업규모 : 도로확장 L=2.2km, B=25m

◦ 사 업 비 : 200억원

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2012년 까지	2013년	2014년	2015년이후
계	200	1	80	100	19
국 비	15			15
도 비
시 비	185	1	80	85	19
기 타

※ 만흥~오천 구간은 미평~만흥 완료 후 시행

사업진행 현황

◦ 2006.  9.  9. : 실시설계용역 완료

◦ 2007.  4.  7. : 실시계획인가

◦ 2013. 11. 29. : 공사착공

◦ 2014.  7.   . : 토지 및 지장물건 보상(90%)

◦ 2015. 11.   . : 공사완료 예정

위 치 도

L=2.2km, B=25m

전경사진

13		무선~여천초등학교 도로개설공사

도 로 과 고수원(659-4072)

실태		□ 국가산단에서 무선방면 도로가 없어 우회지역인 학동지역의 교통체증 심화
추진방향		□ 배후 주거지인 무선과 국가산단 간의 도로개설로 교통체증 해소
기대효과		□ 교통체증 해소 및 출퇴근 거리 감소에 따른 물류비용 절감

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 화장동 무선~주동 사거리

◦ 사업기간 : 2012~2016

◦ 사업규모 : 도로확장 L=1.06km, B=25m

◦ 사 업 비 : 116억원

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2012년 까지	2013년	2014년	2015년이후
계	116	1	10	10	95
국 비
도 비
시 비	116	1	10	10	95
기 타

사업진행 현황

◦ 2012. 10. 31. : 실시설계용역 완료

◦ 2013.  6. 20. : 실시계획인가

◦ 2014.  7.   . : 토지 및 지장물건 보상(50%)

◦ 2015.  3. ~ 2016. 12. : 공사시행

위 치 도

전경사진

14		거문교(동도～서도간 연도교)가설공사

섬자원개발과 고희승(659-3986)

실태		□거문도는 육지와 멀리(115km) 떨어져 지역낙후도가 높을 뿐 아니라, 동도·서도간 연결도로가 없어 주민의 교통생활, 생산 활동 등에 가장 큰 불편요인임
추진방향		□국가 균형발전 사업의 일환으로 추진되는 “제3차 도서종합개발사업계획(‘08.1, 행정안전부)”에 거문도 동도~서도 연도교 사업이 포함되어 2015년까지 추진
기대효과		□삼산면 동도~서도간 일주 교통망 연계로 각종 농수산물 수송단축 및 도서민 정주의식 고취와 주민교통 편의제공

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 삼산면 동도리～서도리

◦ 사업기간 : 2009년～2015년

◦ 사업규모 : 도로개설 L=1.42km, B=11.2m (교량 L=530.0m, 접속도로 L=888.0m)

◦ 사 업 비 : 456억원(국비 319, 도비 68.5 시비 68.5)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2012년 까지	2013년	2014년	2015년이후
계	456	199	84	88	85
국 비	319	139	59	61	60
도 비	68.5	30	12.5	13.5	12.5
시 비	68.5	30	12.5	13.5	12.5
기 타	0	0	0	0	0

사업진행 현황

◦ 2008. 01.    : 제3차 도서종합개발사업 계획 반영 확정

◦ 2010. 12. 30 : 공사계약(조달청)

◦ 2011. 01. 01 : 공사 착공

◦ 2011. 07. 31 : 턴키발주에 따른 행정절차이행(국립공원계획변경)

◦ 2012년 ～ 2013년 : 보상완료(편입토지 및 어업피해)

◦ 2013. 12. 31 : 교량주탑공사 완료

◦ 2014. 07 현재  : 교량상부공사 슬래브 공사중 (전체진도 68%)

위 치 도

전경사진

15		돌산읍소재지 종합 정비사업

도시계획과 장현철(659-4017)

실태		□농촌지역의 문화, 복지, 교육 등의 다수주민이 이용 가능한 시설확충 필요
추진방향		□읍소재지 생활편익, 복지시설 확충 등으로 주민들의 정주 서비스 제공
기대효과		□사회기반시설 확충을 통한 정주여건 개설 및 지역경제 활성화

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 돌산읍 군내리 일원

◦ 사업기간 : 2011. ~ 2015.

◦ 사업규모 : 도로개설 L=1,175m  B=8~10m(쉼터 1개소, 체육시설 1개소)

◦ 사 업 비 : 100억원(국비 70%, 지	방비 30%)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2012년 까지	2013년	2014년	2015년이후
계	100	33	12	30	25
국 비	70	23	8	21	18
도 비
시 비	30	10	4	9	7
기 타

사업진행 현황

◦ ‘10. 11.  5. : 사업지구 확정(농림수산식품부)

◦ ‘12.  5. 25. : 도시계획시설사업(도로) 실시계획 인가 및 고시

◦ ‘12. 12. 17. : 종합정비사업 시행계획 수립 및 승인

◦ ‘13.  4. 15. : 총괄계약 및 1차분 공사 착공

◦ ‘14.  3. 31. : 2차분 착공(’14. 4. 14. 1차분 준공)

◦ ‘15. 12. 31. : 공사준공

위 치 도

체육시설

쉼 터

전경사진

16		돌산갓권역 농촌마을 종합개발사업

건설방재과 전영수(659-4051)

실태		□ SOC위주의 소액분산 투자로 농촌의 계획적인 공간정비나 농촌 다움을 살리는 개발에는 소홀
추진방향		□ 동일한 생활권․영농권 등 동질성을 가지며, 발전 잠재력이 있는 마을들을 상호 연계하여 소규모 권역단위로 개발
기대효과		□ 농촌마을의 경관개선, 생활환경정비로 주민소득 기반 확충 및 농촌 정주공간 조성으로 살고싶은 농촌마을 실현

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 돌산읍 죽포․서덕리(2개리 7개마을)

◦ 사업기간 : 2011. 12. ～ 2015. 12.

◦ 사업규모 : 갓고을센터, 생활환경정비, 소득증대, 마을경관개선, 지역역량강화 등

◦ 사 업 비 : 70억원(광특 49, 지방비 21)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2012년 까지	2013년	2014년	2015년까지
계	70.0	14.73	28.79	13.94	12.54
국 비	49.0	10.31	20.15	9.76	8.78
도 비	0.22	0.22	0.0	0.0	0.0
시 비	20.78	4.2	8.64	4.18	3.76
기 타	0.0	0.0	0.0	0.0

사업진행 현황

◦ ‘10. 12. 29. : 기본계획 승인(여수시)

◦ ‘11. 12. 16. : 세부시행계획 승인(여수시)

◦ ‘11. 12. 30. : 1단계 사업 착수(갓고을센터 및 판매장)

◦ ‘14.  4. 30. : 1단계 준공

◦ ‘14.  5.   . : 2단계 사업 착공

◦ ‘15. 12. 31. : 2단계 및 총사업 완료(체험소득, 쉼터, 등산로 등)

위 치 도

전경사진