11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 여수시에서 ‘13년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

					(단위: 백만원, %)
사 업 명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
32건	344,693	15,630	23,602	297,476
제8회 실크로드 시장단포럼 - 도심사	573	0	573	0	2013	2013	100
패류(홍합) 공동작업장 조성사업 - 도심사	5,860	0	0	0		2013	2013.11 사업포기
제22회 슈퍼모델 선발대회 - 도심사	2,364	0	2,364	0	2013	2013	100
학동지구 하수저류시설 설치사업 - 도심사	12,510	0	714	11,796	2016	2013	5
시청 직장어린이집 신축공사 - 도심사	4,327	0	1,041	3,286	2014	2013	100
외해 참다랑어양식 기반시설 지원 - 자체심사	2,000	0	0	2,000	2015	2013	0
여수 해양레저 스포츠 타운 조성사업 - 자체심사	3,600	0	90	3,510		2013	5
만흥교 재가설 공사 - 자체심사	2,159	0	467	1,692	2015	2013	21
변촌~장촌간 군도 (22호선) 확포장공사 - 자체심사	4,800	0	220	4,580	2016	2013	10
여수시립 공원묘지 진입로 개설공사 - 자체심사	5,000	0	80	4,920	2016	2013	5
찾아가고 싶은 섬 (여자도) 조성사업 - 자체심사	2,500	0	0	2,500	2017	2013	25
성두항 남방파제 건설사업 - 자체심사	2,500	0	0	2,500	2015	2013	0
거문도해풍쑥 실용화 및 힐링체험사업 - 자체심사	3,000	0	0	730	2017	2013	10.5
GS칼텍스 사회공헌사업 부지매입 - 자체심사	35,000	13,900	7,600	13,500	2015	2013	52
여수 진남수영장 건립사업 - 도심사	29,800	1,400	4,800	23,600	2,016	2013	5
진남롤러경기장 지붕 설치사업 - 도심사	9,500	0	0	9,500	2,017	2013
제40차 한국기독실업 인회 한국대회 개최 - 도심사	861	0	861	0	2013	2013	100
여수 거북선축제관 건립사업 - 도심사	2,980	0	0	2,980	미정	2013	0
여수학숙 건립사업 - 자체심사	3,255	0	3,255	0	2013	2013	100
만흥 검은모래해변 배후부지 개발사업 - 자체심사	68,328	0	600	67,728	2018	2013	5
제48회 여수거북선축제 - 도심사	815	0	0	815		2013	2014 사업취소
일루미네이션 설치운영- 도심사	950	0	0	950	2014	2013	행사가 아닌 시설로 변경
여수시 보훈회관 건립사업 - 도심사	3,000	0	0	3,000	2014	2013	5
소규모 농촌용수(저수지) 개발사업 - 자체심사	4,231	90	607	3,534	2015	2013	8
웅천~소호간 도로 개설공사 - 자체심사	71,700	0	100	71,600	2020	2013	5
돌산읍 201호선 도로 확포장공사 - 자체심사	3,000	0	0	3,000	2016	2013	0
화양면 군도28호선 개량공사 - 자체심사	3,200	100	0	3,100	2016	2013	5
동문우체국~자산공원 입구 도시계획도로 개설공사 - 자체심사	28,580	0	80	28,500	2016	2013	10
상봉~여흥간 도로 확포장공사 - 자체심사	7,000	140	0	6,860	2016	2013	5
무선산 근린공원 조성사업 - 자체심사	13,300	0	150	13,150	2019	2013	1.1
여수시 장애인종합 복지관 신축 - 도심사	5,000	0	0	5,000	2015	2013	10
여서동 대치마을 도시계획도로 개설공사 - 자체심사	3,000	0	0	3,000	2016	2013	5

‣ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2013년에 추진한 사업

		투·융자사업 심사란?
	□ 지방자치단체의 장은 예산을 편성하고자 하는 경우 사업의 필요성, 사업계획의 타당성 등에 대한 지방재정법에 기초한 지방재정 투·융자 사업심사를 거쳐야 함. 투·융자 사업심사는 지방자치단체가 투자사업을 시행함에 있어 한정된 재원을 효율적으로 배분하고, 투자사업의 우선순위를 합리적으로 결정하기 위한 것으로 중기재정계획에 반영된 사업을 대상으로 투자심사위원회 구성 등을 통해 심사의 전문성을 제고하고 지역주민, 지방의회의 공개 등을 통해 주민의 의견이 수렴되도록 하여 심사의 내실을 기하여야 함

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

개별 투융자심사 사업 추진현황 - 도심사

사업명

제8회 실크로드 시장단 여수포럼

담당자

박람회활용과 김상규(☎659-3469)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해상실크로드의 중심지인 여수를 국제적으로 부각시켜 국제도시로서의 위상을 공고히 하는 계기 마련

○ 세계 도시간의 인적 네트워크를 형성하여 경제ㆍ문화적 교류 확대 및 「국제 해양 관광 레저 스포츠 교육 문화 수도」건설 기반 구축

○ 실크로드 시장단 포럼 등 MICE를 적극 유치하여 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 10. 21. ~ 10. 24.(4일간)

○ 위 치 : 여수세계박람회장 엑스포홀

○ 규 모 : 31개국 73개 도시 1,000여명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 573백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	573		573
국 비
시 도 시
시군구비	573		573
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기획단계 : 2013.1.~3월

○ 사전준비단계 : 2013. 5. ~ 9월

○ 세부실행단계 : 2013. 9. ~ 10월

□ 사업변경 내역

구분	사업변경 내역		비고
	변경전	변경후
사업기간	2013.10.14~10.16	2013.10.21~10.24
장 소	엠블호텔외 2개소	여수세계박람회장 엑스포홀
초청인원	40개국 60개도시 300명	31개국 73개도시 1,000여명
예산액	660백만원	573백만원

개별 투융자심사 사업 추진현황- 도심사

사업명

패류(홍합)공동 작업장 조성사업

담당자

해양항만레저과 정종기(☎659-3967)

□ 사업목적 및 필요성

○ 난립한 홍합 박신장을 집단화함으로서 폐수방류로 인한 가막만의 수질

오염을 방지하고 난립한 박신장을 정비함으로서 도시이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ～2014

○ 위 치 : 여수시 소호동 1211-1번지

○ 규 모 : 공동작업장, 저온저장고, 기반시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,860백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	5,860
국 비	2,500
시 도 시
시군구비	3,360
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 주민(관할 어촌계)와 시의회 반대, 대체부지 선정 및 대체사업 발굴이

어려워 사업 최종 포기확정(2013. 11. 07일 방침결정)

□ 향후계획

○ ‘14년도 제1회 추경 반영 반납

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투융자심사 사업 추진현황 - 도심사

사업명

제22회 슈퍼모델 선발대회

담당자

문화예술과 서왕기(☎659-4738)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2013슈퍼모델들이 문화관광의 도시 여수의 주요관광지에서 프로필 촬영 및 국내외 방송을 통하여 문화와 패션, 관광을 알리는 기회제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 9. 27

○ 위 치 : 여수세계박람회장 EDC

○ 규 모 : 10,000명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :2,364백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,364		2,364
국 비
시 도 시
시군구비	400		400
지 방 채
민간자본	1,964		1,964
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2013. 6.26 : 2013슈퍼모델 선발대회 계약서 체결

○ 2013. 9.27 : 2013슈퍼모델 선발대회 행사 개최

○ 2013.10.18 : 2013슈퍼모델 선발대회 보조금 교부 결정

※ 2013.6.26 2013슈퍼모델 선발대회 계약서상 행사를 개최 이후

보조금 지급하기로 상호협약 의거 지연 지급됨

○ 2013.11.26 : 2013슈퍼모델 선발대회 보조금 정산 완료

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○  (당초) 2,300백만원(시비400, 자담1,900)

(변경) 2,364백만원(시비400, 자담1,964)으로 자담 64백만원을 증액

개별 투융자심사 사업 추진현황 - 도심사

사업명

학동지구 하수저류시설 설치사업

담당자

하수도과 차재원(☎659-4991)

□ 사업목적 및 필요성

○ 집중호우 시 상습적인 침수피해를 입고 있어 근본적인 침수방지 대책 필요

○ 하수저류시설을 설치하여 침수피해 예방과 주민생활 안정 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 01. ～ 2016. 12

○ 위 치 : 여수시 학동 지내

○ 규 모 : 하수저류시설 12,000㎥, 관로개선 L=1,209m, 유입박스 L=53m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :12,510백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	12,510		714	3,539	8,257
국 비	8,755		500	2,477	5,778
시 도 시
시군구비	3,755		214	1,062	2,479
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ‘14. 3.  6.  : 설계자문 완료

○ ‘14. 3. 21.  : 공공하수도 설계자문 완료

○ ‘14. 5. 20.  : 설계VE(경제성검토)용역 완료

○ ‘14. 6. 26.  : 기본 및 실시설계 용역 완료

□ 향후계획

○ ‘14. 7.             : 재원협의 및 도시관리계획 변경

○ ‘14. 8.               : 계약심사 및 계약심의, 일상감사 추진

○ ‘14. 9. ~ ’16. 12. : 공사발주 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투융자심사 사업 추진현황 - 도심사

사업명

여수 진남수영장 건립사업

담당자

체육지원과 정미순(☎659-3269)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국제규모 수영장 건립으로 국제 및 전국규모 대회 유치를 통한 지역경제

활성화에 기여

○ 시민 체육복지 증진 및 전문 체육선수 육성기반 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2016

○ 위 치 : 여수시 오림동 345-6번지 일원

○ 규 모 :  2급 공인수영장 건립(50m 8레인, 다이빙장, 체력단련장 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,800백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	29,800	1,400	4,800	3,300	20,300
국 비	7,800	700	1,000		6,100
시 도 시
시군구비	22,000	700	1,000	3,300	14,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %)

○ ‘13.  7. 31 : 전남도 지방재정 투·융자 재심사

○ ‘13. 12. 20 : 공유재산관리계획 변경 의결

○ ‘14.  4. 23 : 편입토지 보상액 산정 및 협의보상 실시

- 보상현황 : 36필지 중 20필지 매입완료(55%)

○  ‘14.  6. 25 : 진남수영장 건립 기본 및 실시설계용역 착수

- (주)유탑엔지니어링 건축사사무소 오금열 / 883,301천원

□ 향후계획

○ ‘14. 11.    : 행정절차 이행(공공디자인 심의, 설계자문위원회 등)

○ ‘14. 12.    : 진남수영장 건립 기본 및 실시설계용역 완료

○ ‘15.  2.    : 전남도 계약심사, 시공자 선정, 공사 착공

○ ‘16. 12.    : 공사 완료

개별 투융자심사 사업 추진현황 - 도심사

사업명

진남롤러경기장 지붕설치사업

담당자

체육지원과 정미순(☎659-3269)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동․하계와 우기시에도 각종 국내외 대회 개최 및 전지훈련단 유치로

지역경제 활성화에 기여

○ 도내 초․중․고 롤러선수단의 지속적인 훈련으로 경기력향상 및 국제대회

성과 기대

○ 남북한 롤러스케이트 교류전 개최로 남북 긴장완화 및 통일 분위기 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2017

○ 위 치 : 여수시 오림동 진남체육공원내 롤러경기장(공인 1종 롤러경기장)

○ 규 모 : 지붕(돔)설치 12,000㎡, 관중석 증설, 조명ㆍ음향 시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,500백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	9,500				9,500
국 비	2,800				2,800
시 도 시
시군구비	6,700				6,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 2013. 7. 31. : 도 지방재정 투융자 심사 완료

○ 2014. 1.  9. : 2015년도 국고보조사업 지원 건의

□ 향후계획

○ 2015. 1.     : 2016년도 국고보조사업 지원 건의

○ 2016. 3. ~ 2017. 12. : 공사 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 당초 7,600백만원 / 변경 9,500백만원

○ 사업내용 : 당초 지붕(돔)설치 10,000㎡ ⇒ 지붕(돔)설치 12,000㎡

개별 투융자심사 사업 추진현황 - 도심사

사업명

제40차 한국기독실업인회 한국대회 개최

담당자

문화예술과 서왕기(☎659-4738)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기독실업과 전문인으로 구성된 한국기독실업인회(국내286개, 해외한인 교포156개 7,500명) 한국대회를 통해 2012여수세계박람회 개최도시임을 알리고 지역경제를 활성화에 기여코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 8.14 ~ 8.16(3일간)

○ 위 치 : 여수세계박람회장

○ 규 모 : 4,000명(개회 찬양제, 주제강연, 비즈니스 특강, 관광 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 861백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	861	0	861
국 비
시 도 시
시군구비	75	0	75
지 방 채
민간자본	786	0	786
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2013.8. 8  : 제40차 한국기독실업회 한국대회초청음악회 계획서 제출

○ 2013.8.12  : 제40차 한국기독실업회 한국대회초청음악회 보조금 교부 결정

○ 2013.8.14  : 제40차 한국기독실업회 한국대회초청음악회 행사 개최

○ 2013.12.30 : 제40차 한국기독실업회 한국대회초청음악회 보조금 정산 완료

□ 향후계획

○ 해당 없음

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 1,047백만원(시비75, 자담972) 변경 861백만원(시비75, 자담786)으로 자담186백만원을 변경됨

개별 투융자심사 사업 추진현황 - 도심사

사업명

여수 거북선축제관 건립사업

담당자

문화예술과 정회훈(☎659-4742)

□ 사업목적 및 필요성

○ 거북선축제 가장물의 온전한 보존 및 전시를 위해 축제관을 건립하여 거북선축제의 전통과 맥을 후세에 전승하고 구전자료를 체계적으로 자료화하여 후세에 전승할 기틀을 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 9월 ~ 2014년 6월(1년)

○ 위 치 : 여수시 하멜로 96-15(종화동) 일원

○ 규 모 : 축제관 건립 1,000㎡(철골 구조), 부지면적 : 1,180㎡,

- 가장물 전시, 소품전시실, 영상실, 소회의실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,980백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,980			2,980
국 비
시 도 시
시군구비	2,980			2,980
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ ‘13. 04 : 도 투융자사업 심사 의뢰

○ ‘13. 10 : 대상 부지(하멜전시관 옆)에 대한 적정성 논란으로 시의회에서 예산 승인이 부결되어 축제관 건립 유보

□ 향후계획

○ 적정한 사업대상지를 선정하여 시의회 설득 후 사업 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○  ○ 사업기간

- 당초 : ‘13. 9. ~ ’14. 6.

- 변경 : 의회 예산승인 부결로 사업 추진 보류

개별 투융자심사 사업 추진현황 - 도심사

사업명

제48회 여수거북선축제

담당자

문화예술과 정회훈(☎659-4742)

□ 사업목적 및 필요성

○ 성웅 이순신 장군과 전라좌수영민의 호국정신 계승 및 시민 자긍심 고취와 지역사회 통합에 기여하는 축제를 구현하고, 역사적 교훈에 현대적 재미를 가미한 전통․호국문화 대표 관광축제로 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 5. 3. ~ 5. 6.

○ 위 치 : 이순신광장 및 여수시 일원

○ 규 모 : 200천명(관람객)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 815백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	815				815
국 비
시 도 비	15				15
시군구비	800				800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘13. 12. 축제 기획위원회 구성

○ ‘14. 02. 축제 기본계획 수립

○ ‘14. 04. 세월호 침몰사고로 축제 무기한 연기

○ ‘14. 05. 거북선축제 취소

□ 향후계획

○ ‘14. 10 축제 기획위원회 구성

□ 사업변경 내역

○ 사업기간

- 당초 : ‘14. 5. 3. ~ 5. 6.

- 변경 : 세월호 참사로 축제 취소

개별 투융자심사 사업 추진현황 - 도심사

사업명

여수시 장애인 종합 복지관 신축

담당자

노인장애인과 주선미(☎659-3729)

□ 사업목적 및 필요성

○ 복지관(본관) 노후, 지반 침하 등 활동적인 균열로 안전 문제 발생

○ 장애물 없는 생활환경 인증 건물로 신축하여 편안하고 쾌적한 환경 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 1. ～ 12.

○ 위 치 : 여수시 만성로 173(미평동)

○ 규 모 : 연면적 2,907㎡  [지하 1층, 지상 3층] ※철거후 신축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,000 백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	5,000			5,000
국 비	3,000			3,000
시 도 시	1,000			1,000
시군구비	1,000			1,000
지 방 채
민간자본
기 타

※ 2014년 예산확보 : 1,490백만원(자체 300 분권 490 특별 700)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 2014년 공유재산 심의 및 의결 : ‘13.12.20.

○ 구 여수여명학교 임시이전 및 복지관 폐쇄 : ‘14. 1.

○ 복지관 기본설계 실시용역 및 계약심사 : ‘14. 1.

□ 향후계획

○ 복지관 건립 설계 재공모 : ‘14. 6. 27. ～ 7. 30.

○ 사업시행 : ‘14. 8. ～ 12.

□ 사업변경 내역

○ 국․도비 예산의 추가확보를 위해 연차사업으로 추진

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

시청 직장어린이집 신축공사

담당자

안전행정과 김경석(☎659-3209)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여수시청 소속 공무원 자녀의 보육서비스 질적향상을 도모하고

직원들의 경제적․사회적 활동을 원활하게 지원하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 10. 10～2014. 3. 28

○ 위 치 : 여수시 시청동 1길 30(학동)

○ 규 모 : 지하1층, 지상3층/743.51㎡(연면적 2,278.26㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,327백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,327		1,041	3,286
국 비
시 도 시
시군구비	4,327		1,041	3,286
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 계약체결 : 2013. 10. 07.

○ 공사착공 : 2013. 10. 10.

○ 기공식 : 2013. 11. 19.

○ 위ㆍ수탁 계약 체결 : 2014. 2. 26.

○ 공사 준공 : 2014. 3. 08.

○ 개  원 : 2014. 3. 20.

□ 향후계획

○ 위탁운영

- 기간 : 2014.2.26 ～2017.2.25(3년간), (2014년 운영비 : 431,052천원)

- 위탁체 : 푸르니 보육지원재단(대표 김온기, 서울 서초구 소재)

□ 사업변경 내역

○ 당초(2013년) : 4,020백만원

○ 변경(2014년) : 4,327백만원(증307백만원, 본예산)

- 내용 : 부지면적 및 건축 연면적 등 최초 과업보다 증가

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

여수 해양레저 스포츠타운 조성사업

담당자

해양항만레저과 정종기(☎659-3967)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소득의 향상과 레저스포츠 성향의 변화로 날로 증가하는 해양레저

스포츠 수요에 대응하고

○ 사계절 해양레저스포츠를 즐기고 교육할 수 있는 기반시설 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ～2014

○ 위 치 : 여수시 웅천동 웅천택지개발사업지구 공공마리나

○ 규 모 : 건물 3층/연면적 990㎡(교육장, 휴게실 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,600백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,600		90	3,510
국 비	2,520		90	2,430
시 도 시
시군구비	1,080			1,080
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ‘13.  2.  9 : 기본 및 실시설계용역 계약 체결

○ ‘14.  6. 03 : 전남도 계약심사 결과 통보

○ ‘14.  6. 27 : 건축공사 총괄계약 및 1차분 착공

□ 향후계획

○ 2015. 2  공사 준공예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

변촌~장촌간 군도(22호선)

확포장공사

담당자

도로과 차용석(☎659-4076)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민들의 생활환경개선 및 교통 불편 해소로 이용자 편의제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013~2016

○ 위 치 : 여수시 삼산면 서도리

○ 규 모 : L=2.2km,B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800 백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,800		220	1,000	3,580
국 비
시 도 시
시군구비	4,800		220	1,000	3,580
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ '13. 6. 21 : 실시설계용역 착수

○ ‘14. 6. 17 : 변촌~장촌간 도로(장촌마을 앞) 확포장공사 착공

□ 향후계획

○ ‘14. 12. : 실시설계용역 완료

○ ‘15.  1. : 편입토지 보상

○ ‘16. 12. : 공사완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

여수시립 공원묘지 진입로 개설공사

담당자

도로과 차용석(☎659-4076)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시립 공원묘지 막다른 진입도로로 명절 성묘객 불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013~2016

○ 위 치 : 여수시 소라면 봉두리~대포~율촌면

○ 규 모 : L=4.0km,B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000 백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	5,000		80	500	4,420
국 비
시 도 시
시군구비	5,000		80	500	4,420
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ '13. 12.  : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ ‘14. 12. : 실시설계용역 완료

○ ‘15.  1. : 편입토지 보상

○ ‘16. 12. : 공사완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

찾아가고 싶은 섬(여자도)

조성사업

담당자

섬자원개발과 고희승(☎659-3986)

□ 필요성 및 기대효과

○ 열악한 도서지역 개발로 주민소득 및 일자리 창출로 정주 의식과 애향       심을 구축

○ 특수상황지역 도서주민들의 주민소득증대에 기여

□ 사업개요

○ 기간 : 2014년～2017년

○ 위치 : 여수시 화정면 여자리 일원

○ 사업규모 : 예술인센터조성 1식, 수산물저장시설 1식, 기타 기반시설 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원(국비 2,000, 도비 250, 시비 250, 기타 0)

○ 지금까지 집행액 : 625백만원(2014년)

○ 향후 소요액 : 1,875백만원(2015년～2017년)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,500		625	625	1,250
국 비	2,000		500	500	1,000
시 도 시	250		62.5	62.5	125
시군구비	250		62.5	62.5	125
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 2014. 06.  : 기본계획 용역 착수

○ 2014. 06.  : 2014년 사업시행분 공사착공(2014.12. 준공예정)

□ 향후계획

○ 2014. 12 : 2014년 사업분 준공

○ 2015년～2017년 : 예술인센터 및 수산물저장시설 사업시행

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

GS칼텍스 사회공헌사업 부지매입

담당자

투자유치과 홍숙자(☎659-3396)

□ 사업목적 및 필요성

○ GS칼텍스(주)에서 사회공헌사업의 필요한 부지를 매입하여 공연․전시장       중심의 문화예술공원 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008. 1. ~ 2015. 12.

○ 위 치 : 여수시 시전동 망마산․장도 근린공원 일원

○ 규 모 : 701천㎡(망마산 606, 장도 95)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,000 백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	35,000	13,900	7,600	300	13,200
국 비
시 도 시
시군구비	35,000	13,900	7,600	300	13,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 52 %)

○ 2012년          : 1단계 핵심시설 공연․전시장, 산책로 부지 매입

○ 2014년 7월 현재 : 2단계 사업보상 중

□ 향후계획

○ 2014년      : 2단계 사업 부지(장도) 매입

○ 2015년 이후 : 망마산 잔여부지 매입

□ 사업변경 내역

○ 사업비 변경 : 350억원 (당초 150억, 증 200억)

○ 변경   사유 : 도시계획 시설사업 실시계획 확정에 따른 면적 증가와 매입 예정 기준가격(공시기자) 30% 이상 증가에 따른 사업비 상승

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

여수학숙 건립사업

담당자

교육지원과 정선태(☎659-4710)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수도권으로 진학한 대학생들이 비싼 주거비 부담을 덜어주고, 학업에

전념할수 있는 여건 조성으로 유능한 인재를 양성하기 위해 운영

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘13. 9. ~’14. 2.

○ 위 치 : 서울특별시 도봉구 창동

○ 규 모 : 지상 7층, 지하 1층(대지306.6㎡, 건물 1,341.71㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   3.255백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,255	3,255	3,255
국 비
시 도 시
시군구비	3.255	3,255	3,255
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘13. 09. ~ ’14. 02. : 건물 매입 및 리모델링 공사

○ ‘13. 12. ~ ’14. 01. : 여수학숙 설치 및 운영 조례․시행규칙 제정

○ ‘14. 3. : 여수학숙 개관 및 운영

□ 향후계획

○ 입사생 결원에 대하여 연중 수시 모집을 통해 예비 인원으로 관리하고

결원 발생시 순위에 따라 입사 조치

□ 사업변경 내역(해당시)

- 당초 : 3,250백만원  -변경 : 3,255백만원(리모델링, 가구비 증가)

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

만흥 검은모래해변 배후부지 개발사업

담당자

해양항만레저과 김정남(☎ 659-3975)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해안선 인접 상가와 주택을 철거하여 해안선을 복원(휴양림 등)하고 배후부지에 상가․숙박시설․이주택지조성 등 정주여건 개선

○  자연재해(태풍, 해일 등)로 인한 피해예방과 해수욕장 주변경관 정비

□ 사업개요

○ 위    치 : 여수시 만흥동 일원

○ 사 업 량 : 배후부지 조성 205,000㎡(상가․숙박시설․이주택지 등)

○ 사 업 비 : 683억원(공사비 182, 보상비 346, 기타 119) ※ 시비 100%

※ 현재 기본계획 및 실시설계수립용역 추진 중

○ 사업기간 : 2013. ~ 2018.(6개년)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 68,328백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	68,328		600	596	67,132
국 비
시 도 시
시군구비	68,328		600	596	67,132
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ ‘13. 3. 13. : 타당성 조사용역 착수(’13. 4. 26. 완료)

○ ‘13. 5. 28. : 기본계획 및 실시설계 용역 착수

□ 향후계획

○ ‘14. 12. 27.      : 기본계획 및 실시설계 용역 완료

○ ‘15. 1 ~ ’18. 12 : 보상 및 공사시행

□ 사업변경 내역

구 분	사업규모	총사업비(백만원)	사업기간	비 고
당 초	부지 조성 205.000㎡	64,700	2013.~2018.
변 경	부지 조성 215.000㎡	68,328	2013.~2018.

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

소규모 농촌용수(저수지) 개발사업

담당자

건설방재과 정을룡(☎659-4052)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가뭄상습지역에 소규모 저수지를 축조하여 안정적인 농업용수를 공급하고 영농편의 도모 및 농업생산성 증가로 소득증대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 1. ~ 2015. 12.

○ 위 치 : 화양면 장수리  1131번지 일원

○ 규 모 : 저수지 축조 1개소(L=169m, H=12m, B=6m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,231백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,231	90	607	2,232	1,302
국 비	2,962	63	427	1,560	912
시 도 시
시군구비	1,269	27	180	672	390
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 8%)

○ 2013.  3. 13. : 기본계획 수립(전라남도)

○ 2013.  9. 10. : 시행계획 승인(전라남도)

○ 2013. 12. 20. : 사업 착공

□ 향후계획

○ 2015. 12.     : 사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

웅천～소호 간 도로개설공사

담당자

도로과 명호남(☎659-4071)

□ 사업목적 및 필요성

○ 웅천택지 준공에 따른 교통량 급증으로 시전, 학동, 소호, 선원동 주변 교통 체증 및 병목현상 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013～2018

○ 위 치 : 여수시 웅천동～소호동

○ 규 모 : 도로개설 L=1.068km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 71,700백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	71,700	-	100		71,600
국 비
시 도 시
시군구비	71,700	-	100		71,600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : -%)

○ 2013. 12. : 타당성조사 완료

- 결과 : B/C(비용편익비) 1.16

□ 향후계획

○ 2015.  3. : 기본 및 실시설계

○ 2016. 1.～2018. 12. : 사업시행

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

동문우체국~자산공원입구 도시계획도로 개설공사

담당자

도로과 차용석(☎659-4076)

□ 사업목적 및 필요성

○ 학생들의 통학로가 매우 협소하여 차량통행에 따른 보행자들의 안전 사고 위험요인 해소 및 자산공원 주차장 버스진입을 위한 도로 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013~2016

○ 위 치 : 여수시 관문동 299-1번지 일원

○ 규 모 : L=1.2km, B=20.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,580 백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	28,580		80	2,000	26,500
국 비
시 도 시
시군구비	28,580		80	2,000	26,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘13. 7. : 실시설계용역발주

□ 향후계획

○ ‘14.  6. : 편입토지 및 지장물 협의보상(20억원)

○ ‘15. 12. : 편입토지 및 지장물 협의보상

○ ‘16. 12. : 공사완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

상봉~여흥간 도로 확포장공사

담당자

도로과 박성(☎659-4077)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민불편사항 해소 및 지역주민 숙원사업 해결

○ 편리한 교통수단 확보로 농업소득 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013~2016

○ 위 치 : 여수시 율촌면 상봉~여흥

○ 규 모 : L=6.2km, B=9.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000 백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	7,000	140			6,860
국 비
시 도 시
시군구비	7,000	140			6,860
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ‘10. 2. : 실시설계용역준공

□ 향후계획

○ ‘14.  6. : 편입토지 및 지장물 협의보상(20억원)

○ ‘15. 12. : 편입토지 및 지장물 협의보상

○ ‘16. 12. : 공사완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

무선산 근린공원 조성사업

담당자

공원과 최우진(☎659-4634)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쾌적한 삶․깨끗한 도시 이미지가 또 하나의 상징이 되도록 장기 미집행

공원을 조성하여 시민들의 보건, 휴양, 정서생활의 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1 ~ 2019. 12

○ 위 치 : 여수시 호장동 일원(무선산 공원)

○ 규 모 : 공원조성 A=875,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,300백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	13,300	150	-	3,000	10,150
국 비
시 도 시
시군구비	13,300	150	-	3,000	10,150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1.1 %)

○ '77. 04. 18 : 근린공원 결정고시(건교부 고시 제69호)

○ ‘14. 02. 26 : 공원조성계획 지역주민, 시의원 설명회 및 의견수렴

○ ‘14. 03. 11 : 주민공람 및 관련부서 협의

○ ‘14. 05. 09 : 공원조성계획 결정 및 고시(여고 제129호)

□ 향후계획

○ ‘14. 10 : 실시설계 및 실시계획 인가

○ ‘15. 02 : 무선공원 조성사업(1단계) 착공

○ ‘17. 12 : 무선공원 조성사업(1단계) 준공

○ ‘20. 12 : 무선공원 조성사업(2단계) 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

11-2. 지방채 발행사업

우리 여수시에서 ‘13년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
		해	당	없	음

▸ (대상사업) 지방채 발행사업 중 2013년에 추진한 사업

▸ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

▸ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

11-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황 : 없음

개별 지방채 발행사업 추진현황 (작성서식 예시)

11-3. 민간투자사업

우리 여수시에서 ‘13년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				‘12년까지 부담액	‘13년부담 예정액	‘14년 이후 부담 예정액
BTL	‘05년BTL사업	푸른여수지키미(주)	38,662	12,460	4,548	75,843	‘2010.3~ 2030.3
BTO	음식물자원화시설 설치사업	주)여수엑스포환경	6,549	5,788	1,896	24,200	'10.1.15～ '25.1.14

▸ 총사업비 : 민간투자사업 심의시 총사업비

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2013년까지는 집행액(결산기준), 2014년 이후는 추정액

▸ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

☞ 재정부담액이 큰 사업 위주로 재정부담이 큰 사유 설명

▸ ‘05년 하수관거정비 BTL 사업 임대료·운영비 지급

▪ 근거 : 2005년 여수시 하수관거정비 BTL 민간투자사업 실시협약 제41조(운영비의 결정), 제56조(시설임대료의 산정)

▪ 설명 : 주무관청이 사업시행자에게 지급하는 임대료·운영비는 준공 후 투자비와 사업수익률·물가상승률을 반영하여 임대료를 산정 20년간 사업시행자에게 매 분기별 국비, 시비를 포함 균등하게 지급

※ 환경부 승인된 BTL재무모델에 근거 산정 지급

11-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

‘05년 하수관거 BTL 사업

담당자

하수도과 임인수(☎659-4986)

□ 필요성 및 기대효과

○ BTL을 도입하여 조기에 하수관거 정비로 보급률을 선진국 수준으로 개선

○ 대폭적인 관거 정비로 하수처리장 가동 효율 극대화 도모

□ 사업개요

○ 기간 : 2006.07.31~ 2010.03.30

○ 위치 : 6개처리분구(학동, 화장, 신월, 여도, 둔덕, 세구지)

○ 민간사업자 : 푸른여수지키미(주)

○ 총사업비 : 38,662백만원

○ 사업규모 : L=47.7㎞, 배수설비 4,036개소

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자액	‘13연도	‘14연도	‘15년 이후
계	92,851	12,460	4,548	4,559	71,284
국 비	64,996	8,722	3,184	3,191	49,899
시 도 비
시군구비	27,855	3,738	1,364	1,368	21,385
기 타

□ 추진단계

○ 운영기간 : 2010. 03 ~ 2030. 03(20년)

□ 향후계획

○ 매분기 성과평가에 따라 임대료, 운영비 지급

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

여수시 음식물 자원화시설 설치사업

담당자

도시미화과

송태귀(☎659-3847)

□ 필요성 및 기대효과

○ 관내에서 발생하는 음식물류 폐기물의 안정적 처리

○ 음식물류 폐기물의 자원재활용으로 환경오염 방지

□ 사업개요

○ 기간 :  2002. 4 ～ 2010. 1

○ 위치 : 여수시 진달래길 310-142(월내동)

○ 민간사업자 : 주)여수엑스포환경

○ 총사업비 : 6,549백만원(국비 1,620  / 시비 658 / 민자  4,271)

○ 사업규모 : 75톤/일(2012년  60톤/일 ⇒75톤/일 증설)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

- 운영기간 : 2010. 1. 15 ～ 2025. 1. 14(15년간)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자액	‘13연도	‘14연도	‘15년 이후
계	31,884	5,788	1,896	2,200	22,000
국 비
시 도 비
시군구비	31,884	5,788	1,896	2,200	22,000
기 타

○ 2014년 부담예정액 : 2,200백만원(사용료)

○ 2014년 이후 부담예정액 : 2,200백만원/년간(사용료)

□ 추진단계

○ 음식물자원화시설 운영 중

□ 향후계획

○ 음식물자원화시설 2025년 1. 14까지 민간사업자 운영(사용료 지급)

○ 사용료는 매년 물가상승분 인상하여 반영(2014년 78,729원/톤당)

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 변경 : 당초 60톤/일 ⇒ 변경 75톤/일(2012. 04월 준공)

- 건설비 전액 민간사업자 부담(18억)

- 발생량 증가(박람회 개최 및 2013년부터 다량배출사업장 규모 증대로 시에서 처리할 음식물폐기물 발생량 증가)