[별지 제1호 서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	여수시 어린이도서관 생활SOC복합화사업
② 추진배경	○ 어린이 특화도서관 건립으로 어린이 문화교육 랜드마크 형성 ○ 부모와 어린이들이 즐겨 찾는 소통공간으로 도서관 발전 도모 ○ 아동권리 증진 및 아동친화도시 브랜드 이미지 강화
③ 사업개요	○ 사 업 명 : 여수시 어린이도서관 생활SOC복합화사업 ○ 사업위치 : 여수시 소라면 죽림리 1248번지(산들공원) ○ 사업내용 : 어린이도서관 및 공동육아나눔터 건립 (생활SOC복합화) ○ 규 모 : 대지면적 5,239.4㎡, 연면적 2,825㎡(지하1층, 지상3층) ○ 사업기간 : 2021. 11. ~ 2025. 12. ○ 사 업 비 : 130억원(국비 6.25 도비 37.27 시비 86.48)
④ 사업부서	도서관운영과	⑤ 담당자		사서5급 배의준 시설8급 임예은
⑥ 선정기준	10억 원 이상 사업	⑦ 사업기간		2021. ~ 2025.
<그간 주요 추진내용>
○ 건립부지 검토(안) ※ 시립도서관-18648(2019.12.19.)		‘19.12.19.	권오봉 시장 이재영 부시장 김용필 국장 박삼숙 과장 배의준 팀장 이경환 주무관 (협조) 지홍섭 운영팀장 조계윤 공원과장 정대홍 공원관리팀장
○ 건립 기본계획(방침 결정) ※ 시립도서관-13214(2020.08.24.)		‘20. 8. 24.	권오봉 시장 서은수 부시장 김학섭 국장 한광민 과장 조일섭 팀장 배금호 주무관 (협조) 나병완 기획예산과장 이 강 예산팀장 정진희 혁신전략팀장 장병연 여성가족과장 최윤영 가족문화팀장 김문환 도시계획과장 서병규 도시계획팀장 서채훈 공원과장 정대홍 공원관리팀장
○ 타당성조사 및 기본계획 수립용역 계약의뢰 ※ 시립도서관-14768(2020.10.07.)		‘20. 10. 7.	한광민 과장 조일섭 팀장 배금호 주무관 (협조) 나병곤 기획예산과장 정진희 혁신전략팀장
○ 2022년도 균특사업 예산신청 ※ 시립도서관-2534(2021.02.15.)		‘21. 2. 15.	황경미 과장 조일섭 팀장 김가은 주무관
○ 2022년도 생활SOC복합화사업 신청서 제출 ※ 시립도서관-7389(2021.04.29.)		‘21. 4. 29.	황경미 과장 조일섭 팀장 김가은 주무관 (협조) 장병연 여성가족과장 최윤영 가족문화팀장 빈경용 가족문화팀 차장
○ 건립부지 도시관리계획 및 공원조성계획 변경용역 시행 ※ 시립도서관-19822(2021.10.25.)		‘21.10.25.	황경미 과장 조일섭 팀장 김가은 주무관 (협조) 조계윤 기획예산과장 오병구 계약1팀장
○ 건축기획용역 시행 ※ 시립도서관-20794(2021.11.03.)		‘21. 11. 3.	황경미 과장 조일섭 팀장 김가은 주무관 (협조) 조계윤 기획예산과장 김진욱 계약2팀장
○ 건축위원회 심의 요청 ※ 시립도서관-3507(2022.02.23.)		‘22. 2. 23.	박삼숙 과장 정봉주 팀장 김가은 주무관
○ 건축기획용역 간담회 개최 결과 ※ 시립도서관-4255(2022. 3. 7.)		‘22. 3. 7.	나병곤 국장 박삼숙 과장 정봉주 팀장 김가은 주무관
○ 건축기획용역 기간연장 검토 보고 ※ 시립도서관-5479(2022. 3. 23.)		‘22. 3. 23.	나병곤 국장 박삼숙 과장 정봉주 팀장 김가은 주무관 (협조) 조계윤 기획예산과장 김진욱 계약2팀장
○ 설계공모 계획(안) ※ 시립도서관-6646(2022.04.07.)		‘22. 4. 7.	박현식 부시장 나병곤 국장 박삼숙 과장 정봉주 팀장 김가은 주무관 (협조) 류갑선 여성가족과장 양혜경 代가족문화팀장 조계윤 회계과장 김진욱 계약2팀장 최정일 代허가민원과장
○ 설계공모 운영위원회 개최 알림 ※ 시립도서관-6825(2022.04.07.)		‘22. 4. 11.	나병곤 국장 박삼숙 과장 정봉주 팀장 김가은 주무관
○ 설계공모 심사위원 선정 결과보고 ※ 시립도서관-7223(2022.04.14.)		‘22. 4. 14.	나병곤 국장 박삼숙 과장 정봉주 팀장 김가은 주무관
○ 설계공모 공고 ※ 시립도서관-7232(2022.04.14.)		‘22. 4. 14.	박삼숙 과장 정봉주 팀장 김가은 주무관
○ 설계공모 심사위원회 운영 계획 ※ 시립도서관-12115(2022.06.20.)		‘22. 6. 20.	나병곤 국장 박삼숙 과장 정봉주 팀장 김가은 주무관
○ 2023년도 균특회계 전환사업(도 자율편성) 예산신청 ※ 시립도서관-12678(2022.06.27.)		‘22. 6. 27.	박삼숙 과장 정봉주 팀장 김가은 주무관
○ 설계공모 심사위원회 결과보고 ※ 시립도서관-12768(2022.06.27.)		‘22. 6. 27.	나병곤 국장 박삼숙 과장 정봉주 팀장 김가은 주무관
○ 설계공모 재공고 계획 ※ 시립도서관-13045(2022.06.29.)		‘22. 6. 30.	나병곤 국장 박삼숙 과장 정봉주 팀장 김가은 주무관 (협조) 김동호 허가민원과장
○ 건축 설계공모 운영위원회 개최 알림 ※ 시립도서관-13114(2022.06.30.)		‘22. 6. 30.	박삼숙 과장 정봉주 팀장 김가은 주무관
○ 설계공모 심사위원회 운영 계획 ※ 시립도서관-18407(2022.09.08.)		‘22. 9. 8.	박삼숙 과장 정봉주 팀장 정아영 주무관
○ 설계공모 심사위원회 결과보고 ※ 시립도서관-19345(2022.09.22.)		‘22. 9. 22.	나병곤 국장 박삼숙 과장 정봉주 팀장 정아영 주무관
○ 여수시 어린이도서관 생활SOC복합화사업 기본 및 실시설계 용역 계약 의뢰 ※ 시립도서관-19458(2022.09.23.)		‘22. 9. 23.	박삼숙 과장 정봉주 팀장 정아영 주무관
○ 여수시 어린이도서관 생활SOC복합화사업 설계 자문위원회 및 착수보고회 개최 계획 ※ 시립도서관-22861(2022.11.04.)		‘22. 11. 4.	나병곤 국장 박삼숙 과장 정봉주 팀장 정아영 주무관
○ 여수시 어린이도서관 생활SOC복합화사업 설계 관련 직원 간담회 개최 계획 ※ 시립도서관-23702(2022.11.16.)		‘22. 11. 16.	박삼숙 과장 정봉주 팀장 정아영 주무관
○ 여수시 어린이도서관 생활SOC복합화사업 기본 및 실시설계 용역 중간보고회 개최 계획 ※ 도서관운영과-3148(2023.02.23.)		‘23. 2. 23.	김철호 代교육복지국장 박삼숙 과장 김장수 팀장 정아영 주무관
○ 여수시 어린이도서관 생활SOC복합화사업 기본 및 실시설계 용역 중간보고회 결과 보고 ※ 도서관운영과-4301(23.03.12.)		‘23. 3. 12.	서정신 교육복지국장 박삼숙 과장 김장수 팀장 정아영 주무관
○ 여수시 어린이도서관 생활SOC복합화사업 기본 및 실시설계 용역 변경계약(기간 연장) 요청 ※ 도서관운영과-5350(23.03.24.)		‘23. 3. 24.	박삼숙 과장 김장수 팀장 정아영 주무관
○ 지적 경계 측량 의뢰(여수시 소라면) ※ 도서관운영과-6914(2023.04.13.)		‘23. 4. 13.	박삼숙 과장 김장수 팀장 정아영 주무관
○ 여수시 어린이도서관 명칭 공모 추진 계획 ※ 도서관운영과-8364(23.05.02.)		‘23. 5. 2.	정기명 시장 김종기 부시장 서정신 교육복지국장 박삼숙 과장 김장수 팀장 정아영 주무관
○ 여수시 어린이도서관 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청 ※ 도서관운영과-10099(2023.05.24.)		‘23. 5. 24.	박삼숙 과장 김장수 팀장 정아영 주무관
○ 여수시 어린이도서관 생활SOC복합화사업 기본 및 실시설계용역 용역중지 요청 ※ 도서관운영과-11238(2023.06.08.)		‘23. 6. 8.	박삼숙 과장 김장수 팀장 정아영 주무관
○ 어린이도서관 에너지효율등급 예비인증 수수료 지급 ※ 도서관운영과-11249(2023.06.08.)		‘23. 6. 8.	박삼숙 과장 김장수 팀장 정아영 주무관
○ 여수시 어린이도서관 생활SOC복합화사업 기본 및 실시설계 용역 일시정지 검토보고 ※ 도서관운영과-11264(2023.06.08.)		‘23. 6. 8.	박삼숙 과장 김장수 팀장 정아영 주무관
○ 여수시 어린이도서관 생활SOC복합화사업 기본 및 실시설계 용역 일시정지 요청 ※ 도서관운영과-11335(2023.06.09.)		‘23. 6. 9.	박삼숙 과장 김장수 팀장 정아영 주무관
○ 여수시 어린이도서관 명칭 공모 결과 및 최종 확정 ※ 도서관운영과-17794(2023.08.23.)		‘23. 8. 23.	정기명 시장 김종기 부시장 김태횡 교육복지국장 박삼숙 과장 김장수 팀장 정아영 주무관
○ 여수시 어린이도서관 생활SOC복합화사업 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 수수료 지급 ※ 도서관운영과-18404(2023.08.29.)		‘23. 8. 29.	박삼숙 과장 김장수 팀장 정아영 주무관
○ 장애물 없는 생활환경(BF) 인증제도 예비인증 심사 결과에 따른 답변 요청(여수시 어린이도서관) ※ 도서관운영과-24384(2023.11.07.)		‘23. 11. 7.	박삼숙 과장 김장수 팀장 정아영 주무관
○ 여수시 어린이도서관 생활SOC복합화사업 기본 및 실시설계용역 최종보고회 개최 계획 ※ 도서관운영과-27294(2023.12.11.)		‘23. 12. 11.	김태횡 교육복지국장 박삼숙 과장 김장수 팀장 정아영 주무관
○ 여수시 어린이도서관 건립 설계 경제성검토(VE) 용역 시행 ※ 도서관운영과-27361(2023.12.12.)		‘23. 12. 12.	박삼숙 과장 김장수 팀장 정아영 주무관 (협조) 한진숙 회계과장 최철웅 계약2팀장
○ 여수시 어린이도서관 생활SOC복합화사업 건립설계 경제성검토(VE)용역 계약 의뢰 ※ 도서관운영과-27479(2023.12.13.)		‘23. 12. 13.	박삼숙 과장 김장수 팀장 정아영 주무관
○ 여수시 어린이도서관 생활SOC복합화사업 기본 및 실시설계용역 최종보고회 결과 보고 ※ 도서관운영과-28616(2023.12.27.)		‘23. 12. 27.	김태횡 교육복지국장 박삼숙 과장 김장수 팀장 정아영 주무관
○ 여수시 어린이도서관 생활SOC복합화사업 건립설계 경제성검토(VE)용역 계약 체결 ※ 회계과-1504(2024.01.09.)		‘24. 1. 9.	강행숙 과장 우희원 팀장 이지향 주무관
○ 여수시 어린이도서관 건립공사 기술자문 요청 ※ 도서관운영과-1969(2024.01.26.)		‘24. 1. 26.	박삼숙 과장 강한빛 팀장 임예은 주무관
○ 2024년 제1차 계약심의위원회 심의 안건 제출 ※ 도서관운영과-3288(2024.02.15.)		‘24. 2. 15.	박삼숙 과장 강한빛 팀장 임예은 주무관
○ 여수시 어린이도서관 생활SOC복합화사업 시행에 따른 공용건축물 건축협의 ※ 도서관운영과-4937(2024.03.07.)		‘24. 3. 7.	박삼숙 과장 강한빛 팀장 임예은 주무관
○ 여수시 어린이도서관 생활SOC복합화사업 계획변경 ※ 도서관운영과-5186(2024.03.11.)		‘24. 3. 11.	정기명 시장 김종기 부시장 류갑선 교육복지국장 박삼숙 과장 강한빛 팀장 임예은 주무관 (협조) 박형열 기획예산담당관 서은주 예산팀장
○ 공공도서관 건립 지원 사업계획서(변경) 제출 ※ 도서관운영과-7330(2024.04.04.)		‘24. 4. 4.	박삼숙 과장 강한빛 팀장 임예은 주무관
○ 공공도서관 건립 지원 사업계획 변경 승인 안내 ※ 도 문화예술과-4437(2024.04.22.)		‘24. 4. 23.	노영환 과장 조명주 팀장 최대한 주무관
○ 공공도서관 건립 - 여수시 어린이도서관 생활SOC복합화사업 성별영향평가서 제출 ※ 도서관운영과-12072(2024.06.03.)		‘24. 6. 3.	신정임 代도서관운영과장 강한빛 팀장 임예은 주무관
○ 여수시 어린이도서관 건립공사 일상감사 및 계약심사 의뢰 ※ 도서관운영과-2138(2024.08.05.)		‘24. 8. 5.	신정임 代도서관운영과장 강한빛 팀장 임예은 주무관
○ 여수시 어린이도서관 생활SOC복합화사업 시공단계의 건설사업관리계획 제출 ※ 도서관운영과-3109(2024.08.16.)		‘24. 8.16.	배의준 도서관운영과장 강한빛 팀장 임예은 주무관
○ 여수시 어린이도서관 건립공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 일상감사 의뢰 ※ 도서관운영과-3988(2024.08.26.)		‘24. 8.16.	신정임 代도서관운영과장 임예은 주무관
○ 여수시 어린이도서관 건립공사 (전기, 소방, 통신) 계약심사 의뢰 ※ 도서관운영과-9154(2024.10.24.)		‘24. 10. 24.	배의준 도서관운영과장 강한빛 팀장 임예은 주무관