- 2021년 정기 5차 -

여수시 지방재정 투자심사 결과

□ 심사위원회 개요 및 결과

□ 일시․장소 : 2021. 10. 14.(목) / 시청 상황실(2층)

□ 참     석 : 12명 (불참석 2명)

□ 내     용 : 주요 투자사업의 필요성 및 사업계획의 타당성 등 심사

□ 심사안건 및 심사결과

(단위 : 억원)

연번	추진 부서	사업명	사업 기간	사업량	사업비	심사결과
1	도로과	소라면 중촌~조산 농어촌 도로개설	2022 - 2025	도로개설 L=2,100m, B=7.5m	52 (시 52)	적정
2	공원과	관기저수지 생태공원 사업	2022 - 2023	수변산책로 L=2.9km, B=2~3m 편의시설(주차장, 화장실) 1식	51.5 (시 51.5)	조건부
3	공원과	미세먼지 차단숲 조성사업	2022 - 2023	수목식재 : 숲 조성 A=4.5ha (가시나무, 동백나무 등 50,000주 식재)	45 (국 22.5) (시 22.5)	조건부
4	문화예술과	개항 100주년 기념 창작뮤지컬 제작 공연	2022 - 2023	2023년 개항 100주년 기념 창작뮤지컬 제작 공연 1식	2.9 (시 2.9)	조건부