정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	돌산지역 급수안정화 대책사업
② 추진배경	- 돌산지역 발전으로 급수량 증가 및 기설 관로 공급 능력 부족 - 배수관(D= 400㎜) 한 개 라인 운영으로 누수 등 사고발생시 대체급수 불가능
③ 사업개요	○ 위 치: 여수시 돌산읍 우두리 및 남산동 일원 ○ 사 업 량: 배수지(V= 3,000㎥), 가압장 3개소/ 송‧배수관 L= 4.51㎞ ○ 사 업 비: 12,700백만 원
④ 사업부서	여수시 상수도과		⑤ 담당자	시설7급 한상범 시설5급 이광재
⑥ 선정기준	10억 원 이상 사업		⑦ 사업기간	‘19.∼‘24.
<그간 주요 추진내용>
○ 기본 및 실시설계 용역 추진계획 ※ 상수도과-2163호		‘19. 2. 1.	권오봉 시장 김재영 부시장 김정남 단장 강 균 과장 차용석 팀장 유재영 주무관
○ 실시설계용역 최종 결과보고 ※ 상수도과-15264호		‘20. 8. 6.	권오봉 시장 서은수 부시장 정윤수 단장 오정환 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 돌산지역 급수안정화 대책사업 일상감사 결과 통보 ※ 감사담당관-9501호		‘21. 11.19.	-
○ 돌산지역 급수안정화 대책사업 시행 ※ 상수도과-23088호		‘21.11. 26.	권오봉 시장 박현식 부시장 김지선 단장 오정환 과장 홍종옥 팀장 강호권 주무관
○ 돌산지역 급수안정화 대책사업 계약심사 결과 회신 ※ 회계과-58534호		‘21.11.26.	-

○ 계약의뢰 ※ 상수도과-23436호	‘21.11. 30.	오정환 과장 홍종옥 팀장 강호권 주무관
○ 계약체결 및 감독공무원 지정 ※ 수도행정과-14821호	‘21.12. 22.	-
○ 품질 및 안전관리자 변경 선임검토 보고 ※ 상수도과-12596호	‘22. 6. 2.	정일석 팀장 홍종옥 팀장 임영수 주무관
○ 폐기물처리용역 계약 의뢰 ※ 상수도과-14779호	‘22. 6. 29.	주영근 과장 홍종옥 팀장 임영수 주무관
○ 폐기물처리용역 계약 체결 ※ 수도행정과-8427호	‘22. 7. 20.	-
○ 실정보고에 따른 설계변경 검토 보고 ※ 상수도과-19579호	‘22. 8. 26.	주영근 과장 구제태 팀장 한상범 주무관
○ 2차분 시행계획 ※ 상수도과-20194호	‘22. 9. 3.	정기명 시장 박현식 부시장 한광민 단장 주영근 과장 구제태 팀장 한상범 주무관
○ 설계변경 검토 보고 ※ 상수도과-28223호	‘22. 12. 13.	주영근 과장 구제태 팀장 한상범 주무관
○ 1,2차분 변경계약의뢰 ※ 상수도과-28386호	‘22.12. 15.	주영근 과장 구제태 팀장 한상범 주무관
○ 준공계(1차분) ※ 상수도과-28733호	‘22.12. 19.	주영근 과장 구제태 팀장 한상범 주무관

○ GIS DB 구축용역 시행 ※ 상수도과-3243호	‘23. 2. 8.	김태횡 단장 김정남 과장 김 혁 팀장 김종서 주무관
○ 건설사업관리용역 시행 ※ 상수도과-3628호	‘23. 2.13.	정기명 시장 김종기 부시장 김태횡 단장 김정남 과장 김 혁 팀장 김종서 주무관
○ GIS DB 구축용역 계약 체결 ※ 수도행정과-2806호	‘23. 3. 6.	-
○ 3차분 공사 시행 ※ 상수도과-6319호	‘23. 3.14.	정기명 시장 김종기 부시장 김태횡 단장 김정남 과장 김 혁 팀장 김종서 주무관
○ 2차분 공사 실정보고 검토 ※ 상수도과-6520호	‘23. 3.16.	김태횡 단장 김정남 과장 김 혁 팀장 김종서 주무관
○ 3차분 공사 계약 체결 ※ 수도행정과-3437호	‘23. 3.20.	-
○ 현장대리인 변경검토 보고 ※ 상수도과-11690호	‘23. 5. 11.	김정남 과장 김 혁 팀장 김종서 주무관
○ 건설사업관리용역 계약 체결 ※ 수도행정과-6412호	‘23. 5.23.	-
○ 송수관로 터파기 관련 실정보고 검토 ※ 상수도과-15216호	‘23. 6.21.	김정남 과장 김 혁 팀장 김종서 주무관
○ 2, 3차분 공사 실정보고 검토 ※ 상수도과-16725호	‘23. 7. 6.	김정남 과장 김 혁 팀장 김종서 주무관

○ 기상여건에 따른 계약기간 연장검토 ※ 상수도과-18527호	‘23. 7.27.	오정환 단장 김정남 과장 김승주 팀장 김종서 주무관
○ 건설사업관리 책임기술인 변경 검토 ※ 상수도과-21642호	‘23. 9. 6.	김정남 과장 김승주 팀장 김종서 주무관
○ 공사 총괄1회 변경 시행 ※ 상수도과-22587호	‘23. 9.18.	오정환 단장 김정남 과장 김승주 팀장 김종서 주무관
○ (2차분) 준공검사 수행계획 ※ 상수도과-25462호	‘23. 10.27.	김정남 과장 김승주 팀장 김종서 주무관
○ 통합건설사업관리용역 2차분 시행 ※ 상수도과-261호	‘24. 1.4.	김종기 부시장 오정환 단장 김정남 과장 김승주 팀장 김종서 주무관
○ 준공계(통합건설사업관리용역 1차분) ※ 수도행정과-265호	‘24. 1.8.
○ 총괄2회 및 3차분1회 변경 시행 계획보고 ※ 상수도과-5194호	‘24. 3.5.	정기명 시장 김종기 부시장 오정환 단장 장현철 과장 김승주 팀장 김종서 주무관
○ (3차분) 준공검사 수행계획 ※ 수도행정과-3979호	‘24. 3.22.
○ 4차분 공사 계약 체결 ※ 수도행정과-4895호	‘24. 4. 9.
○ 실정보고 검토(배수지 및 가압장) ※ 상수도과-11453호	‘24. 5. 20.	장현철 과장 김승주 팀장 김종서 주무관
○ 실정보고 검토(송수관로 노선) ※ 상수도과-13914호	‘24. 6. 18.	정기명 시장 김종기 부시장 오정환 단장 장현철 과장 김승주 팀장 김종서 주무관
○ 공사기간 연장 검토 보고 ※ 상수도과-16272호	‘24. 7. 16.	김문환 단장 이광재 과장 서주용 팀장 한상범 주무관

○ 실정보고 검토(사토장 선정) ※ 상수도과-20491호	‘24. 9. 2.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 주무관
○ 실정보고 검토(배수지 부대시설 등) ※ 상수도과-20675호	‘24. 9. 4.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 주무관
○ 물가변동으로인한 계약금액 조정 검토 보고 ※ 상수도과-20817호	‘23. 9. 5.	김문환 단장 이광재 과장 서주용 팀장 한상범 주무관
○ 총괄3회 4차분1회 설계변경 검토 ※ 상수도과-21809호	‘23. 9. 19.	김문환 단장 이광재 과장 서주용 팀장 한상범 주무관
○ 실정보고 검토(배수펌프, 포장 등) ※ 상수도과-23207호	‘24. 10. 7.	김문환 단장 이광재 과장 서주용 팀장 한상범 주무관
○ 일시정지 검토 ※ 상수도과-23207호	‘24. 10. 14.	김문환 단장 이광재 과장 서주용 팀장 한상범 주무관
○ 전기공사 준공검사 수행계획 ※ 상수도과-24944호	‘24. 10. 25.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 주무관

○ 통합 건설사업관리용역(3차분) 시행 ※ 상수도과-175호	‘25. 1. 3.	김문환 단장 박영춘 과장 정은성 팀장 이광재 과장 서주용 팀장 한상범 주무관
○ 통합 건설사업관리용역(3차분) 계약의뢰 ※ 상수도과-21호	‘25. 1. 3.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 주무관
○ 감정평가업자 추천 요청(재평가) ※ 수도행정과-722호	‘25. 1. 9..	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장 송나민 주무관
○ 계약체결(감독공무원 지정)알림 ※ 수도행정과-560호	‘25. 1. 13.
○ 책임기술인 현장이탈 승인 통보 ※ 상수도과-1499호	‘25. 1. 16.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 공용건출물 건축 협의 요청 ※ 상수도과-1820호	‘25. 1. 20.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 승인요청에 따른 검토 보고 ※ 상수도과-2294호	‘25. 1. 24.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 춤질시험계획서(변경) 승인 ※ 상수도과-2370호	‘25. 1. 24.	최우진 팀장 서주용 팀장 한상범 차장

○ 공용건축물 건축신고(신축) 협의에 따른 보안 요구 ※ 허가과=3369호	‘25. 2. 17.
○ 공용건축물 건축신고(신축) 협의에 따른 보안 요구 ※ 허가과-3527호	‘25. 2. 5.
○ 공용건축물 건축신고(신축) 협의에 따른 보안 요구 ※ 허가과-3528호	‘25. 2. 5.
○ 편입토지 감정평가 의뢰 ※ 상수도과-2902호	‘25. 2. 4.	서주용 팀장 한상범 차장 송나민 주무관
○ 감정평가 계획 알림 ※ 수도행정과-2976호	‘25. 2. 5.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장 송나민 기안
○ 대책사업(4차분) 준공검사 수행계획 보고 ※ 동성-건설사업-제2025-106호	‘25. 2. 5.
○ 안전점검 종합보고서 제출 ※ 돌산(감)2025-19	‘25. 2. 5
○ 시설물 개선공사 실시설계 용역 시행 ※ 상수도과-3216호	‘25. 2. 7.	이광재 과장 윤국한 과장 정은성 팀장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 시설물 개선공사 실시설계 용역 계약의뢰 ※ 상수도과-3264호	‘25. 2. 7.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 계약체결(감독공무원 지정) 알림 ※ 상수도과-1826	‘25. 2. 11.

○ 공공측량성과심사 수수료 집행 ※ 상수도과-3973	‘25. 2. 17.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 건설관리용역 3차분 1회 설계변경도서 제출 ※ 동성-건설사업-제2025-159	‘25. 2. 17.
○ 통합건설사업관리용역(3차분)용역기간 연장 검토 보고 ※ 상수도과-4239호	‘25. 2. 19.	김문환 단장 윤국한 과장 정은성 팀장 이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 편입토지 등에 대한 손실보상 협의 요청 ※ 상수도과-4261	‘25. 2. 19.	최우진 팀장 서주용 팀장 한상범 차장 송나민 주무관
○ 여수 도시관리계획(도로) 결정 변경(안) 주민 등의 의견청취 및 협의(돌산읍 성두마을) ※ 도시계획과=3271호	‘25. 2. 19.
○ 통합건설사업관리용역(3차분) 변경계약 의뢰 ※ 상수도과-4259	‘25. 2. 19.	최우진 팀장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 통합건설사업관리용역(3차분) 변경계약 사항 알림 ※ 수도행정과-2309호	‘25. 2. 19.
○ (4차분) 준공검사 결과 보고 ※ 동성-건설사업-제2025-153	‘25. 2. 20.
○ 착수계(돌산지역 상수도 시설물 개선공사 실시설계용역) ※ 상수도과-28386호	‘22.12. 15.	주영근 과장 구제태 팀장 한상범 주무관
○ 준공계(1차분) ※ 상수도과-4330호	‘25. 2. 20.

○ 선금 지급 결정 알림 ※ 수도행정과-2626호	‘25. 2. 25.
○ 기술지원(비상주)기술인 2월 현장점검 결과 보고 ※ 돌산(감)2025-29호	‘25. 2. 27.
○ 돌산지역 급수안정화 대책사업 최종건설사업관리 보고서 제출 ※ 돌산(감)2025-34호	‘25. 2. 27.
○ 건설사업관리 월간보고서 제출 ※ 돌산(감)2025-48호	‘25. 3. 7.
○ 돌산지역 배수관로 감압변 설치공사 시행 ※ 상수도과-5933호	‘25. 3. 10.	김문환 단장 윤국한 과장 정은성 팀장 이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 계약심사 요청 ※ 상수도과-5989호	‘25. 3. 10.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 계약심사 결과 회신 ※ 감사담당관-2487호	‘25. 3. 11.
○ 배수관로 감압변 설치공사 계약의뢰(긴급) ※ 상수도과-6153호	‘25. 3. 12.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 수의견적 제출 안내 공고 ※ 수도행정과-3385호	‘25. 3. 13.
○ 국유재산 사용 협의 요청 ※ 상수도과-6328호	‘25. 3. 14.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장

○ 공유수면 원상회복 의무면제 신청에 따른 의견 조회 ※ 해양정책과-3005호	‘25. 3. 19.
○ 편입토지 등에 대한 손실보상(2차)협의 요청 ※ 상수도과-6947호	‘25. 3. 30.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장 송나민 주무관
○ 계약체결(감독공무원 지정)알림 ※ 수도행정과-3890호	‘25. 3. 24.
○ 준공검사 공무원 지정 알림 ※ 수도행정과-4007호	‘25. 3. 25.
○ 계약체결 및 감독공무원 지정 통보 ※ 수도행정과-4195호	‘25. 3. 28.
○ GIS DB 구축용역 일시정지 해지 검토 보고 ※ 상수도과-7962호	‘25. 4. 1.	김문환 단장 윤국한 과장 정은성 팀장 이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ GIS DB 구축 용역 변경계약 의뢰 ※ 상수도과-8123호	‘25. 4. 2.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 기술지도 용역 시행 ※ 상수도과-8122호	‘25. 4. 2.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 통합건설사업관리 분야기술인 현장이탈 승인 통보 ※ 수도행정과-8121호	‘25. 4. 2.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 감압변 설치공사 관급자재(변경) 구입 검토보고 ※ 상수도과-8152호	‘25. 4. 2.	이광재 과장 윤국한 과장 정은성 팀장 서주용 팀장 한상범 차장

○ 감압변실 설치공사 관급자재 변경계약 의뢰 ※ 해양정책과-8171호	‘25. 4. 3.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 변경계약 사항 알림 ※ 수도행정과-4504호	‘25. 4. 3.
○ 수의견적 제출 안내 공고 ※ 수도행정과-4511호	‘25. 3. 24.
○ 준공검사 공무원 지정 알림 ※ 수도행정과-4676호	‘25. 4. 8.
○ 지하시설물 GIS DB 제출 ※ 상수도과-8644호	‘25. 4. 8.	이광재 과장 서주용 침장 한상범 차장
○ 계약체결(감독공무원 지정)알림 ※ 수도행정과-4977호	‘25. 4. 14.
○ 공간정보 자료제공 요청에 대한 회신 ※ 스마트정보과-8819호	‘25. 4. 18.
○ 감압변 설치공사 실정보고에 따른 검토 보고 ※ 상수도과-11611호	‘25. 5. 13.	이광재 과장 윤국한 과장 정은성 팀장 서주용 팀장 한상범 차장
○ (통괄분, 3차분) 변경계약 의뢰 ※ 상수도과-11587호	‘25. 5. 13.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ (통괄분, 3차분) 변경계약 사항 알림 ※ 수도행정과-6276호	‘25. 5. 13.

○ 제공받은 공간정보 자료 제출 ※ 상수도과-11962호	‘25. 5. 15.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 가압장 CCTV 설치공사 시행 ※ 상수도과-12548호	‘25. 5. 22.	김문환 단장 윤국한 과장 정은성 팀장 이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 가압장 CCTV 설치공사 계약의뢰 ※ 상수도과-12735호	‘25. 5. 26.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 감압변 설치공사 설계변경 검토 보고 ※ 상수도과-12748호	‘25. 5. 26.	이광재 과장 윤국한 과장 정은성 팀장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 감압변 설치공사 변경계약 의뢰 ※ 상수도과-12799호	‘25. 5. 26.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 변경계약 사항 알림 ※ 수도행정과-6813호	‘25. 5. 27.
○ 원격자동검침시스템 설치사업 시행 ※ 상수도과-13076호	‘25. 5. 28.	이광재 과장 윤국한 과장 정은성 팀장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 원격자동검침시스템 설치사업 계약 의뢰 ※ 상수도과-13137호	‘25. 5. 29.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 준공검사 공무원 지정 알림 ※ 수도행정과-6991호	‘25. 5. 30.
○ 계약체결 및 감독공무원 지정 통보 ※ 수도행정과-6990호	‘25. 5. 29.

○ 유량계 LTE무선통신망 개통(가입) 신청 ※ 상수도과-13592호	‘25. 6. 4.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 통합건설사업관리 분야기술인 현장이탈 승인 통보 ※ 상수도과-14318호	‘25. 6. 12.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 가압장 CCTV설치에 따른 행정예고 ※ 상수도과-14408호	‘25. 6. 13.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 무선통신 모뎀 비용 집행 ※ 상수도과-14579호	‘25. 6. 16.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 변경계약 사항 알림 ※ 수도행정과-7876호	‘25. 6. 20.
○ 검사(검수)공무원지정 알림 ※ 수도행정과-7909호	‘25. 6. 23.
○ 일반수도사업 변경인가 신청 ※ 상수도과-15439호	‘25. 6. 25.	최우진 팀장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 기성(1회) 검사공무원 지정 알림 ※ 수도행정과-8061호	‘25. 6. 25.
○ 기성금(1회) 지급 결정 알림 ※ 수도행정과-8115호	‘25. 6. 26.
○ 전용회선(CCTV)설치 요청 ※ 상수도가-15865호	‘25. 6. 30.	최우진 팀장 서주용 팀장 최우진 차장

○ 통합건설사업관리 책임기술인 현장이탈 승인 통보 ※ 상수도과-16269호	‘25. 7. 3.	이광재 과장 한상범 차장
○ 일반수도사업(변경)인가(기간연장)의제 협의 ※ 상수도과-16583호	‘25. 7. 7.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 기술지원기술인 변경 검토 요청 ※ 수도행정과-9083호	‘25. 7. 15.
○ 기술지원건설사업관리기술인(상하수도)변경 요청에 대한 검토 보고 ※ 상수도과-17436호	‘25. 7. 16.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 기술지원건설사업기술인 변경 검토 결과 회신 ※ 상수도과- 17472호	‘25. 7. 16.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 기술지원기술인 변경 검토 요텅 ※ 수도행정과-9172호	‘25. 7. 17.
○ 기술인 변경 승인 알림 ※ 수도행정과-9171호	‘25. 7. 17.
○ 검사(검수)공무원지정 알림 ※ 수도행정과-9219호	‘25. 7. 17.
○ 현장이탈 승인 통보 ※ 상수도과-17874호	‘25. 7. 21.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 검사(검수) 공무원지정 알림 ※ 수도행정과-9579호	‘25. 7. 25.

○ CCTV 설치공사 전용회선 설치 요청 ※ 상수도과-17510호	‘25. 8. 7.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 일반수도사업(변경)인가(기간연장) 의제 협의 회신 ※ 도시계획과-16928호	‘25. 8. 7.
○ 야간 상수도 시설물 점검 실시 ※ 상수도과-19791호	‘25. 8. 11.	이광재 과장 김수구 팀장 박승호 주무관 한상범 차장
○ 기술지원기술인 변경 검토요청 ※ 수도행정과-10460호	‘25. 8. 18.
○ 변경 요청에 대한 검토 보고 ※ 상수도과-20330호	‘25. 8. 18.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 기술지원건설사업기술인 변경 검토 결과 회신 ※ 상수도과-20340호	‘25. 8. 18.	이과재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 기술인 변경 승인 알림 ※ 수도행정과-10505호	‘25. 8. 18.
○ 도로점용허가 변경신청서 제출 ※ 상수도과-20756호	‘25. 8. 22.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 돌산읍 상하가압장 전기증설공사 시행 ※ 상수도과-20805호	‘25. 8. 22.	이광재 과장 윤국한 과장 정은성 팀장 김수구 팀장 김범수 주무관 한상범 차장
○ 돌산읍 우두리 비상연결관로 설치공사 시행 ※ 상수도과-20808호	‘25. 8. 22.	이광재 과장 윤국한 과장 정은성 팀장 김수구 팀장 한상범 차장

○ 돌산읍 상하가압장 전기증설공사 계약으뢰 ※ 상수도과-20825호	‘25. 8. 22.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 돌산읍 우두리 비상연결관로 설치공사 계약의뢰 ※ 상수도과-20826호	‘25. 8. 22.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 검사 공무원지정 알림 ※ 수도행정과-10835호	‘25. 8. 25.
○ 계약체결(감독공무원 지정)알림 ※ 수도행정과-10846호	‘25. 8. 25.
○ 계약체결(감독공무원 지정)알림 ※ 수도행정과-10847호	‘25. 8. 25.
○ 계약체결 및 감독공무원 지정 통보 ※ 수도행정과-10935호	‘25. 8. 27.
○ 통건설사업관리 책임기술인 현장이탈 승인 통보 ※ 수도행정과-10505호	‘25. 8. 29.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 도로점용허가 변경신청서 제출 ※ 상수도과-21808	‘25. 9. 3.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 돌산읍(히딩크모텔~도실가압장) 누수탐사용역 시행 ※ 상수도과-22052	‘25. 9. 5.	이광재 과장 윤국한 과장 정은성 팀장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 누수탐사용역 계약으뢰 ※ 상수도과-22085호	‘25. 9. 5.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장

○ 계약체결(감독공무원 지정)알림 ※ 상수도행정과-11592	‘25. 9. 9.
○ 실정보고에 따른 검토 보고 ※ 상수도과-22807호	‘25. 9. 15.	이광재 과장 윤국한 과장 정은성 팀장 김수구 팀장 김범수 주무관 한상범 차장
○ 변경계약 의뢰 ※ 상수도과-22887호	‘25. 9. 15.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 변경계약 사항 알림 ※ 수도행정과-11914호	‘25. 9. 16.
○ 실정보고에 따른 검토 보고 ※ 상수도과-23376호	‘25. 9. 19.	이광재 과장 윤국한 과장 정은성 팀장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 변경계약 의뢰 ※ 상수도과-23389호	‘25. 9. 19.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 변경계약 사항 알림 ※ 수도행정과=12145호	‘25. 9. 19.
○ 비상연결관로 설치공사 GIS DB 구룩용역 시행 ※ 상수도과-23900호	‘25. 9. 25.	주원평 팀장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 준공검사 공무원 지정 알림 ※ 수도행정과-12397호	‘25. 9. 25.
○ 누수탐자요역 일시정지 검토보고 ※ 상수도과-24342호	‘25. 9. 30.	주원평 팀장 윤국한 과장 정은성 팀장 김수구 팀장 한상범 차장

○ 누수탐사용역 일시정지 요청 ※ 상수도과-24410호	‘25. 9. 30.	주원평 팀장 김수구 팀장 한상법 차장
○ 누수탐자용역 일시정지 알림 ※ 수도행정과-12643호	‘25. 10. 2.
○ 통합건설사업관리용역(3차분) 변경계약 의뢰 ※ 상수도과-25297호	‘25. 10. 15.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 변경계약 사항 알림 ※ 수도행정과-13084호	‘25. 10. 16.