【 붙임5 】

남면사무소 신축사업

- 단계 : 기본계획 -

회계과, 이아람, 061-659-5221

일반 현황	소 재 지	여수시 남면 우학리 649-1번지 외 2필지
	인구 수	2,953명(2020.12.31.기준)
	공무원 수	21명/21명	현원/정원
	재정자립도	27.02%

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도				부지면적			기준면적			건물연면적		층수 (지하/지상)				비고
	합계	1985. 1.				814.5㎡						841.65㎡		지상 2층
	주민센터	1985. 1.				814.5㎡						841.65㎡		지상 2층
	청사신축 필요성			노후되고 협소한 기존 청사의 신축을 통한 주민불편 해소 및 업무효율 증대
	사업기간			2020. 4. ~ 2023. 10.
	사업수행방식			설계･시공 분리 : 입찰(적격심사 낙찰제)
	추정(예정)가격			4,815,000,000원				계약금액							낙찰율
	청사신축 계획(안)
	용도		준공연도		부지면적		기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)			비고
	합계		2023. 10.		2,800㎡					1,302㎡			지상 3층
	주민센터		2023. 10.		2,800㎡					1,302㎡			지상 3층

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비	시도비		시군구비	지방채
	합계	4,815					4,815
	당해연도(H)
	H+1(2021)	356					356
	H+2(2022)	4,459					4,459
	H+3 이후
	총사업비(4,815백만원)
	1) 토지매입비		123			비고
	2) 설계비		198
	3) 감리비		183
	4) 공사비		4,244
	5) 기타부대비		67

향후 계획 및 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	투융자심사	2020. 10.	승인	도
	공유재산관리계획	2020. 9.	의결	여수시의회
	중기재정계획	2020. 9.	확정	자체
	타당성 조사	해당없음
	설계	2021. 4.		자체
	착공	2022. 7.		자체
	준공	2023. 10.		자체