109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 여수시에서 ‘22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

							(단위 : 백만 원, %)
연번	사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률
			기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후
1	삼산면사무소 신축	4,417	4,125	0	292		2023	2019	90%
2	여수시립박물관 건립	29,309	1,040	8,214	6,250	13,805	2024	2019	35%
3	폐플라스틱 자원화 소재 개발을 위한 실증기반 구축	16,920	8,390	4,320	4,210	-	2023	2019	75%
4	여수산단 재난대응 통합 인프라 구축사업	23,730	18,830	4,200	700	0	2023	2019	97%
5	국동지구 하수도정비 중점관리 지역 정비	31,800	2,714	0	3,405	25,681	2025	2019	5%
6	소호2지구 연안정비	11,146	2,500	2,000	500	6,146	2025	2019	60%
7	시민, 진남문예회관 리모델링	19,800	850	600	3,000	15,350	2024	2019	10%
8	여수 생활문화센터 건립(생활SOC복합화)	5,798	1,007	4,791	-	-	2022	2019	100%
9	여수 종화지구 새뜰마을사업	6,226	4,060	960	1,206	0	2023	2019	90%
10	화장동 공영주차장(주차타워) 신축 (생활SOC사업)	11,700	1,997	3,000	6,703	0	2023	2019	60%
11	원도심 노인복지관 신축	9,753	2,583	279	1,543	5,348	2024	2019	15%
12	성산공원 리모델링	6,850	3,500	3,350			2022	2019	100%
13	여문공원 종합정비	4,536	700	2,836	1,000		2023	2019	75%
14	어촌뉴딜 300 화태도 사업	9,207	6,076	3,131	0	0	2022	2020	90%
15	어촌뉴딜 300 우학항 사업	7,139	4,732	2,407	0	0	2022	2020	80%
16	어촌뉴딜 300 의성항 사업	8,821	5,825	2,996	0	0	2022	2020	95%
17	어촌뉴딜 300 직포항 사업	9,190	5,645	3,545	0	0	2022	2020	90%
18	여수 선소테마정원 조성	23,900	6,683		1,925	15,292	2025	2020	35%
19	웅천 국민체육센터 건립	9,500	300		5,000	4,200	2024	2020	25%
20	산지수산물 유통물류센터 건립	5,315	2,436	2,879	-	-	2022	2020	100%
21	어촌뉴딜 300 둔병, 화산항 사업	5,053	3,796	1,257	0	0	2022	2020	95%
22	농업기술센터 종합실험 연구동 신축	5,810	768	2,912	1,630	500	2024	2020	85%
23	율촌 교차로~연화마을 도로 확장	35,000	4,468	973	4,288	25,271	2025	2020	28%
24	주삼지구 새뜰마을 사업	5,770	1,015	425	2,500	1,830	2024	2020	50%
25	조명연합수군 테마 관광자원 개발사업	10,831	5,229	2,620	2,982	-	2023	2020	90%
26	학동선소일원 악취방지하수도정비	5,500	200	0	1,500	3,800	2024	2020	5%
27	남면사무소 신축	4,850	315	1,189	3,346		2023	2020	45%
28	지방어항 손죽항 시설공사	16,078	1,700	1,125	1,329	11,924	2026	2020	20%
29	미세먼지 차단숲 조성	10,000	8,794	1,206			2022	2020	100%
30	웅천 장도공원 예술의 숲 조성	6,900	3,300	1,600	2,000		2023	2020	80%
31	돌산읍 안굴전 우회도로 개설	15,600	6,150	112	0	9,338	2025	2020	10%
32	양지고가교 철거 및 평면교차로 정비	6,532	1,343	5,189			2022	2020	100%
33	여수시 어린이도서관 건립	10,000	817	332	4,972	3,879	2024	2021	5%
34	어촌뉴딜 300 동도항 사업	8,057	1,525	3,309	3,223		2023	2021	40%
35	어촌뉴딜 300 장지항 사업	13,307	1,556	6,428	5,323		2023	2021	40%
36	여수시 월내위생매립장 증설	5,600		400	2,000	3,200	2025	2021	0%
37	여수국가산단 복합문화센터 건립	10,000	5,730	300	450	3,520	2024	2021	20%
38	분해성 고분자 소재 상용화 기반 구축	16,807	5,501	8,268	3,038	-	2023	2021	82%
39	글로벌 스마트 관광도시 조성사업	6,906	0	6,906	0	0	2022	2021	100%
40	여수산단 디지털 환경, 안전 통합관제센터 구축	13,000	4,080	5,920	3,000	0	2023	2021	77%
41	2012 여수세계박람회 10주년 기념사업	700	0	700	0	0	2023	2021	100%
42	돌산 생활 SOC 복합화 사업	13,000	4,000	47	3,000	5,953	2025	2021	10%
43	화정면 개도 테마관광 자원 개발사업	9,000	-	177	823	8,000	2025	2022	2%
44	2022년 작금항 어촌뉴딜300	7,754		1,163	2791	3,800		2022	40%
45	2022년 화산항 어촌뉴딜 300	7,114		1,067	2,561	3,486		2022	40%
46	2022년 금천항 어촌뉴딜 300	5,033		755	1,812	2,466		2022	40%
47	소호~죽림 도로개설공사	63,900	125	0	0	63,775	2029	2022	5%
48	문수~시전 도로개설공사	64,500	125	0	0	64,375	2029	2022	5%
49	신기동 공영주차장 건립	9,700	4,104	124	5,472	0	2024	2022	10%
50	화정면사무소 신축	4,420	0	0	818	3,602	2,025	2022	0%
51	화정면 백야도 테마관광 자원개발사업	4,000	-	-	-	4,000	미정	2022	0%
52	고소동 공영주차장(주차타워) 신축	6,900	1,554	3	5,343	0	2024	2022	10%
53	다목적 관공선 건조	10,000	-	-	322	9,678	2024	2022	5%
54	동문로 공공디자인 특화거리조성	2,000	-	300	400	1,300	2024	2022	10%
55	지방상수도 공간정보 구축용역	8,900				8,900	2026	2022	3%
56	화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설	5,000	135	171	0	4,694	2024	2022	6%
57	화양면 안포~굴구지 농어촌도로 개설	4,500	0	114	49	4,337	2025	2022	4%
58	소라면 달천마을 일원 시도12호선도로확장	3,000	0	0	83	2,917	2025	2022	3%
59	돌산읍 진두마을 도로개설	4,100	1,422	30	600	2,048	2024	2022	10%
60	무선산공원 조성	19,900	3,400		9,800	6,700	2027	2022	41%
61	자산공원 조성	19,800	7,000		8,100	4,700	2027	2022	78%

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2022년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘22년말 기준으로 작성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황 : 별첨 6

10-2. 지방채 발행사업

우리 여수시에서 ‘22년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만 원, %)

사 업 명	총 사업비	재 원 구 성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
	해	당	없	음

10-3. 민간투자사업

우리 여수시에서 ‘22년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만 원)

사업 유형	사업명	민 간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계 약 기 간
				기투자	2021년	2022년	2023년 이후
BTL	2005년도 하수관거정비	푸른여수 지키미(주)	38,662	48,544	3,402	3,317	27,776
	2008년도 하수관거정비	여수맑은 물사랑(주)	55,475	35,884	3,430	3,344	59,183
BTO	음식물자원화시설 설치사업	㈜여수엑스포환경	11,349	48,537	3,075	3,024	31,618	‘10.1.15. ~’30.1.14.

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2022년까지는 집행액(결산기준), 2023년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

▢ 하수관거정비사업

⚪ 민간사업자가 관리운영권 행사의 방법으로 약정한 기간 동안 지자체 등에 시설을

임대하고, 약정된 임대료 수입을 통해 투자비 회수(국비 70%, 시비 30%)

⚪ 시설임대료는 현재가치로 평가하여 부채로 계상하고 있음

⚪	시설임대료 = 총민간투자비	×	수익률
			1-(1+수익률)-(임대기간)

▢ 음식물자원화시설 설치사업

⚪ BTO 사업의 재정부담액은 연간 음식물 처리량에 톤당 단가를 곱한 금액. 매년 일정 규모의 사용료가 지출 되므로 재정부담이 큼

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황 1

사업명

2005년 하수관거 BTL 사업

담당자

하수도과 위성현(☎659-4981)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재원조달의 한계로 장기간이 소요되는 하수관거 정비사업을 민간자본을       활용하여 정비함으로써 하수처리장 운영효율 향상 및 하천수질개선 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2006. 7. 31. ~ 2010. 3. 30.

○ 위    치 : 6개처리 분구(학동, 화장, 신월, 여도, 둔덕, 세구지)

○ 민간사업자 : 푸른여수지키미㈜

○ 총사업비 : 38,662백만원

○ 사업규모 : L=47.7㎞, 배수설비 4,036개소

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	83,039	48,544	3,402	3,317	27,776
국 비	57,230	36,893	2,344	2,286	15,707
시 도 비
시군구비	25,809	11,651	1,058	1,031	12,069
기 타

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 운영 중(운영기간 : 2010. 3. 31. ~ 2030. 3. 30.)

□ 향후계획

○ 매분기 성과평가에 따라 운영비 등 지급

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 민간투자사업 현황 2

사업명

2008년 하수관거 BTL 사업

담당자

하수도과 위성현(☎659-4981)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재원조달의 한계로 장기간이 소요되는 하수관거 정비사업을 민간자본을       활용하여 정비함으로써 하수처리장 운영효율 향상 및 하천수질개선 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010. 12. 14. ~ 2014. 2. 13.

○ 위    치 : 6개처리 분구(연등, 여서, 웅천, 여천, 소호, 수정)

○ 민간사업자 : 여수맑은물사랑㈜

○ 총사업비 : 55,475백만원

○ 사업규모 : L=34.76㎞, 배수설비 4,403개소

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	101,841	35,884	3,430	3,344	59,183
국 비	71,288	20,805	2,202	2,340	45,941
시 도 비
시군구비	30,553	15,079	1,228	1,004	13,242
기 타

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 운영 중(운영기간 : 2014. 2. 14. ~ 2034. 2. 13.)

□ 향후계획

○ 매분기 성과평가에 따라 운영비 등 지급

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 민간투자사업 현황 3

		2022년 지방자치단체 재정공시 편람

사업명

음식물자원화시설 설치사업

담당자

자원순환과 정여옥

(☎659-3847)

□ 사업목적 및 필요성

○ 음식물류폐기물의 원활한 처리를 통해 쾌적한 주민생활환경 유지

○ 호기성 퇴비화 공법을 이용한 음식물류폐기물의 자원화

□ 사업개요

○ 기    간 : ‘10 1. 15. ~ ’30. 1. 14.

○ 위    치 : 여수시 진달래길 310-142(월내동)

○ 민간사업자 : ㈜여수엑스포환경

○ 총사업비 : 11,349백만원(국비 1,620/ 시비 658/ 민자 9,071)

○ 사업규모 : 90톤/일(호기성 퇴비화 공법)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

- 계약기간 : 2010. 1. 15. ∼ 2030. 1. 14.

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	86254	48,537	3,075	3,024	31,618
시군구비	86254	48,537	3,075	3,024	31,618

□ 추진단계

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 사용료 단가는 매년 4. 1. 소비자물가지수 변동률 반영하여 조정

- 2022년 단가 : 99,017원/톤, 2023년 단가 : 104,046원/톤

□ 사업변경 내역

○ 해당없음