정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	문수동 주민(자치)센터 신축
② 추진배경	○ 여서·문수지구 활성화 사업 추진계획의 일환으로 1999년 준공 후 21년 경과한 기존 문수동 주민센터를 대체할 주민센터와 주민자치센터 복합건물 신축 필요
③ 사업개요	○ 사업목적 : 문수동 주민(자치)센터 신축 ○ 위 치 : 여수시 문수동 169번지 ○ 사 업 비 : 5,500백만 원 ○ 사업내용 : 지상 3층, 1동 / 연면적 1,500㎡
④ 사업부서	여수시 회계과		⑤ 담당자	행정5급 김종필 시설8급 임예은
⑥ 선정기준	10억원 이상 공사		⑦ 사업기간	'20. 1. ~ '25. 5.
<그간 주요 추진내용>
○ 방침 결정 ※ 회계과-2818호(’20.01.15.)		'20. 1. 15.	권오봉 시장 서은수 부시장 양기원 국장 박은규 과장 정미순 팀장 위준용 주무관
○ 공공건축 사업계획 사전검토 ※ 회계과-53866(’20.09.25.)		‘20. 9. 25.	조계윤 과장 고영백 팀장 위준용 주무관
○ 설계공모 계획(안) 방침 ※ 회계과-4950호(’22.02.03.)		‘22. 2. 3.	권오봉 시장 박현식 부시장 김용필 국장 조계윤 과장 김희영 팀장 위준용 주무관
○ 설계공모 심사 ※ 회계과-30385호(’22.06.22.)		‘22. 6. 22.	조계윤 과장 김희영 팀장 위준용 주무관
○ 설계 용역 계약 체결 ※ 회계과-31197호(’22.06.27.)		‘22. 6. 27.	조계윤 과장 김희영 팀장 위준용 주무관
○ 사업비 변경 검토보고 ※ 회계과-42355호(’22.09.06.)		‘22. 9. 6.	정기명 시장 박현식 부시장 김지선 국장 한진숙 과장 김희영 팀장 위준용 주무관
○ 기술자문 심의 요청 ※ 회계과-2970호(’23.01.30.)		‘23. 1. 30.	한진숙 과장 김희영 팀장 위준용 차장

○ 우수유출저감대책 수립용역 시행 ※ 회계과-18777호(’23.04.27.)	‘23. 4. 27.	한진숙 과장 김희영 팀장 위준용 주무관
○ 계약심사 및 일상감사 요청 ※ 회계과-28481호(’23.06.16.)	‘23. 6. 16.	한진숙 과장 김희영 팀장 위준용 주무관
○ 설계 용역 준공 ※ 회계과-64898호(’23.12.18.)	‘23. 12. 18.	한진숙 과장 김희영 팀장 최두용 주무관
○ 문수동 주민센터 신축공사 시행 ※ 회계과-17758호(’24.04.08.)	‘24. 4. 8.	정기명 시장 김종기 부시장 김병완 국장 강행숙 과장 고영백 팀장 조만호 주무관
○ 공사 착공 ※ 회계과-22680호(’24.05.02.)	‘24. 5. 2.	강행숙 과장 고영백 팀장 조만호 주무관
○ 공사 준공	‘25. 5. 12.	김종필 과장 한태광 팀장 임예은 주무관