정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	본청사 별관 증축사업
② 추진배경	○ 분산된 청사로 시민 불편과 업무효율성 저하와 기존 청사의 공간 협소, 국동임시별관의 향후 운영 문제 등 청사 운영의 안정성과 지속성 확보 필요
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 학동 100번지 일원 ○ 사 업 비 : 62,246백만 원 ○ 사업내용 : 지하2층/ 지상6층, 건축연면적 18,000㎡
④ 사업부서	여수시 회계과		⑤ 담당자	행정5급 강행숙 시설7급 최두용
⑥ 선정기준	10억원 이상 공사		⑦ 사업기간	’23. 1. ~ ’27. 9.
<그간 주요 추진내용>
○ 방침 결정 ※ 회계과-7899호(’23.03.01.)		‘23. 3. 1.	정기명 시장 김종기 부시장 한광민 국장 한진숙 과장 김희영 팀장 위준용 차장
○ 타당성 조사 의뢰 방침 ※ 회계과-15564(’23.04.12.)		‘23. 4. 12.	정기명 시장 김종기 부시장 한광민 국장 한진숙 과장 김희영 팀장 위준용 차장
○ 타당성 분석 및 기본계획수립용역 계약 ※ 회계과-24454호(’23.05.30.)		‘23. 5. 30.	한진숙 과장 김희영 팀장 위준용 차장
○ 타당성조사 업무수행 약정체결 ※ 회계과-29527호(’23.06.21.)		‘23. 6. 21.	정기명 시장 김종기 부시장 한광민 국장 한진숙 과장 김희영 팀장 위준용 차장
○ 타당성조사 수정의뢰서 제출 및 약정기간 연장 요청 ※ 회계과-44036호(’23.09.06.)		‘23. 9. 6.	한진숙 과장 김희영 팀장 최두용 주무관
○ 2024년도 본예산 반영 보고 ※ 회계과-47397호(’23.09.23.)		‘23. 9. 23.	정기명 시장 김종기 부시장 한광민 국장 한진숙 과장 김희영 팀장 최두용 주무관

○ 타당성 조사 최종보고회 ※ 회계과-58740호(’23.11.23.)	‘23. 11. 21.	한광민 국장 한진숙 과장 김희영 팀장 최두용 주무관
○ 타당성 조사 완료 ※ 회계과-63309호(’23.12.12.)	‘23. 12. 12.	한진숙 과장 김희영 팀장 최두용 주무관
○ 지방재정투자심사 의뢰 ※ 회계과-64121호(’23.12.15.)	‘23. 12. 15.	한진숙 과장 김희영 팀장 최두용 주무관
○ 공유재산 심의 완료 ※ 회계과-7848호(’24.02.19.)	‘24. 02. 19.	강행숙 과장 고영백 팀장 최두용 주무관
○ 지방재정투자심사 완료 ※ 회계과-10736호(’24.03.07.)	‘24. 03. 07.	강행숙 과장 고영백 팀장 최두용 주무관
○ 타당성분석 및 기본계획수립용역 중간보고회 ※ 회계과-12038호(’24.03.13.)	‘24. 03. 11.	정기명 시장 김종기 부시장 김병완 국장 강행숙 과장 고영백 팀장 최두용 주무관
○ 공유재산관리계획 의결 상정 ※ 회계과-17159호(’24.04.04.)	‘24. 04. 04.	강행숙 과장 고영백 팀장 최두용 주무관
○ 공유재산관리계획 의결 ※ 회계과-31742호(’24.06.17.)	‘24. 06. 17.	강행숙 과장 고영백 팀장 최두용 주무관