정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	본청사 별관 증축사업
② 추진배경	○ 분산된 청사로 시민 불편과 업무효율성 저하와 기존 청사의 공간 협소, 국동임시별관의 향후 운영 문제 등 청사 운영의 안정성과 지속성 확보 필요
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 학동 100번지 일원 ○ 사 업 비 : 62,246백만 원 ○ 사업내용 : 지하2층/ 지상6층, 건축연면적 18,000㎡
④ 사업부서	여수시 회계과		⑤ 담당자	행정5급 김종필 시설7급 최두용
⑥ 선정기준	10억원 이상 공사		⑦ 사업기간	’23. 1. ~ ’28. 2.
<그간 주요 추진내용>
○ 방침 결정 ※ 회계과-7899호(’23.03.01.)		‘23. 3. 1.	정기명 시장 김종기 부시장 한광민 국장 한진숙 과장 김희영 팀장 위준용 차장
○ 타당성 조사 의뢰 방침 ※ 회계과-15564(’23.04.12.)		‘23. 4. 12.	정기명 시장 김종기 부시장 한광민 국장 한진숙 과장 김희영 팀장 위준용 차장
○ 타당성 분석 및 기본계획수립용역 계약 ※ 회계과-24454호(’23.05.30.)		‘23. 5. 30.	한진숙 과장 김희영 팀장 위준용 차장
○ 타당성조사 업무수행 약정체결 ※ 회계과-29527호(’23.06.21.)		‘23. 6. 21.	정기명 시장 김종기 부시장 한광민 국장 한진숙 과장 김희영 팀장 위준용 차장
○ 타당성조사 수정의뢰서 제출 및 약정기간 연장 요청 ※ 회계과-44036호(’23.09.06.)		‘23. 9. 6.	한진숙 과장 김희영 팀장 최두용 주무관
○ 2024년도 본예산 반영 보고 ※ 회계과-47397호(’23.09.23.)		‘23. 9. 23.	정기명 시장 김종기 부시장 한광민 국장 한진숙 과장 김희영 팀장 최두용 주무관

○ 타당성 조사 최종보고회 ※ 회계과-58740호(’23.11.23.)	‘23. 11. 21.	한광민 국장 한진숙 과장 김희영 팀장 최두용 주무관
○ 타당성 조사 완료 ※ 회계과-63309호(’23.12.12.)	‘23. 12. 12.	한진숙 과장 김희영 팀장 최두용 주무관
○ 지방재정투자심사 의뢰 ※ 회계과-64121호(’23.12.15.)	‘23. 12. 15.	한진숙 과장 김희영 팀장 최두용 주무관
○ 공유재산 심의 완료 ※ 회계과-7848호(’24.02.19.)	‘24. 02. 19.	강행숙 과장 김남영 팀장 김수영 주무관
○ 지방재정투자심사 완료 ※ 회계과-10736호(’24.03.07.)	‘24. 03. 07.	기획예산담당관 박형열 서은주 팀장 이주희 주무관
○ 타당성분석 및 기본계획수립용역 중간보고회 ※ 회계과-12038호(’24.03.13.)	‘24. 03. 11.	정기명 시장 김종기 부시장 김병완 국장 강행숙 과장 고영백 팀장 최두용 주무관
○ 공유재산관리계획 의결 상정 ※ 회계과-17159호(’24.04.04.)	‘24. 04. 04.	강행숙 과장 고영백 팀장 최두용 주무관
○ 공유재산관리계획 의결 ※ 회계과-31742호(’24.06.17.)	‘24. 06. 17.	박형열 기획예산담당관 채주은 팀장 오승룡 주무관
○ 본청사 별관 증축 건립사업 설계공모 관리용역 추진계획 보고 ※ 회계과-44429호(’24.08.19.)	‘24. 08. 19.	정기명 시장 최정기 부시장 김병완 국장 강행숙 과장 한태광 팀장 최두용 주무관
○ 여수시 별관 증축 건립사업 설계공모 관리용역 착수 ※ 회계과-55728호(’24.10.24.)	‘24. 10. 24.	강행숙 과장 한태광 팀장 최두용 주무관

○ 설계공모 계획(안) 방침결정 ※ 회계과-25610호(’25.01.15.)	‘25. 01. 15.	정기명 시장 최정기 부시장 나병곤 국장 김종필 과장 한태광 팀장 최두용 주무관
○ 설계공모 운영위원회 구성 ※ 회계과-4782호(’25.02.03.)	‘25. 02. 03.	나병곤 국장 김종필 과장 한태광 팀장 최두용 주무관
○ 공공건축 심의 완료 ※ 허가과-9912호(’25.03.21.)	‘25. 03. 21.	김희영 공동주택허가팀장(대결) 신정환 팀장 정은주 주무관
○ 설계공모 공고 ※ 회계과-14460호(’25.03.28.)	‘25. 03. 28.	김종필 과장 한태광 팀장 최두용 주무관
○ 타당성 분석 및 기본계획수립용역 완료 ※ 회계과-21733호(’25.05.02.)	‘25. 05. 02.	김종필 과장 한태광 팀장 최두용 주무관
○ 설계공모 기술심사위원회 개최 ※ 회계과-29198호(’25.06.12.)	‘25. 06. 12.	나병곤 국장 김종필 과장 한태광 팀장 최두용 주무관
○ 설계공모 심사위원회 개최 ※ 회계과-30541호(’25.06.18.)	‘25. 06. 18.	나병곤 국장 김종필 과장 한태광 팀장 최두용 주무관
○ 설계공모 심사결과 공고 ※ 회계과-30806호(’25.06.19.)	‘25. 06. 19.	김종필 과장 한태광 팀장 최두용 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 시행 ※ 회계과-31169호(’25.06.20.)	‘25. 06. 20.	김종필 과장 한태광 팀장 최두용 주무관
○ 설계공모 시상식 전시회 개최계획 ※ 회계과-33636호(’25.07.01.)	‘25. 07. 01.	최정기 부시장 나병곤 국장 김종필 과장 한태광 팀장 최두용 주무관
○ 설계공모 관리용역 준공 ※ 회계과-38692호(’25.07.28.)	‘25. 07. 28.	김종필 과장 한태광 팀장 최두용 주무관

○ 기본 및 실시설계 용역 착수보고회 개최계획 ※ 회계과-38738호(’25.10.26.)	‘25. 07. 28.	나병곤 국장 김종필 과장 한태광 팀장 최두용 주무관
○ 전략환경영향평가 용역 시행 ※ 회계과-40560호(’25.08.07.)	‘25. 08. 07.	김종필 과장 한태광 팀장 최두용 주무관
○ 교통영향평가 용역 시행 ※ 회계과-40636호(’25.08.07.)	‘25. 08. 07.	나병곤 국장 김종필 과장 한태광 팀장 최두용 주무관
○ 기본 및 실시설계 용역 착수보고회 결과보고 ※ 회계과-41166호(’25.08.12.)	‘25. 08. 12.	나병곤 국장 김종필 과장 한태광 팀장 최두용 주무관
○ 기본 및 실시설계 용역 하도급 검토보고 ※ 회계과-43895호(’25.09.01.)	‘25. 09. 01.	김종필 과장 한태광 팀장 최두용 주무관