정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	여수 선소테마정원 조성사업
② 추진배경	거북선 건조가 이루어진 역사적 장소성을 살려 역사·문화 체험공간으로 정비하여 문화교육 관광자원으로 활용
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 시전동 690번지 ○ 규 모 : 부지면적 133,484㎡, 연면적 3,934.0㎡ ○ 사 업 비 : 195억원 ○ 사업내용 : 기본 및 실시설계, 건축 및 전시공사 등
④ 사업부서	문화유산과		⑤ 담당자	시설5급 김인옥 행정6급 김영화 시설8급 김혁준
⑥ 선정기준	10억원 이상의 사업		⑦ 사업기간	2018. ~ 2026.
<그간 주요 추진내용>
○ 여수 선소테마정원 조성계획 ※ 문화예술과-14766호		’18. 8. 6.	권오봉 시장 고재영 부시장 고재익 국장 하봉영 과장 김기흥 팀장 신아름 주무관
○ 여수 선소테마정원 조성계획 ※ 문화예술과-2781호		’19. 2. 12.	권오봉 시장 고재영 부시장 고재익 국장 하봉영 과장 김기흥 팀장 신아름 주무관
○ 여수 선소테마정원 사업변경 검토보고 ※ 문화예술과-2330호		’21. 1. 28.	권오봉 시장 서은수 부시장 김학섭 국장 고영준 과장 황여진 팀장 김남희 주무관
○ 여수 선소테마정원 사업변경 검토보고 ※ 문화예술과-2330호		’21. 1. 28.	권오봉 시장 서은수 부시장 김학섭 국장 고영준 과장 황여진 팀장 김남희 주무관
○ 공공건축 사업계획 사전검토 신청 ※ 문화예술과-2330호		’21. 2. 2.	고영준 과장 황여진 팀장 김남희 주무관
○ 여수 선소테마정원 설계 심사안 ※ 문화예술과-20729호		’21. 8. 30.	권오봉 시장 고영준 과장 황여진 팀장 김남희 주무관
○ 경제성 검토 용역 시행 ※ 문화예술과-3688호		’22. 2. 15.	김춘수 과장 양현옥 팀장 백현철 주무관
○ 여수 선소테마정원 설계용역 기간 연장검토보고 ※ 문화예술과-6361호		’22. 3. 21.	나병곤 국장 김춘수 과장 양현옥 팀장 백현철 주무관
○ 재해영향평가 용역 시행 ※ 문화예술과-13478호		’22. 6. 15.	나병곤 국장 김춘수 과장 양현옥 팀장 백현철 주무관
○ 건축물 에너지효율등급 예비인증 수수료 납부 ※ 문화예술과-19190호		’22. 8. 22.	김춘수 과장 양현옥 팀장 강병준 주무관
○ 여수 선소테마정원 설계용역 일시정지 검토보고 ※ 문화예술과-23117호		’22. 10. 5.	나병곤 국장 김춘수 과장 양현옥 팀장 강병준 주무관
○ BF예비인증 수수료 납부 ※ 문화예술과-30151호		’22. 12. 20.	김춘수 과장 양현옥 팀장 강병준 주무관
○ 설계의 적정성 검토 요청 ※ 문화예술과-30644호		’22. 12. 23.	김춘수 과장 양현옥 팀장 강병준 주무관
○ 재해영향평가용역 일시정지 검토보고 ※ 문화예술과-23117호		’22. 12. 28.	나병곤 국장 김춘수 과장 양현옥 팀장 강병준 주무관
○ 공사기간산정 및 적정성 검토 용역 ※ 문화유산과-1047호		’23. 2. 8.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 설계안전검토보고서 검토 수수료 납부 ※ 문화유산과-2129호		’23. 3. 7.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 녹색건축 인증 심사 수수료 납부 ※ 문화유산과-2129호		’23. 3. 9.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 건설기술심의위원회 심의 신청 ※ 문화유산과-3154호		’23. 3. 31.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 재해영향평가 심의 요청 ※ 문화유산과-3340호		’23. 4. 5.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 적정성검토 대금 지급 ※ 문화유산과-4055호		’23. 4. 21.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 선소테마정원 조성사업 관련 검토보고 ※ 문화유산과-4169호		’23. 4. 25.	정기명 시장 김종기 부시장 김용필 국장 김춘수 과장 엄태오 팀장 노혜진 주무관
○ 설계용역 최종보고회 개최 계획 ※ 문화유산과-6411호		’23. 6. 13.	김용필 국장 김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 농지전용 대행용역 ※ 문화유산과-8744호		’23. 8. 1.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 전시 실시설계 및 전시물 제작 설치 제안서 평가위원(후보자 모집) ※ 문화유산과-8939호		’23. 8. 4.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 설계승인 요청 ※ 문화유산과-10021호		’23. 8. 28.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 평가위원 접수 현황 보고 ※ 문화유산과-10348호		’23. 9. 4.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 농지전용 대행용역 ※ 문화유산과-10602호		’23. 9. 8.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 국유지(도로) 매입방안 검토보고 ※ 문화유산과-10779호		’23. 9. 13.	정기명 시장 김종기 부시장 김용필 국장 김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 전시 실시설계 및 전시물 제작 설치 공모 공고 ※ 문화유산과-10602호		’23. 9. 19.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 계약심사 요청서 송부 ※ 문화유산과-11862~5호		’23. 10. 11.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 지적측량 수수료 지급 ※ 문화유산과-12199호		’23. 10. 18.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 제안서 평가위원회 구성 및 평가계획 ※ 문화유산과-12519호		’23. 10. 26.	김용필 국장 김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 제안서 평가위원회 평가결과 보고 ※ 문화유산과-13120호		’23. 11. 7.	김용필 국장 김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 분할측량 수수료 지급 ※ 문화유산과-13357호		’23. 11. 13.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 여수 선소테마정원 조성사업 시행 ※ 문화유산과-13649호		’23. 11. 17.	정기명 시장 김종기 부시장 김용필 국장 김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 기공식 개최 계획 ※ 문화유산과-14454호		’23. 12. 5.	김용필 국장 김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 건설사업관리 용역 추진 계획(안) ※ 문화유산과-960호		’24. 1. 23.	정기명 시장 김종기 부시장 나병곤 국장 조정만 과장 서은주 팀장 우희원 팀장 박형열 과장 강행숙 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 사업수행능력평가서 제출 안내 공고 ※ 문화유산과-4731호		’24. 4. 16.	조정만 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 건설사업관리용역 면접평가결과보고 ※ 문화유산과-5790호		’24. 5. 9.	서채훈 과장 조정만 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 건설사업관리용역 계약의뢰 ※ 문화유산과-5814호		’24. 5. 9.	조정만 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 전시 실시설계 및 전시물 제작설치 협상결과 보고 ※ 문화유산과-7628호		’24. 6. 19.	정기명 시장 김종기 부시장 나병곤 국장 조정만 과장 강행숙 과장 우희원 팀장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 건설사업관리용역 계약의뢰(전기) ※ 문화유산과-795호		’24. 7. 23.	조정만 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 농지전용허가(협의) 신청에 따른 제반납입금 납부 ※ 문화유산과-1747호		’24. 8. 12.	조정만 과장 강행숙 과장 양동안 팀장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 선소공영주차장 주차관제시스템 임시철거 ※ 문화유산과-2588호		’24. 8. 28.	조정만 과장 강행숙 과장 양동안 팀장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 건축 관계기술자 변경 검토보고 ※ 문화유산과-3819호		’24. 9. 24.	조정만 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 설계의도 구현 용역 시행 ※ 문화유산과-4538호		’24. 10. 10.	조정만 과장 강행숙 과장 양동안 팀장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 관급자재 구매 의뢰(레미콘, 철근, 데크플레이트) ※ 문화유산과-6978호		’24. 11. 29.	엄태오 팀장 전결 강병준 주무관
○ 전기 감리용역 계약의뢰 ※ 문화유산과-7316호		’24. 12. 5.	조정만 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 전기, 통신, 소방(1차분) 계약의뢰 ※ 문화유산과-8443,8444,8477호		’24. 12. 30.	조정만 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 하도급 관리계획 및 직접시공계획서 검토보고 ※ 문화유산과-550호		’25. 1. 13.	김인옥 과장 김영화 팀장 강병준 주무관
○ 하도급 계약 적정성 검토보고 ※ 문화유산과-554호		’25. 1. 13.	김인옥 과장 김영화 팀장 강병준 주무관
○ 관급자재 구매의뢰(항온항습기, 공기순환기, CCTV, 방송설비) ※ 문화유산과-1548호		’25. 1. 13.	김인옥 과장 김영화 팀장 강병준 주무관 김종윤 주무관 이영훈 주무관
○ 건축(2차분) 계약의뢰 ※ 문화유산과-2719호		’25. 2. 27.	김인옥 과장 김영화 팀장 강병준 주무관
○ 건설사업관리(2차분) 계약의뢰 ※ 문화유산과-3139호		’25. 3. 10.	김인옥 과장 김영화 팀장 강병준 주무관
○ 하도급 계약 적정성 검토보고(기계설비공사) ※ 문화유산과-3646호		’25. 3. 19.	김인옥 과장 김영화 팀장 강병준 주무관 이영훈 주무관
○ 건축(1차분-정산) 설계변경 변경계약의뢰 ※ 문화유산과-3763호		’25. 3. 20.	김인옥 과장 김영화 팀장 강병준 주무관
○ 재해예방기술지도용역 시행(전기, 통신, 소방) ※ 문화유산과-3763호		’25. 4. 7.	김인옥 과장 김종필 과장 양동안 팀장 김영화 팀장 강병준 주무관 이영훈 주무관 김종윤 주무관 전영재 주무관
○ 4대인증 본인증 컨설팅 용역 시행 ※ 문화유산과-4703호		’25. 4. 8.	김인옥 과장 김종필 과장 양동안 팀장 김영화 팀장 강병준 주무관
○ 전기 감리용역(2차분) 계약의뢰 ※ 문화유산과-5223호		’25. 4. 18.	김인옥 과장 김영화 팀장 강병준 주무관
○ 관급자재 구매의뢰(수배전반, MCC, 분전반) ※ 문화유산과-5975호		’25. 5. 2.	김인옥 과장 김영화 팀장 강병준 주무관
○ 하도급 계약 적정성 검토보고(비계공사) ※ 문화유산과-6568호		’25. 5. 15.	김인옥 과장 김영화 팀장 강병준 주무관
○ 설계의도 구현 용역 사업기간 연장 검토보고 ※ 문화유산과-7024호		’25. 5. 26.	김인옥 과장 한태광 팀장 양동안 팀장 김영화 팀장 강병준 주무관
○ 여수 선소테마정원 조성사업 설계의도 구현 용역 사업기간 변경 계약의뢰 ※ 문화유산과-7050호		’25. 5. 26.	김인옥 과장 김영화 팀장 강병준 주무관
○ 「여수 선소테마정원 조성사업(전기)(총괄 및 1차분)」 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-26067호		’25. 5. 27.	엄정직 팀장 양동안 팀장 김대건 주무관
○ 「여수 선소테마정원 조성사업(소방)(총괄 및 1차분)」 외 1건 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-26241호		’25. 5. 27.	엄정직 팀장 양동안 팀장 김대건 주무관
○ 「여수 선소테마정원 조성사업 설계의도 구현 용역」변경계약 체결 알림 ※ 회계과-26425호		’25. 5. 28.	엄정직 팀장 양동안 팀장 이지향 주무관
○ 여수 선소테마정원 조성사업 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 일상감사 의뢰(설계변경) ※ 문화유산과-8052호		’25. 6. 16.	김인옥 과장 김영화 팀장 강병준 주무관
○「(설계변경)여수 선소테마정원 조성사업 건설사업관리용역(감독권한대행 등)」일상감사 결과 통보 ※ 감사담당관-5873호		’25. 6. 17.	정웅정 담당관 이재태 팀장 송수진 주무관
○ 「여수 선소테마정원 조성사업(건축)(총괄 및 2차분) 외 9건」감독공무원 변경요청 ※ 문화유산과-9404호		’25. 7. 9.	김인옥 과장 김영화 팀장 김혁준 주무관
○ 여수 선소테마정원 조성사업 전시 실시설계 및 전시물 제작설치 용역(1차분) 변경계약 검토보고 ※ 문화유산과-9721호		’25. 7. 11.	서채훈 과장 김종필 과장 김기현 팀장 김인옥 과장 김영화 팀장 손인희 주무관
○ 여수 선소테마정원 조성사업 전시 실시설계 및 전시물 제작설치 용역(1차분) 변경계약 의뢰 ※ 문화유산과-9775호		’25. 7. 15.	김인옥 과장 김영화 팀장 손인희 주무관
○ 「여수 선소테마정원 조성사업 전시 실시설계 및 전시물 제작설치 용역(1차분)」 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-37021호		’25. 7. 17	김종필 과장 김기현 팀장 김대건 주무관
○ 여수 선소테마정원 조성사업 관급자재선정심의위원회 심의 안건 제출 ※ 문화유산과-10849호		’25. 8. 6.	김인옥 과장 김영화 팀장 김혁준 주무관
○ 「여수 선소테마정원 조성사업(전기)」관급자재선정심의 요구 검토의견 통보 ※ 회계과-10849호		’25. 9. 1.	김종필 과장 김기현 팀장 이정은 주무관
○ 「여수 선소테마정원 조성사업(전기)」관급자재선정심의 보완 제출 ※ 문화유산과-12404호		’25. 9. 8.	김인옥 과장 김영화 팀장 김혁준 주무관
○ 「여수 선소테마정원 조성사업(전기)」관급자재선정심의위원회 심의요청서 제출(BIPV, PV)(정정) ※ 문화유산과-12945호		’25. 9. 18.	김인옥 과장 김영화 팀장 김혁준 주무관
○ 설계변경(증액)심의회 안건 제출(여수 선소테마정원 조성사업) ※ 문화유산과-13259호		’25. 9. 24.	김인옥 과장 김영화 팀장 김혁준 주무관
○ 「여수 선소테마정원 조성사업」 성립전예산 사용 검토보고 ※ 문화유산과-13469호		’25. 9. 25.	최정기 부시장 서채훈 국장 신영자 과장 신숙이 팀장 김인옥 과장 김영화 팀장 김혁준 주무관
○ 여수 선소테마정원 조성사업 전시 실시설계 및 전시물 제작설치 용역(총괄 및 1차분) 기간연장 검토보고 ※ 문화유산과-13466호		’25. 9. 29.	서채훈 국장 김종필 과장 김기현 팀장 김인옥 과장 김영화 팀장 손인희 주무관 김혁준 주무관
○ 여수 선소테마정원 조성사업 전시 실시설계 및 전시물 제작설치 용역(총괄 및 1차분) 변경계약(기간연장) 의뢰 ※ 문화유산과-13471		’25. 9. 29.	김인옥 과장 김영화 팀장 김혁준 주무관
○ 여수 선소테마정원 조성사업 설계의도 구현 용역 사업기간 연장 검토보고 ※ 문화유산과-13679호		’25. 10. 2.	김인옥 과장 김종필 과장 김기현 팀장 김영화 팀장 김혁준 주무관
○ 여수 선소테마정원 조성사업 설계의도 구현 용역 사업기간 변경 계약의뢰 ※ 문화유산과-13684호		’25. 10. 2.	김인옥 과장 김영화 팀장 김혁준 주무관
○ 「여수 선소테마정원 조성사업 설계의도 구현 용역」변경계약 체결 알림 ※ 회계과-49462호		’25. 10. 13.	김종필 과장 김기현 팀장 김대현 주무관
○ 「여수 선소테마정원 조성사업」설계변경 부서 검토의견 제출 ※ 문화유산과-13843호		’25. 10. 13.	김인옥 과장 김영화 팀장 김혁준 주무관
○ 「여수 선소테마정원 조성사업 전시 실시설계 및 전시물 제작설치 용역」 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-49462호		’25. 10. 13.	김종필 과장 김기현 팀장 김대현 주무관