정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	돌산 생활SOC 복합화 사업
② 추진배경	증가하는 체육시설 충족으로 시민체력증진과 건강한 여가활동 지원 공공체육시설 균형배치를 통해 생활체육시설 사각지대 해소
③ 사업개요	사업위치 : 여수시 돌산읍 우두리 1117-5 사 업 량 : 국민체육센터 건립(수영장, 다목적체육관, 공동육아나눔터 등), 지하1층/지상2층 연면적 2,828.55㎡ 사 업 비 : 13,705백만원(기금 4,000, 시비 9,705)
④ 사업부서	체육지원과		⑤ 담당자	행정5급 김용우 시설6급 김현미 시설7급 최원혁 시설7급 정효진
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2022. 1. ~ 2026. 3.
<그간 주요 추진내용>
「돌산 생활SOC 복합화 사업」 시행 ※체육지원과-6123(2024. 10. 23.)		‘24. 10. 23.	정기명 시장 최종기 부시장 정재호 문화관광체육국장 김용우 체육지원과장 강행숙 회계과장 정일권 계약1팀장 김현미 체육시설팀장 최원혁 주무관 정효진 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역」 시행 ※체육지원과-3321(2024. 9. 5.)		‘24. 9. 5.	정기명 시장 최종기 부시장 정재호 문화관광체육국장 김용우 체육지원과장 강행숙 회계과장 정일권 계약1팀장 김현미 체육시설팀장 최원혁 주무관 정효진 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 일상감사 및 계약심사 요청 ※체육지원과-1067(2024. 7. 26.)		‘24. 7. 26.	김용우 체육지원과장 김현미 체육시설팀장 정효진 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업」시공단계의 건설사업관리계획 제출 ※체육지원과-871(2024. 7. 23.)		‘24. 7. 23.	김용우 체육지원과장 김현미 체육시설팀장 최원혁 주무관 정효진 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업 일상감사 및 계약심사 요청 ※체육지원과-450(2024. 7. 15.)		‘24. 7. 15.	김용우 체육지원과장 김현미 체육시설팀장 정효진 주무관
설계안전검토보고서 검토의견 알림(돌산 생활SOC 복합화 사업) ※체육지원과-6942(2024. 4. 23.)		‘24. 4. 23.	윤경희 체육지원과장 김대희 체육시설팀장 정효진 주무관
2024년 제1회(1분기 정기, 서면) 기술자문위원 확인서 제출(돌산 생활SOC 복합화사업) ※체육지원과-4631(2024. 3. 15.)		‘24. 3. 15.	윤경희 체육지원과장 김대희 체육시설팀장 정효진 주무관
2024년 제1회(1분기 정기, 서면) 기술자문위원회 자문결과 알림 ※건설과-3032(2024. 2. 16.)		‘24. 2. 16.	건설행정팀장 박경 지역개발팀장 정일석 정상기 차장
공용건축물 건축허가사항 알림[돌산읍-체육지원과] ※허가과-4279(2024. 1. 31.)		‘24. 1. 31.	김인옥 허가과장 김희영 건축허가팀장 신정환 차장
공용건축물 건축 협의 요청(돌산 생활SOC복합화 사업) ※체육지원과-20911(2023. 12. 26.)		‘23. 12. 26.	윤경희 체육지원과장 김대희 체육시설팀장 김지아 주무관
공공건축물 신재생에너지 설치계획서 제출(돌산 생활SOC복합화 사업) ※체육지원과-20196(2023. 12. 14.)		‘23. 12. 14.	윤경희 체육지원과장 김대희 체육시설팀장 김지아 주무관
2023년 기술자문윈원회 기술자문 요청(돌산 생활SOC복합화 사업) ※체육지원과-19410(2023. 12. 4.)		‘23. 12. 4.	윤경희 체육지원과장 김대희 체육시설팀장 김지아 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 기본 및 실시설계 용역 일시정지 알림 ※체육지원과-36797(2023. 7. 25.)		‘23. 7. 25.	한광민 행정안전국장 봉영권 재산관리팀장 김진욱 계약1팀장 김주희 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 기본 및 실시설계 용역 일시정지 요청 ※체육지원과-11186(2023. 7. 21.)		‘23. 7. 21.	윤경희 체육지원과장 김대희 체육시설팀장 김지아 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 기본 및 실시설계 용역 최종보고회 결과보고 ※체육지원과-11155(2023. 7. 20.)		‘23. 7. 20.	김태횡 교육복지국장 윤경희 체육지원과장 김대희 체육시설팀장 김지아 주무관
장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청 ※체육지원과-8225(2023. 6. 5.)		‘23. 6. 5.	윤경희 체육지원과장 김대희 체육시설팀장 김지아 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 기본 및 실시설계 용역 변경계약의뢰 ※체육지원과-92(2023. 1. 11.)		‘23. 1. 11.	윤경희 체육지원과장 김대희 체육시설팀장 김지아 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 기본 및 실시설계 용역 설계변경 검토보고 ※체육지원과-123(2023. 1. 11.)		‘23. 1. 11.	윤경희 체육지원과장 박형열 기획예산담당관 한진숙 회계과장 서은주 예산팀장 김진욱 계약1팀장 김대희 체육시설팀장 김지아 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 기본 및 실시설계 용역 계약체결 감독공무원 지정 통보 ※회계과-50605(2022. 10. 25.)		‘22. 10. 25.	김지선 행정지원국장 한진숙 회계과장 김진욱 계약1팀장 여미향 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 기본 및 실시설계용역 계약의뢰 ※체육지원과-15004(2022. 10. 17.)		‘22. 10. 17.	장지문 체육지원과장 김대희 체육시설팀장 김지아 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 건축 설계 공모 심사 결과 공고 ※체육지원과-14837(2022. 10. 13.)		‘22. 10. 13.	장지문 체육지원과장 김대희 체육시설팀장 김지아 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 건축 설계공모 심사위원회 결과보고 ※체육지원과-14828(2022. 10. 13.)		‘22. 10. 13.	김지선 행정지원국장 장지문 체육지원과장 하성준 체육시설팀장 김지아 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 건축설계공모 공고요청 ※체육지원과-10483(2022. 7. 25.)		‘22. 7. 25.	장지문 체육지원과장 하성준 체육시설팀장 김지아 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 건축설계 공모 ※체육지원과-10430(2022. 7. 25.)		‘22. 7. 25.	장지문 체육지원과장 하성준 체육시설팀장 김지아 주무관
여수시 돌산 생활SOC복합화 사업 설계용역 계약심사 결과 알림 ※전라남도 회계과-33779(2022. 7. 19.)		‘22. 7. 19.	이길용 회계과장 김재인 계약심사팀장 김태양 주무관
계약심사 요청(돌산 생활SOC복합화사업 기본 및 실시설계용역) ※체육지원과-10133(2022. 7. 18.)		‘22. 7. 18.	장지문 체육지원과장 하성준 체육시설팀장 김지아 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 건축설계공모 사전규격 공개 의뢰 ※체육지원과-9983(2022. 7. 14.)		‘22. 7. 14.	장지문 체육지원과장 하성준 체육시설팀장 김지아 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 건축설계공모 운영위원회 구성 및 심사위원 선정계획 ※체육지원과-9791(2022. 7. 11.)		‘22. 7. 11.	김용필 행정지원국장 장지문 체육지원과장 김동호 허가민원과장 기권 공공시설팀장 하성준 체육시설팀장 김지아 주무관
‘22년도 수시 분 여수시 공유재산관리계획안 제출 ※체육지원과-9736(2022. 7. 11.)		‘22. 7. 11.	장지문 체육지원과장 하성준 체육시설팀장 김지아 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 설계공모 계획안 ※체육지원과-9690(2022. 7. 6.)		‘22. 7. 6.	정기명 시장 박현식 부시장 김용필 행정지원국장 조계윤 회계과장 장지문 체육지원과장 오병구 계약1팀장 하성준 체육시설팀장 김지아 주무관
2022년도 생활SOC 화 사업 선정결과 알림 ※기획예산과-18033(2021. 10. 5.)		‘21. 10. 5.	이동일 기획예산과장 박영화 혁신적략팀장 임수정 주무관