정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	돌산 생활SOC 복합화 사업
② 추진배경	증가하는 체육시설 충족으로 시민체력증진과 건강한 여가활동 지원 공공체육시설 균형배치를 통해 생활체육시설 사각지대 해소
③ 사업개요	사업위치 : 여수시 돌산읍 우두리 1117-5 사 업 량 : 국민체육센터 건립(수영장, 다목적체육관, 공동육아나눔터 등), 지하1층/지상2층 연면적 2,828.55㎡ 사 업 비 : 13,705백만원(기금 4,000, 시비 9,705)
④ 사업부서	체육지원과		⑤ 담당자	행정5급 김용우 시설6급 지상훈 시설7급 최원혁 시설7급 김주희
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2022. 1. ~ 2026. 3.
<그간 주요 추진내용>
2022년도 생활SOC 화 사업 선정결과 알림 ※기획예산과-18033(2021. 10. 5.)		’21. 10. 5.	이동일 기획예산과장 박영화 혁신적략팀장 임수정 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 설계공모 계획안 ※체육지원과-9690(2022. 7. 6.)		’22. 7. 6.	정기명 시장 박현식 부시장 김용필 행정지원국장 조계윤 회계과장 장지문 체육지원과장 오병구 계약1팀장 하성준 체육시설팀장 김지아 주무관
‘22년도 수시 분 여수시 공유재산관리계획안 제출 ※체육지원과-9736(2022. 7. 11.)		’22. 7. 11.	장지문 체육지원과장 하성준 체육시설팀장 김지아 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 건축설계공모 운영위원회 구성 및 심사위원 선정계획 ※체육지원과-9791(2022. 7. 11.)		’22. 7. 11.	김용필 행정지원국장 장지문 체육지원과장 김동호 허가민원과장 기권 공공시설팀장 하성준 체육시설팀장 김지아 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 건축설계공모 사전규격 공개 의뢰 ※체육지원과-9983(2022. 7. 14.)		’22. 7. 14.	장지문 체육지원과장 하성준 체육시설팀장 김지아 주무관
계약심사 요청(돌산 생활SOC복합화사업 기본 및 실시설계용역) ※체육지원과-10133(2022. 7. 18.)		’22. 7. 18.	장지문 체육지원과장 하성준 체육시설팀장 김지아 주무관
여수시 돌산 생활SOC복합화 사업 설계용역 계약심사 결과 알림 ※전라남도 회계과-33779(2022. 7. 19.)		’22. 7. 19.	이길용 회계과장 김재인 계약심사팀장 김태양 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 건축설계 공모 ※체육지원과-10430(2022. 7. 25.)		’22. 7. 25.	장지문 체육지원과장 하성준 체육시설팀장 김지아 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 건축설계공모 공고요청 ※체육지원과-10483(2022. 7. 25.)		’22. 7. 25.	장지문 체육지원과장 하성준 체육시설팀장 김지아 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 건축 설계공모 심사위원회 결과보고 ※체육지원과-14828(2022. 10. 13.)		’22. 10. 13.	김지선 행정지원국장 장지문 체육지원과장 하성준 체육시설팀장 김지아 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 건축 설계 공모 심사 결과 공고 ※체육지원과-14837(2022. 10. 13.)		’22. 10. 13.	장지문 체육지원과장 김대희 체육시설팀장 김지아 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 기본 및 실시설계용역 계약의뢰 ※체육지원과-15004(2022. 10. 17.)		’22. 10. 17.	장지문 체육지원과장 김대희 체육시설팀장 김지아 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 기본 및 실시설계 용역 계약체결 감독공무원 지정 통보 ※회계과-50605(2022. 10. 25.)		’22. 10. 25.	김지선 행정지원국장 한진숙 회계과장 김진욱 계약1팀장 여미향 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 기본 및 실시설계 용역 설계변경 검토보고 ※체육지원과-123(2023. 1. 11.)		’23. 1. 11.	윤경희 체육지원과장 박형열 기획예산담당관 한진숙 회계과장 서은주 예산팀장 김진욱 계약1팀장 김대희 체육시설팀장 김지아 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 기본 및 실시설계 용역 변경계약의뢰 ※체육지원과-92(2023. 1. 11.)		’23. 1. 11.	윤경희 체육지원과장 김대희 체육시설팀장 김지아 주무관
장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청 ※체육지원과-8225(2023. 6. 5.)		’23. 6. 5.	윤경희 체육지원과장 김대희 체육시설팀장 김지아 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 기본 및 실시설계 용역 최종보고회 결과보고 ※체육지원과-11155(2023. 7. 20.)		’23. 7. 20.	김태횡 교육복지국장 윤경희 체육지원과장 김대희 체육시설팀장 김지아 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 기본 및 실시설계 용역 일시정지 요청 ※체육지원과-11186(2023. 7. 21.)		’23. 7. 21.	윤경희 체육지원과장 김대희 체육시설팀장 김지아 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업 기본 및 실시설계 용역 일시정지 알림 ※체육지원과-36797(2023. 7. 25.)		’23. 7. 25.	한광민 행정안전국장 봉영권 재산관리팀장 김진욱 계약1팀장 김주희 주무관
2023년 기술자문윈원회 기술자문 요청(돌산 생활SOC복합화 사업) ※체육지원과-19410(2023. 12. 4.)		’23. 12. 4.	윤경희 체육지원과장 김대희 체육시설팀장 김지아 주무관
공공건축물 신재생에너지 설치계획서 제출(돌산 생활SOC복합화 사업) ※체육지원과-20196(2023. 12. 14.)		’23. 12. 14.	윤경희 체육지원과장 김대희 체육시설팀장 김지아 주무관
공용건축물 건축 협의 요청(돌산 생활SOC복합화 사업) ※체육지원과-20911(2023. 12. 26.)		’23. 12. 26.	윤경희 체육지원과장 김대희 체육시설팀장 김지아 주무관
공용건축물 건축허가사항 알림[돌산읍-체육지원과] ※허가과-4279(2024. 1. 31.)		’24. 1. 31.	김인옥 허가과장 김희영 건축허가팀장 신정환 차장
2024년 제1회(1분기 정기, 서면) 기술자문위원회 자문결과 알림 ※건설과-3032(2024. 2. 16.)		’24. 2. 16.	건설행정팀장 박경 지역개발팀장 정일석 정상기 차장
2024년 제1회(1분기 정기, 서면) 기술자문위원 확인서 제출(돌산 생활SOC 복합화사업) ※체육지원과-4631(2024. 3. 15.)		’24. 3. 15.	윤경희 체육지원과장 김대희 체육시설팀장 정효진 주무관
설계안전검토보고서 검토의견 알림(돌산 생활SOC 복합화 사업) ※체육지원과-6942(2024. 4. 23.)		’24. 4. 23.	윤경희 체육지원과장 김대희 체육시설팀장 정효진 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업 일상감사 및 계약심사 요청 ※체육지원과-450(2024. 7. 15.)		’24. 7. 15.	김용우 체육지원과장 김현미 체육시설팀장 정효진 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업」시공단계의 건설사업관리계획 제출 ※체육지원과-871(2024. 7. 23.)		’24. 7. 23.	김용우 체육지원과장 김현미 체육시설팀장 최원혁 주무관 정효진 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 일상감사 및 계약심사 요청 ※체육지원과-1067(2024. 7. 26.)		’24. 7. 26.	김용우 체육지원과장 김현미 체육시설팀장 정효진 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역」 시행 ※체육지원과-3321(2024. 9. 5.)		’24. 9. 5.	정기명 시장 최종기 부시장 정재호 문화관광체육국장 김용우 체육지원과장 강행숙 회계과장 정일권 계약1팀장 김현미 체육시설팀장 최원혁 주무관 정효진 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업 감독 권한대행 등 건설사업관리용역」사업수행능력평가 결과보고 ※체육지원과-5412(2024. 10. 11.)		’24. 10. 11.	정재호 문화관광체육국장 김용우 체육지원과장 김현미 체육시설팀장 정효진 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업」 시행 ※체육지원과-6123(2024. 10. 23.)		’24. 10. 23.	정기명 시장 최종기 부시장 정재호 문화관광체육국장 김용우 체육지원과장 강행숙 회계과장 정일권 계약1팀장 김현미 체육시설팀장 최원혁 주무관 정효진 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업 전기 감리용역」 시행 ※체육지원과-7266(2024. 11. 11.)		’24. 11. 11.	정재호 문화관광체육국장 강행숙 회계과장 정일권 계약1팀장 신영자 기획예산과장 서은주 예산팀장 김용우 체육지원과장 김현미 체육시설팀장 정효진 주무관
『돌산 생활SOC 복합화 사업 기본 및 실시설계용역』 준공검사조서 제출 ※체육지원과-8025(2024. 11. 25.)		’24. 11. 25.	김용우 체육지원과장 김현미 체육시설팀장 정효진 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업(돌산읍 우두리 1117-5번지) 분할측량 신청 ※체육지원과-10105(2024. 12. 26.)		’24. 12. 26.	김용우 체육지원과장 김현미 체육시설팀장 정효진 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업(건축 등)(총괄 및 1차분) 착공계 제출 ※ 체육지원과-10324(2024. 12. 30.)		’24. 12. 30.	김용우 체육지원과장 김현미 체육시설팀장 정효진 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 착수계 제출 ※ 체육지원과-10326(2024. 12. 30.)		’24. 12. 30.	김용우 체육지원과장 김현미 체육시설팀장 정효진 주무관
공용건축물 착공신고 (돌산 생활SOC복합화 사업) ※ 체육지원과-2244(2025. 2. 7.)		’25. 2. 7.	김용우 체육지원과장 김현미 체육시설팀장 정효진 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업 감독 권한대행 등 건설사업관리용역」기술인 배치기간 등 변경 검토보고(토목, 기계, 통신) ※ 체육지원과-4675(2025. 3. 17.)		’25. 3. 17.	정재호 문화관광체육국장 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 신영자 기획예산과장 서은주 예산팀장 김현미 체육시설팀장 최원혁 주무관 정효진 주무관
외부 사토장 선정 요청(3차) 승인 알림[돌산 생활SOC 복합화 사업] ※ 체육지원과-5875(2025. 4. 4.)		’25. 4. 4.	김용우 체육지원과장 김현미 체육시설팀장 최원혁 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업 감독 권한대행 등 건설사업관리용역」기술인(건축-안전) 변경 검토보고 ※ 체육지원과-6629(2025. 4. 16.)		’25. 4. 16.	김용우 체육지원과장 김현미 체육시설팀장 정효진 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)(2차분)」 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※회계과-26246(2025. 5. 27.)		’25. 5. 27.	나병곤 행정안전국장 엄정직 재산관리팀장 정일권 계약1팀장 이정란 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업(건축 등)_1차분」공사기간 연장 요청에 따른 검토보고 ※체육지원과-8929(2025. 5. 28.)		’25. 5. 28.	정재호 문화관광체육국장 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 김용우 체육지원과장 김현미 체육시설팀장 정효진 주무관 최원혁 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업(건축 등)(1차분)」 변경계약 체결 알림 ※회계과-26663(2025. 5. 29.)		’25. 5. 29.	엄정직 재산관리팀장 정일권 계약1팀장 이정란 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업(건축 등)(1차분) 착공계 제출 ※ 체육지원과-9144(2025. 6. 2.)		’25. 6. 2.	김용우 체육지원과장 김현미 체육시설팀장 정효진 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업」 관련 설계변경 의견 요청 ※체육지원과-9931(2025. 6. 16.)		’25. 6. 16.	김용우 체육지원과장 김현미 체육시설팀장 정효진 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업(통신) 변경계약 의뢰 ※체육지원과-10559(2025. 6. 25.)		’25. 6. 25.	김용우 체육지원과장 김현미 체육시설팀장 최원혁 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업(통신)」 변경계약 체결 알림 ※회계과-32858(2025. 6. 27.)		’25. 6. 27.	김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 이정란 주무관
「돌산 생활SOC 복합화사업」 기계설비공사 하도급 계약 적정성 검토 보고 ※체육지원과-10914(2025. 7. 9.)		’25. 6. 27.	김용우 체육지원과장 김현미 체육시설팀장 정효진 주무관
설계변경(증액)심의 요청(돌산 생활SOC 복합화 사업) ※체육지원과-10914(2025. 7. 2.)		’25. 7. 2.	김용우 체육지원과장 김현미 체육시설팀장 정효진 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업(건축 등)」토공 및 가설흙막이 실정 보고에 따른 검토보고 ※체육지원과-11153(2025. 7. 3.)		‘25. 7. 3.	김용우 체육지원과장 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 김현미 체육시설팀장 정효진 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업 기본 및 실시설계용역」 설계용역 평가 결과보고 ※체육지원과-11273(2025. 7. 4.)		’25. 7. 4.	강행숙 문화예술과장 황정혜 스포츠마케팅팀장 김현미 체육시설팀장 정효진 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업 감독 권한대행등 건설사업관리용역」 기성검사원 제출 ※체육지원과-11274(2025. 7. 4.)		’25. 7. 4.	김현미 체육시설팀장 정효진 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업(건축 등)」실정 보고에 따른 설계변경 검토보고 ※체육지원과-11573(2025. 7. 9.)		’25. 7. 10.	김용우 체육지원과장 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 지상훈 체육시설팀장 김효진 주무관 최원혁 주무관
「2025년 제18차 설계변경심의위원회」심의 결과 알림 ※회계과-35804(2025. 7. 11..)		’25. 7. 11.	김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 김재연 주무관
「돌산 생활 SOC 복합화 사업 감독 권한대행 등 건설사업관리용역」기성검사 결과 제출 ※체육지원과-11708(2025. 7. 11.)		’25. 7. 11.	김용우 체육지원과장 지상훈 체육시설팀장 최주희 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업(총괄 및 1차분)」 변경계약 체결 알림 ※회계과-35928(2025. 7. 11.)		’25. 7. 11.	박희우 총무과장 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 이정란 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업 1차분 준공검사 결과 제출 ※체육지원과-12669(2025. 7. 29.)		’25. 7. 29.	지상훈 체육시설팀장 최주희 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)」 실정보고에 따른 검토 보고 ※체육지원과-12840(2025. 7. 30.)		’25. 7. 30.	서채훈 문화관광체육국장 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 김용우 체육지원과장 지상훈 체육시설팀장 김주희 주무관
'돌산 생활SOC 복합화 사업' 파일항타공사 실정보고 승인 ※체육지원과-12893(2025. 7. 31.)		’25. 7. 31.	김용우 체육지원과장 지상훈 체육시설팀장 김주희 주무관
돌산 생활 SOC 복합화사업 폐기물 처리용역 과업변경 검토 보고 ※체육지원과-14905(2025. 9. 4.)		’25. 9. 4.	김용우 체육지원과장 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 지상훈 체육시설팀장 김주희 주무관
「돌산 생활 SOC 복합화사업 폐기물처리 용역」 변경계약 체결 알림 ※회계과-45051(2025. 9. 8.)		’25. 9. 8.	김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 정의영 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업(기계)[2차분]-빌딩자동제어장치」계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※회계과-45359(2025. 9. 10.)		’25. 9. 10.	김종필 회계과장 김기현 계약2팀장 손다슬 주무관
돌산 생활SOC복합화 사업(2차분) 제1회 기성 검사자 임명 보고의 건 ※체육지원과-16300(2025. 9. 25.)		’25. 9. 25.	박민국 본부장 김명원 부장 김소정 사원
돌산 생활SOC 복합화 사업(2차분) 제1회 기성 검사 결과 보고의 건 ※체육지원과-16524(2025. 9. 29.)		’25. 9. 29.	박민국 본부장 김명원 부장 김소정 사원
「돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)(2차분)」 기성대가 확정 알림 ※회계과-48495(2025. 9. 30.)		’25. 9. 30.	나병곤 행정안전국장 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 이정란 주무관
[돌산 생활SOC 복합화 사업]사토장 위치 변경에 따른 운반거리 변경 등 실정보고 검토결과 보고 ※체육지원과-18838(2025. 11. 7.)		’25. 11. 7.	박의훈 책임건설사업관리기술인 윤세한 토목기술지원기술인 조광용 건축건설사업관리기술인
돌산 생활 SOC복합화 사업_ 전기공사_펌프 추가신설에 따른 전기 MCC 판넬 UNIT 추가 증설 ※체육지원과-18838(2025. 11. 20.)		’25. 11. 20.	김영창 책임감리원
돌산 생활 SOC복합화 사업_ 전기공사_옥탑층 3층 조명 전등설비 및 콘센트 추가 신설 ※체육지원과-19860(2025. 11. 25.)		’25. 11. 25.	김영창 책임감리원
설계변경 심의 요청(돌산 생활SOC 복합화 사업) ※체육지원과-20050(2025. 11. 28.)		’25. 11. 28.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 최원혁 주무관
돌산 생활 SOC복합화 사업_ 전기공사 _다목적체육관 2층 옥외 옥상 휴게공간 및 옥외 휴게 데크공간 조명등 신설 ※체육지원과-20171(2025. 12. 1.)		’25. 12. 1.	김영창 책임감리원
돌산 생활 SOC복합화 사업_ 전기공사_감리_펌프 추가신설에 따른 전기 MCC 판넬 UNIT 추가 증설 ※체육지원과-20596(2025. 12. 5.)		’25. 12. 5.	김영창 책임감리원
「돌산 생활SOC 복합화 사업(건축 등)」 사토운반 등 실정 보고에 따른 검토보고 ※체육지원과-20626(2025. 12. 8.)		’25. 12. 8.	서채훈 문화관광체육국장 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 최원혁 주무관
돌산 생활 SOC복합화 사업 전기공사 감리_전기 분전반판넬 전기 스위치(ELB) 220V 추가설치 ※체육지원과-20731(2025. 12. 9.)		’25. 12. 9.	김영창 책임감리원
[돌산 생활SOC 복합화 사업(건축,소방)] 기성 검사자 임명 보고의 건 ※체육지원과-21260(2025. 12. 16.)		’25. 12. 16.	박민국 본부장 김명원 부장 김소정 사원
[돌산 생활SOC 복합화 사업]2025년 4,4분기 기술지원 합동점검 결과 보고 제출 ※체육지원과-21384(2025. 12. 18.)		’25. 12. 18.	박의훈 책임건설사업관리기술인
[돌산 생활SOC 복합화 사업(건축,소방)] 기성 검사 결과 보고의 건 ※체육지원과-21737(2025. 12. 24.)		’25. 12. 24.	박민국 본부장 김명원 부장 김소정 사원
「돌산 생활SOC 복합화 사업(소방)」 기성대가 확정 알림(1회) ※회계과-64642(2025. 12. 24.)		’25. 12. 24.	나병곤 행정안전국장 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 이정란 주무관
[돌산 생활SOC 복합화 사업]기계설비공사 수영장 장비 및 장비연결 배관공사 도면·내역 불일치 실정보고(2차) ※체육지원과-217(2026. 1. 6.)		’26. 1. 6.	박의훈 책임건설사업관리기술인 신동호 기계기술지원기술인 권태익 기계건설사업관리기술인
'돌산 생활SOC 복합화 사업' 품질관리자 변경 검토 보고 ※체육지원과-504(2026. 1. 9.)		’26. 1. 9.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업 감독 권한대행 등 건설사업관리용역」 기성검사 결과 제출 ※체육지원과-1100(2026. 1. 19.)		’26. 1. 19.	양동안 체육지원팀장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업 건설현장 안전점검 실시 안내 ※체육지원과-1126(2026. 1. 20.)		’26. 1. 20.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
「돌산 생활 SOC 복합화 사업 감독 권한대행 등 건설사업관리용역」 기성대가 확정 알림(2회) ※회계과-2903(2026. 1. 20.)		’26. 1. 20.	박형열 행정안전국장 이수남 회계과장 이정모 계약2팀장 김대건 주무관
건설사업관리기술인 배치기간 조정 요청에 대한 검토 보고(돌산 생활SOC 복합화 사업) ※체육지원과-1389(2026. 1. 22.)		’26. 1. 22.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)(2차분)」 기성대가 확정 알림(2회) ※회계과-3480(2026. 1. 22.)		’26. 1. 22.	박형열 행정안전국장 이수남 회계과장 이정모 계약2팀장 김대건 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업 관급자재(미장벽돌) 변경사항 검토 보고 ※체육지원과-1459(2026. 1. 23.)		’26. 1. 23.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업 설계변경사항 검토 및 반영 요청 ※체육지원과-1557(2026. 1. 26.)		’26. 1. 26.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업(건축 등)_총괄 및 2차분 변경계약 의뢰 ※체육지원과-1698(2026. 1. 27.)		’26. 1. 27.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관 한상범 차장
설계변경 심의 요청 ※체육지원과-1757(2026. 1. 28.)		’26. 1. 28.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
「돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)(총괄 및 2차분)」 변경계약 체결 알림 ※회계과-4152(2026. 1. 28.)		’26. 1. 28.	박형열 행정안전국장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 김대건 주무관
[돌산 생활SOC 복합화 사업] 준공기간 연장 사유서 적정성 검토 결과 보고 및 승인 요청 ※체육지원과-1864(2026. 1. 29.)		’26. 1. 29.	박의훈 책임건설사업관리기술인 조광용 건축건설사업관리기술인
건설기술인 변경 승인 알림(돌산 생활SOC 복합화 사업 품질관리자) ※체육지원과-1955(2026. 1. 30.)		’26. 1. 30.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업 공사기간 연장 검토 보고 ※체육지원과-2120(2026. 2. 2.)		’26. 2. 2.	서채훈 문화관광체육국장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업 3차분 계약 의뢰 ※체육지원과-2475(2026. 2. 6.)		’26. 2. 6.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
제 3회 기성 검사자 임명 보고의 건(돌산 생활SOC 복합화 사업) ※체육지원과-2465(2026. 2. 6.)		’26. 2. 6.	박민국 본부장 김명원 부장 김소정 사원
[돌산 생활SOC 복합화 사업] 제 3회 기성 검사 결과 보고의 건 ※체육지원과-2776(2026. 2. 12.)		’26. 2. 12.	박민국 본부장 김명원 부장 김소정 사원
[돌산 생활SOC 복합화 사업] 공기순환기(관급자재) 제 1회 기성 검사 결과 보고의 건 ※체육지원과-2777(2026. 2. 12.)		’26. 2. 12.	박민국 본부장 김명원 부장 김소정 사원
「돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)(2차분)」 기성대가 확정 알림(3회) ※회계과-2834(2026. 2. 12.)		’26. 2. 12.	박형열 행정안전국장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 김대건 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업(건축 등) 2차분관급자재(공기순환기) 기성검사 결과 송부 ※체육지원과-2862(2026. 2. 12.)		’26. 2. 12.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
「돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)(3차분)」계약체결 및 공사관리관 지정 알림 ※회계과-6958(2026. 2. 13.)		’26. 2. 13.	박형열 행정안전국장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 김대건 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역」설계변경 일상감사 결과 알림 ※감사담당관-2058(2026. 2. 20.)		’26. 2. 20.	김인보 감사담당관 한상근 기술감사팀장 윤영상 주무관
『돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)』실정보고 검토 보고 ※체육지원과-3452(2026. 2. 24.)		’26. 2. 24.	김용우 체육지원과장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
『돌산 생활SOC 복합화 사업』 관급자재 구매 및 계약변경 의뢰 ※체육지원과-3539(2026. 2. 26.)		’26. 2. 26.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
『돌산 생활SOC 복합화 사업 감독 권한대행 등 건설사업관리용역』계약변경 검토 보고 ※체육지원과-3612(2026. 2. 26.)		’26. 2. 26.	정현구 부시장 서채훈 문화관광체육국장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업(건축 등) 실정보고에 따른 검토보고 ※체육지원과-3873(2026. 3. 3.)		’26. 3. 3.	서채훈 문화관광체육국장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
돌산 생활SOC 복합화 사업(건축 등) 실정보고에 따른 검토보고 ※체육지원과-3997(2026. 3. 4.)		’26. 3. 4.	서채훈 문화관광체육국장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
「돌산 생활SOC 복합화 사업 감독대행 등 건설사업관리용역」 변경계약 체결 알림 ※회계과-9184(2026. 3. 4.)		’26. 3. 4.	박형열 행정안전국장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 김대건 주무관
『돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)』철골공사 실정보고 검토 보고 ※체육지원과-3997(2026. 3. 9.)		’26. 3. 9.	김용우 체육지원과장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
건축공사 제 1회(3차분) 기성 부분검사자 임명 보고의 건(돌산 생활SOC 복합화 사업) ※체육지원과-4232(2026. 3. 9.)		’26. 3. 9.	박민국 본부장 김명원 부장 김소정 사원
돌산 생활SOC 복합화 사업(건축 등) 2차분 등 11건 변경계약 의뢰 ※체육지원과-4253(2026. 3. 9.)		’26. 3. 9.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관 한상범 차장
「돌산 생활SOC 복합화 사업(전기)」실정보고에 따른 검토 보고 ※체육지원과-4529(2026. 3. 11.)		’26. 3. 11.	김용우 체육지원과장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
[돌산 생활SOC 복합화 사업]2026년 1분기 기술지원 합동점검 결과 보고 제출 ※체육지원과-4592(2026. 3. 12.)		’26. 3. 12.	박의훈 책임건설사업관리기술인 조광용 건축건설사업관리기술인
돌산 생활SOC 복합화 사업(건축 등)_총괄 및 3차분 변경계약 의뢰 ※체육지원과-4725(2026. 3. 16.)		’26. 3. 13.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관 한상범 차장
『돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)』창호공사 실정보고 검토 보고 ※체육지원과-4811(2026. 3. 16.)		’26. 3. 16.	김용우 체육지원과장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
건축공사 제 1회(3차분) 기성 부분검사 결과 보고의 건(돌산 생활SOC 복합화 사업) ※체육지원과-4822(2026. 3. 16.)		’26. 3. 16.	박민국 본부장 김명원 부장 김소정 사원
돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)(3차분)」 기성대가 확정 알림(1회) ※회계과-11407(2026. 3. 17.)		’26. 3. 17.	이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 김대건 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업 폐합성수지 처리 용역 시행 및 계약의뢰 ※체육지원과-5107(2026. 3. 19.)		’26. 3. 19.	김용우 체육지원과장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업 건설사업관리용역 분야기술인(기계) 변경 요청에 대한 검토 보고 ※체육지원과-5198(2026. 3. 21.)		’26. 3. 21.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관 한상범 차장
「돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)(총괄 및 3차분)」 변경계약 체결 알림 ※회계과-12300(2026. 3. 20.)		’26. 3. 20.	박형열 행정안전국장 조치영 재산관리팀장 김기현 계약1팀장 김대건 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업 폐합성수지 처리 용역」 계약 체결 및 감독공무원 알림 ※회계과-12472(2026. 3. 23.)		’26. 3. 23.	이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 신은결 주무관
도시가스 공급 신청(돌산 생활soc 복합화 사업)에 대한 회신 ※체육지원과-5346(2026. 3. 24.)		’26. 3. 24.	정태옹 담당
「돌산 생활SOC 복합화 사업(건축 등) 2차분」관급자재 변경 검토 보고 ※체육지원과-5529(2026. 3. 25.)		’26. 3. 25.	김용우 체육지원과장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
돌산 생활soc 복합화 사업 도로점용(굴착) 사업계획서 제출 ※체육지원과-5707(2026. 3. 30.)		’26. 3. 30.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
돌산 생활SOC 복합화 사업(건축 등) 2차분 관급자재(원형수로관, 빗물저류시설) 변경 계약 의뢰 ※체육지원과-5800(2026. 3. 30.)		’26. 3. 30.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
[돌산 생활SOC 복합화 사업] 예비준공검사 보고 ※체육지원과-5991(2026. 4. 1.)		’26. 4. 1.	박의훈 책임건설사업관리기술인 조광용 건축건설사업관리기술인
돌산 생활SOC 복합화 사업 관급자재(충격안전보드) 구매설치 시행 및 계약 의뢰 ※체육지원과-6279(2026. 4. 6.)		’26. 4. 6	김용우 체육지원과장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업(건축 등)」관급자재(제트공조기) 변경 검토 보고 ※체육지원과-6340(2026. 4. 6.)		’26. 4. 6.	김용우 체육지원과장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
돌산 생활SOC 복합화 사업(토목)[2차분] 관급자재 빗물침투 저류블록 구매」수의계약 계약금액 조정 및 낙찰률 협의 요청에 대한 회신 ※체육지원과-6552(2026. 4. 9.)		’26. 4. 9.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
국민체육센터 건립지원 사업계획 변경 승인 신청(돌산 생활SOC 복합화 사업) ※체육지원과-6578(2026. 4. 9.)		’26. 4. 9.	강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업(토목)[2차분] 관급자재 빗물침투 저류블록 구매」계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※회계과-16473(2026. 4. 10.)		’26. 4. 10.	이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 손다슬 주무관
『돌산 생활SOC 복합화 사업』준공예정일 도래에 따른 사업관리 철저 요청 ※체육지원과-6641(2026. 4. 10.)		’26. 4. 10.	강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
상수도 급수시설 신청[돌산 생활soc 복합화 사업] ※체육지원과-6663(2026. 4. 10.)		’26. 4. 10.	강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
『돌산 생활SOC 복합화 사업』 예비준공검사 공무원 지정 통보 ※회계과-16886(2026. 4. 13.)		’26. 4. 13.	이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 김대건 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업(소방)」실정보고에 따른 검토 보고 ※체육지원과-6824(2026. 4. 14.)		’26. 4. 14.	김용우 체육지원과장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
돌산 생활SOC 복합화 사업(건축 등) 실정보고에 따른 검토보고 ※체육지원과-6922(2026. 4. 15.)		’26. 4. 15.	서채훈 문화관광체육국장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
돌산 생활soc 복합화 사업(건축 등) 2차분 관급자재 변경 계약 의뢰 ※체육지원과-6954(2026. 4. 15.)		’26. 4. 15.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관 한상범 차장
「돌산 생활SOC 복합화 사업(전기)」실정보고에 따른 검토 보고 ※체육지원과-6963(2026. 4. 15.)		’26. 4. 15.	김용우 체육지원과장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
돌산 생활soc 복합화 사업(전기) 관급자재 변경 계약 의뢰 ※체육지원과-6996(2026. 4. 16.)		’26. 4. 16.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
설계변경 심의 요청 ※체육지원과-7075(2026. 4. 17.)		’26. 4. 17.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
상수도 급수시설 신청[돌산 생활SOC 복합화 사업]회신 ※상수도과과-9787(2026. 4. 20.)		’26. 4. 20.	이광재 상수도과장 김수구 수도급수팀장 정용웅 주무관
돌산 생활soc 복합화 사업(건축 등) 하도급(변경) 계약 적정성 검토 보고 ※체육지원과-7264(2026. 4. 21.)		’26. 4. 21.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
「돌산 생활SOC 복합화 사업」 하도급 계약 및 직접시공계획서 변경 검토 보고 ※체육지원과-7323(2026. 4. 21.)		’26. 4. 21.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
돌산 생활 SOC 복합화사업 폐합성수지 처리 용역 계약변경 검토 보고 ※체육지원과-7513(2026. 4. 24.)		’26. 4. 24.	김용우 체육지원과장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업(소방) 변경계약 의뢰 ※체육지원과-7580 (2026. 4. 24.)		’26. 4. 24.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관 한상범 차장
돌산 생활SOC 복합화 사업(전기) 실정보고에 따른 검토보고 ※체육지원과-7638(2026. 4. 27.)		’26. 4. 27.	서채훈 문화관광체육국장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
돌산 생활SOC 복합화 사업 폐합성수지 처리 용역 변경계약 체결 알림 ※회계과-20079(2026. 4. 27.)		’26. 4. 27.	이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 신은결 주무관
전기사용신청서 및 사용전점검신청서 제출(돌산 생활SOC 복합화 사업) ※체육지원과-8344 (2026. 5. 7.)		’26. 5. 7.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
「돌산 생활soc 복합화 사업(전기)」일상감사 및 계약심사 결과 회신 ※감사담당관-5075 (2026. 5. 8.)		’26. 5. 8.	김인보 감사담당관 한상근 기술감사팀장 윤영상 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업(전기) 변경계약 의뢰 ※체육지원과-8485 (2026. 5. 9.)		’26. 5. 9.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
「돌산 생활SOC 복합화 사업(건축 등) 2차분」관급자재 변경 검토 보고 ※체육지원과-8534(2026. 5. 11.)		’26. 5. 11.	김용우 체육지원과장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
돌산 생활soc 복합화 사업 정보통신공사 사용전검사신청서 제출 ※체육지원과-8521(2026. 5. 11.)		’26. 5. 11.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
「돌산 생활SOC 복합화 사업(건축 등)」설계변경 검토 보고 ※체육지원과-8617(2026. 5. 11.)		’26. 5. 11.	김용우 체육지원과장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
돌산 생활soc 복합센터 자가용전기설비 전기안전관리대행용역 시행 및 계약체결 ※체육지원과-8601(2026. 5. 11.)		’26. 5. 11.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
돌산 생활soc 복합센터 전기차충전기 전기안전관리대행용역 시행 및 계약체결 ※체육지원과-8602(2026. 5. 11.)		’26. 5. 11.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
돌산 생활SOC 복합화 사업(건축 등) 2차분 관급자재(원형수로관) 변경 계약 의뢰 ※체육지원과-8603(2026. 5. 11.)		’26. 5. 11.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
돌산 생활SOC 복합화 사업(건축 등)_총괄, 2차, 3차분 변경계약 의뢰 ※체육지원과-8624(2026. 5. 12.)		’26. 5. 12.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관 한상범 차장
돌산 생활SOC 복합화 사업(건축 등) 실정보고에 따른 검토보고 ※체육지원과-8681(2026. 5. 12.)		’26. 5. 12.	서채훈 문화관광체육국장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
「돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)(총괄 및 2, 3차분)」 변경계약 체결 알림 ※회계과-22775 (2026. 5. 12.)		’26. 5. 12.	박형열 행정안전국장 조치영 재산관리팀장 김기현 계약1팀장 김대건 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업 2차분 준공검사자 임명 보고의 건 ※체육지원과-8685 (2026. 5. 12.)		’26. 5. 12.	박민국 본부장 김명원 부장 김소정 사원
「돌산 생활SOC 복합화 사업 폐합성수지 처리 용역」 준공검사공무원 지정 통보 ※회계과-23112 (2026. 5. 13.)		’26. 5. 13.	이수남 화계과장 김기현 계약1팀장 김대건 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업(전기)」 변경계약 체결 알림 ※회계과-23145 (2026. 5. 13.)		’26. 5. 13.	박형열 행정안전국장 이수남 화계과장 김기현 계약1팀장 김대건 주무관
현장대리인 변경 선임계 검토 보고(돌산 생활 SOC복합화 사업_전기공사) ※체육지원과-8854 (2026. 5. 15.)		’26. 5. 15.	김영창 책임감리원
돌산 생활SOC 복합화 사업 2차분 준공검사 결과 보고의 건 ※체육지원과-8877 (2026. 5. 15.)		’26. 5. 15.	박민국 본부장 김명원 부장 김소정 사원
『돌산 생활SOC복합화 사업 폐합성수지 처리 용역』 완료검사 결과 제출 ※체육지원과-9053 (2026. 5. 19.)		’26. 5. 19.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
『돌산 생활SOC복합화 사업 폐기물처리용역』 완료검사 결과 제출 ※체육지원과-9063 (2026. 5. 19.)		’26. 5. 19.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
『돌산 생활SOC 복합화 사업 감독 권한대행 등 건설사업관리용역』계약기간 연장 검토 보고 ※체육지원과-9181(2026. 5. 20)		’26. 5. 20.	서채훈 문화관광체육국장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
『돌산 생활SOC 복합화 사업 감독대행 등 건설사업관리용역』 계약변경 의뢰 체※육지원과-9187 (2026.05.20		’26. 5. 20.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
[돌산 생활SOC 복합화 사업] 2차분 준공검사 완료 보고 보완 제출 ※체육지원과-9206(2026. 5. 20.)		’26. 5. 20.	박의훈 책임건설사업관리기술인 조광용 건축건설사업관리기술인
『돌산 생활SOC 복합화 사업』 세출예산 변경사용 검토 보고 ※체육지원과-9266(2026. 5. 21.)		’26. 5. 21.	최재영 문화예술과장 남기복 기획예산과장 신숙이 예산팀장 김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업 전기 감리용역 용역기간 연장 검토보고 ※체육지원과-9396(2026. 5. 22.)		’26. 5. 22.	최재영 문화예술과장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
돌산 생활SOC 복합화 사업 전기 감리용역 변경계약 의뢰 ※체육지원과-9455 (2026. 5. 26.)		’26. 5. 26.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
「돌산 생활SOC 복합화 사업 감독대행 등 건설사업관리용역」 변경계약 체결 알림 ※회계과-25281 (2026. 5. 26.)		’26. 5. 26.	박형열 행정안전국장 이수남 화계과장 김기현 계약1팀장 김대건 주무관
『돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)』공사기간 연장 검토 보고 ※체육지원과-9573 (2026. 5. 27.)		’26. 5. 27.	최재영 문화예술과장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
(돌산 생활SOC 복합화 사업) 설계변경 심의 요청 ※체육지원과-9604 (2026. 5. 27.)		’26. 5. 27.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
『돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)』 계약변경 의뢰 ※체육지원과-9607 (2026. 5. 27.)		’26. 5. 27.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업 전기 감리용역」 변경계약 체결 알림 ※회계과-25993 (2026. 5. 28.)		’26. 5. 28.	이수남 화계과장 김기현 계약1팀장 김대건 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)(총괄 및 3차분)」 변경계약 체결 알림 ※회계과-26376 (2026. 5. 29.)		’26. 5. 29.	이수남 화계과장 김기현 계약1팀장 김대건 주무관
[돌산 생활SOC 복합화 사업] 소방공사 준공검사자 임명 보고의 건 ※체육지원과-9906 (2026. 6. 1.)		’26. 6. 1.	박민국 본부장 김명원 부장 김소정 사원
『돌산 생활SOC 복합화 사업(통신)』 준공검사 공무원 지정 통보 ※회계과-26735 (2026. 6. 1.)		’26. 6. 1.	조치영 재산관리팀장 김기현 계약1팀장 김대건 주무관
도시가스 공급계약서 및 공급배관 공사비 부담 협약서(돌산 생활soc 복합화 사업) 날인 송부 ※체육지원과-10008 (2026. 6. 2.)		’26. 6. 2.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
돌산 생활SOC 복합화 사업(기계) 관급자재(냉난방기) 검사조서 송부 ※체육지원과-10063 (2026. 6. 2.)		’26. 6. 2.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
돌산 생활SOC 복합화 사업(기계) 관급자재(빌딩자동제어장치) 검사조서 송부 ※체육지원과-10064 (2026. 6. 2.)		’26. 6. 2.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
돌산 생활SOC 복합화 사업(전기) 관급자재(태양광발전장치) 검사조서 송부 ※체육지원과-10065 (2026. 6. 2.)		’26. 6. 2.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
『돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)』관급자재(수영시설기구) 구매변경 요청 ※체육지원과-10160(2026. 6. 4.)		’26. 6. 4.	김용우 체육지원과장 이수남 화계과장 김기현 계약1팀장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
돌산 생활 SOC 복합화 사업 (전기) 준공검사자 임명 보고서 송부의 건 ※체육지원과-10163(2026. 6. 4.)		’26. 6. 4.	이림헌 담당자
돌산 생활SOC 복합화 사업(소방) 소방공사감리 결과보고서 및 소방공사 감리일지 날인 송부 ※체육지원과-10177(2026. 6. 4.)		’26. 6. 4.	김용우 체육지원과장 한상범 차장
『돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)』공사 일시정지 검토 보고 ※체육지원과-10245(2026. 6. 5)		’26. 6. 5.	정일권 관광과장 이수남 화계과장 김기현 계약1팀장 김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
[돌산 생활SOC 복합화 사업] 소방공사 준공검사 결과 보고의 건 ※체육지원과-10303 (2026. 6. 6.)		’26. 6. 6.	박민국 본부장 김명원 부장 김소정 사원
「돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)(3차분)」 일시정지 알림 ※회계과-27877 (2026. 6. 8.)		’26. 6. 8.	박형열 행정안전국장 이수남 화계과장 김기현 계약1팀장 김대건 주무관
『돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)』설계변경 검토 보고 ※체육지원과-10487 (2026. 6. 9.)		’26. 6. 9.	정기명 시장 정현구 부시장 정일권 관광과장 조치영 재산관리팀장 김기현 계약1팀장 김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
『돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)』계약변경 요청 ※체육지원과-10510 (2026. 6. 9.)		’26. 6. 9.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
『돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)』공사 일시정지 해지 검토 보고 ※체육지원과-10555 (2026. 6. 10.)		’26. 6. 10.	서채훈 문화관광체육국장 이수남 화계과장 김기현 계약1팀장 김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
돌산 생활soc 복합화 사업(통신) 준공검사조서 제출 ※체육지원과-10646 (2026. 6. 11.)		’26. 6. 11.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
돌산 생활soc 복합화 사업(통신) 준공검사조서 제출 ※체육지원과-10647 (2026. 6. 11.)		’26. 6. 11.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
『돌산 생활SOC복합화 사업(건축)』 관급자재 계약물량 변경 요청 ※체육지원과-10703 (2026. 6. 11.)		’26. 6. 11.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
[돌산 생활SOC 복합화 사업] 3차분 및 총괄분 준공검사자 임명 보고의 건 ※체육지원과-10707 (2026. 6. 12.)		’26. 6. 12.	박민국 본부장 김명원 부장 김소정 사원
「돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)(총괄 및 3차분)」 일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림 ※회계과-29073 (2026. 6. 12.)		’26. 6. 12.	박형열 행정안전국장 이수남 화계과장 김기현 계약1팀장 김대건 주무관
『돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)』 총괄 및 3차분 준공검사자 임명 보고 ※체육지원과-10760 (2026. 6. 12.)		’26. 6. 12.	강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
[돌산 생활SOC 복합화 사업] 3차분 및 총괄분 준공검사 결과 보고의 건 ※체육지원과-10768 (2026. 6. 12.)		’26. 6. 12.	박민국 본부장 김명원 부장 김소정 사원
『돌산 생활 SOC 복합화 사업 감독대행 등 건설사업관리용역』완료계 송부 ※체육지원과-10770 (2026. 6. 12.)		’26. 6. 12.	강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
돌산 생활soc 복합화 사업 전기공사 준공검사 결과 제출 ※체육지원과-10781 (2026. 6. 12.)		’26. 6. 12.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업(건축 등)」관급자재(빌딩자동제어장치) 정산 검토 보고 ※체육지원과-10782 (2026. 6. 12.)		’26. 6. 12.	김용우 체육지원과장 이수남 화계과장 김기현 계약1팀장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
돌산 생활soc 복합화 사업(건축 등) 관급자재(빌딩자동제어장치) 변경 계약 의뢰 ※체육지원과-10833 (2026. 6. 15.)		’26. 6. 15.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
돌산 생활soc 복합화 사업(건축 등) 하도급(변경) 계약 적정성 검토 보고 ※체육지원과-10849( 2026. 6. 15.)		’26. 6. 15.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
『돌산 생활SOC 복합화 사업 감독대행 등 건설사업관리용역』 준공검사 공무원 지정 통보 ※회계과-29370 (2026. 6. 15.)		’26. 6. 15.	이수남 화계과장 김기현 계약1팀장 김대건 주무관
돌산 생활soc 복합화 사업(건축 등) 하도급(변경) 계약 검토 결과 회신 ※체육지원과-10856 (2026. 6. 15)		’26. 6. 15.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
『돌산 생활SOC 복합화 사업 전기 감리용역』 준공검사 공무원 지정 통보 ※회계과-29753 (2026. 6. 16.)		’26. 6. 16.	이수남 화계과장 김기현 계약1팀장 김대건 주무관
『돌산 생활SOC복합화 사업(건축)』 관급자재(세면대하부장) 계약물량 변경 요청 ※체육지원과-11006(2026. 6. 17.)		’26. 6. 17.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
『돌산 생활SOC 복합화 사업(건축)』 준공검사 결과 송부 ※체육지원과-11093 (2026. 6. 17.)		’26. 6. 17.	강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
돌산 생활soc 복합화 사업 전기 감리 용역 준공검사조서 제출 ※체육지원과-11327 (2026. 6. 17.)		’26. 6. 22.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 한상범 차장
배수설비 준공검사 결과통보[돌산읍 우두리 1117-5번지(돌산 생활SOC 복합화 사업)] ※하수도과-11835 (2026. 6. 23.)		’26. 6. 23.	윤대근 하수도과장 강성욱 하수정비팀장 차상건 주무관
『돌산 생활SOC 복합화 사업 감독 권한대행 등 건설사업관리용역』 완료검사 결과 제출 ※체육지원과-11632 (2026. 6. 25.)		’26. 6. 25.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
『돌산 생활SOC 복합화 사업 BF 등 본인증 용역』 계약기간 연장 검토 보고 ※체육지원과-156 (2026. 7. 3.)		’26. 7. 3.	김용우 체육지원과장 이수남 화계과장 이정모 계약2팀장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업 설계의도 구현 용역」 준공검사공무원 지정 통보 ※회계과-943 (2026. 7. 6.)		’26. 7. 6.	이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 신은결 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업 BF 등 본인증 용역」 변경계약 체결 알림 ※회계과-1035 (2026. 7. 7.)		’26. 7. 7.	이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 신은결 주무관
「돌산 생활SOC 복합화 사업 설계의도 구현 용역」 완료검사 결과 보고 ※체육지원과-945 (2026. 7. 15.)		’26. 7. 15.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
돌산 생활SOC 복합화 사업 건설사업관리용역 건설엔지니어링 평가 추진 계획 ※체육지원과-1442 (2026. 7. 25.)		’26. 7. 25.	문장곤 문화관광체육국장 김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관
장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 신청(돌산 생활SOC 복합화) ※체육지원과-1700 (2026. 7. 29.)		’26. 7. 29.	김용우 체육지원과장 강한빛 체육시설팀장 김주희 주무관