정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	손죽항(지방어항) 시설공사
② 추진배경	태풍 및 해일 내습시 어항 피해발생을 예방하고 정온 수역 확보하여 어선의 대피장소 확보
③ 사업개요	○ 위 치: 삼산면 손죽길 7번지 인근 ○ 사 업 량: 방파제 연장 L=100m, 방파제 보강 L=57m, 등 ○ 사 업 비: 17,078백만원 ○ 사업기간: 총 괄 - 2022. 9. 26. ~ 2026. 9. 24.
④ 사업부서	여수시 섬발전지원과		⑤ 담당자	행정5급 김정오 시설6급 박동훈
⑥ 선정기준	10억 원 이상 공사		⑦ 사업기간	’22. 1. ~’26. 12.
<그간 주요 추진내용>
○지방어항(손죽항)시설공사 (총괄 및 1차분)시행 ※ 섬자원개발과-4499(22. 4. 21.)		‘22. 4. 21.	권오봉 시장 박현식 부시장 김병완 국장 김태횡 과장 마동현 팀장 이민호 주무관
○지방어항(손죽항)시설공사 (총괄 및 1차분)계약 체결 ※ 회계과-43401(22. 9. 8.)		‘22. 9 8.	김지선 국장 한진숙 과장 여미향 주무관
○지방어항(손죽항)시설공사 해양환경영향조사용역 시행 ※섬발전지원과-1067(2023. 2. 6.)		‘23. 2. 6.	김종기 부시장 정재호 국장 김정오 과장 김용채 팀장 박가영 차장
○용역사업 집행계획 및 사업 수행능력평가서 제출 안내 공고 ※섬발전지원과-3433(2023. 4. 3.)		‘23. 4. 3.	김정오 과장 김용채 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)시설공사 해양 환경영향조사용역 입찰공고 ※회계과-22266(2023. 5. 17.)		‘23. 5. 17.	김정오 과장 김용채 팀장 박가영 차장

○지방어항(손죽항)시설공사 해향환경영향조사용역(총괄 및 1차분)착수계알림 ※ 섬발전지원과-6531(2023. 6. 19.)	‘23. 6. 9.	김정오 과장 김용채 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)시설공사 (2차분)시행 ※ 섬자원개발과-4499(22. 4. 21.)	‘23. 6. 19.	정기명 시장 김종기 부시장 정재호 국장 김정오 과장 김용채 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)시설공사(2차분) 계약체결 및 감독공무원 지정통보 ※회계과30498(2023. 6. 26.)	‘23. 6. 26.	김정오 과장 김용채 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)시설공사 건설폐기물처리용역 변경계약 의뢰	‘23. 7. 18.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)공유수면 상용 변경승인(면적변경) 알림 ※해양정책과-10318(2023. 8.25..)	‘23. 8. 25.	윤국한 과장 장내근 팀장 김채린 주무관
○지방어항(손죽항) 공사기성부분 검사원 신청 ※섬발전지원과-10722(2023. 9. 19.)	‘23. 9. 19.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)시설공사 사업 계획 변경 및 총사업비 조정 ※전라남도 섬해양정책과-(2023. 12. 6)	‘23. 12. 6.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)공사 설계변경 계약심사 결과 알림 ※전라남도 회계과-67486(2023. 12.26.)	‘23.12.26.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 시행 ※섬발전지원과-1257	‘24. 1. 29.	정기명 시장 김종기 부시장 정재호 국장 김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)공사 해양환경영향조사용역(2차분) 시행 ※섬발전지원과-1640	‘24. 2. 6.	정재호 국장 김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○ 지방어항(손죽항)공사(1, 2차분) 준공	‘24. 2. 16.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)공사 해양환경영향 조사용역(1차분) 준공 ※섬발전지원과-2227	‘24. 2. 23.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 품질시험계획 적정성 검토보고 ※섬발전지원과-2786	‘24. 3. 8.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 하도급계약 적정성 검토 ※섬발전지원과-3050	‘24. 3. 13.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 현장대리인 변경 검토보고 ※섬발전지원과-3440	‘24. 3. 25.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 실정보고에 따른 검토보고 ※섬발전지원과-5306	‘24. 5. 10.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)공사 해양환경영향조사 용역 참여기술자 변경 검토보고 ※섬발전지원과-6747	‘24. 5. 10.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)공사(총괄분 및 3차분) 실정보고에 따른 검토보고 ※섬발전지원과-7537	‘24. 7. 2.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 현장대리인 변경 검토보고 ※섬발전지원과-710	‘24. 7. 23.	김정오 과장 김 혁 팀장 박동훈 차장
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 계약금액 변경 검토보고 ※섬발전지원과-2781	‘24. 9. 6.	김정오 과장 김 혁 팀장 박동훈 차장
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 변경계약 체결 ※회계과-51658	‘24. 10. 2.	강행숙 과장 정일권 팀장 김대건 주무관
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 기성(개산급) 검사	‘24. 10. 15.	김 혁 팀장 박동훈 차장