정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	여수시 교통약자 이동지원센터 신축
② 추진배경	○ 교통약자 이동지원센터의 안정적인 운영과 근로자 복지증진을 위해 센터 필요 ○ 늘어나는 장애인, 고령자 등 교통약자에 대한 운전자 이동지원 서비스 제고
③ 사업개요	○ 위치: 여수시 화장동 780-2(화장동 시내버스 공영차고지 맞은편) ○ 사업규모 - 부지조성(5,606㎡) 및 주차시설 55면(일반 53, 장애인2) 부대시설(418㎡): 사무실, 휴게실, 회의실, 화장실, 환경미화원 휴게실 등 ○ 구조: 철근콘크리트 ○ 공사기간: 착공일로부터 8개월 ○ 총사업비: 2,192백만 원(시비 100%) ○ 계약방법: 공개경쟁입찰
④ 사업부서	여수시 교통과		⑤ 담당자	행정5급 정수환 행정7급 문재동
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간	’23. 10. ~ ’24. 8.
<그간 주요 추진내용>
○ 방침 결정(여수시 교통약자 이동지원센터 신축계획) ※ 교통과-13320호(’22.02.14)		‘22. 2. 14.	권오봉 시장 박형식 부시장 문인기 국장 공주식 과장 손용봉 팀장 박도성 차장
○ 여수시 교통약자 이동지원센터 신축 실시설계용역 시행 ※ 교통과-24413호(’22.03.16.)		‘22. 3. 16.	공주식 과장 손용봉 팀장 박도성 차장
○ 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청 ※ 교통과-66275호(’22.07.11.)		‘22. 7. 11.	공주식 과장 손용봉 팀장 박도성 차장
○ 여수시 교통약자 이동지원센터 신축 실시설계용역 일시정지 해지 및 변경계약 검토보고 ※ 교통과-33545(’23.05.11)		‘23. 5. 11.	이경종 국장 한진숙 과장 서채훈 과장 김진욱 팀장 강재희 팀장 박도성 차장
○ 여수시 교통약자 이동지원센터 신축 공사 시행 ※ 교통과-44946(’23.06.12)		‘23. 6. 12.	정기명 시장 김종기 부시장 이경종 국장 한진숙 과장 서채훈 과장 최철웅 팀장 강재희 팀장 박도성 차장
○ 여수시 교통약자 이동지원센터 신축 공사 관련 일상감사 및 계약심사 의뢰 ※ 교통과-42009(’23.06.14)		‘23. 6. 14.	서채훈 과장 강재희 팀장 박도성 차장
○ 여수시 교통약자 이동지원센터 신축 공사(건축 등) 계약의뢰 ※ 교통과-57730(23.08.16.)		‘23. 8. 14.	정수환 과장 강재희 팀장 임여은 주무관
○ 여수시 교통약자 이동지원센터 신축 공사(건축 등) 입찰 공고 ※ 회계과-42220(’23.08.28.)		‘23. 8. 28.	한광민 국장 한진숙 과장 김진욱 팀장 김주희 주무관
○ 여수시 교통약자 이동지원센터 신축 공사(건축 등) 계약체결 및 감독공무원 지정 ※ 회계과-46200(’23.09.19.)		‘23. 9. 19.	한진숙 과장 김진욱 팀장 김주희 주무관
○ 여수시 교통약자 이동지원센터 신축 공사(건축 등) 착공계 제출 ※ 교통과-67781(’23.09.20.)		‘23. 9. 20.	정수환 과장 강재희 팀장 임여은 주무관
○ 여수시 교통약자 이동지원센터 신축 공사(건축 등) 준공 - 소방 ※ 교통과-48859 (’24.06.18.)		‘24. 6. 17.	정수환 과장 강재희 팀장 김종택 차장 문재동 주무관
- 건축, 통신, 기계 ※ 교통과-51928 (’24.06.26.)		‘24. 6. 26.	고영백 팀장 최두용 주무관
- 전기 ※ 교통과-52371 (’24.06.27.)		‘24. 6. 27.	백현철 차장 이성우 주무관