[ 붙임5 ]

남면사무소 신축사업

- 단계 : 준공 -

회계과 최두용 061-659-3221

1. 일반현황

일반 현황	소 재 지	여수시 남면 우학리 655번지
	인구 수	2,689명(2022.12.31.기준)
	공무원 수	21명/21명	현원/정원
	재정자립도	27.02%

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도			부지면적			기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)				비고
	합계	1985. 1.			814.5㎡						841.65㎡			지상 2층
	주민센터	1985. 1.			814.5㎡						841.65㎡			지상 2층
	청사신축 필요성			노후되고 협소한 기존 청사의 신축을 통한 주민불편 해소 및 업무효율 증대
	사업기간			2020. 4. ~ 2023. 10.
	사업수행방식			설계･시공 분리 : 입찰(적격심사 낙찰제)
	추정(예정)가격			4,815,000,000원			계약금액						낙찰율
	청사 규모
	용도		준공연도			부지면적			기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)		비고
	합계		2023. 10.			2,800㎡						1,328㎡			지상 3층
	주민센터		2023. 10.			2,800㎡						1,328㎡			지상 3층

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비	시도비	시군구비	지방채
	합계	5,077				5,077
	당해연도(H)	135				135
	H+1(2021)	263				263
	H+2(2022)	4,448				4,448
	H+3(2023)	231				231
	세부 내역별 사업비(백만원)
	구분							비고
	1) 토지매입비		123
	2) 설계비		198
	3) 감리비		118
	4) 공사비		4,143
	5) 기타부대비		495

추진 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	투융자심사	2020. 10.	승인	도
	공유재산관리계획	2020. 9.	의결	여수시의회
	중기재정계획	2020. 9.	확정	자체
	타당성 조사	해당없음
	설계	2021. 4.		자체
	착공	2022. 7.		자체
	준공	2023. 11.		자체

2. 공종별 공사비 (부가가치세, 관급자재비 포함)

공 종		금액ㆍ비율	주요시설･장비	비고
합계	금액(원)	4,143,125,810
	단위비용(원/㎡)	3,119,824원/㎡
	점유율(%)	100%
건 축	금액(원)	3,353,288,900	사무실, 호적서고, 민원상담실, 소회의실, 문서고, 대회의실, 프로그램실, 중대본부 냉·난방기, 공기순환장치
	단위비용(원/㎡)	2,525,067원/㎡
	점유율(%)	80.9%
전 기	금액(원)	442,560,000	LED조명기구, 분전반, 태양광발전설비
	단위비용(원/㎡)	333,253원/㎡
	점유율(%)	10.7%
통 신	금액(원)	264,388,210	CCTV시스템, 전관방송 및 A/V시스템
	단위비용(원/㎡)	199,088원/㎡
	점유율(%)	6.4%
소 방	금액(원)	82,888,700	수신기, 발신기, 화재 감지기, 시각경보기, 피난구 유도등, 완강기, 소화기
	단위비용(원/㎡)	62,416원/㎡
	점유율(%)	2%