정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	국동 남초등학교 인근 도로 개설 공사
② 추진배경	구도심지역 도로망 확충으로 지역 균형발전 도모
③ 사업개요	○ 위 치 : 국동 324-2번지 일원 ○ 사 업 량 : L=184m, B=18m ○ 사 업 비 : 5,290백만 원(설계 90, 공사 500, 보상 4,700)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설9급 김슬우 시설5급 박성식
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‵19. 8. ~ ‵27. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계용역 착수 ※ 도로과-10788호		‵19. 9. 1.		박동훈 주무관
○ 지방토지수용위원회 수용재결 신청 ※ 도로과-10856호		‵19. 9. 2.		김기채 국장 서유권 과장 이덕연 팀장 배 경 주무관
○ 도시계획선 명시 및 지적 경계복원측량 의뢰 ※ 도로과-13470호		‵19. 11. 1.		서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 손실보상비 산정 및 집행계획 ※ 도로과-13941호		‵19. 11. 12.		서유권 과장 박은규 과장 손하진 팀장 이재태 팀장(공석) 박동훈 주무관 이덕연 팀장 배 경 주무관
○ 실시설계용역 일시정지 검토보고 ※ 도로과-15832호		‵19. 12. 23.		김기채 국장 장세길 과장 박은규 과장 오병구 팀장 서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 실시설계용역 일시정지 통보 ※ 도로과-15934호, 회계과-67912		‵19. 12. 26.		박은규 과장 손하진 팀장 박희진 주무관
○ 실시계획인가 신청 ※ 도로과-910호		‵20. 1. 21.		서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 실시계획인가를 위한 사전열람공고 ※ 도로과-5090호		‵20. 4. 14.		서유권 과장 이덕연 팀장 배 경 주무관
○ 사업인정에 관한 의견청취 결과 제출 ※ 도로과-6122호		‵20. 5. 7.		서유권 과장 이덕연 팀장 배 경 주무관
○ 관계기간(부서) 협의 의견에 대한 조치계획 제출 ※ 도로과-7812호		‵20. 6. 12.		서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 실시설계용역 일시정지 해지 검토보고 ※ 도로과-9865호		‵20. 7. 24.		장세길 국장 조계윤 과장 김미옥 팀장 강 균 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 실시설계용역 일시정지 해지 및 변경계약사항 통보 ※ 도로과-9956호, 회계과-43833		‵20. 7. 27.		조계윤 과장 손하진 팀장 심미연 주무관
○ 실시설계용역 준공검사공무원 지정 통보 ※ 도로과-10009호, 회계과-44064		‵20. 7. 28.		조계윤 과장 손하진 팀장 심미연 주무관
○ 실시설계용역 완료계 ※ 도로과-13158호		‵20. 7. 29.		박동훈 주무관
○ 무상귀속 협의 결과 알림 ※ 도로과-340호		‵20. 10. 13.		박동훈 주무관
○ 지적 분할측량 의뢰 ※ 도로과-1480호		‵23. 2. 10.		오정환 과장 이광재 팀장 박상진 차장
○ 지적공부정리 신청 ※ 도로과-2782호		‵23. 3. 15.		오정환 과장 김정아 팀장 이광재 팀장 박상진 차장
○ 지적공부정리 신청 ※ 도로과-2928호		‵23. 3. 20.		박상진 팀장
○ 실시계획(변경)인가 신청 ※ 도로과-4104호		‵23. 4. 13.		김정아 팀장 박채훈 주무관 박상진 팀장
○ 사업인정 의제 관련 의견 청취 이행결과 제출 요청 ※ 도로과-10516호, 도시계획과-10516		‵23. 5. 4.		이영호 과장 임기형 팀장 하인대 주무관
○ 사업인정 의견청취 결과보고 ※ 도로과-5744호		‵23. 5. 26.		오정환 과장 박상진 팀장 백채훈 주무관
○ 의견 청취 이행결과 제출 ※ 도로과-5745호		‵23. 5. 29.		오정환 과장 박상진 팀장 백채훈 주무관
○ 편입토지(지장물)등에 대한 실태조사 계획 알림 ※ 도로과-5852호		‵23. 5. 31.		오정환 과장 박상진 팀장 김정아 팀장 민원기 주무관
○ 실시계획(변경)인가 알림 ※ 도로과-6099호, 도시계획과-13175호		‵23. 6. 8.		박채훈 주무관
○ 지장물 실태조사 결과보고 ※ 도로과-6935호		‵23. 6. 26.		오정환 과장 김정아 팀장 김상석 주무관 김민수 주무관 민원기 주무관
○ 보상계획 열람공고 ※ 도로과-7744호		‵21. 7. 13.		심근하 과장 김정아 팀장 민원기 주무관
○ 감정평가업자 추전 요청 ※ 도로과-8775호		‵23. 8. 7.		심근하 과장 김정아 팀장 민원기 주무관
○ 편입토지에 대한 감정평가 의뢰 ※ 도로과-9232호		‵23. 8. 17.		심근하 과장 김정아 팀장 민원기 주무관
○ 편입토지에 대한 감정평가 계획 알림 ※ 도로과-9706호		‵23. 8. 30.		심근하 과장 김정아 팀장 민원기 주무관
○ 감정평가회보 ※ 도로과-11229호		‵23. 10. 12.		민원기 주무관
○ 감정평가회보 ※ 도로과-11230호		‵23. 10. 12.		민원기 주무관
○ 편입토지등에 대한 손실보상비 집행 계획 ※ 도로과-11531호		‵23. 10. 18.		정기명 시장 김종기 부시장 이경종 국장 심근하 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 박상진 팀장 배경춘 주무관 김정아 팀장 민원기 주무관
○ 편입토지에 대한 보상협의 요청(1차) ※ 도로과-11539호		‵23. 10. 19.		심근하 과장 김정아 팀장 민원기 주무관
○ 편입 국유지 용도폐지 요청 ※ 도로과-11541호		‵23. 10. 19.		심근하 과장 김정아 팀장 민원기 주무관
○ 편입토지에 대한 보상협의 요청(2차) ※ 도로과-13661호		‵23. 12. 4.		심근하 과장 김정아 팀장 민원기 주무관
○ 편입 토지 등에 대한 손실보상비 산정 및 집행 계획(2차) ※ 도로과-1250호		‵24. 1. 27.		정기명 시장 김종기 부시장 염승열 국장 명호남 과장 강행숙 과장 김진욱 팀장 정진희 팀장 민원기 주무관
○ 편입 국유지 보상 협의에 대한 검토 보고 ※ 도로과-1389호		‵24. 2. 1.		명호남 과장 정진희 팀장 민원기 주무관
○ 편입 토지(지장물)에 대한 보상협의 요청(3차) ※ 도로과-2092호		‵24. 2. 20.		명호남 과장 정진희 팀장 민원기 주무관
○ 편입 지장물에 대한 감정평가 의뢰(추가) ※ 도로과-5797호		‵24. 5. 13.		명호남 과장 정진희 팀장 민원기 주무관
○ 추가 편입 지장물에 대한 보상협의 요청(1차) ※ 도로과-7076호		‵24. 6. 11.		명호남 과장 정진희 팀장 민원기 주무관
○ 추가 편입 지장물에 대한 보상협의 요청(2차) ※ 도로과-1883호		‵24. 8. 22.		명호남 과장 정진희 팀장 민원기 주무관
○ 거래처 정정 요청(국동 남초등학교 인근 도로개설공사) ※ 도로과-3934호		‵24. 10. 18.		명호남 과장 정진희 팀장 민원기 주무관
○ 국동 남초등학교 인근 도로개설공사 재감정평가 계획 알림 ※ 도로과-1041호		‵25. 2. 3.		박성식 과장 정진희 팀장 민원기 주무관
○ 국동 남초등학교 인근 도로개설공사 편입 토지 등에 대한 감정평가 수수료집행(재감정) ※ 도로과-1930호		‵25. 2. 25.		박성식 과장 정진희 팀장 민원기 주무관
○ 국동 남초등학교 인근 도로개설공사 편입 국유지에 대한 손실보상비 집행 ※ 도로과-4977호		‵25. 5. 12.		최정기 부시장 최연호 국장 김종필 과장 정일원 팀장 박성식 과장 정진희 팀장 민원기 주무관
○ 국동 남초등학교 인근 편입 토지에 대한 소유권이전 등기수수료 집행(국유지) ※ 도로과-5614호		‵25. 5. 29.		박성식 과장 정진희 팀장 민원기 주무관
○ 계약심사 요청(국동 남초등학교 일원 도로개설) ※ 도로과-10742호		‵25. 10. 10.		박성식 과장 황규석 팀장 김슬우 주무관
○ 국동 남초등학교 인근 도로개설공사 실시계획 (변경)인가 신청서 제출 ※ 도로과-11867호		‵25. 11. 10.		박성식 과장 황규석 팀장 김슬우 주무관
○ 국동 남초등학교 인근 도로개설 추진계획 ※ 도로과-12613호		‵25. 11. 28.		최연호 국장 박성식 과장 황규석 팀장 김슬우 주무관
○ 국동 남초등학교 인근 도로개설 건축물 철거 및 건설폐기물 처리 시행계획 검토보고 ※ 도로과-3220호		‵26. 3. 27.		김광호 국장 박성식 과장 황규석 팀장 김슬우 주무관
○ 「국동 남초등학교 인근 도로개설」총괄 및 1차분 외 2건 시행계획 검토보고		‵26. 8. 10.		김광호 국장 박성식 과장 황규석 팀장 김슬우 주무관