정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	율촌중학교 앞 도로확장 공사
② 추진배경	통학생 및 주민 통행불편 해소를 위하여 기존도로 확장
③ 사업개요	○ 위 치 : 율촌면 조화리 136-6번지 일원 ○ 사 업 량 : L=170m, B=8~11m ○ 사 업 비 : 1,950백만원(설계 및 공사 920 보상 등 1,030)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설8급 안준희 시설5급 박성식
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‵19. 8. ~ ‵26. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 착수계(실시설계용역) ※ 도로과-11221호		‵19. 8. 27.		김종서 주무관
○ 실시설계용역 일시정지 통보 ※ 회계과-66709호		‵19. 12. 23.		김종서 주무관
○ 도시계획시설(도로)사업인정에 관한 의견청취 결과 제출 ※ 도로과-6115호		‵20. 5. 7.		서유권 과장 이덕연 팀장 정준호 주무관 장문희 주무관
○ 사업인정 의견청취 결과제출 ※ 도로과-6140호		‵20. 5. 8.		서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 알림 ※ 도시계획과-14534호		‵20. 6. 19.		정준호 주무관
○ 무상귀속(양도)검토결과 알림 ※ 도시계획과-15096호		‵20. 6. 26.		정준호 주무관
○ 실시설계용역 일시정지 해지 통보 ※ 회계과-46188호		‵20. 8. 10.		임선진 주무관
○ 실시설계용역 준공검사공무원 지정통보 ※ 회계과-46243호		‵20. 8. 11.		임선진 주무관
○ 율촌중학교 공유재산 손실보상계약 및 손실보상금 청구 ※ 재정지원과-11314호		‵21. 7. 14.		김용찬 주무관
○ 도시계획시설(도로) 실시계획(변경)인가 신청 ※ 도로과-10344호		‵21. 8. 27.		강균 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 편입토지(지장물)등에 대한 실태조사 계획 알림 ※ 도로과-2547호		‵22. 3. 7.		오정환 과장 김정아 팀장 조진우 주무관 장문희 주무관
○ 주거이전 대상자 실태조사 결과보고 ※ 도로과-3107호		‵22. 3. 21.		오전환 과장 전결 김정아 팀장 대결 장문희 주무관
○ 지장물 실태조사 결과보고 ※ 도로과-3101호		‵22. 3. 21.		오전환 과장 전결 김정아 팀장 대결 장문희 주무관
○ 보상계획 열람공고 ※ 도로과-3230호		‵22. 3. 22.		오전환 과장 전결 김정아 팀장 대결 조진우 주무관 장문희 주무관
○ 감정평가 계획알림 ※ 도로과-3995호		‵22. 4. 11.		오전환 과장 김정아 팀장 장문희 주무관
○ 편입토지(지장물)등에 대한 보상협의 요청(최종) ※ 도로과-7879호		‵22. 7. 15.		오전환 과장 김정아 팀장 전명수 팀장 조진우 주무관 장문희 주무관
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경)인가 ※ 도시계획과-18894호		‵22. 8. 29.		조진우 주무관
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 취소 요청 ※ 도로과-3431호		‵23. 3. 30.		오정환 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 폐지(취소)알림 ※ 도시계획과-8009호		‵23. 4. 5.		최영민 주무관
○ 도로구역 결정 용역 시행 ※ 도로과-6007호		‵23. 6. 5.		오정환 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 도로구역 결정 및 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 공고 ※ 도로과-8130호		‵23. 7. 21.		심근하 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 국유재산 무상귀속 사전협의 결과 알림 ※ 지역계획과-11608호		‵23. 8. 9.		최영민 주무관
○ 사업인정 의견청취 결과보고 ※ 도로과-10918호		‵23. 9. 27.		심근하 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 도로구역 결정 및 지형도면 고시 ※ 도로과-13901호		‵23. 12. 8.		심근하 과장 전결 김정아 팀장 대결 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 지적 분할측량 의뢰 ※ 도로과-14012호		‵23. 12. 12.		심근하 과장 전결 김정아 팀장 대결 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 보상계획 열람공고 알림 ※ 도로과-975호		‵24. 1. 23.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 장문희 실무원
○ 편입토지 등에 대한 감정평가 계획 알림 ※ 도로과-1850호		‵24. 2. 15.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 장문희 실무원
○ 편입토지 등에 대한 보상협의 요청(1차) ※ 도로과-3621호		‵24. 2. 15.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 장문희 실무원
○ 관급자재 선정 심의 요청 ※ 도로과-3873호		‵24. 3. 28.		명호남 과장 결재 황규석 팀장 배경춘 주무관
○ 도로확장공사 시행 계획 ※ 도로과-4422호		‵24. 4. 9.		김종기 부시장 전결 염승열 건설교통국장 강행숙 회계과장 김진욱 계약1팀장 명호남 과장 황규석 팀장 배경춘 주무관
○ GIS DB 구축용역 시행 계획 ※ 도로과-4400호		‵24. 4. 9.		명호남 과장 전결 강행숙 회계과장 김진욱 계약1팀장 황규석 팀장 배경춘 주무관
○ 건설폐기물 처리용역 시행 계획 ※ 도로과-4408호		‵24. 4. 9.		염승열 건설교통국장 전결 강행숙 회계과장 김진욱 계약1팀장 명호남 과장 황규석 팀장 배경춘 주무관
○ 재해예방 기술지도용역 시행 계획 ※ 도로과-4406호		‵24. 4. 9.		명호남 과장 전결 강행숙 회계과장 김진욱 계약1팀장 황규석 팀장 배경춘 주무관
○ 편입토지 등에 대한 보상협의 요청(2차) ※ 도로과-5038호		‵24. 4. 25.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 장문희 실무원
○ 편입토지 등에 대한 보상협의 요청(2차) ※ 도로과-5728호		‵24. 5. 10.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 장문희 실무원
○ 지정폐기물 철거공사 시행 계획 ※ 도로과-6295호		‵24. 5. 23.		명호남 과장 전결 고영백 청사관리팀장 김진욱 계약1팀장 황규석 팀장 배경춘 주무관
○ 지정폐기물 처리용역 시행 계획 ※ 도로과-6292호		‵24. 5. 23.		명호남 과장 전결 고영백 청사관리팀장 김진욱 계약1팀장 황규석 팀장 배경춘 주무관
○ 공사 등 6건 일시정지 검토보고 ※ 도로과-494호		‵24. 7. 16.		명호남 과장 전결 강행숙 회계과장 정일권 계약1팀장 곽 원 팀장 백두산 주무관
○ 보상계획 공시송달 공고의뢰 ※ 도로과-1182호		‵24. 8. 2.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 대결 박시영 실무원
○ 도로구역(변경)결정 및 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 공고 ※ 도로과-3985호		‵24. 10. 21.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 대결 곽 원 팀장 백두산 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」사업인정에 관한 주민 등의 의견청취 결과보고 ※ 도로과-4682호		‵24. 11. 7.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 박시영 실무원 곽 원 팀장 백두산 주무관
○ 사업인정(의제)사업 경미한 변경에 따른 추가협의 요청(율촌중학교 앞 도로확장) ※ 도로과-4980호		‵24. 11. 18.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 박시영 실무원 곽 원 팀장 백두산 주무관
○ 도로구역 결정(변경) 및 지형도면 고시(율촌중학교 앞 도로확장) ※ 도로과-5790호		‵24. 12. 9.		정진희 팀장 대결 곽 원 팀장 백두산 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」편입토지 등에 대한 손실보상비 산정 및 집행 계획 ※ 도로과-6095호		‵24. 12. 16.		이동일 국장 전결 명호남 과장 강행숙 과장 정일권 팀장 곽 원 팀장 백두산 주무관
○ 보상계획 열람공고「율촌중학교 앞 도로확장공사」 ※ 도로과-247호		‵25. 1. 8.		박성식 과장 전결 정진희 팀장 박시영 실무원
○ 지적 분할측량 의뢰(율촌중학교 앞 도로확장공사) ※ 도로과-2287호		‵25. 3. 6.		박성식 과장 전결 곽 원 팀장 안준희 주무관
○ 지역현안 특별교부세 용도변경 검토보고(율촌중학교 앞 도로확장공사) ※ 도로과-2555호		‵25. 3. 10.		정기명 시장 결재 최정기 부시장 최연호 국장 신영자 과장 신숙이 팀장 박성식 과장 정진희 팀장 곽 원 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」편입 토지(지장물 등) 감정평가 수수료 집행 ※ 도로과-2438호		‵25. 3. 11.		박성식 과장 전결 정진희 팀장 박시영 실무원
○ 지적공부정리(토지이동 및 분할) 신청(율촌중학교 앞 도로확장공사) ※ 도로과-4536호		‵25. 4. 29.		박성식 과장 결재 곽 원 팀장 안준희 주무관
○ 2025년 제3회 지방토지수용위원회 재결신청서 수정 제출(율촌중학교 앞 도로확장공사) ※ 도로과-5985호		‵25. 6. 9.		최연호 국장 전결 박성식 과장 정진희 팀장 박시영 실무원
○ 도로구역 결정(정정) 및 지형도면 고시(율촌중학교 앞 도로확장) ※ 도로과-6121호		‵25. 6. 12.		박성식 과장 전결 곽 원 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」 수용재결 신청에 따른 감정평가 수수료 집행 ※ 도로과-7364호		‵25. 7. 9.		박성식 과장 전결 정진희 팀장 박시영 실무원
○ 2025년 제3회 전라남도지방토지수용위원회 토지수용재결에 따른 공탁금 위임 집행(율촌중학교앞도로) ※ 도로과-9747호		‵25. 9. 8.		박성식 과장 전결 김종필 과장 정일권 팀장 정진희 팀장 박시영 실무원
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」 설계변경 심의 요청 ※ 도로과-9757호		‵25. 9. 8.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」 현장 실정보고에 따른 설계변경 검토보고 ※ 도로과-10623호		‵25. 10. 1.		최연호 국장 전결 김종필 과장 정일권 팀장 박성식 과장 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」 일시정지 해지 및 변경계약 의뢰 ※ 도로과-10630호		‵25. 10. 1.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」토지수용재결에 따른 공탁 및 소유권 이전 수수료 집행 ※ 도로과-10681호		‵25. 10. 2.		박성식 과장 전결 김은희 팀장 박시영 실무원
○「율촌중학교 앞 도로확장공사 건설재해예방 기술지도용역」일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-49572호		‵25. 10. 13.		김종필 과장 전결 정일권 팀장 정의영 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사 GIS DB 구축용역」일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-49571호		‵25. 10. 13.		김종필 과장 전결 정일권 팀장 정의영 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」잔여지 손실보상비 집행(장O윤) ※ 도로과-10894호		‵25. 10. 15.		박성식 과장 전결 김종필 과장 정일권 팀장 김은희 팀장 박시영 실무원
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」잔여지 손실보상비 집행(장O훈) ※ 도로과-10895호		‵25. 10. 15.		박성식 과장 전결 김종필 과장 정일권 팀장 김은희 팀장 박시영 실무원
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」편입토지 등에 대한 소유권 이전 등기수수료 집행 ※ 도로과-10921호		‵25. 10. 15.		박성식 과장 전결 김은희 팀장 박시영 실무원
○「율촌중학교 앞 도로확장공사 건설폐기물처리용역」일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-50198호		‵25. 10. 16.		나병곤 국장 결재 김종필 과장 정일권 팀장 이정란 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-50403호		‵25. 10. 17.		나병곤 국장 결재 김종필 과장 정일권 팀장 이정란 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」하도급 변경계약 검토 요청 ※ 회계과-51786호		‵25. 10. 27.		김종필 과장 전결 정일권 팀장 이정란 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」 하도급 계약 및 직접시공계획서(변경) 검토보고 ※ 도로과-11565호		‵25. 10. 29.		박성식 과장 전결 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」직접시공계획 검토 요청 ※ 회계과-52802호		‵25. 10. 31.		김종필 과장 전결 정일권 팀장 이정란 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」 하도급 계약 및 직접시공계획서(변경) 검토 결과 제출 ※ 도로과-11595호		‵25. 11. 3.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」 하도급 현장대리인 변경 검토보고 ※ 도로과-11929호		‵25. 11. 11.		박성식 과장 전결 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」 하도급 현장대리인 변경 검토결과 알림 ※ 도로과-11929호		‵25. 11. 11.		박성식 과장 전결 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사 건축물 해체 인허가 용역」시행 ※ 도로과-11979호		‵25. 11. 11.		박성식 과장 전결 김종필 과장 정일권 팀장 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사 건축물 해체 인허가 용역」시행 ※ 도로과-11979호		‵25. 11. 11.		박성식 과장 전결 김종필 과장 정일권 팀장 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사 건축물 해체 인허가 용역」시행 ※ 도로과-11980호		‵25. 11. 11.		박성식 과장 전결 김종필 과장 정일권 팀장 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사 지정폐기물 철거공사」실정보고에 따른 설계변경 검토보고 ※ 도로과-12040호		‵25. 11. 13.		박성식 과장 전결 김종필 과장 정일권 팀장 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」 현장대리인(하도급-토공) 변경 검토 결과 회신 ※ 회계과-54798호		‵25. 11. 13.		김종필 과장 전결 정일권 팀장 이정란 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사 지정폐기물 철거공사」일시정지 해지 및 변경계약 의뢰 ※ 도로과-12055호		‵25. 11. 13.		박성식 과장 전결 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사 지정폐기물 처리용역」일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-55222호		‵25. 11. 14.		김종필 과장 전결 정일권 팀장 정의영 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사 지정폐기물 철거공사」일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-55221호		‵25. 11. 14.		김종필 과장 전결 정일권 팀장 정의영 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」 하도급 변경계약 및 직접시공계획 변경 검토 결과 알림(토공사) ※ 회계과-55343호		‵25. 11. 14.		김종필 과장 전결 정일권 팀장 이정란 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」 하도급 변경계약 및 직접시공계획 변경 검토 결과 알림(포장공사) ※ 회계과-55344호		‵25. 11. 14.		김종필 과장 전결 정일권 팀장 이정란 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사 건축물 해체 인허가 용역」계약체결 및 감독공무원 알림 ※ 회계과-56062호		‵25. 11. 19.		김종필 과장 전결 김기현 팀장 정의영 주무관
○ 율촌중학교 앞 도로확장공사 건축물 해체 인허가 용역에 대한 착수계 제출 ※ 도로과-12399호		‵25. 11. 24.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사 지정폐기물 처리용역」폐기물 처리계획(변경)서 제출 ※ 도로과-12410호		‵25. 11. 24.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」에 따른 건축물 해체 신고서 제출 ※ 도로과-12538호		‵25. 11. 27.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○ 지장물(보안등) 이설 협조 요청「율촌중학교 앞 도로확장」 ※ 도로과-12700호		‵25. 12. 2.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장」지장물(계량기) 철거 요청 ※ 도로과-12719호		‵25. 12. 2.		박성식 과장 전결 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장」준공계 제출 ※ 도로과-12773호		‵25. 12. 3.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사 지정폐기물 처리용역」준공검사공무원 지정 알림 ※ 회계과-58769호		‵25. 12. 3.		김종필 과장 전결 정일권 팀장 정의영 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사 지정폐기물 철거공사」준공계 제출 ※ 도로과-12817호		‵25. 12. 3.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사 지정폐기물 철거공사」준공검사공무원 지정 알림 ※ 회계과-59033호		‵25. 12. 4.		김종필 과장 전결 정일권 팀장 정의영 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사 지정폐기물 철거공사」준공검사조서 제출 ※ 도로과-13106호		‵25. 12. 10.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사 지정폐기물 처리용역」용역준공조서 제출 ※ 도로과-13107호		‵25. 12. 10.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」편입토지 등에 대한 손실보상비 산정 및 집행 계획 ※ 도로과-13239호		‵25. 12. 12.		김은희 팀장 전대결 김종필 과장 김기현 팀장 안준희 주무관 박시영 실무원
○ 납품계 제출 (율촌중학교 앞 도로확장공사)(보차도용콘크리트블록) ※ 도로과-13272호		‵25. 12. 15.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○ 납품계 제출「율촌중학교 앞 도로확장공사」(보도용난간) ※ 도로과-13453호		‵25. 12. 17.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장」배전선로 이설비 집행 ※ 도로과-13487호		‵25. 12. 18.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사 건축물 해체 인허가 용역」준공계 제출 ※ 도로과-13545호		‵25. 12. 19.		황규석 팀장 대결 서주용 팀장 안준희 주무관
○ 납품계 제출「율촌중학교 앞 도로확장공사」(PE다중벽관) ※ 도로과-13552호		‵25. 12. 19.		서주용 팀장 대결 안준희 주무관
○ 납품계 제출「율촌중학교 앞 도로확장공사」(환봉지지연결구) ※ 도로과-13551호		‵25. 12. 19.		서주용 팀장 대결 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사 건축물 해체 인허가 용역」준공검사공무원 지정 알림 ※ 회계과-63386호		‵25. 12. 19.		김종필 과장 전결 정일권 팀장 정의영 주무관
○ 납품계 제출「율촌중학교 앞 도로확장공사」(경계석) ※ 도로과-13733호		‵25. 12. 24.		김은희 팀장 대결 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사 건축물 해체 인허가 용역」준공검사조서 제출 ※ 도로과-13796호		‵25. 12. 29.		김은희 팀장 대결 서주용 팀장 안준희 주무관
○ 납품계 제출「율촌중학교 앞 도로확장공사」(이형수로관) ※ 도로과-13794호		‵25. 12. 29.		김은희 팀장 대결 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장」기성검사원(1회)제출 ※ 도로과-13793호		‵25. 12. 29.		김은희 팀장 대결 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」기성검사공무원 지정 알림 ※ 회계과-66023호		‵25. 12. 30.		김종필 팀장 전결 정일권 팀장 이정란 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장」기성검사조서(1회) 제출 ※ 도로과-13908호		‵25. 12. 30.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」기성대가 확정 알림 ※ 회계과-66485호		‵25. 12. 31.		박희우 과장 대결 김종필 팀장 정일권 팀장 이정란 주무관
○ 납품계 제출「율촌중학교 앞 도로확장공사」관급자재(조경석) ※ 도로과-13969호		‵25. 12. 31.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」편입 국유지에 대한 보상협의 요청 ※ 도로과-88호		‵26. 1. 5.		박성식 과장 전결 김은희 팀장 박시영 실무원
○「율촌중학교 앞 도로확장」외 3건 실정보고에 따른 공기연장 검토보고 ※ 도로과-546호		‵26. 1. 14.		임병종 과장 전대결 이수남 과장 김기현 팀장 박성식 과장 박상진 팀장 서준영 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장」외 3건 공사기간 연장 요청 ※ 도로과-606호		‵26. 1. 15.		박성식 과장 결재 박상진 팀장 서준영 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장 재해예방 기술지도용역」변경계약 체결 알림 ※ 회계과-2551호		‵26. 1. 16.		이수남 과장 전결 이정모 팀장 신은결 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장 GIS DB 구축용역」변경계약 체결 알림 ※ 회계과-2552호		‵26. 1. 16.		이수남 과장 전결 이정모 팀장 신은결 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」변경계약 체결 알림 ※ 회계과-2582호		‵26. 1. 19.		박형열 국장 결재 이수남 과장 이정모 팀장 김대건 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사 건설폐기물처리용역」변경계약 체결 알림 ※ 회계과-2698호		‵26. 1. 19.		이수남 과장 전결 이정모 팀장 김대건 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」건설폐기물 처리계획 변경 검토 요청 ※ 도로과-1225호		‵26. 1. 30.		박성식 과장 결재 박상진 팀장 서준영 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」실정보고에 따른 설계변경 검토보고 ※ 도로과-1691호		‵26. 2. 10.		김광호 국장 전결 이수남 과장 김기현 팀장 박성식 과장 박상진 팀장 서준영 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」설계변경 일상감사 및 계약심사 요청 ※ 도로과-1631호		‵26. 2. 10.		박성식 과장 결재 박상진 팀장 서준영 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」일상감사 및 계약심사 결과 회신 ※ 감사담당관-1858호		‵26. 2. 13.		김인보 과장 결재 한상근 팀장 김상곤 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」편입 국유지에 대한 손실보상비 집행 ※ 도로과-2016호		‵26. 2. 24.		박성식 과장 전결 이수남 과장 김기현 팀장 김은희 팀장 장명순 실무원
○「율촌중학교 앞 도로확장공사(설계변경)」 일상감사 조치결과 제출 ※ 도로과-2134호		‵26. 2. 26.		박성식 과장 결재 박상진 팀장 서준영 주무관
○「율촌중학교 앞 보안등 이설 공사」시행 계획 ※ 도로과-2210호		‵26. 3. 3.		박성식 과장 전결 이수남 과장 김기현 팀장 박상진 팀장 서준영 주무관
○「율촌중학교 앞 보안등 이설 공사」계약 의뢰 ※ 도로과-2298호		‵26. 3. 5.		김은희 팀장 대결 박상진 팀장 서준영 주무관
○「율촌중학교 앞 보안등 이설 공사」계약 체결 및 감독공무원 알림 ※ 회계과-9606호		‵26. 3. 6.		이수남 과장 전결 김기현 팀장 신은결 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장 공사」변경계약 의뢰 ※ 도로과-2442호		‵26. 3. 9.		박성식 과장 결재 박상진 팀장 서준영 주무관
○「율촌중학교 앞 보안등 이설 공사」착공계 제출 ※ 도로과-2298호		‵26. 3. 5.		박성식 과장 결재 박상진 팀장 서준영 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」변경계약 체결 알림 ※ 회계과-10570호		‵26. 3. 12.		박형열 국장 결재 이수남 과장 김기현 팀장 김대건 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」구간 지장물 이설 촉구 요청 ※ 도로과-2732호		‵26. 3. 16.		김은희 팀장 전대결 박상진 팀장 서준영 주무관
○ 율촌중학교 앞 도로확장공사 편입 국유지에 대한 소유권이전 등기수수료 집행 ※ 도로과-4140호		‵26. 3. 16.		박성식 과장 전결 김은희 팀장 장명순 실무원
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」 일시정지 검토보고 ※ 도로과-4186호		‵26. 4. 20.		김광호 국장 전결 이수남 과장 김기현 팀장 박성식 과장 박상진 팀장 서준영 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」 등 5건 일시정지 요청 ※ 도로과-4198호		‵26. 4. 20.		박성식 과장 결재 박상진 팀장 서준영 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사」 일시정지 알림 ※ 회계과-18750호		‵26. 4. 21.		박형열 국장 결재 이수남 과장 김기현 팀장 김대건 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사 건설폐기물처리용역」 일시정지 알림 ※ 회계과-18751호		‵26. 4. 21.		박형열 국장 결재 이수남 과장 김기현 팀장 김대건 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사 재해예방 기술지도 용역」 일시정지 알림 ※ 회계과-18740호		‵26. 4. 21.		이수남 과장 전결 김기현 팀장 신은결 주무관
○「율촌중학교 앞 도로확장공사 GIS DB 구축용역」일시정지 알림 ※ 회계과-18741호		‵26. 4. 21.		이수남 과장 전결 김기현 팀장 신은결 주무관
○「율촌중학교 앞 보안등 이설 공사」일시정지 알림 ※ 회계과-18742호		‵26. 4. 21.		이수남 과장 전결 김기현 팀장 신은결 주무관