정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서 (2024-5)

① 정책사업명	다목적 관공선 건조
② 추진배경	수산자원 보호와 어업질서 확립 및 일반 행정업무 수행의 효율성을 높이기 위한 환경 친화형 다목적 관공선 건조
③ 사업개요	○ 사업내용 : 다목적 관공선 1척 건조(총톤수 119톤급) ○ 주요제원 설계 계획(안) - 주요규격 : (전장) 37.49 × (폭) 6.5 × (깊이) 3.3 m - 선 질 : 강(하부) + 알루미늄(상부) - 엔 진 : 3,047마력 디젤엔진 2기 [배기가스저감장치(DPF) 장착] - 추 진 기 : 워터제트 2기
④ 사업부서	수산경영과		⑤ 담당자	해수7급 박석준 해수5급 박정환
⑥ 선정기준	10억 원 이상 사업		⑦ 사업기간	2022. ～ 2025.
<그간 주요 추진내용>
○ 다목적 관공선 건조계획 수립 ※ 수산경영과-13947호(’22.8.8.)		‘22. 8. 8.	정기명 시장 박현식 부시장 김병완 국장 이동일 과장 이 강 팀장 김태횡 과장 김인보 팀장 정임조 과장 박정환 과장 김상호 팀장 양진형 팀장 임지현 차장
○ 2022년도 제4차 여수시 공유재산심의회 자료제출 ※ 수산경영과-15769호(’22.9.7.)		‘22. 9. 7.	정임조 과장 양진형 팀장 임지현 차장
○ 지방재정계획심의위원회 심의안건 제출(투자심사) ※ 수산경영과-16270호(’22.9.17.)		‘22. 9. 17.	정임조 과장 양진형 팀장 임지현 차장

○ 2023년도 정기분 여수시 공유재산관리계획안 제출 ※ 수산경영과-18680호(’22.10.26.)	‘22 10. 26.	정임조 과장 양진형 팀장 임지현 차장
○ 다목적 관공선(어업지도선) 건조에 따른 기본 및 실시설계 용역 계약 의뢰 ※ 수산경영과-5086호(’23.4.3.)	‘23. 4. 3.	정덕영 과장 양진형 팀장 박경훈 주무관
○ 다목적 관공선(어업지도선) 대체 건조 사업 추진에 따른 주요장비 선정 외부 위원 모집 협조 ※ 수산경영과-7624호(’23.5.12.)	‘23. 5. 12.	정덕영 과장 양진형 팀장 박경훈 주무관
○ 다목적 관공선 건조 기본 및 실시설계용역 착수보고 결과 ※ 수산경영과-10210호(’23.6.23.)	‘23. 6. 23.	정재호 국장 정덕영 과장 양진형 팀장 박경훈 주무관
○ 다목적 관공선(어업지도선) 대체 건조 사업에 따른 장비선정위원회 위원 확정 ※ 수산경영과-11606호(’23.7.14.)	‘23. 7. 14.	정덕영 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 다목적 관공선 장비선정 결과 보고 ※ 수산경영과-12274호(’23.7.25.)	‘23. 7. 25.	정재호 국장 정덕영 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 다목적 관공선 건조 기본 및 실시설계 용역 중간보고회 결과 보고 ※ 수산경영과-16321호(’23.9.25.)	‘23. 9. 25.	정재호 국장 정덕영 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 다목적 관공선 건조 기본 및 실시설계 용역 최종보고회 결과 보고 ※ 수산경영과-18377호(’23.11.1.)	‘23. 11. 1.	신영자 과장(전대결) 정덕영 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 다목적 관공선 건조 일상감사 의뢰 ※ 수산경영과-2255호(’24.1.30.)	‘24. 1. 30.	정덕영 과장 박진용 팀장 박석준 주무관

○ 다목적 관공선 건조 전면 책임감리 용역 일상감사 의뢰 ※ 수산경영과-2257호(’24.1.30.)	‘24. 1. 30.	정덕영 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 2024년 제1차 계약심의위원회 심의(의결)요구서 제출 ※ 수산경영과-3214호(’24.2.14.)	‘24. 2. 14.	정덕영 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 다목적 관공선 건조 전면 책임감리 용역 계약심사 요청 ※ 수산경영과-3582호(’24.2.20.)	‘24. 2. 20.	정덕영 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 다목적 관공선 건조(물품) 총괄 및 1차분 계약 체결 의뢰(조달청) ※ 수산경영과-4432호(’24.3.5.)	‘24. 3. 5.	정덕영 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 다목적 관공선 건조 전면 책임감리 용역 계약 의뢰 ※ 수산경영과-5398호(’24.3.18.)	‘24. 3. 18.	김장환 팀장(대결) 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 「다목적 관공선 건조」 구매업무 협의사항 회신 ※ 수산경영과-6460호(’24.4.2.)	‘24. 4. 2.	정덕영 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 「다목적 관공선 건조 전면 책임감리 용역」 책임감리원 변경 검토 보고 ※ 수산경영과-3699호(’24.9.2.)	‘24. 9. 2.	박정환 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 「다목적 관공선 건조」 현장대리인 변경 요청 ※ 수산경영과-4252호(’24.9.10.)	‘24. 9. 10.	박정환 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 「(선박)다목적 관공선 건조(물품)[총괄 및 1차분]」 계약기간 연장 요청 ※ 수산경영과-9442호(’24.12.4.)	‘24. 12. 4.	박정환 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 『여수시 다목적 관공선 건조』 관련 주요 장비 비교 검토건에 대한 회신 ※ 수산경영과-10605호(’24.12.20.)	‘24. 12. 20.	박정환 과장 박진용 팀장 박석준 주무관

○ 「다목적 관공선 건조(물품)[총괄 및 1차분]」 변경계약 체결에 따른 변경 건조공정표 제출 ※ 수산경영과-50호(’25.1.2.)	‘25. 1. 2.	박정환 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 「다목적 관공선 건조 전면 책임감리 용역」 기술감리원 변경 요청에 대한 검토 결과 제출 ※ 수산경영과-2198호(’25.2.6.)	‘25. 2. 6.	박정환 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 『(선박)다목적 관공선 건조(물품)[총괄 및 1차분]』 건조비 내역 수정 알림 ※ 수산경영과-2987호(’25.2.18.)	‘25. 2. 18.	박정환 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 다목적 관공선(어업지도선) 건조 준공기한 준수 요청 ※ 수산경영과-4681호(’25.3.17.)	‘25. 3. 17.	박정환 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 『여수시 다목적 관공선 건조』 관련 추가 주요 장비 승인 및 업체 변경건에 대한 회신 ※ 수산경영과-6123호(’25.4.4.)	‘25. 4. 4.	박정환 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 「(선박)다목적 관공선 건조(물품)[총괄 및 1차분]」 계약기간 연장 요청(2차) ※ 수산경영과-6325호(’25.4.8.)	‘25. 4. 8.	박정환 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 다목적 관공선(어업지도선) 공정 지연 알림 및 준공기한 준수 요청 ※ 수산경영과-7524호(’25.4.24.)	‘25. 4. 24.	박정환 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 다목적 관공선 건조 조달청 계약수수료 지급 ※ 수산경영과-7904호(’25.4.30.)	‘25. 4. 30.	박정환 과장 김상호 팀장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 다목적 관공선 건조(물품) 총괄 및 2차분 계약 체결 의뢰(조달청) ※ 수산경영과-8207호(’25.5.7.)	‘25. 5. 7.	박정환 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 다목적 관공선(어업지도선) 공정 만회 대책 관련 알림 ※ 수산경영과-8456호(’25.5.12.)	‘25. 5. 12.	박정환 과장 박진용 팀장 박석준 주무관

○ 「(선박)다목적 관공선 건조(물품)[총괄 및 1차분]」 건조비 내역 변경 승인 요청 ※ 수산경영과-9556호(’25.5.28.)	‘25. 5. 28.	박정환 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 「(선박)다목적 관공선 건조(물품)[총괄 및 1차분]」 준공계 제출 ※ 수산경영과-9740호(’25.5.30.)	‘25. 5. 30.	김장환 팀장(대결) 박진용 팀장(공석-특별휴가) 오승환 주무관
○ (선박)다목적 관공선 건조(물품)[총괄 및 2차분] 착공계 제출 ※ 수산경영과-9795호(’25.6.2.)	‘25. 6. 2.	박진용 팀장(대결) 박석준 주무관
○ (선박)다목적 관공선 건조(물품)[총괄 및 1차분] 준공계 보완 서류 제출 ※ 수산경영과-10185호(’25.6.10.)	‘25. 6. 10.	박진용 팀장(대결) 박석준 주무관
○ (선박)다목적 관공선 건조(물품)[총괄 및 1차분] 준공검사 조서 제출 ※ 수산경영과-10506호(’25.6.13.)	‘25. 6. 13.	박정환 과장 박석준 주무관
○ 다목적 관공선(어업지도선) 공정 만회 대책 관련 알림 ※ 수산경영과-10529호(’25.6.16.)	‘25. 6. 16.	박정환 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 다목적 관공선 건조 조달청 계약수수료(2차분) 지급 ※ 수산경영과-11935호(’25.7.4.)	‘25. 7. 4.	박정환 과장 김상호 팀장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 다목적 관공선(어업지도선) 건조 준공기한 준수 요청 ※ 수산경영과-12637호(’25.7.15.)	‘25. 7. 15.	박정환 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 다목적 관공선 건조 사양 일부 변경 요청 ※ 수산경영과-12639호(’25.7.15.)	‘25. 7. 15.	박정환 과장 박진용 팀장(공석-출장) 박석준 주무관
○ 다목적 관공선(어업지도선) 건조 준공기한 준수 요청 ※ 수산경영과-14891호(’25.8.20.)	‘25. 8. 20.	박정환 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 다목적 관공선 건조 사양 일부 변경 요청(2차) ※ 수산경영과-14893호(’25.8.20.)	‘25. 8. 20.	박정환 과장 박진용 팀장 박석준 주무관
○ 다목적 관공선(어업지도선) 건조 준공기한 준수 요청(7차) ※ 수산경영과-15866호(’25.9.4.)	‘25. 9. 4.	박정환 과장 박진용 팀장 박석준 주무관