정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	만흥~오천 도로 확포장
② 추진배경	만흥~오천간 연계도로 구축하여 지역 간 접근성 개선 및 물류비용 절감
③ 사업개요	○ 위 치 : 만흥동 51-9번지 일원 ○ 사 업 량 : L=780m, H=21m ○ 사 업 비 : 16,600백만원(설계 1,407 공사 9,393, 기타 5,800)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자	시설5급 박성식 시설6급 차용석 시설7급 정동섭
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간	2019. 2. ~ 2027. 1.
<그간 주요 추진내용>
○「만흥~오천간 도로 확포장공사」 사업계획 검토에 따른 추진방안 보고 ※ 도로과-8165호(’19.2.17.)		‘19. 2. 17.	권오봉 시장 고재영 부시장 김기채 건설교통국장 서유권 도로과장 이영호 도로계획팀장
○「만흥~오천간 도로 확포장공사」 추진계획(안) ※ 도로과-6091호(’19.5.16.)		‘19. 5. 16.	고재영 부시장 김기채 건설교통국장 서유권 도로과장 이영호 도로계획팀장 박성 주무관
○「만흥~오천간 도로 확포장공사 실시설계(보완) 용역」시행 계획(변경) ※ 도로과-6714호(’19.5.29.)		‘19. 5. 29.	서유권 도로과장 이영호 도로계획팀장 박성 주무관
○「만흥~오천간 도로 확포장공사 실시설계(보완) 용역」계약 체결 및 감독공무원 지정 통보 ※ 회계과-30385호(’19.6.18.)		’19. 6. 18.	박성 주무관
○ 지적 분할측량 의뢰 (만흥~오천 도로 확포장 공사) ※ 도로과-12174호(’19.10.1.)		’19.10. 1.	박성 주무관

○만흥~오천간 도로 확포장공사 추진 검토보고 ※ 도로과-12620호(’19.10.13.)	’19. 10. 13.	권오봉 시장 고재영 부시장 김기채 건설교통국장 서유권 도로과장 이영호 도로계획팀장
○ 도시계획시설(도로) 실시계획(변경)인가 신청(만흥~오천 도로 확포장공사) ※ 도로과-800호(’20.1.20.)	’20. 1. 20.	서유권 도로과장 이영호 도로계획팀장 임영수 주무관
○「만흥~오천 도로확포장 공사」등 3건 일상감사 의뢰 ※ 도로과-7654호(’20.6.10.)	’20. 6. 10.	서유권 도로과장 이영호 도로계획팀장 임영수 주무관
○ 만흥~오천간 도로확포장공사 편입토지(물건 등) 손실보상비 산정 및 집행계획 ※ 도로과-8330호(’20.6.23.)	’20. 6. 23.	권오봉 시장 서은수 부시장 장세길 건설교통국장 서유권 도로과장 이덕연 도로행정팀장 배경 실무원
○ 여수 도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경)인가 알림(만흥~오천간 도로확포장 공사) ※ 도시계획과-30301호(’\20.12.30.)	’20. 12. 30.	임영수 주무관
○ 만흥~오천 도로 확·포장공사 등록사항 정정 필지 처리방안 검토 보고 ※ 도로과-6281호(’21.5.26.)	’21. 5. 26.	임광건 건설교통국장 강균 도로과장 김정남 도로계획팀장 김평순 주무관
○「만흥~오천 도로 확포장」재해영향평가 시행계획 ※ 도로과-3509호(’22.3.28.)	’22. 3. 28.	문인기 건설교통국장 오정환 도로과장 명호남 도로계획팀장 김평순 주무관
○「만흥~오천 도로 확포장 공사 재해영향평가 용역」계약 체결의뢰 ※ 도로과-13479호(’22.4.5.)	’22. 4. 5.	오정환 도로과장 명호남 도로계획팀장 김평순 주무관
○「만흥~오천 도로 확포장」소규모 환경영향평가 시행계획 ※ 도로과-4278호(’22.4.14.)	’22. 4. 14.	문인기 건설교통국장 오정환 도로과장 명호남 도로계획팀장 김평순 주무관

○「만흥~오천 도로 확포장」설계안정성 검토 용역 시행계획 ※ 도로과-7649(’22.7.7.)	’22. 7. 7.	오정환 도로과장 명호남 도로계획팀장 김평순 주무관
○ 「만흥~오천 도로 확포장공사」실시설계(보완) 용역 추진계획 ※ 도로과-1076(’23.1.30.)	’23. 1. 30.	오정환 도로과장 배도선 도로계획팀장 박성원 주무관
○「만흥~오천 도로 확포장공사」설계 경제성 검토 등 시행 계획 보고 ※ 도로과-1232호(’23.2.3.)	’23. 2. 3.	이경종 건설교통국장 오정환 도로과장 배도선 도로계획팀장 박성원 주무관
○「만흥~오천 도로 확포장공사 실시설계(보완) 용역」계약 의뢰 ※ 도로과-1565호(’23.2.14.)	’23. 2. 14.	오정환 도로과장 배도선 도로계획팀장 박성원 주무관
○「만흥~오천 도로 확포장공사」세출예산 변경사용 검토보고 ※ 도로과-9361호(’23.8.21.)	’23. 8. 21.	이경종 건설교통국장 심근하 도로과장 윤대근 도로계획팀장 김현철 주무관
○ 만흥~오천 도로 확포장공사 등 2개지구 통합건설사업관리 용역 시행계획 보고 ※ 도로과-10442호(’23.9.15.)	’23. 9. 15.	정기명 시장 김종기 부시장 이경종 건설교통국장 심근하 도로과장 윤대근 도로계획팀장 박성원 주무관
○「만흥~오천 도로 확포장공사 등 2개지구 통합건설사업관리 용역」사업수행능력평가 관련 소위원회 구성 및 운영계획 ※ 도로과-10791호(’23.9.25.)	’23. 9. 25.	이경종 건설교통국장 심근하 도로과장 윤대근 도로계획팀장 박성원 주무관
○「만흥~오천 도로 확포장공사 」기술자문위원회 의견에 따른 사면보강 공법 검토보고 ※ 도로과-11314호(’23.10.13.)	’23. 10. 13.	이경종 건설교통국장 심근하 도로과장 윤대근 도로계획팀장 박성원 주무관
○「만흥~오천 도로 확포장공사 」신기술·특허공법 선정을 위한 예비위원 선정 및 공법선정위원회 개최 계획 ※ 도로과-12006호(’23.10.31.)	’23. 10. 31.	이경종 건설교통국장 심근하 도로과장 윤대근 도로계획팀장 박성원 주무관

○소규모 환경영향평가 이행 관련 협의(만흥~오천 도로 확포장 공사) ※ 도로과-12067호(’23.10.31.)	’23. 10. 31.	이경종 건설교통국장 심근하 도로과장 윤대근 도로계획팀장 박성원 주무관
○「만흥~오천 도로확포장공사」사면 보강 옹벽 공법 선정을 위한 정량적평가(1차) 결과 보고 ※ 도로과-12365호(’23.11.6.)	’23. 11. 6.	이경종 건설교통국장 심근하 도로과장 윤대근 도로계획팀장 박성원 주무관
○「만흥~오천 도로확포장공사 등 2개지구 통합건설사업관리용역」사업수행능력평가 결과 보고 ※ 도로과-12546호(’23.11.9.)	’23. 11. 9.	이경종 건설교통국장 심근하 도로과장 윤대근 도로계획팀장 박성원 주무관
○「만흥~오천 도로확포장공사」사면 보강 패널식 옹벽 공법 선정 평가 결과 보고 ※ 도로과-12873호(’23.11.15.)	’23. 11. 15.	이경종 건설교통국장 심근하 도로과장 윤대근 도로계획팀장 박성원 주무관
○「만흥~오천 도로확포장공사」사업 시행계획 보고 (총괄 및 1차분) ※ 도로과-13902호(’23.12.7.)	’23. 12. 7.	정기명 시장 김종기 부시장 이경종 건설교통국장 김정아 도로행정팀장 대결 윤대근 도로계획팀장 박성원 주무관
○「만흥~오천 도로확포장공사(총괄 및 1차분)」계약 의뢰 ※ 도로과-14052호(’23.12.12.)	’23. 12. 12.	김정아 도로행정팀장 대결 윤대근 도로계획팀장 박성원 주무관
○ 여수 도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경)인가 알림(만흥~오천간 도로확포장공사) ※ 도시계획과-30623호(’23.12.21.)	’23. 12. 21.	박성원 주무관
○ 만흥~오천 도로확포장공사 건설폐기물 처리용역 시행계획 ※ 도로과-1490호(’24.2.5.)	’24. 2. 5.	정기명 시장 김종기 부시장 염승열 건설교통국장 명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 김현식 주무관
○「만흥~오천 도로확포장공사 건설폐기물 처리용역」계약 체결 의뢰 ※ 도로과-1515호(’24.2.6.)	’24. 2. 6.	명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 김현식 주무관

○「만흥~오천 도로확포장공사」임목폐기물 처리용역 시행계획 ※ 도로과-2149호(’24.2.21.)	’24. 2. 21.	염승열 건설교통국장 명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 김현식 주무관
○ 만흥~오천 도로확포장 공사 설계변경(실정보고) 검토 보고 ※ 도로과-3875호(’24.3.26.)	’24. 3. 26.	정기명 시장 김종기 부시장 염승열 건설교통국장 명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 김현식 주무관
○ 지역현안 특별교부세 용도변경 검토보고(만흥~오천 도로확포장공사) ※ 도로과-4946호(’24.4.21.)	’24. 4. 21.	정기명 시장 김종기 부시장 염승열 건설교통국장 명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 김현식 주무관
○ 만흥~오천 도로확포장공사 등 2개지구 통합건설사업관리용역(1차/ES)물가변동으로 인한 조정 신청액 검토결과 ※ 도로과-5846호(’24.5.14.)	’24. 5. 14.	김종기 부시장 염승열 건설교통국장 명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 김현식 주무관
○「만흥~오천 도로확포장공사 등 2개지구 통합건설사업관리용역(총괄분 1회, 1차분 1회)」변경 시행 ※ 도로과-6829호(’24.6.5.)	’24. 5. 14.	김종기 부시장 염승열 건설교통국장 명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 김현식 주무관
○「만흥~오천 도로확포장공사 등 2개지구 통합건설사업관리용역」 2차분 시행계획 보고 ※ 도로과-7261호(’24.6.17.)	’24. 6. 17.	정기명 시장 김종기 부시장 염승열 건설교통국장 명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 김현식 주무관
○「만흥~오천 도로확포장공사」 주민건의사항 추진계획 보고 ※ 도로과-569호(’24.7.18.)	’24. 7. 18.	이동일 건설교통국장 명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장공사 등 2개지구 통합건설사업관리용역(1차분)」준공검사조서 제출 ※ 도로과-573호(’24.7.18.)	’24. 7. 18.	명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「소규모 환경영향평가 이행 관련 협의(만흥~오천 도로 확포장 공사) ※ 도로과-1582호(’24.8.14.)	’24. 8. 14.	명호남 도로과장 정진희 도로행정팀장 대결 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관

○「만흥~오천 도로확포장공사」호우 대비 토사유출 피해예방 계획 수립 및 점검 철저 ※ 도로과-2215호(’24.8.30.)	’24. 8. 30.	명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장공사」안전대책 점검 및 운반로 토사 제거 등 현장관리 철저 ※ 도로과-2584호(’24.9.9.)	’24. 9. 9.	명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사 등 2개지구 통합건설사업관리용역』 건설사업관리단 현장 이탈 승인 통보 ※ 도로과-2891호(’24.9.20.)	’24. 9. 20.	명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사』 시공전 확인측량 결과 반영 ※ 도로과-3176호(’24.9.27.)	’24. 9. 27.	명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장공사」어촌계 면담 결과 및 호우 시 피해예방 조치계획서 제출 요청 ※ 도로과-3280호(’24.9.30.)	’24. 9. 30.	명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장 공사」 실정보고 내용 검토결과 보고 ※ 도로과-4338호(’24.10.29.)	’24. 10. 29.	최정기 부시장 이동일 건설교통국장 명호남 도로과장 강행숙 회계과장 협조 정일권 계약1팀장 협조 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장 공사」실정보고 승인 통보 ※ 도로과-4377호(’24.10.30.)	’24. 10. 30.	명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관 협조 배승호 주무관
○「만흥~오천 도로확포장 공사」설계변경(총괄 및 1차분 2회)계약의뢰 ※ 도로과-4815호(’24.11.12.)	’24. 11. 12.	명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장 공사」메타세콰이어 이식 검토 및 처리계획 ※ 도로과-5189호(’24.11.22.)	’24. 11. 22.	정기명 시장 최정기 부시장 이동일 교통도로국장 명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관

○「만흥~오천 도로확포장 공사」실정보고 승인 통보(메타세콰이어 이식 및 제거 ※ 도로과-5600호(’24.12.3.)	’24. 12. 3.	명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장공사」실정보고 접수에 따른 설계변경 및 공기연장 검토보고 ※ 도로과-6179호(’24.12.17.)	’24. 12. 17.	이동일 교통도로국장 강행숙 회계과장 협조 정일원 계약1팀장 협조 명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사 등 2개지구 통합건설사업관리용역』 건설사업관리단 현장 이탈 승인 통보 ※ 도로과-6147호(’24.12.17.)	’24. 12. 17.	명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사』 실정보고 승인 통보 ※ 도로과-6186호(’24.12.18.)	’24. 12. 18.	명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장공사」설계변경(1차분 3회 및 공기연장)계약의뢰 ※ 도로과-6187호(’24.12.18.)	’24. 12. 18.	명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장 공사」 지장물(한전주) 이설 요청 ※ 도로과-318호(’25.1.9.)	’25. 1. 9.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장 공사」만흥어촌계 민원접수에 따른 조치계획 제출 요청 ※ 도로과-495호(’25.1.14.)	’25. 1. 14.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장 공사 임목폐기물처리용역」 실정보고 접수에 따른 설계변경 검토보고 ※ 도로과-780호(’25.1.21.)	’25. 1. 21.	최연호 교통도로국장 김종필 회계과장 협조 정일권 계약1팀장 협조 박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장 공사 임목폐기물 처리용역」변경계약의뢰 ※ 도로과-819호(’25.1.22.)	’25. 1. 22.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관

○「만흥~오천 도로확포장 공사」시행계획 보고(2차분) ※ 도로과-920호(’25.1.24.)	’25. 1. 24.	정기명 시장 최정기 부시장 김종필 회계과장 협조 정일권 계약1팀장 협조 최연호 교통도로국장 박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장공사(2차분)」계약체결 의뢰 ※ 도로과-989호(’25.1.31.)	’25. 1. 31.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사 등 2개지구 통합건설사업관리용역』 분야별 건설사업관리기술인 변경 검토보고 ※ 도로과-1088호(’25.2.4.)	’25. 2. 4.	명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사 등 2개지구 통합건설사업관리용역』 건설사업기술인 변경 검토결과 회신 ※ 도로과-1131호(’25.2.5.)	’25. 2. 5.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장공사(2차분)」착공계 제출 ※ 도로과-1250호(’25.2.7.)	’25. 2. 7.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장 공사」 구간 지장물(한전구)이설공사비 청구에 대한 회신 ※ 도로과-1407호(’25.2.11.)	’25. 2. 11.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사 등 2개지구 통합건설사업관리용역』 건설사업관리단 현장 이탈 승인 통보 ※ 도로과-1471호(’25.2.13.)	’25. 2. 13.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장공사」 품질시험계획서(2차분) 승인 ※ 도로과-495호(’2025.02.14.)	’25. 2. 14.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관

○「만흥~오천 도로 확포장공사」구간 지장물(한전주) 이설 공사비 청구에 대한 회신 ※ 도로과-1787호(’25.2.20.)	’25. 2. 20.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○만흥~오천 도로확포장공사 지장물(한전주) 이설 공사비 집행 ※ 도로과-1827호(’25.2.21.)	’25. 2. 21.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사』 안전점검 수행기관 선정계획 검토 보고 ※ 도로과-1950호(’25.2.25.)	’25. 2. 25.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○ 만흥~오천 도로확포장공사 안전점검 수행기관 지정 모집공고 ※ 도로과-1985호(’25.2.26.)	’25. 2. 26.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장공사 관급자재(판넬 및 앵커) 구입」구매업무 협의안 자료 제출 ※ 도로과-2124호(’25.3.4.)	’25. 3. 4.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사』 안전점검 수행기관 세부평가 검토보고 ※ 도로과-2258호(’25.3.6.)	’25. 3. 6.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사』 안전점검 수행기관 지정을 위한 사실확인 서류 제출 요청 ※ 도로과-2274호(’25.3.6.)	’25. 3. 6.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사 등 2개지구 통합건설사업관리용역』 건설사업관리단 현장 이탈 승인 통보 ※ 도로과-2275호(’2025.03.6.)	’25. 3. 6.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사』 안전점검 수행기관 지정 ※ 도로과-2461호(’2025.03.11.)	’25. 3. 11.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관

○ 만흥~오천 도로확포장공사 가로등 이설공사 계약의뢰 ※ 도로과-2486호(’25.3.12.)	’25. 3. 12.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○[만흥-오천 도로확포장공사] 2025년 02월 노무비 청구서 제출 ※ 도로과-2492호(’25.3.12.)	’25. 3. 12.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사』 안전점검 수행기관 지정 알림 ※ 도로과-2485호(’25.3.12.)	’25. 3. 12.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○ 만흥~오천 도로확포장공사 안전점검 수행기관 지정 모집공고 ※ 도로과-1985호(’25.2.26.)	’25. 2. 26.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사(1차분)』관급자재 계약 체결 알림 ※ 도로과-2534호(’25.3.12.)	’25. 3. 12.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사(1차분)』관급자재(특허 판넬 및 앵커) 반려알림 및 설계변경 반영 ※ 도로과-2629호(’25.3.12.)	’25. 3. 12.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○ 만흥~오천 도로확포장공사(1차분) 관급자재(이탈방지압륜) 추가 구매요청 ※ 도로과-2813호(’25.3.18.)	’25. 3. 18.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○만흥-오천 도로확포장공사 가로등 이설공사 착공계 제출 ※ 도로과-2856호(’2025.03.19.)	’25. 3. 19.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로 확포장공사」 하도급계약 적정성 검토 보고 ※ 도로과-2877호(’2025.03.19.)	’25. 3. 19.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장고사」하도급 계약사항 검토결과 알림 ※ 도로과-2884호(’2025.03.20.)	’25. 3. 20.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로 확포장공사」 하도급관리계획서(변경) 승인요청에 따른 검토 보고 ※ 도로과-2890호(’2025.03.20)	’25. 3. 20.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관

○ 「만흥~오천 도로확포장공사」 하도급 관리계획서 변경 승인 통보 ※ 도로과-2919호(’2025.03.21)	’25. 3. 21.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○만흥-오천 도로확포장 가로등 이설공사 준공계 제출 ※ 도로과-3233호(’25.3.28.)	’25. 3. 28.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사』 실정보고 접수에 따른 설계변경 검토보고 ※ 도로과-3470호(’25.4.4.)	’25. 4. 4.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○ 「만흥~오천 도로확포장공사 가로등 이설공사」 준공검사조서 제출 ※ 도로과-3484호(’25.4.4.)	’25. 4. 4.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로 확포장공사」구간 지장물(한전주) 이설 공사비 청구에 대한 회신 ※ 도로과-3594호(’25.4.7.)	’25. 4. 7.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○만흥~오천 도로확포장공사 물가변동에 따른 계약금액 조정(1회) 검토 용역 시행 ※ 도로과-3811호(’25.4.10.)	’25. 4. 10.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○ 「만흥~오천 도로 확포장공사」구간 지장물(한전주) 이설대상(변경) 협조 요청 ※ 도로과-3962호(’25.4.15.)	’25. 4. 15.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○만흥~오천 도로확포장공사 GIS DB 구축용역 시행 ※ 도로과-4069호(’25.4.17.)	’25. 4. 17.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장 공사(2차분)」추경예산 확보에 따른 설계변경 검토 ※ 도로과-4064호(’25.4.17.)	’25. 4. 17.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
만흥~오천 도로확포장공사(1차분) 관급자재 납품계 제출(혼합골재) ※ 도로과-4109호(’25.4.17.)	’25. 4. 17.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관

○ 「만흥~오천 도로확포장공사 GIS DB구축용역」계약심사 요청 ※ 도로과-4110호(’25.4.17)	’25. 4. 17.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○만흥-오천 도로확포장공사(1차분) 준공검사 조서 및 결과보고 제출 ※ 도로과-4338호(’25.4.22.)	’25. 4. 22.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사 등 2개지구 통합건설사업관리용역』 건설사업관리단 현장 이탈 승인 통보 ※ 도로과-4336호(’25.4.24.)	’25. 4. 24.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○ 만흥~오천 도로확포장공사 GIS DB 구축용역 계약의뢰 ※ 도로과-4440호(’25.4.28.)	’25. 4. 28.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장공사(1회ES)」 물가변동으로 인한 조정 신청액 검토결과 ※ 도로과-4643호(’25.4.28.)	’25. 4. 28.	최정기 부시장 최연호 교통도로국장 김종필 회계과장 협조 정일권 계약1팀장 협조 박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사』물가변동에 따른 금액조정 보고(1회) 검토 결과 통보 ※ 도로과-4732호(’25.5.4.)	’25. 5. 4.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사 등 2개지구 통합건설사업관리용역』 건설사업관리단 현장 이탈 승인 통보 ※ 도로과-4770호(’25.5.7.)	’25. 5. 7.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장 공사」직소민원 접수에 따른 검토 요청 ※ 도로과-4803호(’25.5.8.)	’25. 5. 8.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장공사」설계변경 계약심사 요청 ※ 도로과-4926호(’25.5.8.)	’25. 5. 8.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관

○「만흥~오천 도로 확포장공사」설계변경 심의 요청 ※ 도로과-4927호(’25.5.8)	’25. 5. 8.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○[만흥-오천 도로확포장공사(2차분)] 2025년 04월 노무비 청구서 제출 ※ 도로과-4928호(’25.5.12.)	’25. 5. 12.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장 공사」직소민원 접수에 따른 검토 요청(묘지 피해 관련) ※ 도로과-4956호(’25.5.12.)	’25. 5. 12.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○ 「만흥~오천 등 2개지구 통합건설사업관리용역」책임건설사업관리기술인 변경 검토보고 ※ 도로과-4970호(’25.5.12.)	’25. 5. 12.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사 건설사업관리용역』책임건설사업관리기술인 변경투입 검토 결과 통보 ※ 도로과-5111호(’25.5.15.)	’25. 5. 15.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사 건설사업관리용역』 직소민원 검토 결과 보고 ※ 도로과-5178호(’25.5.18.)	’25. 5. 18.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장공사」설계변경 일상감사 요청 ※ 도로과-5188호(’25.5.19.)	’25. 5. 19.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○[만흥-오천 도로확포장공사 GIS DB 구축 용역] 착수계 제출 ※ 도로과-5223호(’25.5.19.)	’25. 5. 19.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○만흥~오천 도로확포장공사 실정보고 및 검토결과 접수에 따른 설계변경 보고 ※ 도로과-5659호(’25.5.29.)	’25. 5. 29.	정기명 시장 최정기 부시장 회계과장 한태광 협조 대결 계약1팀장 정일권 협조 최연호 교통도로국장 박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관

○『만흥~오천 도로확포장공사』 변경(총괄 4회 및 2차분 1회)계약 의뢰 ※ 도로과-5675호(’25.5.30.)	’25. 5. 30.	황규석 도시도로팀장 대결 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장 공사」시내버스(7번) 메리엘 펜션 앞 우회도로 진입여부 검토 요청 ※ 도로과-5751호(’25.6.2.)	’25. 6. 2.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○만흥~오천도로확포장공사 세출예산 변경사용 검토 보고 ※ 도로과-5902호(’25.6.8.)	’25. 6. 8.	최연호 교통도로국장 신영자 기획예산과장 협조 신숙이 예산팀장 협조 박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○만흥~오천 도로확포장공사 세출예산 변경사용 승인 요청 ※ 도로과-5963호(’25.6.9.)	’25. 6. 9.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장공사」 암 발파(시험발파) 관련 관계기관 협의 ※ 도로과-6363호(’25.6.17.)	’25. 6. 17.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○안전관리계획서(변경) 검토 의뢰(만흥~오천 도로확포장 공사) ※ 도로과-6453호(’25.6.18.)	’25. 6. 18.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장 공사」직소민원 접수에 따른 검토 요청(우수 피해 방지요청) ※ 도로과-6600호(’25.6.22.)	’25. 6. 22.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○안전관리계획서 검토의견 회신(만흥~오천 도로확포장공사) ※ 도로과-6692호(’25.6.24.)	’25. 6. 24.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사』암 발파(시험발파) 관계기관 협의결과 알림 ※ 도로과-6751호(’25.6.25.)	’25. 6. 25.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관

○만흥~오천 도로확포장공사 하도급계약(변경) 적정성 검토보고 ※ 도로과-9870호(’25.6.27.)	’25. 6. 27.	정진희 도로행정팀장 대결 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장고사」하도급 계약(변경) 검토결과 알림 ※ 도로과-6875호(’25.6.27.)	’25. 6. 27.	정진희 도로행정팀장 대결 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로 확포장공사」 하도급관리계획서(변경) 승인요청에 따른 검토 보고 ※ 도로과-7101호(’25.7.3.)	’25. 7. 3.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장공사」 하도급 관리계획서 변경 승인 통보 ※ 도로과-7163호(’25.7.4.)	’25. 7. 4.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「 만흥~오천간 도로확포장공사」편입 지장물에 대한 감정평가 의뢰 ※ 도로과-7230호(’25.7.7.)	’25. 7. 7.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 민원기 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사』 품질시험계획서(총괄2회 및 2차분 1회) 검토결과에 대한 회신 ※ 도로과-7563호(’25.7.14.)	’25. 7. 14.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천간 도로확포장공사」 편입 지장물에 대한 보상협의 요청 ※ 도로과-7727호(’25.7.17.)	’25. 7. 17.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 민원기 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사』 품질시험계획서 변경(총괄2회 및 2차분 2회) 검토결과에 대한 회신 ※ 도로과-8215호(’25.7.29.)	’25. 7. 29.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사』실정보고 접수에 따른 검토보고 ※ 도로과-9282호(’25.8.26.)	’25. 8. 26.	최연호 교통도로국장 엄정직 재산관리팀장 협조 대결 정일권 계약1팀장 협조 박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관

○「만흥~오천 도로 확포장공사」설계변경 심의 요청 ※ 도로과-9867호(’25.9.10.)	’25. 9. 10.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○만흥-오천 도로확포장공사 등 2개지구 통합건설사업관리용역 기성검사원(2차분 제1회) 제출 ※ 도로과-10009호(’25.9.15.)	’25. 9. 15.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로확포장공사 등 2개지구 통합건설사업관리용역(2차분)」 기성검사조서(1회) 제출 ※ 도로과-10051호(’25.9.16.)	’25. 9. 16.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사』 변경 계약(총괄 5회 및 2차분 2회) 의뢰 ※ 도로과-10059호(’25.9.16.)	’25. 9. 16.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○「만흥~오천 도로 확포장공사」 하도급관리계획서(변경) 승인요청에 따른 검토 보고 ※ 도로과-10386호(’25.9.24.)	’25. 9. 24.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관
○『만흥~오천 도로확포장공사』실정보고 접수에 따른 검토보고 ※ 도로과-10950호(’25.10.16.)	’25. 10. 16.	최연호 교통도로국장 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 정동섭 주무관