정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	돌산읍 진두마을 도로개설
② 추진배경	도시기반시설 확충으로 주민생활 환경개선 및 국제해양관광 휴양도시건설
③ 사업개요	○ 위 치 : 돌산읍 우두리 799-21번지 일원 ○ 사 업 량 : L=478m, B=6m ○ 사 업 비 : 3,552백만원(설계 및 공사 2,059 보상 등 1,493)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설8급 박지윤 시설5급 박성식
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‵19. 8. ~ ‵26. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 착수계(실시설계용역) ※ 도로과-11221호		‵19. 9. 6.		임영수 주무관
○ 도로계획(노선선정 등) 검토보고 ※ 도로과-15731호		‵19. 12. 19.		임영수 주무관
○ 주민설명회 개최 알림 ※ 도로과-15761호		‵19. 12. 20.		임영수 주무관
○ 실시설계용역 일시정지 의뢰 ※ 도로과-932호		‵20. 1. 22.		서유권 과장 결재 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 도시계획시설(도로) 결정(변경)신청 ※ 도로과-2095호		‵20. 2. 18.		서유권 과장 결재 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 공고 알림 ※ 도로과-4272호		‵20. 3. 27.		서유권 과장 전결 이덕연 팀장 임영수 주무관 장문희 실무원
○ 실시계획인가 신청 전 사전 협의 협조 ※ 도로과-4393호		‵20. 3. 31.		서유권 과장 결재 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 도시계획시설(도로) 실시계획인가 신청 ※ 도로과-5134호		‵20. 4. 14.		서유권 과장 결재 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 사업인정 의견청취 처리검토 ※ 도로과-5515호		‵20. 4. 22.		서유권 과장 전결 이영호 팀장 장문희 실무원 임영수 주무관
○ 도시계획시설(도로) 사업인정에 관한 의견청취 결과 제출 ※ 도로과-5567호		‵20. 4. 23.		서유권 과장 전결 이재태 팀장 대결 송문종 차장 임영수 주무관 장문희 실무원
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경)인가 알림 ※ 도시계획과-14023호		‵20. 6. 16.		김문환 도시계획과장 전결 서범규 도시계획팀장 김용환 주무관
○ 관급자재선정 심의위원회 의뢰 ※ 도로과-8260호		‵20. 6. 22.		서유권 과장 전결 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 편입토지(지장물) 등에 대한 실태조사 계획 알림 ※ 도로과-11673호		‵20. 9. 4.		강균 과장 전결 김희신 팀장 임영수 주무관 장문희 실무원
○ 보상계획 열람공고 ※ 도로과-12206호		‵20. 9. 17.		강균 과장 결재 김희신 팀장 임영수 주무관 장문희 실무원
○ 보상계획 열람공고 알림 ※ 도로과-12205호		‵20. 9. 17.		강균 과장 전결 김희신 팀장 임영수 주무관 장문희 실무원
○ 감정평가 계획 알림 ※ 도로과-12810호		‵20. 10. 5.		강균 과장 전결 김희신 팀장 장문희 실무원
○ 편입토지 등에 대한 보상협의 요청(1차) ※ 도로과-14347호		‵20. 11. 10.		강균 과장 전결 김희신 팀장 이영호 팀장 임영수 주무관 장문희 실무원
○ 국유재산 무상귀속 협의 ※ 도로과-4150호		‵21. 4. 6.		강균 과장 결재 김정남 팀장 황보호 주무관
○ 무상귀속 사전협의에 대한 동의 여부 회신 ※ 전라남도 지역계획과-6697호		‵21. 4. 19.		황보호 주무관
○ 편입토지에 대한 보상협의 요청(2차) ※ 도로과-5181호		‵21. 4. 29.		강균 과장 전결 김희신 팀장 김정남 팀장 황보호 주무관 장문희 실무원
○ 편입토지에 대한 보상협의 요청(3차) ※ 도로과-5942호		‵21. 5. 14.		강균 과장 전결 김희신 팀장 김정남 팀장 황보호 주무관 장문희 실무원
○ 도시관리계획(도로)결정(변경) 및 실시계획(변경)인가 신청 ※ 도로과-6864호		‵21. 6. 8.		강균 과장 결재 김정남 팀장 황보호 주무관
○ 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 공고 ※ 도로과-7241호		‵21. 6. 16.		강균 과장 전결 김희신 팀장 황보호 주무관 장문희 실무원
○ 지방토지수용위원회 수용재결 신청 ※ 도로과-10143호		‵21. 8. 23.		임광건 건설교통국장 전결 강균 과장 김정아 팀장 장문희 실무원
○ 토지수용 재결신청서 열람공고 ※ 도로과-13456호		‵21. 11. 16.		강균 과장 전결 김정아 팀장 문태영 주문관 장문희 실무원
○ 소규모재해영향평가 시행계획 ※ 도로과-2248호		‵22. 2. 25.		오정환 과장 전결 조계윤 회계과장 오병구 계약1팀장 문태영 주무관
○ 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획(변경)인가 신청 ※ 도로과-12707호		‵22. 11. 9.		오정환 과장 결재 전명수 팀장 문태영 주무관
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경)인가 및 지형도면 고시 알림 ※ 도시계획과-29192호		‵22. 12. 30.		문태영 주무관
○ 지적 분할측량 의뢰 ※ 도로과-180호		‵23. 1. 4.		오정환 과장 결재 배도선 팀장 문태영 주무관
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획 (변경)인가 신청에 관한 주민등의 의견청취 공고 ※ 도로과-4417호		‵23. 4. 21.		오정환 과장 전결 김정아 팀장 문태영 주무관
○ 편입토지 등에 대한 실태조사 계획 알림 ※ 도로과-5386호		‵23. 5. 17.		오정환 과장 전결 김정아 팀장 대결 김상석 실무원
○ 사업인정 의제 관련 의견 청취 이행결과 제출 ※ 도로과-7264호		‵23. 7. 3.		오정환 과장 결재 배도선 팀장 문태영 주무관
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획 (변경)인가 및 지형도면 알림 ※ 도시계획과-19500호		‵23. 8. 11.		김현철 주무관
○ 국유재산 무상귀속 협의 ※ 도로과-9176호		‵23. 8. 16.		김근하 과정 전결 윤대근 팀장 김현철 주무관
○ 실시설계용역 준공검사조서 제출 ※ 도로과-9888호		‵23. 9. 4.		김근하 과정 결재 윤대근 팀장 김현철 주무관
○ 도로개설공사(총괄 및 1차분) 계약체결 및 감독공무원 지정알림 ※ 회계과-54023호		‵23. 11. 1.		한광민 행정안전국장 결재 봉영권 재산관리팀장 김진욱 계약1팀장 김주희 주무관
○ 건설폐기물 처리용역 계약체결 및 감독공무원 지정알림 ※ 회계과-54184호		‵23. 11. 1.		한진숙 회계과장 전결 봉영권 재산관리팀장 대결 김진욱 계약1팀장 김주희 주무관
○ 가연성폐기물 처리용역 계약체결 및 감독공무원 지정알림 ※ 회계과-55532호		‵23. 11. 8.		한진숙 회계과장 전결 김진욱 계약1팀장 김주희 주무관
○ 건설재해예방 기술지도용역 계약체결 및 감독공무원 지정알림 ※ 회계과-63422호		‵23. 12. 13.		한진숙 회계과장 전결 김진욱 계약1팀장 송용석 주무관
○ 도로개설공사(2차분) 계약체결 및 감독공무원 지정알림 ※ 회계과-34228호		‵24. 6. 26.		김병완 행정안전국장 결재 강행숙 회계과장 김진욱 계약1팀장 김대건 주무관
○ 도로개설공사 일시정지 검토보고 ※ 도로과-2246호		‵24. 8. 30.		이동일 교통도로국장 전결 강행숙 회계과장 정일권 계약1팀장 명호남 과장 곽 원 팀장 김현철 주무관
○ 도로개설공사 건설폐기물처리용역 외2건 기간연장 검토보고 ※ 도로과-4443호		‵24. 10. 31.		명호남 과장 전결 강행숙 회계과장 양동안 계약2팀장 곽 원 팀장 김현철 주무관
○ 돌산읍 진두마을 도로개설공사 건설폐기물처리용역 외2건 기간연장 요청 ※ 도로과-4458호		‵24. 10. 31.		명호남 과장 결재 곽 원 팀장 김현철 주무관
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사 지장물(공원등) 이설 협의 ※ 도로과-4541호		‵24. 11. 5.		정진희 팀장 대결 곽 원 팀장 김현철 주무관
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사 1차분 하도급 계약(철근콘크리트공) 적정성 검토보고 ※ 도로과-5043호		‵24. 11. 19.		명호남 과장 전결 강행숙 회계과장 정일권 계약1팀장 곽 원 팀장 김현철 주무관
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사 1차분 하도급 하도급 계약사항 검토결과 제출 ※ 도로과-5054호		‵24. 11. 19.		명호남 과장 결재 곽 원 팀장 김현철 주무관
○ 지장물(통신선로) 이설 요청(돌산읍 진두마을 도로개설) ※ 도로과-6248호		‵24. 12. 19.		명호남 과장 결재 곽 원 팀장 김현철 주무관
○ 지장물(한전주) 이설 요청(돌산읍 진두마을 도로개설) ※ 도로과-6256호		‵24. 12. 19.		명호남 과장 결재 곽 원 팀장 김현철 주무관
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사 실정보고에 따른 검토보고 ※ 도로과-6624호		‵24. 12. 31.		명호남 과장 전결 곽 원 팀장
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사 실정보고 승인 통보 ※ 도로과-53호		‵25. 1. 2.		명호남 과장 전결 곽 원 팀장
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사 (2차분) 실정보고에 따른 일시정지 검토보고 ※ 도로과-876호		‵25. 1. 2.		최연호 국장 전결 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 박성식 과장 곽 원 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사 (2차분) 일시정지 요청 ※ 도로과-903호		‵25. 1. 24.		박성식 과장 결재 곽 원 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사 실정보고(설계변경) 접수에 따른 추진계획 보고 ※ 도로과-2074호		‵25. 2. 28.		박성식 과장 전결 곽 원 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사 설계변경 심의 요청 ※ 도로과-2083호		‵25. 2. 28.		박성식 과장 결재 곽 원 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사 현장실정(설계변경)에 대한 검토보고 ※ 도로과-2337호		‵25. 3. 7.		최연호 국장 전결 김종필 회계과장 양동안 계약2팀장 박성식 과장 곽 원 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사 변경계약 의뢰 ※ 도로과-2377호		‵25. 3. 10.		박성식 과장 결재 곽 원 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사 실정보고 접수에 따른 검토보고 ※ 도로과-3341호		‵25. 4. 1.		최연호 국장 전결 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 박성식 과장 곽 원 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사 실정보고 승인 통보 ※ 도로과-3358호		‵25. 4. 1.		박성식 과장 전결 곽 원 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사 계약기간 연장 의뢰 ※ 도로과-3359호		‵25. 4. 1.		박성식 과장 결재 곽 원 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사(2차분) 일시정지 해지 검토보고 ※ 도로과-6123호		‵25. 6. 11.		최연호 국장 전결 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 박성식 과장 곽 원 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사(2차분) 일시정지 해지 요청 ※ 도로과-6132호		‵25. 6. 12.		박성식 과장 결재 곽 원 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사(총괄 및 1차분) 설계변경 시행 ※ 도로과-6184호		‵25. 6. 13.		박성식 과장 전결 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 곽 원 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사(1차분) 준공계 제출 알림 ※ 도로과-6603호		‵25. 6. 20.		박성식 과장 결재 곽 원 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사(1차분) 준공검사조서 제출 ※ 도로과-6735호		‵25. 6. 24.		박성식 과장 결재 곽 원 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사(총괄 및 2차분) 실정보고 검토보고 ※ 도로과-7020호		‵25. 7. 1.		박성식 과장 전결 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 곽 원 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사(총괄 및 2차분) 실정보고 승인 통보 ※ 도로과-7031호		‵25. 7. 2.		박성식 과장 결재 곽 원 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사(2차분) 하도급계약 적정성 검토보고 ※ 도로과-8714호		‵25. 8. 11.		박성식 과장 전결 서주용 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사 현장관리 철저 지시 ※ 도로과-9099호		‵25. 8. 20.		박성식 과장 전결 서주용 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사 실정보고에 따른 공사기간 연장 검토보고 ※ 도로과-9553호		‵25. 9. 3.		최연호 국장 전결 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 박성식 과장 서주용 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 진두마을 도로 개설공사 (총괄 및 2차분) 계약기간 연장 의뢰 ※ 도로과-9574호		‵25. 9. 3.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 박지윤 주무관