정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로
② 추진배경	안산 택지지구에서 죽림 택지지구 미연결 구간을 연결하여 교통소통 원활
③ 사업개요	○ 위 치 : 안산동 537번지 일원 ○ 사 업 량 : L=625m, H=15m(기개설 L=110m) ○ 사 업 비 : 11,200백만원(설계 116 공사 6,484, 기타 4,600)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자	시설5급 명호남 시설6급 차용석 시설9급 배승호
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간	2020. 2. ~ 2026. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 심곡 도시계획도로 개설공사 실시설계용역 시행 ※ 도로과-489호(’20.1.13.)		‘20. 1. 13.	서유권 도로과장 이영호 도로계획팀장 강성수 주무관
○ 심곡 도시계획도로 개설 소규모재해영향평가 용역 시행 ※ 도로과-3849호(’20.3.19.)		‘20. 3. 19.	서유권 도로과장 이영호 도로계획팀장 강성수 주무관
○ 심곡 도시계획도로 개설공사 실시설계용역 일시정지 검토보고 ※ 도로과-5794호(’20.4.28.)		‘20. 4. 28.	장세길 건설교통국장 서유권 도로과장 이영호 도로계획팀장 박성 주무관
○ 여수 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 알림(심곡 도시계획도로) ※ 도시계획과-15393호(’20.6.30.)		‘20. 6. 30.	강성수 주무관
○「심곡 도시계획도로 개설」지적 분할측량 의뢰 ※ 도시계획과-3887호(’21.4.1.)		‘21. 4. 1.	강균 도로과장 김정남 도로계획팀장 정준호 주무관

○ 보상계획열람공고(심곡 도시계획도로 개설 2공구) ※ 도로과-10496호(’21.8.31.)	‘21. 8. 31.	강균 도로과장 김정아 도로행정팀장 김정신 주무관
○ 「심곡 도시계획도로 개설공사(2공구)」편입 토지 손실보상비 집행 계획 ※ 도로과-13653호(’21.11.23.)	‘21. 11. 23.	권오봉 시장 박현식 부시장 임광건 건설교통국장 강균 도로과장 김정아 도로행정팀장 김정신 주무관
○ 월래이주택지~죽림택지간 도시계획도로 개설공사(2공구) 시행 ※ 도로과-8072호(’22.7.20.)	‘22. 7. 20.	정기명 시장 박현식 부시장 문인기 건설교통국장 오정환 도로과장 전명수 도로계획팀장 최상록 주무관
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경)인가 알림[월래이주택지~죽림택지 연결(2공구)] ※ 도시계획과-25644호(’22.11.28.)	‘22. 11. 28.	김평순 주무관
○「월래이주택지~죽림택지간 도시계획도로 개설공사(2공구)」계약체결 감독공무원 지정 통보 ※ 회계과-40231호(’22.8.22.)	‘22. 8. 22.	김평순 주무관
○「월래이주택지~죽림택지연결 도로개설공사(1공구)」지적 분할측량 의뢰 ※ 도로과-3689호(’23.4.5.)	‘23. 4. 5.	오정환 도로과장 배도선 도로계획팀장 박성원 주무관
○「월래이주택지~죽림택지연결 도로개설공사(2공구)」준공검사조서 제출 ※ 도로과-9890호(’23.9.4.)	‘23. 9. 4.	심근하 도로과장 윤대근 도로계획팀장 김현철 주무관
○ 도시계획시설사업 실시계획인가 알림[월내이주단지~죽림택지 도로개설공사(1공구)] ※ 도시계획과-29213호(’23.12.11.)	‘23. 12. 13.	박성원 주무관
○「심곡 도시계획도로 개설공사 실시설계용역」준공계 제출 ※ 도로과-1792호(’24.2.13.)	‘24. 2. 13.	정진희 도로행정팀장 대결 차용석 도로계획팀장 김현식 주무관

○「월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설공사」손실보상비 지출원인행위 감액 검토 ※ 도로과-5310호(’24.5..1.)	‘24. 5. 1.	명호남 도로과장 강행숙 회계과장 협조 차용석 도로계획팀장 협조 김진욱 계약1팀장 협조 김현식 주무관 협조 김진표 주무관
○「월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설공사」편입 토지에 대한 손실보상비 집행 ※ 도로과-5597호(’24.5.9.)	‘24. 5. 9.	김종기 부시장 염승열 건설교통국장 명호남 도로과장 강행숙 회계과장 협조 차용석 도로계획팀장 협조 김진욱 계약1팀장 협조 정진희 도로행정팀장 협조 김현식 주무관 협조 김진표 주무관
○「월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설공사」보상에 따른 등기수수료 집행 ※ 회계과-5705호(’24.5.10.)	‘24. 5. 10.	명호남 도로과장 정진희 도로행정팀장 김진표 주무관
○「월내 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설공사」편입 국유지 보상협의 요청 ※ 도로과-6390호(’24.5.27.)	‘24. 5. 27.	명호남 도로과장 정진희 도로행정팀장 김진표 주무관
○「월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설공사」편입 국유지 손실보상계약 체결 ※ 도로과-8261호(’24.7.5.)	‘24. 7. 5.	명호남 도로과장 정진희 도로행정팀장 김진표 주무관
○월래이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설」 지방재정관리시스템 지출재원변경 요청 ※ 도로과-1763호(’24.8.20.)	‘24. 8. 20.	명호남 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○월래이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설」편입 토지에 대한 손실보상비 집행 ※ 도로과-4330호(’24.10.29.)	‘24. 10. 29.	명호남 도로과장 정진희 도로행정팀장 김수정 주무관