정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	개도 농어촌관광휴양단지 조성사업
② 추진배경	섬박람회와 화태~백야 간 연도교 개설구간에 인접하여 활용도가 높아진 개도 간척지를 섬박람회 부행사장으로 활용하는 등 농어촌관광휴양단지로 조성하여 균형발전 및 정주여건 개선에 기여
③ 사업개요	○ 위 치: 화정면 개도리 1840번지 일원 ○ 사 업 량: 농어촌관광휴양단지 조성 A=157,425㎡ ○ 총사업비: 31,733백만 원(시비)
④ 사업부서	여수시 건설과		⑤ 담당자	시설5급 장현철 시설6급 차재원 시설7급 박채원
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2024. 4. 30. ~ 2026. 10. 29.
<그간 주요 추진내용>
○ 개도간척지 인수 방안 방침 결정 ※ 건설과-2013(2021.2.10.)		‘21. 2.10.	권오봉 시장 서은수 부시장 임광건 건설교통국장 박상훈 건설과장 김승주 농업기반팀장 김창오 주무관
○ 『개도간척지 관리처분 및 기본계획 수립용역』 계약 체결 ※ 회계과-19808(2021. 4. 19.)		‘21. 4.19.	박상훈 건설과장 김승주 농업기반팀장 김창오 주무관
○ 여수 개도 농어촌관광휴양단지 지정(안) 주민 공람공고 ※ 건설과-18860(2021. 12. 30.)		‘21.12.30.	박상훈 건설과장 김승주 농업기반팀장 김창오 주무관
○ 감정평가 의뢰(개도간척지 관리처분) ※ 건설과-133(2022. 1. 4.)		‘22. 1. 4.	박상훈 건설과장 김승주 농업기반팀장 김창오 주무관
○ 『개도 농어촌관광휴양단지』 지정(안) 방침 결정 ※ 건설과-3980(2022. 3. 25.)		‘22. 3.25.	권오봉 시장 박현식 부시장 문인기 건설교통국장 심근하 건설과장 김승주 농업기반팀장 김창오 주무관
○ 여수 개도 농어촌관광휴양단지 지정 및 지형도면 고시 ※ 건설과-4124(2022. 3. 29.)		‘22. 3.29.	심근하 건설과장 김승주 농업기반팀장 김창오 주무관

○ 매립지 등의 매각을 위한 관리․처분 승인 신청 ※ 건설과-6637(2022. 5. 13.)	‘22. 5.13.	심근하 건설과장 김승주 농업기반팀장 김창오 주무관
○ 여수 개도간척지 매립지 등의 관리․처분 승인 ※ 농림축산식품부 간척지 농업과-1711 (2022. 5. 16.)	‘22. 5.16.	심근하 건설과장 김승주 농업기반팀장 김창오 주무관
○ 감정의뢰에 대한 회보 ※ 삼일 152201-1-04002호(2022. 5. 23.), 하나 220105-16-0018(2022. 5. 23.)	‘22. 5.23.	심근하 건설과장 김승주 농업기반팀장 김창오 주무관
○ 여수 개도 매립지 등 관리처분 계획 공고 ※ 건설과-7444(2022. 5. 26.)	‘22. 5.26.	심근하 건설과장 김승주 농업기반팀장 김창오 주무관
○ 『개도간척지 관리처분 및 기본계획 수립용역』 준공 ※ 회계과-25774(2022. 5. 27.)	‘22. 5.27.	심근하 건설과장 김승주 농업기반팀장 김창오 주무관
○ 『개도 농어촌관광휴양단지 조성공사』 실시설계용역 시행 방침결정 ※ 건설과-13165(2022. 9. 13.)	‘22. 9.13.	권오봉 시장 박현식 부시장 문인기 건설교통국장 심근하 건설과장 홍종옥 농업기반팀장 임영수 주무관
○ 『개도 농어촌관광휴양단지 조성공사 실시설계용역』 사업수행능력평가 결과 보고 ※ 건설과-13165(2022. 10. 27.)	‘22.10.27.	문인기 건설교통국장 심근하 건설과장 홍종옥 농업기반팀장 김창오 주무관
○ 『개도 농어촌관광휴양단지 조성공사』 재해영향성검토 용역 등 2건 시행 방침결정 ※ 건설과-16247(2022. 11. 11.)	‘22.11.11.	문인기 건설교통국장 심근하 건설과장 홍종옥 농업기반팀장 김창오 주무관
○ 감정평가 결과 알림(여수 개도간척지)(시→한국농어촌공사) ※ 건설과-17021(2022. 11. 28.)	‘22.11.28.	심근하 건설과장 홍종옥 농업기반팀장 임영수 주무관
○ 『개도 농어촌관광휴양단지 조성공사』 재해영향성검토 및 재해영향평가 용역 계약체결 ※ 회계과-58140(2022. 12. 5.)	‘22.12. 5.	심근하 건설과장 홍종옥 농업기반팀장 임영수 주무관
○ 『개도 농어촌관광휴양단지 조성공사 전략 및 소규모환경영향평가』 외 1건 계약체결 ※ 회계과-59706(2022. 12. 13.)	‘22.12.13.	심근하 건설과장 홍종옥 농업기반팀장 임영수 주무관

○ 「개도 농어촌관광휴양단지」 간척지 농지관리기금 납부계획 방침결정 ※ 건설과-204(2023. 1. 4.)	‘23. 1. 4.	정기명 시장 김종기 부시장 이경종 건설교통국장 심근하 건설과장 홍종옥 농업기반팀장 임영수 주무관
○ 「개도 농어촌관광휴양단지 조성공사 실시설계용역」 착수보고회 개최 ※ 건설과-305(2023. 1. 6.)	‘23. 1.11.	이경종 건설교통국장 심근하 건설과장 홍종옥 농업기반팀장 임영수 주무관
○ 「개도 농어촌관광휴양단지 조성사업」 도시관리계획 결정 (변경) 입안검토 방침결정 ※ 건설과-2578(2023. 2. 21.)	‘23. 2.21.	정기명 시장 김종기 부시장 이경종 건설교통국장 심근하 건설과장 홍종옥 농업기반팀장 임영수 주무관
○ 전략환경영향평가항목 등의 결정 내용 공고(개도 농어촌관광휴양단지 조성사업) ※ 건설과-4222(2023. 3. 20.)	‘23. 3.20.	심근하 건설과장 홍종옥 농업기반팀장 임영수 주무관
○ 전략환경영향평가(초안) 공고공람 및 주민설명회 개최 공고 ※ 건설과-11195(2023. 6. 26.)	‘23. 6.26.	이경종 건설국장 심근하 건설과장 홍종옥 농업기반팀장 임영수 주무관
○ 건설사업관리용역 적정성 검토보고(방침결정) ※ 건설과-15997(2023. 9. 5.)	‘23. 9. 5.	정기명 시장 김종기 부시장 이경종 건설교통국장 주영근 건설과장 장현철 농업기반팀장 임영수 주무관
○ 개발계획 수립(안) 검토보고(방침결정) ※ 건설과-15998(2023. 9. 5.)	‘23. 9. 5.	정기명 시장 김종기 부시장 이경종 건설교통국장 주영근 건설과장 장현철 농업기반팀장 임영수 주무관
○ 여수 개도 농어촌관광휴양단지 지정(변경)․개발계획(안) 주민열람공고 ※ 건설과-16393(2023. 9. 11.)	‘23. 9.11.	주영근 건설과장 장현철 농업기반팀장 임영수 주무관
○ 『개도 농어촌관광휴양단지 조성사업』 재해영향평가서(본안) 제출 ※ 건설과-19244(2023. 10. 26.)	‘23. 9.11.	주영근 건설과장 장현철 농업기반팀장 임영수 주무관

○ 「개도 농어촌관광휴양단지 조성사업」 농지전용 협의 요청 ※ 건설과-20162(2023. 11. 8.)	‘23.11. 8.	주영근 건설과장 장현철 농업기반팀장 임영수 주무관
○ 도로점용 사전 협의(개도 농어촌관광휴양단지 조성사업) ※ 건설과-20317(2023. 11. 10.)	‘23.11.10.	주영근 건설과장 장현철 농업기반팀장 임영수 주무관
○ 국유재산 무상귀속 재협의 ※ 건설과-21025(2023. 11. 21.)	‘23.11.21.	주영근 건설과장 장현철 농업기반팀장 임영수 주무관
○ 재해영향평가 변경이행계획서 제출 ※ 건설과-21992(2023. 12. 5.)	‘23.12. 5.	주영근 건설과장 장현철 농업기반팀장 임영수 주무관
○ 재해영향성검토 및 재해영향평가 용역 준공 ※ 회계과-61392(2023. 12. 5.)	‘23.12. 5.	주영근 건설과장 장현철 농업기반팀장 임영수 주무관
○ 실시설계용역 완료보고회 개최 ※ 건설과-21227(2023. 11. 23.)	‘23.12. 7.	주영근 건설과장 장현철 농업기반팀장 임영수 주무관
○ 전략 및 소규모 환경영향평가 용역 준공 ※ 회계과-62280(2023. 12. 8.)	‘23.12. 8.	주영근 건설과장 장현철 농업기반팀장 임영수 주무관
○ 「개도 농어촌관광휴양단지」 지정(변경) 및 개발계획 방침결정 ※ 건설과-23297(2023. 2. 21.)	‘23.12.21.	정기명 시장 김종기 부시장 이경종 건설교통국장 주영근 건설과장 장현철 농업기반팀장 임영수 주무관
○ 개도 농어촌관광휴양단지 지정 (변경)․개발계획 승인 및 지형도면고시 알림 ※ 건설과-23517(2023. 12. 26.)	‘23.12.26.	주영근 건설과장 장현철 농업기반팀장 임영수 주무관
○ 건설사업관리계획 수립 제출 ※ 건설과-23544(2023. 12. 26.)	‘23.12.26.	주영근 건설과장 장현철 농업기반팀장 임영수 주무관
○ 「개도 농어촌관광휴양단지 조성사업(토목)」 등 3건 일상감사 결과통보 ※ 감사담당관-53(2024. 1. 2.)	‘24. 1. 2.	주영근 건설과장 장현철 농업기반팀장 임영수 주무관
○ 「개도 농어촌관광휴양단지 조성사업 건설사업관리용역」 등 2건 계약심사 결과 회신 ※ 감사담당관-743(2024. 1. 22.)	‘24. 1. 22.	김정남 건설과장 최종춘 농업기반팀장 박채원 주무관

○ 「개도 농어촌관광휴양단지 조성사업 건설사업관리용역」 사업수행능력평가(PQ) 계획 검토보고 ※ 건설과-1537(2024. 1. 24.)	‘24. 1.24.	염승열 건설교통국장 김정남 건설과장 최종춘 농업기반팀장 박채원 주무관
○ 공사원가 사전검토서 송부 ※ 조달청 토목환경과-727(2024. 2. 22.)	‘24. 2.22.	김정남 건설과장 최종춘 농업기반팀장 박채원 주무관
○ 『개도 농어촌관광휴양단지 조성사업』 편입 농업생산기반시설 폐지 신청계획(안) ※ 건설과-3671(2024. 2. 27.)	‘24. 2.27.	김정남 건설과장 최종춘 농업기반팀장 박채원 주무관
○ 농업생산기반시설 폐지 및 국유재산 용도폐지(개도 농어촌관광휴양단지 조성사업) ※ 건설과-3784(2024. 2. 28.)	‘24. 2.28.	김정남 건설과장 박 경 건설행정팀장 천세원 주무관
○ 『개도 농어촌관광휴양단지 조성사업』 추진에 따른 용도폐지 국유재산 인계(화정면 개도리 1810 등 9필지) ※ 건설과-4907(2024. 3. 5.)	‘24. 3. 5.	김정남 건설과장 박 경 건설행정팀장 천세원 주무관
○ 「개도 농어촌관광휴양단지 조성사업 건설사업관리용역」 사업수행능력평가(면접) 계획 검토보고 ※ 건설과-4412(2024. 3. 8.)	‘24. 3. 8.	염승열 건설교통국장 김정남 건설과장 최종춘 농업기반팀장 박채원 주무관
○ 개도 농어촌관광휴양단지 조성사업 편입 국유재산 매입 사전협의에 대한 회신(개도리1810외 9건) ※ 한국자산관리공사 광주전남지역본부-46246(2024. 3. 8.)	‘24. 3. 8.	김정남 건설과장 최종춘 농업기반팀장 박채원 주무관
○ 「개도 농어촌관광휴양단지 조성사업 건설사업관리용역」 사업수행능력평가(PQ) 결과보고 ※ 건설과-4906(2024. 3. 15.)	‘24. 3.15.	염승열 건설교통국장 김정남 건설과장 최종춘 농업기반팀장 박채원 주무관
○ 「개도 농어촌관광휴양단지 조성사업」 공사 및 폐기물처리용역 집행계획 방침결정 ※ 건설과-5252(2024. 3. 19.)	‘24. 3.19.	정기명 시장 김종기 부시장 염승열 건설교통국장 김정남 건설과장 최종춘 농업기반팀장 박채원 주무관
○ 실시설계용역 준공 ※ 건설과-5596(2024. 3. 25.)	‘24. 3.25.	김정남 건설과장 최종춘 농업기반팀장 박채원 주무관

○ 「개도 농어촌관광휴양단지 조성사업」 편입토지 감정평가 추진계획 검토보고 ※ 건설과-5905(2024. 3. 29.)	‘24. 3.29.	김정남 건설과장 최종춘 농업기반팀장 박채원 주무관
○ 「개도 농어촌관광휴양단지 조성사업」 순성토 반입량 및 반입시기 회신 협조 요청 ※ 건설과-6048(2024. 4. 1.)	‘24. 4. 1.	김정남 건설과장 최종춘 농업기반팀장 박채원 주무관
○ 「개도 농어촌관광휴양단지 조성사업 건설사업관리용역(총괄 및 1차분)」 계약체결 및 착공 ※ 회계과-20980(2024. 4. 25.)	‘24. 4.29.	김정남 건설과장 최종춘 농업기반팀장 박채원 주무관
○ 「개도 농어촌관광휴양단지 조성사업(총괄 및 1차분)」 계약 체결 및 착공 ※ 회계과-21373(2024. 4. 26.)	‘24. 4.30.	김정남 건설과장 최종춘 농업기반팀장 박채원 주무관
○ 도시개발사업 등의 착수 신고서 제출(개도 농어촌관광휴양단지 조성사업) ※ 건설과-8516(2024. 5. 7.)	‘24. 5. 7.	김정남 건설과장 최종춘 농업기반팀장 박채원 주무관
○ 「개도 농어촌관광휴양단지 조성사업 폐기물처리용역」 계약 체결 및 착공 ※ 회계과-22443(2024. 5. 1.)	‘24. 5.10.	김정남 건설과장 최종춘 농업기반팀장 박채원 주무관
○ 「개도 농어촌관광휴양단지 조성사업」 편입토지(국유지) 매입계획 검토보고 ※ 건설과-8940(2024. 5. 13.)	‘24. 5.13.	정기명 시장 김종기 부시장 염승열 건설교통국장 김정남 건설과장 최종춘 농업기반팀장 박채원 주무관
○ 「개도 농어촌관광휴양단지 조성사업」 편입 국유지 매수 및 대부 신청 ※ 건설과-9142(2024. 5. 16.)	‘24. 5.16.	김정남 건설과장 최종춘 농업기반팀장 박채원 주무관
○ 「개도 농어촌관광휴양단지 조성사업」 편입 국유재산 대부료 납부 ※ 건설과-10400(2024. 5. 31.)	‘24. 5.31.	김정남 건설과장 최종춘 농업기반팀장 박채원 주무관
○ 「개도 농어촌관광휴양단지 조성사업」 토사(외부반입) 운반시기 검토 지시 ※ 건설과-11613(2024. 6. 17.)	‘24. 5.31.	김정남 건설과장 최종춘 농업기반팀장 박채원 주무관

○ 「개도 농어촌관광휴양단지 조성사업」 안전점검 수행기관 선정계획 검토보고 ※ 건설과-2943(2024. 8. 19.)	‘24. 8.19.	장현철 건설과장 차재원 농업기반팀장 박채원 주무관
○ 「개도 농어촌관광휴양단지 조성사업」 안전점검 수행기관 지정 ※ 건설과-4195(2024. 9. 6.)	‘24. 9. 6.	장현철 건설과장 차재원 농업기반팀장 박채원 주무관
○ 「개도 농어촌관광휴양단지 조성사업」 토취장 재선정 계획 검토보고 ※ 건설과-6251(2024. 10. 14.)	‘24.10.14.	정기명 시장 최정기 부시장 염승열 건설교통국장 장현철 건설과장 차재원 농업기반팀장 박채원 주무관
○ 「개도 농어촌관광휴양단지 조성사업」 토취장 재선정 계획 검토보고 ※ 건설과-6252(2024. 10. 14.)	‘24.10.14.	정기명 시장 최정기 부시장 염승열 건설교통국장 장현철 건설과장 차재원 농업기반팀장 박채원 주무관
○ 「개도 농어촌관광휴양단지 조성사업」 편입 국유재산 대부료 납부 ※ 건설과-7117(2024. 10. 28.)	‘24.10.28.	장현철 건설과장 차재원 농업기반팀장 박채원 주무관