정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	유기동물보호센터 설치
② 추진배경	○ 기존 유기동물보호소 공간 협소 및 시설 노후화로 보호 유기동물의 적절한 관리가 어려움 ○ 유기동물로 발생하는 사회적 갈등을 완화하고, 인프라 확충으로 동물복지를 구현
③ 사업개요	○ 사업명 : 유기동물보호센터 설치 ○ 위치 : 여수시 평여동 579-1번지 외 15필지 ○ 사업내용 : 유기동물보호센터 이전 설치 ○ 사업규모 : 부지 3,976㎡, 건축 연면적 742.42㎡ (1개동/ 150두 수용) ○ 총사업비 : 3,200백만원(국비 600 19%, 시비 2,600 81%) ○ 사업기간 : 2021. 2. ~ 2025. 12. (5년)
④ 사업부서	농업정책과		⑤ 담당자	농업5급 문우환 농업6급 남윤 농업9급 지세인
⑥ 선정기준	10억 원 이상 사업		⑦ 사업기간	2021.2. ~ 2025.12.
<그간 주요 추진내용>
○ 설치 계획 수립 ※ 농업정책과-5175(’21. 2. 1.)		‘21. 2. 1.	권오봉 시장 서은수 부시장 윤혜옥 소장 이훈기 과장 임채영 팀장 전현성 주무관
○ 설계 용역 계약 의뢰 ※ 농업정책과-37937(’21. 10. 13.)		‘21. 10. 13.	장인호 소장 윤희순 과장 임채영 팀장 김영배 주무관
○ 사업 관계자 협의 결과 보고 ※ 농업정책과-1407(’22. 1. 12.)		‘22. 1. 12.	장인호 소장 윤희순 과장 김치훈 팀장
○ 유기동물보호센터 설치사업 검토보고 ※ 농업정책과-23396(’23. 5. 18.)		‘23. 5. 18.	정기명 시장 김종기 부시장 장인호 소장 이훈기 과장 이혜령 팀장 배지나 주무관

○ 건축공사 계약체결 ※ 농업정책과-58232(’23. 12. 29.)	‘23. 12. 29.	이훈기 과장 김재진 팀장 장은진 주무관
○ 사업 적정성 검토 및 상황보고 ※ 농업정책과-13892(’24. 3. 20.)	‘24. 3. 20.	정기명 시장 김종기 부시장 이병호 소장 이훈기 과장 이균홍 팀장 김한별 주무관
○ 유기동물보호센터 신축 전기공사 관급자재 구매 시행 ※ 농업정책과-44095(’24. 9. 12.)	‘24. 9. 12.	이병호 소장 최재영 과장 유재영 팀장 고영란 차장
○ 유기동물보호센터 설치사업(건축,토목,기계) 현지여건 변동에 따른 실정보고 ※ 농업정책과-48939(’24. 10. 15.)	‘24. 10. 15.	최정기 부시장 이병호 소장 최재영 과장 유재영 팀장 고영란 차장
○ 유기동물보호센터 설치사업(건축,토목,기계) 설계변경 검토보고 ※ 농업정책과-59965(’24. 12. 9.)	‘24. 12. 9.	정기명 시장 최정기 부시장 이병호 소장 최재영 과장 유재영 팀장 고영란 차장
○ 유기동물보호센터 신축 전기공사 관급자재 계약해지 검토보고 ※ 농업정책과-1160(’25. 1. 8.)	‘25. 1. 8.	한진숙 소장 최재영 과장 유재영 팀장 고영란 차장
○ 유기동물보호센터 신축 전기공사 관급자재 구매시행 ※ 농업정책과-3930(’25. 1. 20.)	‘25. 1. 20.	한진숙 소장 최재영 과장 유재영 팀장 임선진 주무관
○ 유기동물보호센터 설치사업(건축,토목,기계) 공사기간 연장 검토보고 ※ 농업정책과-6095(’25. 2. 3.)	‘25. 2. 3.	한진숙 소장 최재영 과장 유재영 팀장 임선진 주무관

○ 유기동물보호센터 진입도로 관로 임시매설 공사 시행 ※ 농업정책과-5990(’25. 2. 3.)	‘25. 2. 3.	최재영 과장 유재영 팀장 임선진 주무관
○ 유기동물보호센터 신축 기계 공사 관급자재 구매시행 ※ 농업정책과-6010(’25. 2. 3.)	‘25. 2. 3.	최재영 과장 유재영 팀장 임선진 주무관
○ 유기동물보호센터 신축 건축공사 관급자재(에폭시)구매시행 ※ 농업정책과-6476(’25. 2. 5.)	‘25. 2. 5.	최재영 과장 유재영 팀장 임선진 주무관
○ 유기동물보호센터 설치사업(건축,토목,기계) 현장 실정보고에 따른 검토보고 ※ 농업정책과-14473(’25. 3. 14.)	‘25. 3. 14.	최정기 부시장 한진숙 소장 최재영 과장 유재영 팀장 임선진 주무관
○ 유기동물보호센터 에너지효율 및 제로에너지 본인증 설계용역 시행 ※ 농업정책과-15075(’25. 3. 17.)	‘25. 3. 17.	최재영 과장 유재영 팀장 임선진 주무관
○ 유기동물보호센터 설치사업(건축,토목,기계) 설계변경 검토보고 ※ 농업정책과-20321(’25. 4. 7.)	‘25. 4. 7.	최정기 부시장 한진숙 소장 최재영 과장 유재영 팀장 임선진 주무관
○ 유기동물보호센터 진료기기 구입계획 보고 ※ 농업정책과-23221(’25. 4. 18.)	‘25. 4. 18.	한진숙 소장 최재영 과장 남윤 팀장 이효석 주무관
○ 유기동물보호센터 설치사업 완료에 따은 건축물 임시사용 계획보고 ※ 농업정책과-26518(’25. 5. 7.)	‘25. 5. 7.	정기명 시장 최정기 부시장 한진숙 소장 최재영 과장 유재영 팀장 임선진 주무관
○ 동물보호센터 내 동물병원 개설신고 수리 완료 ※ 농업정책과-22526(’25. 6. 10.)	‘25. 6. 10.	한진숙 소장 최재영 과장 남윤 팀장 이효석 주무관