정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	여수시 공공주도 해상풍력 단지개발 지원사업
② 추진배경	(공약) 지역사회·수산업계 대타협을 통한 남면·삼산면권 해상풍력에너지 개발
③ 사업개요	공공주도 3GW 해상풍력단지 조성
④ 사업부서	신산업에너지과		⑤ 담당자	공업5급 최다윤 공업6급 곽원준 공업7급 이영훈 공업8급 조성민
⑥ 선정기준	10억 원 이상 사업 국정과제 (산업부 공고 제2024-470호, 지자체 주도 공공단지 개발)		⑦ 사업기간	’24.8. ~ ’27.12.
<그간 주요 추진내용> ○ 공모사업 최종 선정(여수시, 인천광역시) : ’24. 8. 23. ○ 민간투자자 협약 체결(사업자, 민간투자금 확정) : ’24. 12. 13. ○ 해상풍력발전 어업인협의회‘단지개발사업’보고 : ’25. 1. 20. ○ 단지개발 참여기관 간담회 : ’25. 1. 23. ○ 해상풍력발전 민관협의회‘단지개발 사업’보고 : ’25. 2. 10. ○ 여수시 해상풍력발전 대시민 포럼 개최 : ’25. 3. 14. ○‘단지개발 사업’특별법 대응 사전컨설팅 추진 : ’25. 4. ~ 5. ○ 해상풍력발전 어업인협의회‘단지개발사업’보고 : ’25. 6. 5. ○ 해상풍력발전 민관협의회‘단지개발 사업’보고 : ’25. 6. 11. ○ 공공주도 해상풍력발전 사업 해외 선진지 견학 : ’25. 7. 7.~12. ○ 해상풍력 단지개발 지원사업 본 용역 착수보고회 : ’25. 9. 4. ○‘단지개발 사업’본 용역 정기 회의(1차~11차) : ’25. 9. ~ ’26. 7. ○‘단지개발 사업’사업관리위원회(3회) : ’25. 11. ~ 26. 6. ○‘단지개발 사업’협약 변경(사업기간 변경 등) : ’25. 12. 24. ○ 여수시 해상풍력 특별법 대응 워크숍 개최 : ’26. 1. 15. ○ 입지선호 의견 수렴 및 숙의경청회(어업인단체) : ’26. 1. ~ 3. ○ 찾아가는 주민 설명회(남면, 화정면) : ’26. 2. 4. ~ 5. ○ 입지선호 워크숍 개최 : ’26. 3. 11. ○ 전남 동부권 해상풍력 공동개발 업무협약 : ’26. 3. 23. ○ 해상풍력발전 민관협의회‘단지개발 사업’보고 : ’26. 3. 25. ○ 해상풍력 특별법에 따른 예비지구 신청(→기후부) : ’26. 6. 19. ○ 공공주도 해상풍력발전 사업 국내 선진지 견학 : ’26. 6. 24.
○ 방침 결정(계획 수립) ※ 신산업에너지과-793호(’24.7.15.)		‘24. 7. 15.	정기명 시장 최정기 부시장 이동일 국장 손용봉 과장 곽원준 팀장 김명훈 차장
○ 협약 체결 ※ 신산업에너지과-15579호(’24.12.12.)		‘24. 12. 12.	손용봉 과장 곽원준 팀장 김명훈 차장
○ 방침 결정(대시민 포럼 개최 계획 수립) ※ 신산업에너지과-4929호(’25.2.24.)		‘25. 2. 24.	정기명 시장 최정기 부시장 이동일 국장 손용봉 과장 곽원준 팀장 조성민 주무관
○ 방침 결정(해상풍력단지 확보 계획) ※ 신산업에너지과-5832호(’25.3.6.)		‘25. 3. 6.	정기명 시장 최정기 부시장 이동일 국장 손용봉 과장 곽원준 팀장 김명훈 차장
○ 방침 결정(해외 선진지 견학 계획) ※ 신산업에너지과-13590호(’25.5.23.)		‘25. 5. 23.	정기명 시장 최정기 부시장 이동일 국장 손용봉 과장 곽원준 팀장 김명훈 차장
○ 방침 결정(도민펀드 업무 협약) ※ 신산업에너지과-15569호(’25.6.16.)		‘25. 6. 16.	정기명 시장 최정기 부시장 이동일 국장 손용봉 과장 곽원준 팀장 조성민 주무관
○ 협약 변경 ※ 신산업에너지과-30544호(’25.11.28.)		‘25. 11. 28.	손용봉 과장 곽원준 팀장 조성민 주무관
○ 방침 결정(국내 선진지 견학 계획) ※ 신산업에너지과-13899호(’26.5.19.)		‘26. 5. 19.	정기명 시장 정현구 부시장 고영준 국장 김상욱 과장 곽원준 팀장 조성민 주무관
○ 방침 결정(예비지구 신청 계획) ※ 신산업에너지과-15637호(’26.6.9.)		‘26. 6. 9.	정기명 시장 정현구 부시장 고영준 국장 김상욱 과장 곽원준 팀장 이영훈 주무관