정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	남면 심포마을 방파제 보강 및 호안정비공사
② 추진배경	제4차 섬종합발전사업의 일환으로 방파제 보강 및 호안정비로 도서민의 안전성 확보 및 정주여건 개선
③ 사업개요	○ 위 치 : 전남 여수시 남면 심장리 일원 ○ 사 업 량 : T.T.P. 설치 964EA ○ 사 업 비 : 1,983백만원(국 1,587, 도 198 시 198)
④ 사업부서	섬발전지원과		⑤ 담당자	행정5급 서영수 시설9급 김수현
⑥ 선정기준	10억 원 이상 공사		⑦ 사업기간	2024. ~ 2025.
<그간 주요 추진내용>
○ 남면 심포마을 방파제 보강 및 호안정비공사(총괄 및 1차분) 시행 ※ 섬발전지원과-5005(’24. 5. 2.)		‘24. 5. 2.	정기명 시장 김종기 부시장 정재호 국장 강행숙 과장 김진욱 팀장 김정오 과장 정종기 팀장 김한수 차장
○ 남면 심포마을 방파제 보강 및 호안정비공사(총괄 및 1차분) 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 회계과-27573(’24. 5. 28.)		‘24. 5. 28.	김병완 국장 강행숙 과장 우희원 팀장 김대건 주무관
○ 남면 심포마을 방파제 보강 및 호안정비공사(총괄 및 1차분) 착수계 접수 알림 ※ 섬발전지원과-6248(’24. 6. 5.)		‘24. 6. 5.	김정오 과장 정종기 팀장 김한수 차장
○ 남면 심포마을 방파제 보강 및 호안정비공사 현장여건 변동에 따른 설계변경 검토보고 ※ 섬발전지원과-2181(’24. 8. 26.)		‘24. 8. 26.	최정기 부시장 김상태 국장 강행숙 과장 정일권 팀장 김정오 과장 정종기 팀장 김한수 차장
○ 남면 심포마을 방파제 보강 및 호안정비공사 현장여건 변동에 따른 변경계약 체결 의뢰 ※ 섬발전지원과-2460(’24. 8. 30.)		‘24. 8. 30.	김정오 과장 정종기 팀장 김한수 차장
○ 남면 심포마을 방파제 보강 및 호안정비공사 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-47457(’24. 9. 4.)		‘24. 9. 4.	강행숙 과장 정일권 팀장 김대건 주무관
○ 남면 심포마을 방파제 보강 및 호안정비공사(1차분) 준공계 접수 알림 ※ 섬발전지원과-2849(’24. 9. 9.)		‘24. 9. 9.	김정오 과장 정종기 팀장 김수현 주무관
○ 남면 심포마을 방파제 보강 및 호안정비공사(1차분) 준공검사 공무원 지정 통보 ※ 회계과-48256(’24. 9. 10.)		‘24. 9. 10.	강행숙 과장 정일권 팀장 김대건 주무관
○ 남면 심포마을 방파제 보강 및 호안정비공사(1차분) 준공검사조서 제출 ※ 섬발전지원과-2905(’24. 9. 10.)		‘24. 9. 10.	김정오 과장 정종기 팀장 김한수 차장
○ 남면 심포마을 방파제 보강 및 호안정비공사(총괄) 현장여건에 따른 일시정지 검토보고 ※ 섬발전지원과-3727(’24. 10. 4.)		‘24. 10. 4.	김상태 국장 강행숙 과장 정일권 팀장 김정오 과장 정종기 팀장 김한수 차장
○ 남면 심포마을 방파제 보강 및 호안정비공사 일시정지 요청 ※ 섬발전지원과-3788(’24. 10. 7.)		‘24. 10. 7.	김정오 과장 정종기 팀장 김한수 차장
○ 남면 심포마을 방파제 보강 및 호안정비공사 일시정지 알림 ※ 회계과-52281(’24. 10. 7.)		‘24. 10. 7.	김병완 국장 강행숙 과장 정일권 팀장 김대건 주무관
○ 남면 심포마을 방파제 보강 및 호안정비공사(2차분) 시행 ※ 섬발전지원과-1536(’25. 2. 7.)		‘25. 2. 7.	정기명 시장 최정기 부시장 정덕영 국장 김종필 과장 정일권 팀장 서영수 과장 정종기 팀장 김수현 주무관
○ 남면 심포마을 방파제 보강 및 호안정비공사(2차분) 계약체결 의뢰 ※ 섬발전지원과-1612(’25. 2. 11.)		‘25. 2. 11.	서영수 과장 정종기 팀장 김수현 주무관
○ 남면 심포마을 방파제 보강 및 호안정비공사(2차분) 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 회계과-6776(’25. 2. 13.)		‘25. 2. 13.	나병곤 국장 김종필 과장 정일권 팀장 이정란 주무관
○ 남면 심포마을 방파제 보강 및 호안정비공사(2차분) 착공계 제출 ※ 섬발전지원과-1947(’25. 2. 19.)		‘25. 2. 19.	정종기 팀장 김수현 주무관
○ 남면 심포마을 방파제 보강 및 호안정비공사(2차분) 기성검사원 접수 알림 ※ 섬발전지원과-3153(’25. 3. 21.)		‘25. 3. 21.	서영수 과장 정종기 팀장 김수현 주무관
○ 남면 심포마을 방파제 보강 및 호안정비공사(2차분) 기성검사공무원(1회) 지정 알림 ※ 회계과-13209(’25. 3. 24.)		‘25. 3. 24.	김종필 과장 정일권 팀장 이정란 주무관
○ 남면 심포마을 방파제 보강 및 호안정비공사(2차분) 기성검사조서(1회) 제출 ※ 섬발전지원과-3391(’25. 3. 28.)		‘25. 3. 28.	서영수 과장 정종기 팀장 김수현 주무관
○ 남면 심포마을 방파제 보강 및 호안정비공사(2차분) 기성대가 확정 알림(1회) ※ 회계과-148374(’25. 4. 1.)		‘25. 4. 1..	나병곤 국장 김종필 과장 정일권 팀장 이정란 주무관