정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	손죽항(지방어항) 시설공사
② 추진배경	태풍 및 해일 내습시 어항 피해발생을 예방하고 정온 수역 확보하여 어선의 대피장소 확보
③ 사업개요	○ 위 치: 삼산면 손죽길 7번지 인근 ○ 사 업 량: 방파제 연장 L=100m, 방파제 보강 L=57m, 등 ○ 사 업 비: 17,078백만원 ○ 사업기간: 총 괄 - 2022. 9. 26. ~ 2027. 9. 24.
④ 사업부서	여수시 섬발전지원과		⑤ 담당자	행정5급 문치곤 시설6급 정을룡
⑥ 선정기준	10억 원 이상 공사		⑦ 사업기간	’22. 1. ~’27. 12.
<그간 주요 추진내용>
○지방어항(손죽항)시설공사 (총괄 및 1차분)시행 ※ 섬자원개발과-4499(22. 4. 21.)		‘22. 4. 21.	권오봉 시장 박현식 부시장 김병완 국장 김태횡 과장 마동현 팀장 이민호 주무관
○지방어항(손죽항)시설공사 (총괄 및 1차분)계약 체결 ※ 회계과-43401(22. 9. 8.)		‘22. 9 8.	김지선 국장 한진숙 과장 여미향 주무관
○지방어항(손죽항)시설공사 해양환경영향조사용역 시행 ※섬발전지원과-1067(2023. 2. 6.)		‘23. 2. 6.	김종기 부시장 정재호 국장 김정오 과장 김용채 팀장 박가영 차장
○용역사업 집행계획 및 사업 수행능력평가서 제출 안내 공고 ※섬발전지원과-3433(2023. 4. 3.)		‘23. 4. 3.	김정오 과장 김용채 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)시설공사 해양 환경영향조사용역 입찰공고 ※회계과-22266(2023. 5. 17.)		‘23. 5. 17.	김정오 과장 김용채 팀장 박가영 차장

○지방어항(손죽항)시설공사 해향환경영향조사용역(총괄 및 1차분)착수계알림 ※ 섬발전지원과-6531(2023. 6. 19.)	‘23. 6. 9.	김정오 과장 김용채 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)시설공사 (2차분)시행 ※ 섬자원개발과-4499(22. 4. 21.)	‘23. 6. 19.	정기명 시장 김종기 부시장 정재호 국장 김정오 과장 김용채 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)시설공사(2차분) 계약체결 및 감독공무원 지정통보 ※회계과30498(2023. 6. 26.)	‘23. 6. 26.	김정오 과장 김용채 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)시설공사 건설폐기물처리용역 변경계약 의뢰	‘23. 7. 18.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)공유수면 상용 변경승인(면적변경) 알림 ※해양정책과-10318(2023. 8.25..)	‘23. 8. 25.	윤국한 과장 장내근 팀장 김채린 주무관
○지방어항(손죽항) 공사기성부분 검사원 신청 ※섬발전지원과-10722(2023. 9. 19.)	‘23. 9. 19.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)시설공사 사업 계획 변경 및 총사업비 조정 ※전라남도 섬해양정책과-(2023. 12. 6)	‘23. 12. 6.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)공사 설계변경 계약심사 결과 알림 ※전라남도 회계과-67486(2023. 12.26.)	‘23.12.26.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 시행 ※섬발전지원과-1257	‘24. 1. 29.	정기명 시장 김종기 부시장 정재호 국장 김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)공사 해양환경영향조사용역(2차분) 시행 ※섬발전지원과-1640	‘24. 2. 6.	정재호 국장 김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○ 지방어항(손죽항)공사(1, 2차분) 준공	‘24. 2. 16.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)공사 해양환경영향 조사용역(1차분) 준공 ※섬발전지원과-2227	‘24. 2. 23.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 품질시험계획 적정성 검토보고 ※섬발전지원과-2786	‘24. 3. 8.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 하도급계약 적정성 검토 ※섬발전지원과-3050	‘24. 3. 13.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 현장대리인 변경 검토보고 ※섬발전지원과-3440	‘24. 3. 25.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 실정보고에 따른 검토보고 ※섬발전지원과-5306	‘24. 5. 10.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)공사 해양환경영향조사 용역 참여기술자 변경 검토보고 ※섬발전지원과-6747	‘24. 5. 10.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)공사(총괄분 및 3차분) 실정보고에 따른 검토보고 ※섬발전지원과-7537	‘24. 7. 2.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 현장대리인 변경 검토보고 ※섬발전지원과-710	‘24. 7. 23.	김정오 과장 김 혁 팀장 박동훈 차장
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 계약금액 변경 검토보고 ※섬발전지원과-2781	‘24. 9. 6.	김정오 과장 김 혁 팀장 박동훈 차장
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 변경계약 체결 ※회계과-51658	‘24. 10. 2.	강행숙 과장 정일권 팀장 김대건 주무관
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 기성(개산급) 검사	‘24. 10. 15.	김 혁 팀장 박동훈 차장
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 하도급 계약 적정성 검토보고 ※섬발전지원과-4593	‘24. 10. 28.	김정오 과장 김 혁 팀장 박동훈 차장
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 하도급 현장대리인 변경 검토보고 ※섬발전지원과-5014	‘24. 11. 7.	김정오 과장 김 혁 팀장 박동훈 차장
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 실정보고에 따른 검토보고 ※섬발전지원과-5078	‘24. 11. 8.	김상태 국장 강행숙 회계과장 정일권 계약1팀장 김정오 과장 김 혁 팀장 박동훈 차장
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 변경계약 체결 ※회계과-61264	‘24. 11. 26.	강행숙 회계과장 정일권 계약1팀장 김대건 주무관
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 하도급 계약(변경) 적정성 검토보고 ※섬발전지원과-6218	‘24. 12. 9.	김정오 과장 김 혁 팀장 박동훈 차장
○지방어항(손죽항)공사 해양환경영향조사 결과보고 ※섬발전지원과-571	‘25. 1. 14.	서영수 과장 김 혁 팀장 박동훈 차장
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 기성(개산급 2회) 검사	‘25. 1. 22.	김 혁 팀장 박동훈 차장
○지방어항(손죽항) 해양환경영향조사용역 참여기술자 변경요청에 대한 검토보고 ※섬발전지원과-1660	‘25. 2. 12.	서영수 과장 김 혁 팀장 박동훈 차장
○지방어항(손죽항) 해양환경영향조사용역(2차분) 완료검사	‘25. 2. 24.	서영수 과장 김 혁 팀장 박동훈 차장
○지방어항(손죽항)시설공사 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토보고 ※섬발전지원과-3272	‘25. 3. 25.	정기명 시장 최정기 부시장 정덕영 국장 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 서영수 과장 김 혁 팀장 박동훈 차장
○지방어항(손죽항)시설공사 설계변경 계약심사 결과 알림 ※전라남도 회계과-15316	‘25. 3. 28.	강미선 회계과장 조준호 계약심사팀장 정동완 주무관
○지방어항(손죽항)시설공사(총괄 및 3차분) 설계변경 검토보고 ※섬발전지원과-4831	‘25. 5. 2.	정기명 시장 최정기 부시장 정덕영 국장 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 서영수 과장 김 혁 팀장 박동훈 차장
○지방어항(손죽항) 해양환경영향조사용역 3차분 시행 ※섬발전지원과-4434	‘25. 4. 22.	정덕영 국장 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 서영수 과장 김 혁 팀장 박동훈 차장
○지방어항(손죽항) 해양환경영향조사용역(3차분) 계약 및 감독공무원 지정 알림 ※회계과-20067	‘25. 4. 25.	나병곤 국장 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 이정란 주무관
○지방어항(손죽항) 시설공사 총괄 및 3차분 변경계약 체결 알림 ※회계과-24200	‘25. 5. 19.	나병곤 국장 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 이정란 주무관
○지방어항(손죽항)공사(3차분) 준공검사	‘25. 5. 28.	김 혁 팀장 박동훈 차장
○지방어항(손죽항)공사(4차분) 시행 ※섬발전지원과-6355	‘25. 6. 13.	정기명 시장 최정기 부시장 정덕영 국장 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 황예진 팀장 김 혁 팀장 박동훈 차장
○지방어항(손죽항)공사(4차분) 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※회계과-30262	‘25. 6. 17.	나병곤 국장 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 이정란 주무관
○지방어항(손죽항)공사(총괄 및4차분) 감독공무원 변경 알림 ※회계과-36069	‘25. 7. 14.	김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 이정란 주무관
○항만시설 사용허가 처리사항 통보[여수시청, 손죽항 시설공사 블록제작장 부지기간 연장] ※고흥군 해양개발과-491	‘25. 7. 18.	신대식 해양개발과장 박승영 어항시설팀장 유환욱 주무관
○지방어항(손죽항)시설공사(4차분) 하도급계약 검토 결과보고 ※섬발전지원과-8174	‘25. 7. 24.	서영수 섬발전지원과장 김 혁 어항시설팀장 조치민 차장
○지방어항(손죽항)시설공사(4차분) 하도급계약 검토 결과 알림 ※회계과-38367	‘25. 7. 25.	김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 이정란 주무관
○지방어항(손죽항) 시설공사 관련 지적현황 측량 의뢰 ※섬발전지원과-8512	‘25. 8. 2.	서영수 섬발전지원과장 김 혁 어항시설팀장 조치민 차장
○지방어항(손죽항) 시설공사(4차분) 관급자재 변경계약 체결 의뢰 ※섬발전지원과-8665	‘25. 8. 5.	서영수 섬발전지원과장 김 혁 어항시설팀장 조치민 차장
○지방어항(손죽항) 시설공사(4차분) 자재공급원(레미콘) 사전점검 결과 보고 ※섬발전지원과-9228	‘25. 8. 21.	서영수 섬발전지원과장 김 혁 어항시설팀장 조치민 차장
○지적측량 완료 및 수수료청구(지방어항(손죽항) 시설공사) ※한국국토정보공사 여수지사-3052	‘25. 8. 26.	정종대 지사장 김종우 주임
○지방어항(손죽항) 시설공사(4차분) 관급자재(해수소통구블록) 변경계약 체결 의뢰 ※섬발전지원과-9605	‘25. 9. 2.	서영수 섬발전지원과장 김 혁 어항시설팀장 조치민 차장
○지방어항(손죽항) 시설공사(4차분) 관급자재(소파블록) 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※회계과-44898	‘25. 9. 9.	김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 박유림 주무관
○지방어항(손죽항) 시설공사(4차분) 소파블록(관급자재) 선금 지급 결정 알림 ※회계과-44898	‘25. 9. 15.	김종필 회계과장 김기현 계약2팀장 박유림 주무관
○지방어항(손죽항) 시설공사(4차분) 기성검사공무원 지정 알림 ※회계과-46990	‘25. 9. 22.	김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 이정란 주무관
○지방어항(손죽항) 시설공사(4차분) 기성대가(1회) 확정 알림 ※회계과-48004	‘25. 9. 26.	나병곤 국장 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 이정란 주무관
○지방어항(손죽항) 시설공사(4차분) 소파블록(관급자재) 공장 점검 결과 보고 ※섬발전지원과-10799	‘25. 9. 30.	서영수 섬발전지원과장 김 혁 어항시설팀장 조치민 차장
○지방어항(손죽항) 시설공사(4차분) 내 ‘이대원장군 광장 조성’ 관련 검토보고 요청 ※섬발전지원과-11219	‘25. 10. 17.	서영수 섬발전지원과장 김 혁 어항시설팀장 조치민 차장
○지방어항(손죽항) 시설공사(4차분) 기성(2회)검사 ※섬발전지원과-13758	‘25. 12. 17.	김 혁 어항시설팀장 조치민 차장
○지방어항(손죽항) 시설공사(총괄 및 4차분) 감독공무원 변경 알림 ※회계과-1926	‘26. 1. 14.	이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 김대건 주무관
○지방어항(손죽항) 시설공사(4차분) 품질관리자 변경 신고에 따른 검토 보고 ※섬발전지원과-645	‘26. 1. 19.	문치곤 섬발전지원과장 고영란 어항시설팀장 정을룡 차장
○지방어항(손죽항) 시설공사 해양환경영향조사 결과보고서(2025년) 제출 ※섬발전지원과-927	‘26. 1. 25.	문치곤 섬발전지원과장 고영란 어항시설팀장 정을룡 차장
○지방어항(손죽항) 시설공사 항만시설 사용허가 연장 신청 ※섬발전지원과-1570	‘26. 2. 6.	문치곤 섬발전지원과장 고영란 어항시설팀장 정을룡 차장
○지방어항(손죽항) 시설공사(4차분) 기성대가(3회) 확정 알림 ※회계과-6061	‘26. 2. 9.	박형열 행정안전국장 이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 김대건 주무관
○지방어항(손죽항) 시설공사(4차분) 하도급 계약 적정성 검토 보고 ※섬발전지원과-2695	‘26. 3. 11.	문치곤 섬발전지원과장 고영란 어항시설팀장 정을룡 차장
○지방어항(손죽항) 시설공사 해양환경영향조사용역(4차분) 시행 ※섬발전지원과-4540	‘26. 4. 21.	정덕영 해양수산국장 문치곤 섬발전지원과장 고영란 어항시설팀장 정을룡 차장
○지방어항(손죽항) 시설공사 해양환경영향조사용역(4차분) 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※회계과-19435	‘26. 4. 23.	이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 김대건 주무관
○지방어항(손죽항) 시설공사 5차분 시행 및 총괄분 공사기간 연장 검토 보고 ※섬발전지원과-5036	‘26. 5. 6.	정기명 시장 정현구 부시장 정덕영 해양수산국장 문치곤 섬발전지원과장 고영란 어항시설팀장 정을룡 차장
○지방어항(손죽항) 시설공사 해양환경영향조사용역(3차분) 준공검사 ※섬발전지원과-5118	‘26. 5. 7.	고영란 어항시설팀장 정을룡 차장
○지방어항(손죽항) 시설공사(총괄분) 변경계약 체결 알림 ※회계과-22706	‘26. 5. 12.	이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 김대건 주무관
○지방어항(손죽항) 시설공사(5차분) 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※회계과-24087	‘26. 5. 19.	이수남 회계과장 김기현 계약1팀장 김대건 주무관
○지방어항(손죽항) 시설공사 물가변동에 의한 계약금액 조정(4회) 검토 보고 ※섬발전지원과-6213	‘26. 6. 2.	정현구 부시장 정덕영 해양수산국장 문치곤 섬발전지원과장 고영란 어항시설팀장 정을룡 차장
○지방어항(손죽항) 시설공사(5차분) 하도급 계약 적정성 검토 보고 ※섬발전지원과-6419	‘26. 6. 8.	문치곤 섬발전지원과장 고영란 어항시설팀장 정을룡 차장
○지방어항(손죽항) 시설공사(4차분) 준공검사 ※섬발전지원과-6640	‘26. 6. 11.	고영란 어항시설팀장 정을룡 차장